АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

                                                   

РЕШЕНИЕ

Дело №А76-3490/2017

07 июля 2017 года

г. Челябинск

Резолютивная часть  решения объявлена 30 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 07 июля 2017 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Востокхимзащита-1», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, о взыскании 482 078 руб. 17 коп., при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО2, удостоверение, доверенность от 16.01.2017; представителя ответчика – ФИО3 паспорт, доверенность от 20.06.2017.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Востокхимзащита-1», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, (далее – истец, ООО «Востокхимзащита-1») 15.02.2017 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, (далее – ответчик, ООО «Мечел-Кокс») о взыскании основного долга по договору подряда №419у/16 в размере 475 189 руб. 54 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6 888 руб. 63 коп.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 07.03.2017 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства (л. д. 1-2).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 05.05.2017 суд перешел к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового судопроизводства (л. д. 115-116).

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме, обратился с ходатайством о частичном отказе от иска в части требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6 888 руб. 63 коп.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, мотивированных возражений в отношении суммы основного долга не завил (л. д. 104).

Заслушав представителей сторон, рассмотрев и оценив представленные письменные доказательства, арбитражный суд приходит к выводу о том, что производство по делу по исковому заявлению ООО «Востокхимзащита-1» к ООО «Мечел-Кокс» в части требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6 888 руб. 63 коп. подлежит прекращению в связи со следующим.

Частью 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истцу предоставлено право до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Полномочия представителя истца, заявившего ходатайство о частичном отказе от исковых требований, подтверждены доверенностью от 16.01.2017 (л. д. 120).

Заявленный отказ истца от исковых требований (его части) не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц, поэтому принимается арбитражным судом в соответствии с ч. 5 ст. 49 АПК РФ. 

Последствия отказа от исковых требований (его части), предусмотренные ст. 151 АПК РФ, истцу известны.

Следовательно, производство по делу по исковому заявлению ООО «Востокхимзащита-1» к ООО «Мечел-Кокс» в части требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6 888 руб. 63 коп. подлежит прекращению на основании п. 4 ч.1 ст. 150 АПК РФ.

Следовательно, судом подлежат рассмотрению по существу исковые требования ООО «Востокхимзащита-1» к ООО «Мечел-Кокс» о взыскании основного долга по договору подряда №419у/16 в размере 475 189 руб. 54 коп.

Исследовав и оценив представленные доказательства в соответствии со ст.71 АПК РФ, арбитражный суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 05.08.2016 между истцом (подрядчик), ответчиком (заказчик) заключен договор подряда №419у/16 (далее – договор), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в приложениях к договору, в соответствии с условиями настоящего договора, заданиями заказчика, планами-графиками работ и расчетами (протоколами) договорных цен, обеспечить качество работ в соответствии с установленными нормами и правилами, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результаты работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену (п.1.1 договора) (л. д. 11-17).

В соответствии с п.1.2. договора если иное не установлено соглашением сторон либо сметами, подрядчик выполняет работы своим инструментом из материалов заказчика. Ответственность за целостность и сохранность переданных подрядчику материалов подрядчик несёт до момента сдачи выполненных работ заказчику.

При этом, если работы выполняются из материалов заказчика, подрядчик принимает материалы у заказчика на .основании подписанного обеими сторонами документа, подтверждающего передачу подрядчику материалов для выполнения работ (акт, накладная и т.п.). Полученные от заказчика материалы подрядчик имеет право использовать только для выполнения работ, указанных в приложении (смете). Материалы, оставшиеся у подрядчика после выполнения работ, подлежат возврату заказчику одновременно с подписанием акта приемки выполненных работ.

Согласно п. 3.1. договора работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются подрядчиком в сроки, предусмотренные приложениями к данному договору, которые являются его неотъемлемой частью.

В соответствии с п.3.2. договора работы по настоящему договору выполняются подрядчиком и принимаются заказчиком поэтапно по результатам отчетного периода, если иное не предусмотрено приложением. Отчетным периодом признается календарный месяц, в котором подрядчик выполнял работы. При этом стороны договорились, что этапом работ, выполненных в рамках настоящего договора, является выполненный подрядчиком и принятый заказчиком объем работ за отчетный период.

Пунктом 3.3. договора предусмотрено, что изменение сроков начала и окончания выполнения работ оформляется дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными представителями сторон.

Согласно п. 4.1.договора стоимость работ по договору определяется в текущих ценах, выраженных в рублевом эквиваленте. Цена работ по объектам устанавливается в приложениях к настоящему договору.

Согласно п.4.2. договора расчеты осуществляются после выставления подрядчиком счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного обеими сторонами. Оплата работ производится не позднее трех месяцев с момента получения заказчиком вышеуказанных документов.

Согласно п.4.3. договора датой оплаты поставляемой продукции (товара) является: при расчетах платежными-поручениями - дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, при расчетах векселями - дата подписания акта приема-передачи векселей.

В соответствии с п.4.4. договора по соглашению сторон обязательство может быть прекращено зачетом взаимных требований.

Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон, оформленным двусторонним соглашением, подписанным уполномоченными на то лицами (п.4.5. договора).

Сторонами подписаны приложения к договору (л. д. 27-28).

В качестве подтверждения факта выполнения работ по договору на общую сумму 475 189 руб. 54 коп., истец представил в материалы дела акты о приемке выполненных работ: №129 от 26.08.2016 на сумму 175 820 руб. 00 коп., №130 от 29.08.2016 на сумму 299 369 руб. 54 коп. (л. д. 36-41). Акты подписаны сторонами без замечаний.

Для оплаты выполненных работ истец выставил ответчику счета-фактуры №129 от 26.08.2016 на сумму 175 820 руб. 00 коп., №130 от 29.08.2016 на сумму 299 369 руб. 54 коп. (л. д. 34-35).

Согласно расчету истца, общая сумма задолженности по оплате выполненных работ составила 475 189 руб. 54 коп.

12.12.2016 истец направил ответчику претензию №01-395 с требованием об оплате задолженности за выполненные работы (л.д.42). Указанная претензия получена ответчиком 19.12.2016, что подтверждается отметкой о получении на почтовом уведомлении (л. д. 44-45).

Поскольку ответчиком в полном объеме не произведена оплата выполненных работ по договору, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности в сумме 475 189 руб. 54 коп.

Судом установлено, что между сторонами заключен договор подряда и возникли правоотношения по договору подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Поскольку в условиях договора речь идет об общестроительных работах, заключенный сторонами договор квалифицируется судом как договор строительного подряда.

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. 

Важным моментом в договоре подряда является приемка выполненных работ, цель которой - проверить качество работ.

Приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами, то есть надлежащим доказательством выполнения работ является названный документ. Исходя из назначения указанного документа, акт выполненных работ должен отражать сведения о содержании выполненных работ, их объеме.

Судом установлено, что истец выполнил принятые на себя обязательства по договору в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ: №129 от 26.08.2016 на сумму 175 820 руб. 00 коп., №130 от 29.08.2016 на сумму 299 369 руб. 54 коп. (л. д. 36-41). 

Акты подписаны заказчиком без замечаний, что свидетельствует о том, что работы истцом выполнены и приняты заказчиком. 

Подписание данных документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика свидетельствуют о выполнении работ истцом, принятии их результата ответчиком, а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего им воспользоваться.

В силу п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 названного Кодекса.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (п. 1 ст. 711 ГК РФ).

В силу статей 307, 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, одностороннее изменение условий обязательства и односторонний отказ от его исполнения не допускаются.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Таким образом, в силу положений статьей 711 ГК РФ основанием для возникновения у подрядчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Мотивированных возражений в отношении суммы основного долга ответчик при рассмотрении настоящего дела не заявил.

Ответчик не представил в материалы дела доказательств об исполнении принятых обязательств по оплате выполненных работ.

Требования истца основаны на законе и подтверждены материалами дела. Таким образом, задолженность за выполненные работы в сумме 475 189 руб. 54 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования истца являются обоснованными, подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение настоящего дела, составляет 12 503 руб. 79 коп.

При обращении истца с настоящим исковым заявлением им была уплачена государственная пошлина в размере 12 503 руб. 79 коп., что подтверждается платежным поручением №1100 от 27.02.2017 (л.д.6).

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 503 руб. 79 коп. подлежат отнесению на ответчика и взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Востокхимзащита-1», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск от исковых требований к  обществу с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в части требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6 888 руб. 63 коп.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Востокхимзащита-1», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Востокхимзащита-1», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, основной долг в размере 475 189 руб. 54 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 503 руб. 79 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья                                                                          Е.А. Мосягина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru