1453/2023-42659(5) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 08 февраля 2023 года 

по делу А33-1521/2021 Красноярск 

08 февраля 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования Департамента городского хозяйства администрации города  Красноярска (ИНН 

<

***>, ОГН 1022402670025) г. Красноярск, удовлетворить.  

Урегулировать разногласия, возникшие в ходе заключения городским округом город  Красноярск от имени которого выступает Администрация города Красноярска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Сосны» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Красноярск,  соглашения № 1 об исполнении схемы теплоснабжения городского округа город Красноярск,  изложив спорные пункты соглашения следующим образом:  

- пункт 1.2 соглашения изложить в редакции истца: «В рамках настоящего Соглашения  Единая теплоснабжающая организация обязуется выполнять мероприятия по строительству,  реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в соответствии со Схемой  теплоснабжения»;  

- пункт 1.3 соглашения изложить в редакции истца: «В рамках Соглашения Орган  местного самоуправления обязан осуществить контроль за исполнением единой  теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)  модернизации объектов теплоснабжения»;  

- пункт 1.5 соглашения изложить в редакции истца: «Если не указано иное, действие  Соглашения распространяется исключительно на деятельность Единой теплоснабжающей  организации в ее зоне деятельности, определенной в Схеме теплоснабжения»;  

- пункт 2.1.2 соглашения изложить в редакции истца: «выполнять мероприятия по  строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, в  соответствии с перечнем и в сроки, указанные в Схеме теплоснабжения»;  

- пункт 2.1.3 соглашения изложить в редакции истца: «Обеспечить поступление денежных  средств, достаточных для выполнения мероприятий по строительству и (или) модернизации  объектов теплоснабжения, предусмотренных Схемой теплоснабжения, в объеме и сроки в  соответствии с п. 1.2»;  

- пункт 2.1.4 соглашения изложить в редакции истца: «нести ответственность за  невыполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных Соглашением, и  наступившие в связи с этим последствия, в том числе ответственность за невыполнение  мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов  теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической  эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в Схеме теплоснабжения в  соответствии с разделом 5 Соглашения»;  

- пункт 2.1.5 соглашения изложить в редакции истца: «предоставить обеспечение  исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения»;  

- пункт 2.1.6 соглашения изложить в редакции истца: «участвовать в распределении  имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты  системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения»;  

- пункт 2.1.7 соглашения изложить в редакции истца: «ежегодно публиковать отчетную  информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством  Российской Федерации»;  

- пункт 2.1.15 соглашения изложить в редакции истца: «предоставлять Органу местного  самоуправления информацию о ходе выполнения мероприятий по строительству,  реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, условий соглашения,  предусмотренных в п.2.1.1., 2.1.2. Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня  поступления запроса»;  

- пункт 2.3.1 соглашения изложить в редакции истца: «участвовать в распределении  имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты  системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения»;  

- пункт 2.3.5 соглашения изложить в редакции истца: «обеспечить в рамках полномочий  органа местного самоуправления условия для надлежащего исполнения Единой  теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)  модернизации объектов теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения»;  

- пункт 2.4.2 соглашения изложить в редакции истца: «ежегодно осуществлять  муниципальный контроль за выполнением Единой теплоснабжающей организацией  мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов  теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической  эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в Схеме теплоснабжения, в  порядке, предусмотренном Законом о теплоснабжении»;  

- пункт 2.4.3 соглашения изложить в редакции истца: «осуществлять строительный  контроль при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) модернизации  объектов теплоснабжения, являющихся объектами муниципальной собственности в случаях,  предусмотренных Положением о проведении строительного контроля при осуществлении  строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства,  утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468»;  

- раздел 3 соглашения изложить в редакции истца: «Распределение имущественных прав  на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы  теплоснабжения»:  

3.1. Стороны пришли к соглашению о распределении имущественных прав на строящиеся,  реконструируемые и (или) модернизируемые объекты теплоснабжения в следующем порядке:  

3.1.1. Право собственности на вновь созданные (построенные) объекты теплоснабжения  устанавливается в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства;  

В случае заключения концессионного соглашения, право собственности на созданные  (реконструируемые) по концессионному соглашению объекты теплоснабжения определяется в  соответствии с его условиями.  

3.1.2. Право собственности на реконструируемые и (или) модернизируемые объекты  теплоснабжения сохраняется за стороной, являвшейся собственником реконструированного и  (или) модернизированного объекта вне зависимости от источника средств, за счет которых  осуществлялась реконструкция и (или) модернизация объекта, если иное распределение прав  собственности на объект после его реконструкции и (или) модернизации не определено  отдельным соглашением сторон.  

- раздел 4 соглашения изложить в редакции истца: «Обеспечение исполнения  обязательств по Соглашению»:  

4.1. Единая теплоснабжающая организация обязана предоставить обеспечение исполнения  своих обязательств по Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская  

гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям  действующего законодательства.  

4.2. Банковская гарантия предоставляется Единой теплоснабжающей организацией  Органу местного самоуправления на первый календарный год действия Соглашения и на  каждый последующий календарный год действия Соглашения на сумму, равную 25 (двадцать  пять) процентов от объема инвестиционных обязательств Единой теплоснабжающей  организации на период, соответствующий году действия банковской гарантии. Под объемом  инвестиционных обязательств Единой теплоснабжающей организации понимается стоимость  мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов  теплоснабжения, завершение выполнения которых предусмотрено в период, соответствующий  году действия банковской гарантии, в соответствии с утвержденной в установленном  

порядке схемой теплоснабжения города-Красноярска в редакции, действующей на  дату предоставления банковской гарантии.  

Банковская гарантия на первый год действия Соглашения вступает в силу не позднее, чем  через 30 календарных дней с момента вступления в силу Соглашения и действует до 31  декабря. Банковская гарантия на последующий календарный год действия Соглашения  предоставляется Единой теплоснабжающей организацией Органу местного самоуправления не  позднее 25 декабря года, предшествующего году предоставления очередной банковской  гарантии.  

4.3. В случае внесения изменения в законодательство Российской Федерации,  регулирующее размер и сроки банковской гарантии для соглашений об исполнении схемы  теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения, условия банковской гарантии Соглашения  подлежат изменению в соответствии с вступившими в силу требованиями соответствующих  нормативных правовых актов.  

Орган местного самоуправления вправе предъявить требование об уплате денежной  суммы банковской гарантии только в случае, если Единой теплоснабжающей организацией  допущено существенное нарушение сроков и объемов исполнения обязательств.  

4.4. Под существенным нарушением для целей соглашения понимается нарушение более  чем на 3 (три) месяца сроков выполнения мероприятий, определенных утвержденной в  установленном порядке схемой теплоснабжения города Красноярска в редакции,  действующей на дату предъявления Органом местного самоуправления требования об уплате  денежной суммы банковской гарантии, при условии, что суммарная стоимость мероприятий,  сроки выполнения которых нарушены на момент предъявления требования, превышает 20  (двадцать) процентов от суммарной стоимости мероприятий, завершение выполнения которых  Единой теплоснабжающих организацией в соответствии с утвержденной в установленном  порядке схемой теплоснабжения города Красноярска в редакции, действующей на дату  предъявления требования об уплате суммы банковской гарантии, предусмотрено в период,  соответствующий периоду действия банковской гарантии.  

4.5. Орган местного самоуправления не вправе предъявлять требование об уплате  денежной суммы в случае уменьшения размера инвестиционных обязательств Единой  теплоснабжающей организации в связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных п.  2.1.10.5. Соглашения, до внесения в установленном порядке соответствующих изменений в  схему теплоснабжения города Красноярска.  

- пункт 5.2 соглашения изложить в редакции истца: «Единая теплоснабжающая  организация несет ответственность за невыполнение мероприятий по строительству,  реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,  повышения надежности или энергетической эффективности системы теплоснабжения и  определенных для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с Законом о теплоснабжении и  иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения»;  

- пункт 5.3 соглашения изложить в редакции истца: «В случае нарушения Единой  теплоснабжающей организацией требований по обеспечению достижения целевых  показателей Схемы теплоснабжения в зоне деятельности Единой теплоснабжающей  организации, по выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и (или)  

модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, Орган  местного самоуправления направляет Единой теплоснабжающей организации в письменной  форме требование об устранении обнаруженного нарушения с указанием пункта Соглашения  и (или) документа, требования которых нарушены. Единая теплоснабжающая организация  обязана в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования представить  в Орган местного самоуправления пояснения по факту указанного в требовании нарушения с  указанием сроков его устранения или направить в Орган местного самоуправления  мотивированные пояснения об отсутствии нарушений со стороны Единой теплоснабжающей  организации. Сроки устранения нарушений, представленные Единой теплоснабжающей  организацией, подлежат согласованию со стороны Органа местного самоуправления»;  

- пункт 5.4 соглашения изложить в редакции истца: «Сторона, не исполнившая или  исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением,  несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств  оказалось невозможным вследствие наступления обязательств непреодолимой силы»;  

- пункт 8.2 соглашения изложить в редакции истца: «настоящее соглашение заключено на  срок – до 31.12.2032 года. Стороны по окончании указанного срока вправе подписать  дополнительное соглашение о продлении срока действия Соглашения или заключить новое  соглашение. Окончание срока действия Соглашения не влечет прекращение обязательств  сторон по Соглашению, возникших в период его действия и неисполненных до окончания  срока действия Соглашения. В случае прекращения действия Соглашения его положения  сохраняют свои силу для обязательств, возникших на его основе и не исполненных сторонами  в период его действия, до надлежащего исполнения обязательств сторон по Соглашению».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «Сосны» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Красноярск, в доход федерального  бюджета 6 000 руб. – государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в  течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Л.В. Мельникова