АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ул. Железнодорожная, д. 14, 

<

...> Тел. 

<

***> Факс 

<

***> E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru www.ulyanovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А72-7706/2025

г. Ульяновск

15 сентября 2025г.

Резолютивная часть решения принята 04 сентября 2025г. 

Мотивированное решение изготовлено 15 сентября 2025г.  

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Слепенковой О.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  

Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Акционерному обществу «Тепличное» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 57 660 руб. 56 коп. 

в отсутствие сторон, извещенных о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в том числе публично, путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Ульяновской области: www.ulyanovsk.arbitr.ru,  

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Волга» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Акционерному обществу «Тепличное» о взыскании договорной неустойки в размере 57 660 руб. 56 коп.  

Определением от 07.07.2025 исковое заявление оставлено без движения. 

Определением суда от 16.07.2025 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

04.09.2025 по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного судопроизводства судом принята резолютивная часть решения. Исковые требования удовлетворены.  

08.09.2025 посредством web-сервиса «Мой Арбитр» в суд от истца поступило ходатайство о составлении мотивированного решения.  

В порядке ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение, которое изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.  

В связи с чем, суд считает необходимым изготовить мотивированное решение по делу.  

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.  

При этом суд исходит из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, 11.12.2014 между истцом (Сетевая организация) и ответчиком (Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт) № 1491-001208, согласно которого Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения вновь сооружаемых (реконструируемых) в процессе технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Заявителя (далее – технологическое присоединение) расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 

<

...> со следующими характеристиками:  

-максимальная установленная мощность генерирующего оборудования 6,4 МВт (без выдачи мощности в сеть Сетевой организации);  

-класс напряжения в точках присоединения 10 кВ, 

-точки присоединения - две существующие точки присоединения: опора № 46 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110/10 кВ «Тепличная» и опора № 104 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Отрада» (кольцуется с ВЛ -10 кВ № 15,16 ПС 110/10 кВ Тепличная)  

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению объектов по производству электрической энергии Заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства).  

Согласно п. 1.2 договора, Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (далее - ТУ) (приложение 1 к настоящему Договору).  

Согласно п. 1.3 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему Договору со стороны Заявителя и Сетевой организации составляет не более 4 лет с даты заключения Договора.  

Согласно п. 2.3 указанного договора заявитель обязан надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению, по оплате расходов на технологическое присоединение, и уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.  

Согласно п. 2.3.2 договора, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в технических условиях (ТУ), направить в адрес сетевой организации уведомление об исполнении ТУ со стороны заявителя способом, подтверждающим отправку и получение уведомления (п.2.3.5).  

Согласно разделу 3 договора, размер платы за технологическое присоединение  

установлен Приказом Министерства экономики Ульяновской области № 06-423 от 28 октября 2014 г. по индивидуальному проекту и составляет 32 963 руб. 13 коп., НДС составляет 5 933 рубля 36 копеек.  

Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, Заявитель перечисляет Сетевой организации платеж в размере 100 % платы за технологическое присоединение. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов, на I. технологическое присоединение считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.  

Мероприятия по технологическому присоединению, обязанность выполнения  

которых возложена на заявителя, перечислены в п. 1.1, 1.2 Технических условий. 

Согласно пункту 1.1. технических условий (приложение к Договору), являющихся  

неотъемлемой частью договора, ответчик обязался осуществить;  

- монтаж четырех генераторов (2x1.2 МВт, 2x2МВт) и двух секций шин 10 кВ,  

укомплектованных выключателями; 

- монтаж кабельной линии 10 кВ от существующей 1 СШ ЗРУ 10 кВ № 1 Заявителя до  

вновь построенной 1 СШ ЗРУ 10 кВ № 2. 

17.04.2019 стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к договору № 1491-001208 от 11.12.2014г. в котором внесли изменения:  

Пункт 1.1 договора, дефис третий изложить в следующей редакции: 

«- точки присоединения, - две существующие точки присоединения: опора № 46 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110/10 кВ Тепличная без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «МРСК Волги» и опора № 104 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Отрада (кольцуется с ВЛ -10 кВ № 15,Гб ПС 110/10 кВ Тепличная) без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «МРСК Волги».  

Руководствуясь изменениями в ч.3 ст. 164 НК РФ в части установления налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) в размере 20 процентов с 01.01.2019 г. согласно ст.5 Федерального закона от 03.08.18г. № 303-Ф3, Стороны договорились внести в п. 3.1. Договора изменения, изложив его в следующей редакции:  

«3.1. Размер платы за технологическое присоединение установлен Приказам Министерства экономики Ульяновской - области № 06-423 от 28 октября .2014 г.; !по индивидуальному проекту и составляет 32 963 (тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек без НДС. НДС составляет 6 592 (шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля 63. копенки. Итого 39 555 (тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 76 копеек.»  

До 01.01.2019г. по Договору Заявителем был произведен 100% авансовые платеж в размере 38 896 (тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 49 копеек, в т.ч. НДС-18 %, 5 933 (пять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 36. копеек,  

В связи с изменением с 01.01.2019 г. процентной ставки НДС с 18 % на 20 %, доплата НДС в размере 2-х процентов составляет: 659 (Шестьсот пятьдесят девять) рублей 27 копеек.  

02.12.2020 стороны подписали дополнительное соглашение № 2 к договору № 1491-001208 от 11.12.2014г. в котором, в том числе, согласовали условие о продлении срока действия технических условий до 11.12.2020г.  

22.06.2021 стороны подписали дополнительное соглашение № 3 к договору 1491-001208 от 11.12.2014г. в котором, в том числе, согласовали условие о продлении срока действия технических условий до 01.08.2021г.  

27.01.2022 стороны подписали дополнительное соглашение № 4 к договору 1491-001208 от 11.12.2014г.в котором, в том числе, согласовали условие о продлении срока действия технических условий до 25.06.2022г.  

07.02.2023 стороны подписали дополнительное соглашение № 5 к договору № 1491-001208 от 11.12.2014г. в котором, в том числе, согласовали условие о продлении срока действия технических условий до 01.05.2023г.  

Истец указывает, что ответчик свои обязательства по договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению не выполнил до настоящего времени (за исключением обязательства по внесению платы за технологическое присоединение), в связи с чем возникла просрочка исполнения обязательств.  

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия, которая оставлена без ответа.  

Несвоевременное выполнение мероприятий по технологическому присоединению явилось основанием для обращения истца в суд с требованием о взыскании неустойки.  

Согласно расчету истца за ответчиком числится неустойка за период с 12.05.2022 по 12.05.2025 в размере 57 660 руб. 56 коп.  

Согласно п.1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

Согласно пункту 24 Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 срок действия технических условий не может составлять менее двух лет и более шести лет.  

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия.  

Истец указывает, что в отношении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нормы Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и принятых в соответствии с этим законом Правил, не предусматривают ни обязательного установления в нем срока его действия, ни предельного срока, на который может быть заключен этот договор, а также не содержат  

положений, согласно которым истечение срока действия данного договора приводит к прекращению возникших из него обязательств.  

Таким образом, исполнение со стороны сетевой организации своих обязательств перед заявителем по договору об оказании услуг по технологическому присоединению в любом случае продолжается, а дальнейшие действия сторон договора по исполнению ТУ приравниваются к конклюдентным действиям, подтверждающим действительность и актуальность.  

В соответствии с п.16.6 Правил технологического присоединения, срок осуществления мероприятий, по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:  

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;  

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;  

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;  

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.  

Истец указывает, что ответчик мероприятия по технологическому присоединению не выполнил.  

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  

Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 330 ГК РФ).  

Согласно п. 4.2 договора, в случае нарушения одной из сторон сроков, исполнения своих обязательств (мероприятий, графика платежей) такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору, за каждый день  

просрочки. 

Истец указывает, что срок мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 4 лет со дня заключения договора, т.е. до 12.12.2018.  

Суд проверил расчет истца и признал его неверным, поскольку он выполнен без учета моратория, действовавшего в 2022 году в отношении задолженности, возникшей до его введения.  

Согласно пункту 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах), Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.  

Целью введения моратория, предусмотренного статьей 9.1 Закона о банкротстве, является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам.  

 На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1 , абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).  

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).  

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 вступило в силу со дня его официального опубликования и действует в течение шести месяцев (с 01.04.2022 до 01.10.2022).  

Таким образом, в период действия указанного моратория финансовые санкции начислению не подлежат.  

Освобождение от ответственности направлено на уменьшение финансового бремени на должника в тот период его просрочки, когда она усугубляется объективными, непредвиденными и экстраординарными обстоятельствами.  

Суд исходит из того, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по  

технологическому присоединению должны быть выполнены в установленные договором  

сроки. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в силу  

пункта 16 Правил № 861 является существенным условием договора.  

Как усматривается из материалов дела, сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению сторонами не менялись.  

Учитывая изложенное, исковые требования в части взыскания пеней подлежат частичному удовлетворению за период с 02.10.2022 по 12.05.2025 в размере 50 189 руб. 14 коп.  

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ следует возложить на ответчика с учетом частичного удовлетворения исковых требований.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 177, 180-182, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с Акционерного общества «Тепличное» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 

-50 189 руб. 14 коп. –неустойка за период с 02.10.2022 по 12.05.2025 -8 704 руб. 00 коп. – в возмещение расходов по госпошлине.  

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.  

Возвратить Публичному акционерному обществу «Россети Волга» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в сумме 50 946  

руб. 00 коп. Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его  

принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд  

в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия. 

Судья О.А. Слепенкова 

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи 449693