И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

 г. Москва                                                                               Дело № А40-107006/23-151-856

06.09.2023 года                                                                             

Резолютивная часть решения объявлена 18.08.2023

Решение в полном объеме изготовлено 06.09.2023

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «ИНЖСТРОЙСИТИ» (ОГРН: 1155047013846)

к ответчику: ООО «МАГНУМ» (ОГРН: 1027708019130)

о взыскании 887 996 руб. 01 коп

при участии

от истца: Смольская Е.А. по доверенности от 01.09.2022

от ответчика: представитель не явился

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности в размере 859 045 руб. 19 коп., неустойки в размере 28 949 руб. 82 коп.  

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Надлежащим образом извещенный представитель ответчика в судебное заседание не явился, в порядке ст. 156 АПК РФ, суд считает возможным провести судебное заседание в его отсутствие.  

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Между ООО «ИнжСтройСити» (Истец, Подрядчик) и ООО «МАГНУМ» (Ответчик, Заказчик) 25 января 2021 года был заключён договор подряда № 25/01/21. (далее - Договор подряда). В соответствии с и. 2.1. Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по устройству кровли на объект Заказчика, благоустройство территории: Московская обл., Одинцовский район, 39-й км Минского шоссе.

Цена договора, в соответствии с п. 3.1 составляет 873 381, 40 руб., на основании Локальной сметы (приложение № 1 к Договору подряда), окончательная цена формируется на основании подписанных КС-2, КС-3.

Срок выполнения работ с 25.01.2021г. по 31.03.2021 г.

Дополнительным соглашением №1 от 02.08.2021 г. к Договору подряда были изменены сроки окончания работ до 10 января 2022 года и подписана новая локальная смета, согласно которой стоимость работ была уменьшена и составила 811 476, 50 руб.

Согласно п. 4.1.1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 436 690,70 руб.

Оплата фактически выполненных работ Подрядчиком производится Заказчиком в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами Актов о приемки выполненных работ КС-2, без замечаний и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, за вычетом ранее предоставленного аванса (4.12 Договора).

20.12.2021г. к Договору подряда Сторонами было заключено дополнительные соглашение № 2 (далее - Дополнительное соглашение №2) на дополнительные работы по договору согласно Локальным сметным расчетам (приложение № 1 к дополнительному соглашению).

Стоимость дополнительных работ в соответствии с п. 2 составила 484 260, руб. оплата фактически выполненных работ производится Подрядчиком течении (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Актов о приемки выполненных работ КС-2, без замечаний за отчетный период и Справок о стоимости выполненных раб и затрат КС-3 (пункт 3)

Сроки дополнительных работ с 20.12.2021 г. по 10.01.2022 г.

Во исполнение условий Договора Ответчик 29.01.2021г. произвел оплату авансового платежа на расчётный счет Истца в размере 436 690,70 коп., ч подтверждается платежным поручением № 504 от 29.01.2021 г.

ООО «ИнжСтройСити» выполнил взятые на себя обязательства по выполненных подрядных работ в полном объеме.

Факт выполнения работ подтверждается следующими документами:

По основному Договору подряда - Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 19.05.22 г. за отчетный период с 02.08.2021 по 10.01.22 г., подписанный Заказчиком без замечаний.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 19.05.22 г. отчетный период с 02.08.2021 по 10.01.22 г.

На общую сумму 811 476, 50 руб.

По Дополнительному соглашению № 2 к Договору подряда

Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 2 от 19.05.22 г. за отчетный период с 20.12.2021 по 10.01.22 г., подписанный Заказчиком без замечаний.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 19.05.22 г. отчетный период с 20.12.2021 по 10.01.22 г.

На общую сумму 484 260,39 руб.

По условиям Договора подряда и Дополнительного соглашения №2 ср окончательный оплаты за фактически выполненные Истцом работы у Ответчика наступил 03 июня 2022 г. (10 банковских/рабочих дней с момента подписания КС-2 и КС-3).

Стоимость выполненных ООО «ИнжСтройСити» и принятых ООО «МАНГУМ» работ по договору подряда составила 1 295 736, 89 руб.

Сумма авансового платежа, полученная Истцом по договору - 436 690,70 Задолженность ООО «МАГНУМ» в пользу ООО «ИнжСтройСити фактически выполненные работы составляет 859 046 (восемьсот пятьдесят де тысяч сорок шесть) рублей 19 копеек.

Истцом произведен расчет неустойки за период с 03.06.2022 по 05.05.2023 в размере 28 949 руб. 82 коп. 

Удовлетворяя требования, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753, 779, 781  Гражданского кодекса, а также учитывает следующее. 

Совокупность надлежащих, относимых и допустимых доказательств подтверждает обоснованность позиции истца по требованиям основного долга в размере 859 045 руб. 19 коп. 

Рассмотрев расчет неустойки, суд признает его методологически и арифметически верным. 

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании статей 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753, 779, 781  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «МАГНУМ» (ОГРН: 1027708019130) в пользу ООО «ИНЖСТРОЙСИТИ» (ОГРН: 1155047013846) задолженность в размере 859 045 руб. 19 коп., неустойку в размере 28 949 руб. 82 коп., а также расходы по оплате  госпошлины в размере 20 760 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 Судья             К.В. Вольская