РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №А40-30867/22-143-224

17 августа 2022 года

г. Москва

 

 

Резолютивная часть решения объявлена                                           10 августа 2022 года

Мотивированное решение изготовлено                                            17 августа 2022 года

 

Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шаталовой А.В.

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску ООО «ДЕЛАЙТ 2000» (ИНН 7722684465)

к АО «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК» (ИНН 6345012488)

о взыскании  20.366.417 руб. 12 коп.

 

при участии: 

от истца: Сляднев А.Н. дов. от 15.02.2022г. Трушкин А.Б. дов. от 28.06.2022г.

от ответчика: Прошутинская Н.Г. дов. от 28.12.2021г. 

 

УСТАНОВИЛ:

с учетом уточнений исковых требований ООО «ДЕЛАЙТ 2000» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК» о взыскании 20.366.416 руб. 98 коп. задолженности по договору №412-Зея/сп-20 от 10.03.2020г.

Представитель истца поддержал требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам представленного письменного отзыва.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 10.03.2020г. между АО «Гидроремонт-ВКК» (подрядчик) и ООО «Делайт 2000» (субподрядчик) заключен договор субподряда №412-Зея/сп-20, в соответствии с которым субподрядчик обязуется по заданию подрядчика в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к договору) выполнить работы по разработке дизайнпроекта, рабочей и сметной документации, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по разделам «Дизайн-проект интерьеров», «Система коллективного отображения информации», «Организация рабочих мест диспетчеров», в том числе осуществить поставку оборудования, а также сдать результат работ подрядчику.

В соответствии с п. 1.2 договора в состав работ по договору входят:            разработка дизайн-проекта помещений и рабочей документации (п.1.2.1 договора); поставка оборудования (п. 1.2.2 договора); строительно-монтажные работы (п.1.2.3 договора); пуско-наладочные работы (п.1.2.4 договора).

В соответствии с п.1.3 договора объем и состав работ по договору определяется техническим заданием (приложение №1 к договору). Работы по договору подлежат выполнению субподрядчиком в строгом соответствии с проектной и рабочей документацией, требованиями применимого права и указаниями подрядчика.

Сторонами подписаны 30.04.2020г. дополнительное соглашение №1, 12.03.2021г. дополнительное соглашение №2.

Материалы дела свидетельствуют, что в рамках выполнения обязательств по разработки дизайн-проекта, рабочей и сметной документации (проектные работы) ООО «Делайт 2000» разработал и направил в адрес АО «Гидроремонт-ВКК» проектную документацию письмами: 28.04.2020г. №485, 02.06.2020г. №613, 07.07.2020г. письмом №746

Результат работ по проектированию был предъявлен исходящим от 07.07.2020г. №746.

14.07.2020г. в ответ ответчик направил перечень замечаний и отказ от приемки работ исходящим 14.07.2020г. №808-Гр-Зей.ф.

Замечания были исправлены, в адрес АО «Гидроремонт-ВКК» направлена документация 31.07.2020 №853.

02.10.2020г. в связи с тем, что АО «Гидроремонт-ВКК» не направило ответа, письмом №1125 в адрес ответчика была направлена документация повторно

20.11.2020г.   в ответ на направленную документацию АО «Гидроремонт-ВКК» уведомило письмом от 20.11.2020 №1324-ГР.Зей.ф. о том, что документация находится на согласовании.

Дополнительных замечаний к проектной и рабочей документации в сроки, установленные договором, АО «Гидроремонт-ВКК» в адрес ООО «Делайт 2000» не направляло.

27.12.2021г.ООО «Делайт 2000» в адрес АО «Гидроремонт-ВКК» направлено письмо №1185 в котором подробно описаны этапы выполнения работ, сроки и документы, а также направлены акты сдачи приёмки проектных работ №746 от 07.07.2020г. на сумму 9 552 307 руб. Ответчик с 31.07.2020г. уклоняется от подписания документации.

По осуществлению монтажных и пусконаладочных работ 08.10.2020г. исх.№ 1159-Гр.Зей. ф АО «Гидроремонт-ВКК» уведомило ООО «Делайт 2000» о готовности объекта к производству работ с 16.11.2020г., однако из-за отсутствия строительной готовности приступить к работам ООО «Делайт 2000» смогло только 24.11.2020г.

В дальнейшем работы истцом выполнялись этапами, по мере наступления строительной готовности помещений.

С 21.11.2020г. по 07.12.2020г. произведена прокладка кабельной продукции.

При производстве работ оформлена ведомость выполненных работ.

С   21.01.2021г.   по   07.02.2021г.   произведен монтаж   оборудования   СКОИ   в   помещениях диспетчерского зала, комнаты спецподготовки, ситуационного центра. При производстве работ оформлены акты готовности помещений Центра управления сетями: диспетчерского зала (123), комнаты спецподготовки (122), ситуационного центра (232), (235) под монтаж оборудования от 25.01.2021г., акт приема-передачи документации от 27.01.2021г., акт приема-передачи оборудования в монтаж №5 от 28.01.2021г., акт приема-передачи оборудования в монтаж (ЖК-дисплеи) № б/н от 28.01.2021г., акты приемки -передачи оборудования в монтаж ОС-15 №2 от 27.01.2021г. и №3 от 27.01.2021г., акт приема-передачи оборудования в монтаж (пульты Атлант) № б/н от 28.01.2021г., акт дефектовки №1 от 09.02.2021г., акт устранения замечаний от 15.02.2021 к акту дефектовки №1 от 09.02.2021г., ведомость выполненных работ по помещению 122 от 16.02.2021г., ведомость выполненных работ по помещению 123 от 16.02.2021г., ведомость выполненных работ по помещению 235 от 16.02.2021г., ведомость выполненных работ по помещению (мониторы на пульты Атлант) от 16.02.2021г., акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение от 15.02.2021г., акт передачи помещений Центра управления сетями: диспетчерского зала (123), комнаты спецподготовки (122), ситуационного центра (232), (235) после выполнения электромонтажных работы от 16.02.2021г.

С 07.06.2021г. по 25.06.2021г. произведен монтаж оборудования в серверной, монтаж оборудования подсистемы коммутации в помещениях диспетчерского зала, комнаты спецподготовки, ситуационного центра, устранение замечаний.

При производстве работ оформлены следующие документы: ведомости выполненных работ по помещению 122 от 19.06.2021г., выполненных работ по сборке РЭКовых шкафов от 19.06.2021г., выполненных работ по помещению 123 от 19.06.2021г. (оборудование в пульты), акт устранения замечаний №2 от 19.06.2021 к акту дефектовки №1 от 09.02.2021г.

С 19.07.2021г. по 06.09.2021г. произведено выполнение работ по ПНР, поддержка мероприятий, связанных с проведением ВЭФ 2021г. в г. Владивосток. При производстве работ оформлены: акт приема-передачи на ответственное хранение от 31.08.2021г., акт специализированной подкомиссии (рабочей комиссии) №б/н о приемке оборудования после индивидуальных испытаний от 06.09.2021г.

Все работы были выполнены иждивением ООО «Делайт 2000».

После завершения работ по ПНР в соответствии с условиями Договора.

Так, в целях промежуточного контроля объемов выполненных работ и осуществления расчетов 22.09.2021г. ООО «Делайт 2000» направило на согласование акты освидетельствования работ на электронные адреса RybalovMA@rushydro.ru, rozenblum@prim.drsk.ru, BBBogush@rushydro.ru, ZilberblumVN@rushydro.ru.: №1 от 13.09.2021г. с указанием суммы выполненных работ по СМР по разделу ОРМД в размере 126 343 руб., №2 от 13.09.2021г. с указанием суммы выполненных работ по СМР по разделу СКОИ в размере 3 547 009 руб., №3 от 13.09.2021г. с указанием суммы выполненных работ по ПНР по разделу СКОИ в размере 11 741 981 руб.

29.11.2021г. в ООО «Делайт 2000» поступили подписанный со стороны АО «Гидроремонт-ВКК» акт освидетельствования работ №2 от 13.09.2021г. на сумму 3 547 009 руб., что соответствует 4 256 410 руб. 80 коп. с НДС.

30.11.2021г. в адрес ООО «Делайт 2000» поступила частичная оплата по подписанному акту освидетельствования работ №2 от 13.09.2021г. в размере 3 589 431 руб. 23 коп.

12.12.2021г. от АО «Гидроремонт-ВКК» поступило требование передать всю исполнительную документацию, согласованную ранее на объект, для проведения комплексной сдачи.

16.12.2021г. ООО «Делайт 2000» передало исполнительную документацию в полном объеме в шести экземплярах, что подтверждается подписанным реестром исполнительной документации (Система коллективного отображения информации, Организация рабочих мест диспетчеров).

По состоянию на 27.12.2021г. ООО «Делайт 2000» выполнило полный комплекс работ, предусмотренный договором.

12.01.2022г. ООО «Делайт 2000» в адрес АО «Гидроремонт-ВКК» направлено письмо №1185, в котором подробно описаны этапы выполнения работ, сроки и документы, направлены акты сдачи-приёмки монтажных работ №1 от 12.01.2022 на сумму 126 343 руб.,

№2 от 12.01.2022г. на сумму 3 547 009 руб., №3 от 12.01.2022г. на сумму 9 505 030 руб. 29 коп., №4 от 12.01.2022г. на сумму 2.376.258 руб. 18 коп.

Таким образом, монтажные и пусконаладочные работы выполнены ООО «Делайт 2000», предъявлены ответчику, у АО «Гидроремонт-ВКК» возникли обязательства по оплате выполненных проектных работ.

21.01.2022г. в связи с тем, что в течение пяти рабочих дней с момента получения письма №1185, от ответчика каких-либо замечаний не поступило, ООО «Делайт 2000» направлена письменная претензия в адрес ответчика.

Ответчик от исполнения обязательств, предусмотренных договором, уклонился, задолженность по проектным работам составляет 8.215.236 руб. 65 коп., по работам по монтажу и пусконаладке в размере 12.151.180 руб. 33 коп., всего  20.366.416 руб. 98 коп.

Задолженность в размере  8.215.236 руб. 65 коп. рассчитана исходя из стоимости проектных работ в размере 11 462 769 руб.

Сумма определена с учетом авансового платежа за проектные работы в размере 646 800 руб., а также суммы переплаты авансового платежа за оборудование в размере 1 454 455 руб. 45 коп., в соответствии с условиями дополнительного соглашения №2 от 12.03.2021г. за вычетом обеспечительного платежа в размере 1 146 276 руб. 90 коп.

Предельная стоимость работ по монтажу и пуско-наладке в соответствии с условиями договора составляет 18 665 570 руб. Согласно актам выполненных работ, стоимость составила 18 665 568 руб. 56 коп.

Ответчиком оплачен авансовый платеж от стоимости работ по монтажу и пуско-наладке в размере 1 058 400 руб. промежуточный платеж в размере 3 589 431 руб. 23 коп.  Из указанной суммы вычтен обеспечительный платеж в размере 1 866 557 руб.

В соответствии с п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст.711 ГК РФ, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Пунктом 1 ст.746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно п.4 ст.753 ГК РФ Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Доводы отзыва ответчика признаются судом необоснованными  по следующим основаниям.

Так, отказ ответчиком в оплате выполненных проектных работ в сумме 8 215 236 руб. 65 коп на основании того, что сметная документация выполнена без учета приказа Минэнерго от 17.01.2019г. № 10, не обоснован.

В соответствии с п.1 Приказа Минэнерго от 17.01.2019г. №10 настоящие укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (разработаны в целях определения объема финансовых потребностей при капитальном строительстве инвестиционных обьектов электроэнергетики.

ООО «Делайт 2000» не должно выполнять данный расчет, поскольку он включает в себя все затраты по объекту по всем разделам проектной документации. Отдельно по конкретному разделу данный расчет не выполняется.

В данном приказе нет ни одной расценки, касающейся монтируемого ООО «Делайт 2000» оборудования.

При этом, согласно выписки из ЕГРН от 04.07.2022г., реконструкция административного здания ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети" г. Владивосток, ул. Командорская, д. 13а завершена, объект введен в эксплуатацию в 2021 году. Объект реконструкции введен в эксплуатацию.

В соответствии с п.1 ст. 55 ГрК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией.

14.07.2020г.АО «Гидроремонт-ВКК» истцу направило перечень замечаний и отказ от приемки работ исходящим 14.07.2020г. № 808-Гр-Зей.ф. Согласно последнего абзаца указанного письма ответчик указал, в случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок АО «Гидроремонт-ВКК» вынуждено будет выполнить работы по устранению выявленных недостатков силами третьих лиц, либо собственными силами с отнесением всех расходов на субподрядчика.

Поскольку объект в эксплуатацию введен и известна цена такого расчета для объекта капитального строительства целиком, отказ ответчика в оплате выполненных проектных работ в полном объеме не обоснован.

При этом 20.11.2020г. письмом 1324-ГР.Зей.ф. АО «Гидроремонт-ВКК» в ответ на письмо от 31.07.2020г. и 02.10.2020г. указало, что рабочая документация включена в состав комплекта проектной и рабочей документации по созданию ЦУС филиала АО «ДРСК», согласование которого продолжается в настоящее время.

08.10.2020г. письмом №1159-ГР.Зей.ф. АО «Гидроремонт-ВКК» обратился с просьбой приступить к выполнению строительно-монтажных работ по договору.

27.01.2021г. ответчик передал истцу техническую документацию для выполнения монтажных и ПНР, разработанную ранее ООО «Делайт 2000».

В совокупности (сдача объекта в эксплуатацию, указание о включении нашей рабочей документации в состав общей проектной и рабочей документации по объекту, просьба о начале производства монтажных и ПНР, передача документации для выполнения монтажных и ПНР) свидетельствует о том, что замечания по проектным работам приняты, а их включение в состав общей рабочей документации свидетельствует о соответствии требованиям технического задания.

Проектные работы выполнены ООО «Делайт 2000» в соответствии с требованиями договора, технического задания к договору.

В соответствии с техническим заданием на проектирование отсутствует требование о включении мероприятий по заземлению в состав выпускаемых ООО «Делайт 2000» документов.

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» установлено.

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите (в текстовой части), а также схемы заземлений (занулений) и молниезащиты (в графической части) отнесены к Подразделу «Система электроснабжения» Подраздела №5 Проектной документации - «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

Согласно Технического задания ООО «Делайт 2000» не осуществляло и не должно было осуществлять подготовку данного подраздела Проектной документации.

Мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите на объекте, должны быть предусмотрены разработчиком соответствующего подраздела.

При этом 14.07.2020г. в ответ АО «Гидроремонт-ВКК» направило перечень замечаний и отказ от приемки работ исходящим 14.07.2020г. № 808-Гр-Зей.ф. Указанное замечание в Письме отсутствует. Указанного замечания также не имелось в процессе выполнения монтажных и ПНР.

Каких-либо подтверждений того, что разница потенциалов между корпусом Creston, установленном в помещении ЦОД, и блоком Creston RX видео-стены составляет 56 вольт в материалы дела не представлено.

Как усматривается из акта устранения замечаний от 21.10.2021г. вышедшие из. строя приемники заменены на новые.

Отданный в гарантийный ремонт ЖК монитор «Iyama XUB2792QSU-B1, 27 черный» возвращен после гарантийного ремонта, что подтверждается актом технического завершения работ №4003-0001, актом приемки работ (оборудования) по гарантийному обслуживанию от 15.02.2022г.

Стороны изначально рассматривали замену ЖК монитор «Гуата XUB2792QSU-B1, 27 черный» как гарантийный ремонт оборудования, поскольку при выполнении монтажные работ монитор был заменен на находящийся в ЗИП.

Указанные в письме от 01.02.2022г. №71-ГР.Зей.ф замечания устранены, в отношении части замечаний ООО «Делайт 2000» указывало на то, что они необоснованы письмом от 04.02.2022г. №1286

Ответчик письмом от 09.03.2022г. №220 признал устранение замечаний, за исключением восстановления работоспособности видео стены в соответствии с проектной схемой. Временная схема позволяет эксплуатировать видеостену, при этом стоимость монтажных работ составляет 280,17 рублей за 1 штуку.

Вышеуказанные  работы приняты и оплачены заказчиком.

ООО «Делайт 2000» выполнило комплекс работ по устранению замечаний, указанных в исх.№71-ГР.Зей.ф. от 01.02.2022г. Устранены следующие замечания: восстановлена подсветка панели №12 на видеостене;   заменен блок Crestron 2000 RX, отвечающий за работу панелей №17, 18, 23, 24. Работоспособность сегмента видеостены полностью восстановлена;            в ходе диагностических работ и дальнейшего прогона нарушений в работе оборудования Crestron switch А56 не выявлено.

Так, по факту выполнения работ был подписан акт № 01-ТЗР/2069 от 17.02.2022г.

Условиями договора с ООО «Делайт 2000» не предусмотрено выполнение работ по устройству заземления оборудования видеостены, работ по испытанию заземления с предоставлением отчета в рамках выполнения монтажных и пусконаладочных работ. Данные работы должны выполняться субподрядчиком, выполняющим работы по соответствующему подразделу.

Письмом от 04.02.2022г.№1286 ООО «Делайт 2000» сообщало, что в адрес АО «Гидроремонт-ВКК» поставлен товар, прошедший все необходимые тесты и получивший сертификаты соответствия. Дополнительных требований к товару условиями договора не предусмотрено.

13.09.2021г. сторонами пописан акт освидетельствования выполненных работ №2 по СМР по разделу СКОИ. Согласно позиции №18 указанного акта набор Crestron HD-EXT-USB-2000-C смонтирован.

Стоимость монтажа данного набора согласно акта составляет 280,17 рублей за 1 штуку. Монтаж подтверждается также подписанной ведомостью выполненных объемов работ на систему коллективного отображения информации (30-2020-СКОИ) в части раздела «Монтаж оборудования в помещении серверной».

Как усматривается из материалов дела после 13.09.2021г. никаких претензий к смонтированному набору от ответчика не поступало.

24.01.2022г. в адрес ООО «Делайт 2000» направлено письмо, в котором указано, что замена оборудования необходима в целях бесперебойной работы объекта, что подтверждает факт эксплуатации объекта.

17.02.2022г. оборудование Crestron HD-EXT-USB-2000-С было передано по акту приема-передачи оборудования б/н, а не по ОС-15 от 27.01.2021г. №3. При этом в акте отмечено, что оборудование вышло из строя в процессе эксплуатации конечным пользователем.

Кроме того, был составлен акт от 17.02.2022г. №01-ТЗР/2069, в котором указано на то, что подрядчик выполнил комплекс работ по восстановлению работоспособности видеостены на объекте. По окончании работ видеостена находится в рабочем состоянии и пригодна для эксплуатации.

Для диагностики причин выхода из строя оборудования оно было передано ООО «Делайт 2000».

13.09.2021г. сторонами пописан акт освидетельствования выполненных работ №2 по СМР по разделу СКОИ на сумму 3 547 009 руб., который оплачен ответчиком платежным поручением № 4200 от 30.11.2011г. Согласно позиции №18 указанного акта набор Crestron HD-EXT-USB-2000-С смонтирован.

Каких-либо доказательств фактического неисполнения спорных работ ответчиком в материалы дела не было представлено, фактическое выполнение спорных работ подтверждается представленными в дело доказательствами, наличие результата работ ответчиком не оспорено.

Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст.310 ГК РФ не допускается, следовательно, требование истца о взыскании задолженности в размере 20 366 416руб. 98коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Стороны согласно ст.ст.8,9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Вопреки требованиям ч.1 ст.65 АПК РФ, ответчиком не представлены доказательства надлежащего исполнения обязательств по договору.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределены в порядке ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 702, 711, 746,753  ГК РФ, ст.ст. 41, 70, 110, 167-170, 176  АПК РФ, суд

                                                     РЕШИЛ:

Взыскать с АО «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК» (ИНН 6345012488) в пользу ООО «ДЕЛАЙТ 2000» (ИНН 7722684465)  20 366 416руб. 98коп. задолженности и 124 832руб. 00коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать истцу  справку  на  возврат государственной  пошлины  в размере 668руб.  00коп. из доходов Федерального бюджета РФ перечисленной по платежному поручению №310 от 14.02.2022г.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                   О.С. Гедрайтис