21/2017-232317(3) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 04 октября 2017 года 

по делу № А33-6852/2017 Красноярск

4 октября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Рос- сийской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Внести изменения в муниципальный контракт № 150/09МК от 8.11.2016, заключенный  между обществом с ограниченной ответственностью строительно-производственной компа- нией «Сфера» и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя  школа № 80», пункт 3.1 контракта изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ: 1 этап: срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального кон- тракта; срок завершения выполнения работ - до 1.08.2017, 2 этап: срок начала выполнения  работ – с момента завершения 1 этапа; срок завершения выполнения работ - до 31.08.2017».  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края  

Судья Е.Р. Смольникова