АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www.kemerovo.arbitr.ru

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-8902/2021

город Кемерово

20 июля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2021 года

Полный текст решения изготовлен 20 июля 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Рино», Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Мариинского муниципального района, Кемеровская область - Кузбасс, район Мариинский, город Мариинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 502 683, 07 руб. неустойки

в отсутствие представителей сторон

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Рино» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Мариинского муниципального района (далее – ответчик) о взыскании 502 683, 07  руб. неустойки за период с 18.07.2018 по 20.11.2020, начисленной в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту №Ф.2017.404010 от 18.09.2017.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела (ст.ст. 121-122 АПК РФ), явку полномочных представителей не обеспечил, заявлений и ходатайств в суд не направил.

Суд считает возможным рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие представителей сторон в порядке статьи 156 АПК РФ по материалам, имеющимся в деле.

Изучив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

18 сентября 2017 года между Управлением жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и связи Мариинского муниципального района (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «РИНО» (подрядчик) заключен муниципальный контракт №Ф.2017.4040010 на выполнение работ по капитальному ремонту скважины, расположенной по адресу: Кемеровская область, Мариинский район, с. Красные Орлы, в рамках которого заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту скважины, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его (п. 1.1). 

Объемы и виды работ указаны в Приложении №1, №2 (Техническое задание и локально – сметный расчет) к настоящему контракту, который является неотъемлемой частью настоящего контракта. 

Согласно п. 2.1 цена контракта составляет 2 697 280 рублей, без НДС. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Источник финансирования бюджет Мариинского муниципального района, цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (п. 2.1). 

Согласно п. 2.4 основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и предоставлении счетов – фактур.

Оплата производится путем безналичного перечисления на расчетный счет подрядчика денежных средств, в течение 30 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставлении счетов (счетов – фактур), с учетом положений пункта 2.9 контракта (п. 2.4).

Согласно раздела 3 контракта приемка выполненных работ осуществляется с составлением документов установленной формы Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) в необходимом количестве экземпляров (п. 3.1). 

Пунктом 3.2 контракта предусмотрено, что Заказчик в течение 7 дней со дня получения акта о приемке выполненных работ, обязан подписать акт о приемке выполненных работ или направить подрядчику мотивированный отказ от приемки по причине их несоответствия требованиям действующего законодательства или условиям настоящего контракта. 

В случае не поступления, в установленный настоящим контрактом срок от заказчика акта или мотивированного отказа, работы считаются принятыми заказчиком в полном объеме. 

Решением суда по делу №А27-4238/2019 от 20.05.2020 с Управления Жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Мариинского муниципального района в пользу общества с ограниченной ответственностью «РИНО» взыскано 2 697 280 рублей долга по муниципальному контракту №Ф.2017.404010 от 18.09.2017 года, 74 669 рублей 70 коп. пени за просрочку оплаты по состоянию на 17.07.2018, 80 000 рублей в возмещение расходов по оплате за проведение судебной экспертизы по делу, 36 860 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску.

В рамках настоящего иска ООО «Рино» заявлено требование о взыскании неустойки с 18.07.2018 по дату фактической оплаты – 20.11.2020 (платежное поручение №655924 от 20.11.2020).

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 30.03.2021 г. в адрес Ответчика направлена претензия №42 от 25.03.2021 об уплате пени, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторон должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованием закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 6.1 контракта).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 6.2).

Согласно п. 38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного 28.06.2017, при расчете пени, подлежащей взыскании в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного решения.

При этом, в соответствии с частью 5 статьи 34 Закона о контрактной системе пеня за просрочку заказчиком исполнения своих обязательств устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Следовательно, при добровольной уплате названной неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа.

Платеж осуществлен 20.11.2020, что соответствует действующей ключевой ставке в размере 4,25 %.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, представленные сторонами доказательства, руководствуясь статьями 421, 422, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями статьи 34 Закона о контрактной системе, пунктом 38 Обзора практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, производит перерасчет неустойки на сумму долга по контракту  в размере 2 697 280 рублей за период с 18.07.2018 по 20.11.2020 с применением ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в момент оплаты задолженности (4,25 %), что составило 327 472,27 рублей. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить в части.

Взыскать с управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Мариинского муниципального района в пользу общества с ограниченной ответственностью «Рино» 327 472,27 рублей неустойки, а также 8 504,01 рублей расходов по оплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья                                                       К.В. Козина