23/2017-21931(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020  

http://novgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Великий Новгород Дело № А44-1346/2017  23 мая 2017 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Строитель» в срок не  

позднее трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить  

недостатки, выявленные в работах по строительству многоквартирного жилого дома,  

расположенного по адресу: 

<

...>, а  

именно: 

1) выполнить монтаж по замене подшивных досок чердачного перекрытия  

сечением 150*25 мм и установить с шагом 350 мм, проектный зазор 200 мм; 

2) выполнить монтаж по утеплению чердачного перекрытия (утеплитель  

чердачного перекрытия должен состоять из 3 - х слоев: гидроизоляционная пленка  

изоспан А, утеплитель 160 мм и пароизоляция изоспан В; 

3) оборудовать чердачное перекрытие тремя рядами ходовыми мостиками из  

обрезной доски сечением 150*50 мм, шириной каждого 600 мм; 

4) заменить элементы стропильной системы сечением элементов: Стропильная нога  

200*50 мм; Стойка сечением 150*50 мм; Подкос сечением 150*50 мм; Затяжка сечением 2*150*50 мм; Балка перекрытия сечением 2*200*50 мм; 

5) выполнить монтаж обрешетки сечением 50*50 с шагом 350 мм, с зазором 300мм;  6) выполнить монтаж подкосов под каждую стропильную ногу;  

7) установить на кровле металлическое барьерное ограждение,  8) выполнить работы по установке подкоса;  

9) выполнить работы по установке узлов сопряжения кровельного покрытия с  

вентканалами и листов между собой; 10) обеспечить водоотвод с кровли; 11) выполнить демонтаж кровельного покрытия; 

12) выполнить устройство кровельного покрытия из жесткого профилированного  листа;  

13) выполнить внутренний ремонт жилых помещений (квартир) №№ 17, 18, 20, 22,  расположенных на третьем этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по  адресу: 

<

...>, а именно: заменить  потолочное покрытие (гипсокартон), заменить утеплитель и поклеить обои.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000,00 руб. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный  

суд в месячный срок со дня его принятия. 

Судья С.В. Давыдова