АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

25 июля 2023 года

 

Дело № А33-6951/2023

Красноярск

 

Резолютивная часть решения вынесена «18» июля 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено «25» июля 2023 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Заблоцкой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Модуль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство горно-химического комбината» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический Комбинат»,

в присутствии:

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности от 14.02.2023,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Модуль» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство горно-химического комбината» (далее – ответчик) о взыскании 1 385 000 руб. задолженности, 170 668,72 руб.  процентов за пользование чужими денежными средствами.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 20.04.2023 возбуждено производство по делу.

Определением от 20.06.2023 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический Комбинат».

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного заседания путем размещения текста определения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не явились. 

В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.

Истец заявленные исковые требования поддержал по основаниям, указанным в иске.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

20.09.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Модуль» (подрядчик) заключен договор № 68-07-07/289-2021, по условиям которого подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить работы по ремонтам объектов ФХ, расположенных на промышленной площадке ФГУП «ГХК» (далее по тексту - работа(ы)), в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору), в объеме, предусмотренном ведомостями объемов работ (приложения № 1,2,3,4,5,6,7 к техническому заданию (приложение № 1 к договору)), сдать заказчику выполненные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 1.2 договора, описание, состав, требования к работам и результатам выполненных работ установлены сторонами в техническом задании (приложение № 1).

Работы выполняются в полном соответствии с требованиями нормативной, технической и методической документации, указанной в техническом задании (приложение № 1), а также в соответствии с действующими нормами и правилами, регламентирующими данный вид работ (пункт 2.1 договора).

В соответствии с пунктом 2.2 договора, работы выполняются по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск.

В пункте 3.1.1 договора предусмотрена обязанность подрядчика выполнить своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в договоре, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), а также законодательством Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации.

Пунктом 4.1 договор предусмотрен срок выполнения работ - начало работ - с даты подписания договора; окончание работ - 15.12.2021.

Согласно пункту 5.1 договора, выполняемые работы должны соответствовать видам работ, указанным в ведомости объемов работ (приложения № 1,2,3,4,5,6,7 к техническому заданию (приложение № 1 к договору)).

В соответствии с пунктом 5.2 договора по завершении выполнения работ подрядчик обязан в письменной форме уведомить заказчика о готовности работ. Приёмка работ осуществляется по акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Пунктом 5.3 договора предусмотрено, что подрядчик, ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет заказчику в 4 экземплярах акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. К акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 прикладывается акты скрытых работ, если таковые присутствуют, а также сертификаты качества на материалы и изделия. Счет и счет - фактура составляются и предоставляются заказчику ежемесячно.

Согласно пункту 5.4 договора заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ, но форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, рассматривает, подписывает и направляет подрядчику подписанный акт или в тот же срок направляет подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ.

В случае письменного мотивированного отказа заказчика от подписания акта сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы, выполненные подрядчиком с нарушениями, в справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не включаются, заказчиком не принимаются и не оплачиваются (пункт 5.5 договора).

В соответствии с пунктом 5.6 договора, замечания и претензии устраняются подрядчиком за его счет в согласованный с заказчиком срок. В этом случае акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается заказчиком после устранения замечаний и претензий.

Согласно пункту 5.7 договора работа считается выполненной после подписания окончательного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанного двумя сторонами со сроком гарантии качества. Подрядчик в 5-дневный срок со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставляет заказчику оригинал счета-фактуры и счета.

В соответствии с пунктом 5.8 договора перед закрытием форм КС-2 (после окончания выполнения работ), подписывается акт технической приёмки ремонтно-строительных работ (без замечаний или с замечаниями, недоделками с указанием сроков их устранения).

Согласно пункту 6.1 договора, за выполненные в соответствии с условиями договора работы заказчик уплачивает подрядчику 7385656 рублей 00 копеек без НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с расчетом стоимости (приложение № 2 к договору).

В цену договора включена компенсация всех издержек подрядчика в том числе: стоимость выполняемых работ, приобретение оборудования, приспособлений, инструмента, материалов, приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды, инвентаря, уплата налогов, сборов, транспортных расходов, связанных с доставкой персонала к месту выполнения работ, с доставкой оборудования, материалов, инструмента, приспособлений к месту выполнения работ, командировочных расходов и других обязательных платежей (пункт 6.2 договора).

В силу пункта 6.3 договора, оплата выполненных работ по договору производится ежемесячно при условии поступления бюджетных денежных средств от ФГУП «ГХК» в безналичном порядке путем перечисления денежных средств заказчиком на расчетный счет подрядчика, в течение 15 рабочих дней, следующих за датой получения представителем заказчика оригинала счета, оформленного подрядчиком на основании: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), принятого (подписанного) представителем заказчика; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); оригинала счета-фактуры.

Окончательный расчет за выполненные работы производится после полного завершения работ, устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе приемки работ на объекте, приемки всей исполнительной документации и актов скрытых работ.

Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему договору с подписанием соответствующего Акта сверки взаиморасчетов ежеквартально, по завершении финансового года и после окончания выполнения работ в целом по настоящему договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего договора. Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки взаиморасчетов (далее - акты сверки) по форме приложения № 4 к договору, в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр подрядчику (пункт 6.4 договора).

В силу пункта 6.5 договора, обязанность заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика. Валюта расчета - Российский рубль.

Сторонами договора подписаны акты о приемке выполненных работ от 29.10.2021 № 1.1 на сумму 2 561 266 руб., от 29.10.2021 № 1.2 на сумму 72 487 руб., от 29.10.2021 № 1.3 на сумму 163 890 руб., от 30.11.2021 № 2.1 на сумму 997 488 руб., от 30.11.2021 № 2.2 на сумму 358 044 руб., от 30.11.2021 № 2.3 на сумму 1 381 131 руб., от 30.11.2021 № 2.4 на сумму 13 569 руб., от 30.11.2021 № 2.5 на сумму 33 816 руб., от 15.12.2021 № 3.1 на сумму 492 416 руб., от 15.12.2021 № 3.2 на сумму 1 311 549 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 29.10.2021 № 1 подрядчиком выполнены работы на сумму 2 797 643 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2021 № 2 подрядчиком выполнены работы на сумму 2 784 048 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 15.12.2021 № 3 подрядчиком выполнены работы на сумму 1 803 965 руб.

Платежными поручениями от 17.12.2021 № 3015 на сумму 1 000 000 руб., от 11.04.2022 № 752 на сумму 2 784 048 руб., от 11.04.2022 № 751 на сумму 1 797 643 руб., от 11.04.2022 № 753 на сумму 418 965 руб., ответчиком произведена частичная оплата выполненных работ.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 24.01.2023 задолженность в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Модуль» 1 385 000 руб.

Письмом от 15.06.2022 № 22 подрядчик обратился к заказчику с просьбой предоставить информацию по срокам погашения задолженности.

Письмом от 18.10.2022 № 38 подрядчик обратился к заказчику с просьбой предоставить информацию по срокам погашения задолженности.

Досудебной претензией от 24.10.2022 № 40 ответчику предложено оплатить задолженность в течение 30 календарных дней с даты получения претензии.

Письмом от 02.11.2022 № 68-01-15/5914 заказчик сообщил подрядчику о том, что задолженность будет погашена в сроки: 400 000 руб. – до 30.11.2022, 400 000 руб. – до 30.12.2022, 585 000 руб. – до 31.01.2023.

Письмом от 13.12.2022 № 45 подрядчик повторно обратился к заказчику с просьбой предоставить информацию по срокам погашения задолженности, указав, что график платежей не соблюден.

Досудебной претензией от 15.03.2022 № 12 ответчику предложено оплатить задолженность в течение 30 календарных дней с даты получения претензии.

В связи с неисполнением заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, из договоров и иных сделок.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статье 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Заключенный между сторонами договор от 20.09.2021 № 68-07-07/289-2021 является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 ГК РФ.

Согласно части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу части 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. В части 2 указанной статьи установлено, что заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Частью 4 статьи 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с частью 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Из положений статей 711, 720 ГК РФ следует, что обязанность заказчика по оплате работ наступает после сдачи ему результата работ, если иное не предусмотрено договором; надлежащим доказательством выполнения работ, их стоимости по договору подряда является акт приемки выполненных работ, подписанный обеими сторонами.

В подтверждение факта выполнения работ по договору истец представил акты о приемке выполненных работ от 29.10.2021 № 1.1 на сумму 2 561 266 руб., от 29.10.2021 № 1.2 на сумму 72 487 руб., от 29.10.2021 № 1.3 на сумму 163 890 руб., от 30.11.2021 № 2.1 на сумму 997 488 руб., от 30.11.2021 № 2.2 на сумму 358 044 руб., от 30.11.2021 № 2.3 на сумму 1 381 131 руб., от 30.11.2021 № 2.4 на сумму 13 569 руб., от 30.11.2021 № 2.5 на сумму 33 816 руб., от 15.12.2021 № 3.1 на сумму 492 416 руб., от 15.12.2021 № 3.2 на сумму 1 311 549 руб.

Платежными поручениями от 17.12.2021 № 3015 на сумму 1 000 000 руб., от 11.04.2022 № 752 на сумму 2 784 048 руб., от 11.04.2022 № 751 на сумму 1 797 643 руб., от 11.04.2022 № 753 на сумму 418 965 руб., ответчиком произведена частичная оплата выполненных работ.

Согласно расчету истца с учетом произведенных ответчиком частичных оплат выполненных работ, задолженность ответчика составила 1 385 000 руб.

Доказательства оплаты 1 385 000 руб. долга ответчиком не представлены.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, учитывая доказанность истцом факта выполнения работ, непредставление ответчиком доказательств оплаты выполненных работ, требования о взыскании 1 385 000 руб. долга являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании 170 668,72 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.11.2021 по 07.04.2023.

В силу пункта 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проверив представленный истцом расчет, суд признает его соответствующим действующему законодательству и фактическим обстоятельствам дела.

При указанных обстоятельствах, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего спора составляет 28 557 руб.

При подаче иска истцом оплачено 30 761 руб. государственной пошлины.

С учетом результата рассмотрения спора, по правилам статьи 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 28 557 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 2 204 руб. излишне уплаченной государственной пошлины подлежат возврату истцу из федерального бюджета.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство горно-химического комбината» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Модуль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 385 000 руб. основного долга, 170 668,72 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 28 557 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Модуль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 2 204 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 27.02.2023№ 12.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

А.В. Заблоцкая