Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-105791/2020

24 февраля 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  03 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  24 февраля 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.,

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ПРОДМАШ" (адрес:  Россия 443022, г САМАРА, САМАРСКАЯ обл, ш ЗАВОДСКОЕ 11, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ИДЖ ИЧТАШ ОТОЙОЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" (196158, 

<

...>, ИНН: 

<

***>, НЗА: 10150010970);

о взыскании,

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 11.01.2021, посредством онлайн- заседания,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Открытое акционерное общество "ЗАВОД ПРОДМАШ" (далее – Завод, ОАО «Завод Продмаш») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Акционерной компании "ИДЖ ИЧТАШ ОТОЙОЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" 2 359 393 руб. 88 коп. долга, 10 381 руб. 33 коп. неустойки.

В порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Арбитражный суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующеею

04.12.2018 между Заводом (субподрядчик) и Акционерной компанией «ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» заключен Договор № SPIA-M11-CM-WO-ZPM-002 (далее - Договор).

27.06.2019 между ОАО «Завод Продмаш», Акционерной компанией «ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», Акционерной компанией «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» заключено Соглашение о перемене лица в обязательстве № SPIA-M11-CM-OT-ZPM-002-ICA от 27.06.2019, по которому Акционерная компания «ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» уступила Акционерной компании «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» все свои права и обязанности по Договору № SPIA-M11-CM-WO-ZPM-002 от 04.12.2018г. в полном объеме.

15.10.2020 Акционерная компания «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» изменила наименование на АКЦИОНЕРНУЮ КОМПАНИЮ «ИДЖ ИЧТАШ ОТОЙОЛ ИНШААТ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (Подрядчик), что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ на аккредитованный филиал.

В соответствии с п. 2.1. Договора, заключенный Договор является рамочным и определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые должны быть конкретизированы путем заключения отдельных Спецификаций на выполнение работ и Спецификаций на поставку Товара на основании и во исполнение Договора.

В ходе исполнения Договора, Сторонами среди прочего была подписана:

Спецификация на выполнение Работ № 1 от 11.04.2019г. в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 13.08.2019г. (в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 20.08.2019г.) к Договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 13.08.2019г. (в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 20.08.2019г.) к Договору, Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 13.08.2019г. к Договору.

Стоимость работ по соглашению сторон определяется в зависимости от фактически выполненных работ (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 13.08.2019г. к Договору) и рассчитывается исходя из цены Работ за единицу измерения, указанных в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 13.08.2019г. к Договору.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 2 от 13.08.2019 (в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 20.08.2019г.) к Договору, ОАО «Завод Продмаш» выполнило Работы по Договору, что подтверждается подписанными Сторонами: Актом о приемке выполненных работ № 1 от 15.10.2019г. (отчетный период 12.04.2019 по 15.10.2019. дата подписания 30.06.2020). Справкой о стоимости выполненных Работ и затрат № 1 от 15.10.2019 (отчетный период 12.04.2019 по 15.10.2019. дата подписания 30.06.2020) на общую сумму: 47 187 877,51 руб.

Согласно п. 1 Приложения № 2 (Условия оплаты) к Дополнительному соглашению № 2 от 13.08.2019г. к Договору, оплата Работ осуществляется Подрядчиком в следующем порядке:

(a) Подрядчик оплачивает 40% (сорок процентов), исходя из следующей формулы: цена ед.изм. Работ соответствующего мостового ограждения (деформационных швов, фронтального ограждения) х 40% х кол-во пог.м., под которые смонтирована анкерная группа, прошедшая испытание анкерных креплений (под «ценой ед.изм. Работ» поднимается цена ед. изм. Работы по монтажу соответствующих деформационных швов, фронтального и мостового ограждения, указанная в Спецификации на выполнение Работ, с учетом НДС), в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления Акта испытаний анкерных креплений на объекте, свидетельствующего о проведенном испытании анкерной группы, смонтированных в Месте Производства Работ;

(b) Подрядчик оплачивает выполненные Субподрядчиком в отчетном периоде Работы после предоставления Субподрядчиком Подрядчику Промежуточного Акта о Приемке Выполненных Работ (Форма № КС-2), Промежуточной Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат (Форма № КС-3) и счет к оплате, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства и Договора, в размере 30 % (тридцать процентов) от цены выполненных Работ (с учетом НДС), предусмотренной в перечисленных документах, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Подрядчиком Промежуточного Акта о Приемке Выполненных Работ (Форма № КС-2) и Промежуточной Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат (Форма № КС-3);

(c) Подрядчик оплачивает выполненные Субподрядчиком в отчетном периоде Работы после их промежуточного освидетельствования с участием Технического Эксперта в размере 25% (двадцати пяти процентов) от цены Работ (с учетом НДС), указанной в предоставленных Субподрядчиком Ежемесячном Отчете о Ходе Работы, Промежуточном Акте о Приемке Выполненных Работ (Форма № КС-2), Промежуточной Справке о Стоимости Выполненных Работ и Затрат (Форма № КС-3) и Журнале Учета Выполненных Работ (форма № КС-ба), в течение 20 (двадцати) календарных дней от наиболее поздней даты из указанных событий при условии выполнения их всех:

1) Утверждения Подрядчиком Ежемесячного отчета о Ходе Работы, ранееутвержденных Подрядчиком Промежуточного Акта о Приемке Выполненных Работ(Форма № КС-2), Промежуточной Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат(Форма № КС-3) в отношении Работ, выполненных в отчетном периоде;

2) предоставления Субподрядчиком счета к оплате, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Договора;

3) предоставления Субподрядчиком Подрядчику гарантийного письма,подтверждающего, что ему не известно о каких-либо имеющихся правах залога илитребованиях, которые могут, породить права залога, затрагивающих Работы. Такоегарантийное письмо должно повторно предоставляться каждый отчетный период;

4) предоставления Субподрядчиком Подрядчику согласованной ТехническимЭкспертом Исполнительной Документации на Работы, указанные в Ежемесячном отчете о Ходе Работы, в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стандартами,

(d) Подрядчик удерживает 5 % (пять процентов) от цены Работ по Спецификации на выполнение Работ (по соответствующим позициям деформационных швов, мостового и фронтального ограждений) как Гарантийное Удержание в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по выполнению Работ по Договору. Сумма Гарантийного Удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Подрядчиком от Субподрядчика Банковской Гарантии Выполнения Гарантийных Обязательств в отношении Работ по Спецификации на выполнение Работ на сумму 5% (пять процентов) от цены Работ по Спецификации на выполнение Работ (по соответствующим позициям деформационных швов, мостового и фронтального ограждений). В случае если Субподрядчик не предоставил Подрядчику Банковскую Гарантию Выполнения Гарантийных Обязательств, сумма Гарантийного Удержания выплачивается Подрядчиком Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после выдачи Субподрядчику Итогового Свидетельства об Исполнении по Спецификации на выполнение Работ.

Субподрядчиком исполнены все обязательства, предусмотренные п. 1 Приложения № 2 (Условия оплаты) к Дополнительному соглашению № 2 от 13.08.2019г. к Договору.

Подрядчиком приняты выполненные Субподрядчиком Работы в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 13.08.2019г. (в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 20.08.2019г.) к Договору, что подтверждается подписанными Подрядчиком Актом о приемке выполненных работ № 1 от 15.10.2019г. (отчетный период 12.04.2019 по 15.10.2019, дата подписания 30.06.2020), Справкой о стоимости выполненных Работ и затрат № 1 от 15.10.2019 (отчетный период 12.04.2019 по 15.10.2019, дата подписания 30.06.2020) без мотивированных возражений (отказа).

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Ответчиком произведена оплата работ по дополнительному соглашению № 2 от 13.08.2019 к договору в размере 25 000 000 руб. 00 коп. (платежное поручение № 227 от 08.11.2019).

В рамках настоящего дела ко взысканию заявлены долг в размере 2 359 393 руб. 88 коп., что составляет пяти процентное гарантийное удержание от цены работ. 

Банковская гарантия выполнения гарантийных обязательств в отношении работ на сумму 5% от цены работ по указанной спецификации на выполнение работ (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 от 13.08.2019 к договору) предоставлена ответчику 22.09.2020 на сумму 2 359 393 руб. 88 коп.

Оплата 5% от цены работ по спецификациям на выполнение работ (приложение  № 1 к дополнительному соглашению № 2 от 13.08.2019 к договору) должна была быть произведена до 06.10.2020.

В соответствии с п. 14.1 договора в случае нарушения подрядчиком сроков оплаты выполненных работ субподрядчик вправе потребовать оплаты подрядчиком неустойки в размере 0,01% от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

Расчёт неустойки по состоянию на 19.11.2020 в 10 381 руб. 33 коп. проверен судом и признан обоснованным.

С учётом изложенного исковые требования признаны судом обоснованными как по праву, так и по размеру. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Акционерной компании "ИДЖ ИЧТАШ ОТОЙОЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" в пользу Открытого акционерного общества "ЗАВОД ПРОДМАШ" 2 359 393 руб. 88 коп. долга, 10 381 руб. 33 коп. неустойки с последующим начислением неустойки с 20.11.2020 по день оплаты долга и исходя из ставки 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, а также 34 849 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.