Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-26188/2019 «18» ноября 2019 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Чуриковой Н.В. при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тарасовой Е.М., 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110, 167 - 170, Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Обязать муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и  

эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) и муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства,  

ремонта и содержания (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30  

календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда передать публичному  

акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в соответствии с пунктом 2.1.2 договора  

 № 34001701008873 от 22.08.2017 следующую исполнительную и техническую  

документацию: 

- ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; - акт технической готовности электромонтажных работ; - ведомость изменений и отступлений от проекта; 

- ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному  

опробованию; -акт приемки-передачи оборудования в монтаж; - акт о выявленных дефектах оборудования; - ведомость смонтированного электрооборудования; 

- акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству  

электромонтажных работ; 

- акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных  

работ; - паспорт заземляющего устройства; - паспорт воздушной линии электропередачи; - акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств; - общий журнал работ; 

- журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов,  

конструкций и оборудования на строительстве; - акты рабочей и приемочной комиссии; - акты о приемке выполненных работ (унифицированные формы КС-2, КС-3); 

в соответствии с пунктом 2.1.8. договора № 34001701008873 от 22.08.2017 по акту  приема-передачи, составленному в двух экземплярах, передать утвержденную проектную  документацию на бумажном и электронном носителе, а также разрешение Ростехнадзора  на допуск объектов электроснабжения в постоянную эксплуатацию в соответствии с  Порядком организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию  энергоустановок.  

Взыскать с муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и  эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Юга» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3000  руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Взыскать с муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства,  ремонта и содержания (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного  акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3000 руб. расходов по оплате государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской  области.  

Судья Н.В. Чурикова