Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

гор. Москва

«03» февраля 2020 года                                    

Дело № А41-87188/19

              Резолютивная часть решения объявлена 20 января 2020 года.

              Полный текст решения изготовлен 03 февраля 2020 года. 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску ЗАО АК "ГЕОСТРОЙ" к ООО "ЮНИДЕЛЛ-СТРОЙ" о взыскании 6 336 168 руб. 36 коп.

При участии в судебном заседании - согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л:

Закрытое акционерное общество «Акционерная компания «ГЕОСТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИДЕЛЛ-СТРОЙ» о взыскании задолженности в размере 4 508 946 руб. 33 коп., неустойки в размере 1 827 222 руб. 03 коп.

В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ по договору № 58 от 26.05.2014, в результате чего образовалась взыскиваемая задолженность. Иск заявлен на основании ст.ст. 309, 310, 330, 314, 709, 720, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Явившийся в судебное заседание представитель истца заявленные требования поддержал. 

Представитель ответчика в судебном заседании не явился, отзыв на иск не представил.

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, заслушав доводы представителя истца, присутствовавшего в судебном заседании, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.      

Между ООО «ЮНИДЕЛЛ-СТРОЙ» (заказчик) и ООО «АК «ГЕОСТРОЙ» (подрядчик) заключен договор № 58 от 26.05.2014, согласно условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить на объекте «Троицкая слобода» земляной комплекс работ по устройству дорог, площадок, проездов и пр. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно п. 2.1 договора стоимость выполняемых работ по договору является приблизительной и определяется локальными сметными расчетами (приложение №2 к договору) и предварительно составляет 10 000 000 руб., включая НДС (по ставке 18%) в сумме 1 525 423 руб. 72 коп. 

Указанная цена договора не является окончательной и подлежит уточнению по фактическим объемам работ, подтвержденным Исполнительной документацией, на основании согласованных сметных расчетов. Изменения стоимости договора в размере 5% не является основанием для заключения дополнительного соглашения (п. 2.2 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 05.08.2014 предусмотрено выполнение дополнительных работ по устройству дорог, площадок, проездов и пр. на объекте «Троицкая слобода» на сумму 20 000 000 руб., включая НДС (по ставке 18 %). Указанная стоимость не является окончательной и подлежит уточнению по фактическим объемам работ, подтвержденным Исполнительной документацией.

Дополнительным соглашением № 2 от 31.10.2014 предусмотрено выполнение дополнительных работ по устройству дорог, площадок, проездов и пр. на объекте «Троицкая слобода» на сумму 10 000 000 руб., включая НДС (по ставке 18 %). Указанная стоимость не является окончательной и подлежит уточнению по фактическим объемам работ, подтвержденным Исполнительной документацией.

В соответствии с п. 4.1 договора расчет за выполненные подрядчиком работы с учетом возможных изменений, указанных договоре, производится заказчиком в течение 5-ти банковских дней на основании счета, выставленного подрядчиком после подписания сторонами Акта о приемке выполненных Работ по форме №КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Согласно п.п. 5.2-5.5 договора для осуществления приемки подрядчик не позднее 25-го числа текущего месяца предоставляет заказчику Акты приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат в 3-х экземплярах, журнал учета выполненных работ, исполнительную документацию на выполненные работы, счет-фактуру и счета на оплату. Приемка-передача документации осуществляется уполномоченными представителями сторон по доверенности.

Заказчик обязан подписать Акт в течение 5-ти рабочих дней или направить письменный мотивированный отказ. Если заказчик в указанный срок не предоставит подрядчику мотивированный отказ, работы считаются выполненными надлежащим образом, принятыми заказчиком по умолчанию и подлежащими оплате. При предоставлении заказчиком подрядчику мотивированного отказа от приемки выполненных работ в связи с обнаруженными недостатками сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Во исполнение своих обязательств по договору истец выполнил работы на сумму 40 008 946 руб. 33 коп, что подтверждается представленными актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами, подписанными со стороны ответчика. Претензий по качеству, срокам или объемам выполненных работ от ответчика не поступало.

Истцом направлены претензии в адрес ответчика с требованием оплатить задолженность. 

Поскольку оплаты в полном объеме от ответчика не поступило, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из статьи 310 ГК РФ следует, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда, одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Как предусмотрено положениями п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Из установленных судом обстоятельств следует, что истцом были выполнены работы, обусловленные договором, что подтверждается актом выполненных работ. Вместе с тем, до настоящего времени выполненные работы в полном объеме не оплачены.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений. 

 Учитывая изложенные обстоятельства, принимая во внимание, что ответчик не представил доказательств оплаты долга в указанном размере, суд считает требования истца о взыскании задолженности обоснованными, документально подтверждёнными и подлежащими удовлетворению.

Также  истцом начислена неустойка в размере 1 827 222 руб. 03 коп. за период с 06.12.2014 по 16.09.2019.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 7.1 договора предусмотрено, что за просрочку проведения расчета, предусмотренную договором, заказчик уплачивает подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора п. 2.1.

Материалами дела доказано ненадлежащее исполнение ответчиком денежных обязательств по договору. Заявленный к взысканию размер неустойки судом проверен и признан верным, в связи с чем исковые требования удовлетворяются в полном объеме.  

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ЮНИДЕЛЛ-СТРОЙ" в пользу ЗАО АК "ГЕОСТРОЙ" 4 508 946 руб. 33 коп. – задолженности, 1 827 222 руб. 03 коп. – неустойки (пени), 54 681 руб. – расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

СУДЬЯ

                          Т. В. СОРОЧЕНКОВА