Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город  Волгоград

«23»    марта   2022 г.

                                    Дело № А12-35691/2021

 

Резолютивная часть решения   объявлена 17 марта 2022 года.                                            

Мотивировочная часть  решения  изготовлена 23 марта     2022 года. 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены Викторовны,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией Александровной, 

при  участии в судебном заседании: 

от унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»  - ФИО1, доверенность от 10.01.2022 № 73;

рассмотрев  в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «МЕ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании штрафа;             

УСТАНОВИЛ:

унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области  с исковым заявлением  к  обществу с ограниченной ответственностью «МЕ» о взыскании штрафа по договору от 25.06.2021  № 1565801-В-СМР-2021 о проведении капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области Волгограда, расположенных по адресу: тер. Поселок Мирный,  21 (капитальный ремонт фундамента, крыши, фасада, системы: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения), тер. Поселок Мирный, 22 (капитальный ремонт фундамента, крыши, фасада, системы: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения) в размере 1 224 074 рублей 45 копеек.  

Ответчик  явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте рассмотрения дела считается извещенным надлежащим образом. 

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. 

Из материалов дела следует, унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «МЕ»  (подрядчик) заключен договор  от 25.06.2021  № 1565801-В-СМР-2021 подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно условиям которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить своими или привлеченными силами и средствами работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах Волгоградской области Волгограда, расположенных по адресу: тер. Поселок Мирный, 21 (капитальный ремонт фундамента, крыши, фасада, системы: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения), тер. Поселок Мирный,  22 (капитальный ремонт фундамента, крыши, фасада, системы: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения) в соответствии с условиями настоящего договора, проектно-сметной документацией, перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил).

В соответствии с пунктом 3.1 вышеупомянутого  договора весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется подрядчиком с даты заключения договора до 15 ноября 2021 года, в том числе: капитальный ремонт крыши, системы теплоснабжения - до 1 октября 2021 года.

В установленный настоящим пунктом срок выполнения работ по договору не включается срок на приемку выполненных работ заказчиком, установленный пунктом 8.2 настоящего договора.

Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, который оформляется подрядчиком в виде календарного графика производства работ и не могут превышать установленный пунктом 3.1 настоящего договора срок выполнения всех работ по объектам (приложение № 2 к договору).

Датой фактического окончания выполнения этапа работ по объекту считается дата подписания заказчиком КС-2, КС-3 в соответствии с пунктом 8.1. настоящего договора в отношении этапа работ.

Датой фактического завершения выполнения работ считается дата подписания заказчиком форм КС-2, КС-3 завершающего этапа работ по объекту, в соответствии с пунктом 8.1.настоящего договора.

Согласно  пункту 4.1 договора цена договора составляет 12 240 744 рублей 52 копейки согласно локальным сметным расчетам, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 к договору).

В соответствии с пунктами 8.1, 8.2  договора после окончания работ в полном объеме (этапа) работ подрядчик предъявляет заказчику с сопроводительным письмом следующие документы:  акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 в 3 (трех) экземплярах (в сшитом и опечатанном виде, подписанные со своей стороны, согласованные с организацией, осуществляющей строительный контроль, а также акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 в электронном виде); справки о стоимости выполненной работы и затрат по форме № КС-3 в 3 (трех) экземплярах;  техническую и исполнительную документацию в объеме, предусмотренном РД11- 02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения» в трех экземплярах, а также на электронном носителе информации (USB Flash) в формате PDF.

Приемка выполненных работ осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента получения заказчиком документации, указанной в пункте 8.1 настоящего договора, путем подписания актов выполненных работ в случае отсутствия замечаний.

Заказчик после получения указанных в пункте 8.1 документов проверяет выполненные работы, проверяет комплектность и правильность оформления исполнительной документации, проверяет правильность и соответствие примененных расценок договорной проектно-сметной документации, после чего передает проверенные акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 подрядчику для согласования их с органами местного самоуправления, а также лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

Подрядчик после согласования актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 с органами местного самоуправления, а также лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме возвращает подписанные документы заказчику до окончания сроков приемки выполненных работ, установленных настоящим пунктом договора.

В  силу пункта 13.1 договора расторжение договора допускается: в том числе  по инициативе заказчика в виде одностороннего расторжения договора. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях: 13.2.1.систематическое (2 раза и более) нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.

Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора с подрядчиком. Уведомление о расторжении договора должно содержать наименование сторон, реквизиты договора, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждающие (пункт 13.3 договора). 

Пунктом 13.4 договора предусмотрено, что в случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 13.2 настоящего договора, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости настоящего договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения требования заказчика. 

По утверждению истца, согласно отчетам организации, осуществляющей строительный контроль, подрядчик  работы выполняет с нарушением графиков производства работ по договору. В ходе проведения контрольных мероприятий 26.07.2021, 02.08.2021, 09.08.2021,16.08.2021, 23.08.2021 за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  фондом совместно с представителем общества с ограниченной ответственностью    «Орион-С» выявлены нарушения сроков  выполнения работ согласно календарным графикам производства работ. Заказчиком совместно с представителями  общества с ограниченной ответственностью «Орион-С», управляющей организации, администрации Краснооктябрьского района Волгограда, а также заместителем прокурора Краснооктябрьского района  Волгограда 28.07.2021,12.08.2021, 19.08.2021 выявлены нарушения  подрядчиком сроков выполнения работ согласно календарным графикам производства работ. Фондом в адрес подрядчика направлены требования от 03.08.2021 № 5548и и от 19.08.2021 № 6035и по многоквартирному дому тер. Поселок Мирный, 21; от 03.08.2021 № 5549и и от 19.08.2021 № 6036и по многоквартирному дому тер. Поселок Мирный,  22 о необходимости приступить к выполнению работ в соответствии с календарными графиками производства работ. Указанные обстоятельства подтверждаются служебной запиской № 1793сл от 23.08.2021.

В связи с нарушениями сроков производства работ, в соответствии с пунктом 13.2.1 договора, пунктом 226 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»  в адрес ответчика направлено уведомление от 24.08.2021 №6148и об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке.

Договор считается расторгнутым по истечении пятнадцати рабочих дней с даты направления уведомления.

В соответствии с условиями договора, уведомление направлено электронной почтой, одновременно на бумажном носителе посредством «Почты России». 15 сентября 2021 года договор от 25.06.2021  № 1565801-В-СМР-2021 расторгнут.

Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»  в адрес общества с ограниченной ответственностью «МЕ» направлено уведомление  с требованием об уплате штрафа в размере  1 224 074 рублей 45 копеек. 

Поскольку требование унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»  об уплате штрафа оставлено обществом без удовлетворения, фонд обратился в суд с требованиями по настоящему делу.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как указано выше, пунктом 13.4 договора предусмотрена ответственность подрядчика в случае расторжения договора заказчиком  в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 13.2 договора.

Материалами дела подтверждается и обществом не оспорено, что договорные обязательства в установленный договором срок обществом не исполнены, в связи с чем отказ фонда от исполнения договора на основании пункта 13.2 договора является правомерным.

На основании пункта 13.4 договора фондом начислен штраф.

Поскольку договор от 25.06.2021  № 1565801-В-СМР-2021 подряда расторгнут по инициативе заказчика ввиду невыполнения подрядчиком работ, суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика штрафа в размере 1 224 074 рублей 45 копеек.  

Согласно пункту 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МЕ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф по договору от 25.06.2021  № 1565801-В-СМР-2021 в размере 1 224 074 рублей 45 копеек,  а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 241 рубля.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области. 

СУДЬЯ                                                                                                                Е.В. Пономарева