100502_2822857 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Пермь 10.12.2019 года Дело № А50-10690/18 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гашевой Е.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента  имущественных отношений администрации города Перми (ОГРН  1025900528697, ИНН 5902502248)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Финпроект»  (ОГРН 1065904124846, ИНН 5904151980)  

третьи лица: 1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение «Гардарика» г. Перми (ОГРН 1025901509468, ИНН 5907013988)  2. акционерное общество «Стройпанелькомплект» (ОГРН 1025900888419,  ИНН 5904006358)  

об обязании устранить недостатки и взыскании штрафа 902 057 руб. 92  коп.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования Департамента имущественных отношений  администрации города Перми (ОГРН 1025900528697, ИНН 5902502248)  удовлетворить частично.  

2. Обязать ООО «Финпроект» не позднее 31.07.2020 года безвозмездно  устранить недостатки, выявленные в результате фактического осмотра  Объекта и отраженные в приложении к акту приема-передачи от 26.05.2016,  из них:  

-устранить провалы грунта на детских уличных игровых площадках. 

Обязать ООО «Финпроект» не позднее 31.07.2020 года безвозмездно  устранить недостатки, выявленные в ходе эксплуатации Объекта  (гарантийные обязательства), и отраженные в письме от 28.09.2017 № СЭД- 059-19-32-3096, из них:  

- устранить трещину лестничного пролета: стык между 2 и 3 этажами  левосторонней части Объекта;  

- устранить недостатки по приточно-вытяжной вентиляции следующих  помещений: групповая ячейка № 3 - раздевальная; пищеблок: гардероб для  персонала пищеблока, туалет для персонала пищеблока; постирочная:  помещение приема и сортировки грязного белья, стиральная, гладильная,  кладовая чистого белья; медицинский блок: медицинский кабинет,  процедурный кабинет, приемная изолятора, палата № 1; групповая ячейка   № 5: спальная; служебные и бытовые помещения второго этажа: помещение  завхоза, бухгалтерия, методический кабинет, кабинет заведующего;  групповая ячейка № 9: раздевальная;  

устранить протечку кровли: разрушение теплоизоляционного покрытия,  многочисленные подтеки, а именно следы замачивания в помещениях №№ 5,  6, 53, 64 на 1 этаже, помещениях №№ 5, 6, 8, 28, 29, 37, 49 на 2 этаже,  помещениях №№ 1, 8, 9, 16, 20, 28, 38, 40, 46, 47 на 3 этаже, в помещении № 3  технического этажа;  

- устранить трещины между плитами перекрытия: в помещениях №№ 1, 2,  3, 11, 13, 18, 20, 21, 23, 29, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 45 на 1 этаже; в помещениях   №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32,  33, 34, 37, 39, 40, 43, 47 на 2 этаже; в помещениях №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12,  14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 46 на 3 этаже;  

- устранить локальные трещины в помещении № 3 технического этажа; в  помещениях №№ 18, 23, 25, 26, 44 на 1 этаже; в помещениях №№ 12, 18, 26  на 2 этаже; в помещениях №№ 1, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 35 на 3  этаже;  

- устранить нарушения целостности изоляции воздуховода на крыше;  

- устранить дефекты отмостки: просадка конструкции отмостки, трещины  бетона отмостки шириной раскрытия до 5,0 мм;  

- устранить протечку козырька над главным входом: в зимний период  происходит образование наледи на стыке 2-х плит;  

- устранить недостатки в комнате уборочного инвентаря - помещение № 8  на 3 этаже: зафиксировано промерзание потолка и вентиляционных каналов  (висячая наледь на вентиляционном коробе, наледь на потолке);  

- устранить разрушение отделочного слоя в помещении № 8 на 3 этаже.  

3) Взыскать с ООО «Финпроект» в пользу Департамента имущественных  отношений администрации города Перми штраф в размере 50 000 руб. 00  коп.  

4) Взыскать с ООО «Финпроект» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 7 166 руб. 28 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Судья Ю.А. Лавров