АРБИТРАЖНЫЙ СУД  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А63-15765/2021

29 августа 2022 года

г. Ставрополь

Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2022 года

Решение в полном объёме изготовлено 29 августа 2022 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Ставрополь, к обществу с ограниченной ответственностью «Технология», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Михайловск, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципального автономного учреждения культуры «Ставропольский дворец культуры и спорта» города Ставрополя, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Ставрополь, об обязании ответчика в течение тридцати дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ по муниципальному контракту от 02.12.2019 № 81/19, в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ:

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Технология» (далее – ООО «Технология») об обязании ответчика в течение тридцати дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ по муниципальному контракту от 02.12.2019 № 81/19, а именно:

На территории Комсомольского пруда:

- на объекте Детский бассейн Б - устранить разрушение лакокрасочного покрытия (далее ЛКП) опор. Произвести ремонт террасной доски ступеней и бортов бассейна. Восстановить контур (террасной доски) со стороны рыбацкой зоны. Устранить разрушения ЛКП перил декинга;

на объекте Декинг Д2 (для прогулок, вдоль леса)- устранить разрушение ЛКП опор, разрушение террасной доски - 2 шт., разрушение ЛКП перил декинга, восстановить светодиодное освещение;

на объекте Пирс Ш (Южный пляж, рядом со спасательной вышкой) - устранить разрушение ЛКП опор, усилителей опор и несущей рамы.

на объекте Пирс П2 (средний на южном пляже) - устранить разрушение ЛКП опор, усилителей опор, несущей рамы, разрушение сварочных швов подушек опор и торца декинга. Произвести ремонт лестницы входа/выхода из воды - 1шт.

на объекте Пирс ПЗ (круглый со скамейками) - устранить разрушение ЛКП опор, усилителей, несущей рамы. Произвести ремонт лестниц входа/выхода из воды- 2 шт.

на объекте Декинг Д4 - устранить разрушение ЛКП опор и перил. Заменить  террасную доску - 3 шт. Произвести ремонт угла пирса.

на объекте Лодочный причал (в районе Декинг Д4) - устранить разрушение ЛКП опор, несущей рамы и причальных столбов. Произвести ремонт ступени лодочного проката.

на объекте Павильон проката - Устранить течь кровли. Устранить разрушение ЛКП деревянной отделки проката.

на объекте Пирс П5, П6 (ГИМС) - устранить разрушение ЛКП опор, выполнить ремонт террасной доски. Устранить разрушение крепежа алюминиевых лаг.

на объекте Туалетный модуль №1, 7 - устранить потерю геометрии ёмкости септика;

на объекте Туалетный модуль № 6 - устранить всплывание ёмкости септика;

на объекте Туалетный модуль № 2 - устранить разрушение ступеней;

-на объекте Туалетный модуль № 1,2,3,4,5,6,7 - устранить разрушение ЛКПоблицовки;

-на объекте Раздевалка №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - устранить разрушение ЛКП облицовки;

на объекте ФИО2 (административное здание) - устранить разрушение ЛКП перил, опор, усилителей и несущей рамы. Выполнить ремонт террасной доски и F-образной планки по контуру декинга. Выполнить ремонт двух подушек несущей рамы. Заменить крепления алюминевых лаг;

на объекте Пирс П4 (спасательная станция административное здание) - устранить разрушение ЛКП опор. Произвести ремонт террасной доски. Заменить F-образную планку;

на объекте места для сидения МС 2(напротив спорт площадок) - устранить разрушение ЛКП и конструкции от оползневых процессов;

на объекте GRS20 В Скамья со спинкой (18шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Bank Line 1 скамья(30шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка В 002 200 (2000*450*450)(10шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Лежак интегрированный в грунт (2100*2000*750) (5шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

-на объекте Скамья «Багдад» металлическая с деревянным настилом(18шт) -устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

-на объекте Шезлонг «Солнце» (304шт) - устранить разрушение ЛКП деревянныхэлементов;

на объекте Скамейка на готовое основание (габион)48*,066- устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Деревянные пляжные дорожки 5000*1000 (110п/м) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов, устранить коррозию и разрушение тросов крепления дорожек;

-на объекте Спасательная вышка ПМО-СВ-1,1(2шт) - устранить разрушение ЛКПдеревянных элементов;

на объекте  Скамейка  индивидуального  изготовления  с  закрытым каркасом 3450*770*450 (4шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов.

Устранить разрушения ступеней из архитектурного бетона лестницы Л1 для спуска в воду;

- Устранить вышелушивание окрасочного материала облицовочного материала по всему периметру парапета дамбы, подпорных стен;

-Привести в рабочее состояние на «Южном склоне»:

Систему Тверь 150x150мм, высота 9,0м, LED 2x56W - 3 шт.;

Систему Тверь 150x150мм, высота 9,0м, LED 1x56W - 3 шт.;

Светильник Аксель LED 28W 3000К - 15 шт.;

Торшер Торжок LED 17W ЗООК, высота 1,0м - 27 шт.

-Привести в рабочее состояние на «Северном склоне»:

Систему Тверь 150x150мм, высота 9,0м, LED lx56W - 5 шт.;

Светильник Аксель LED 28W ЗОООК - 14 шт.;

Торшер Торжок LED 17W ЗООК, высота 1,0м - 42 шт. (от здания ГИМС МЧС до детской площадки);

Прожектор Смайл LED 40W.

На территории Пионерского пруда:

на объекте Покрытие (деревянный настил, обшивка торцов лестницы и мест для сидения) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте BankLine 1 скамья со спинкой (15шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка В001 200 замкнутая R-внут. =2000мм (2шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка В001 200 замкнутая R-внут. =4000мм (2шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная со спинкой (кол-во спинок 2шт) R-внут.-5000мм (1шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная со спинкой (кол-во спинок 2шт) R-внут.-4500мм (1шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная. RBHyr-11000 Длина внут-4000(1шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная со спинкой (кол-во спинок 2 шт) RBHyr-l 1,5(1шт)

-устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

-на объекте Комбинация 637*441 *290 (1шт) - устранить растрескивание одногоэлемента (бревна) конструкции.

Привести в рабочее состояние 6  опор со светильниками h 9м, 29  опор со светильниками h1м, 15 светильников «Бавария» вдоль парковки и детских зон.

Определением от 06.07.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено  ООО «Строительный дорожный контроль».

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились.  

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил заявленные требования, просил обязать ответчика в течение тридцати дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ по муниципальному контракту от 02.12.2019 № 81/19, а именно:

На территории Комсомольского пруда:

- на объекте Детский бассейн Б - устранить разрушение лакокрасочного покрытия (далее ЛКП) опор. Произвести ремонт террасной доски ступеней и бортов бассейна. Восстановить контур (террасной доски) со стороны рыбацкой зоны. Устранить разрушения ЛКП перил декинга;

на объекте Декинг Д2 (для прогулок, вдоль леса)- устранить разрушение ЛКП опор, разрушение террасной доски - 2 шт., разрушение ЛКП перил декинга, восстановить светодиодное освещение;

на объекте Пирс Ш (Южный пляж, рядом со спасательной вышкой) - устранить разрушение ЛКП опор, усилителей опор и несущей рамы.

на объекте Пирс П2 (средний на южном пляже) - устранить разрушение ЛКП опор, усилителей опор, несущей рамы, разрушение сварочных швов подушек опор и торца декинга. Произвести ремонт лестницы входа/выхода из воды - 1шт.

на объекте Декинг Д4 - устранить разрушение ЛКП опор и перил. Заменить  террасную доску - 3 шт. Произвести ремонт угла пирса.

на объекте Лодочный причал (в районе Декинг Д4) - устранить разрушение ЛКП опор, несущей рамы и причальных столбов. Произвести ремонт ступени лодочного проката.

на объекте Павильон проката - Устранить течь кровли. Устранить разрушение ЛКП деревянной отделки проката.

на объекте Пирс П5, П6 (ГИМС) - устранить разрушение ЛКП опор, выполнить ремонт террасной доски. Устранить разрушение крепежа алюминиевых лаг.

на объекте Туалетный модуль №1, 7 - устранить потерю геометрии ёмкости септика;

на объекте Туалетный модуль № 6 - устранить всплывание ёмкости септика;

на объекте Туалетный модуль № 2 - устранить разрушение ступеней;

-на объекте Туалетный модуль № 1,2,3,4,5,6,7 - устранить разрушение ЛКПоблицовки;

-на объекте Раздевалка №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - устранить разрушение ЛКП облицовки;

на объекте ФИО2 (административное здание) - устранить разрушение ЛКП перил, опор, усилителей и несущей рамы. Выполнить ремонт террасной доски и F-образной планки по контуру декинга. Выполнить ремонт двух подушек несущей рамы. Заменить крепления алюминевых лаг;

на объекте Пирс П4 (спасательная станция административное здание) - устранить разрушение ЛКП опор. Произвести ремонт террасной доски. Заменить F-образную планку;

на объекте места для сидения МС 2(напротив спорт площадок) - устранить разрушение ЛКП и конструкции от оползневых процессов;

на объекте GRS20 В Скамья со спинкой (18шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Bank Line 1 скамья (30шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка В 002 200 (2000*450*450)(10шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Лежак интегрированный в грунт (2100*2000*750) (5шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

-на объекте Скамья «Багдад» металлическая с деревянным настилом(18шт) -устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

-на объекте Шезлонг «Солнце» (304шт) - устранить разрушение ЛКП деревянныхэлементов;

на объекте Скамейка на готовое основание (габион)48*,066- устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Деревянные пляжные дорожки 5000*1000 (110п/м) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов, устранить коррозию и разрушение тросов крепления дорожек;

-на объекте Спасательная вышка ПМО-СВ-1,1(2шт) - устранить разрушение ЛКПдеревянных элементов;

на объекте  Скамейка  индивидуального  изготовления  с  закрытым каркасом 3450*770*450 (4шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов.

Устранить разрушения ступеней из архитектурного бетона лестницы Л1 для спуска в воду;

- Устранить вышелушивание окрасочного материала облицовочного материала по всему периметру парапета дамбы, подпорных стен;

-Привести в рабочее состояние на «Южном склоне»:

Систему Тверь 150x150мм, высота 9,0м, LED 2x56W - 3 шт.;

Систему Тверь 150x150мм, высота 9,0м, LED 1x56W - 3 шт.;

Светильник Аксель LED 28W 3000К - 15 шт.;

Торшер Торжок LED 17W ЗООК, высота 1,0м - 27 шт.

-Привести в рабочее состояние на «Северном склоне»:

Систему Тверь 150x150мм, высота 9,0м, LED lx56W - 5 шт.;

Светильник Аксель LED 28W ЗОООК - 14 шт.;

Торшер Торжок LED 17W ЗООК, высота 1,0м - 42 шт. (от здания ГИМС МЧС до детской площадки);

Прожектор Смайл LED 40W.

На территории Пионерского пруда:

на объекте Покрытие (деревянный настил, обшивка торцов лестницы и мест для сидения) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте BankLine 1 скамья со спинкой (15шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка В001 200 замкнутая R-внут. =2000мм (2шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка В001 200 замкнутая R-внут. =4000мм (2шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная со спинкой (кол-во спинок 2шт) R-внут.-5000мм (1шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная со спинкой (кол-во спинок 2шт) R-внут.-4500мм (1шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная. RBHyr-11000 Длина внут-4000(1шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная со спинкой (кол-во спинок 2 шт) RBHyr-l 1,5(1шт)

-устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

-на объекте Комбинация 637*441 *290 (1шт) - устранить растрескивание одногоэлемента (бревна) конструкции.

Привести в рабочее состояние 6  опор со светильниками h 9м, 29  опор со светильниками h1м, 15 светильников «Бавария» вдоль парковки и детских зон.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. К рассмотрению приняты уточненные исковые требования.

Исследовав материалы дела, суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела 02.12.2019 между комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя (заказчик) и ООО «Технология» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 503-ЭА-И/19, в соответствии с которым подрядчик  принял на себя обязательства выполнить работы по благоустройству прилегающей территории Комсомольского пруда и Пионерского пруда в городе Ставрополе, а заказчик принять и оплатить работы.

Во исполнение условий контракта подрядчик выполнил, а заказчик принял и оплатил работы.

В соответствии с п.10.3 контракта определено, что подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

Истцом был произведен осмотр территории Комсомольского и Пионерского пруда, в ходе которого зафиксированы дефекты.

Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием безвозмездного устранения недостатков, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения истца в суд с иском об устранении недостатков работ.

Оценивая законность и обоснованность исковых требований, суд исходит из следующего. 

В силу пункта 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

Согласно положениям пункта 1 статьи 737 ГК РФ в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 названного Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

Пунктом 1 статьи 723 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Положения названных норм предусматривают презумпцию вины подрядчика (застройщика) за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока.

Согласно пункту 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 2 статьи 755 ГК РФ ).

По спору о ненадлежащем исполнении подрядчиком гарантийных обязательств бремя предоставления доказательств отсутствия вины подрядчика в возникновении недостатков, в том числе посредством доказывания причин образования спорных дефектов (отсутствия причинно-следственной связи), относится на подрядчика как лицо, принявшее на себя обязательство обеспечить соответствие результата выполненных работ требованиям качества (статьи 721, 722, 724, 755 ГК РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2016 №305-ЭС15-16906, в случае выявления недостатков работ в период гарантийного срока бремя доказывания причин их возникновения, исключающих ответственность подрядчика за дефекты, возлагается на последнего.

Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 ГК РФ способами, а также иными способами, предусмотренными законом. Одним из способов защиты гражданских прав является требование о присуждении к исполнению обязанностей в натуре.

Принимая во внимание изложенное, бремя доказывания обстоятельств того, что выявленные недостатки выполненных работ являются следствием неправильной эксплуатации автомобильной дороги, либо последствием нормального износа и иных означенных в данной норме обстоятельств, лежит на ответчике.

Материалами дела подтверждается, что дефекты выявлены в течение гарантийного срока, что отражено в акте выездного осмотра территории от 31.08.2021.

Из материалов дела следует, что истцом в адрес ответчика направлялась претензия от 16.06.2021, в которой содержалось предложение истца по принятию мер по устранению выявленных дефектов, однако до настоящего времени требования истца в полном объеме не исполнены.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному  на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (п.2 ст. 71 АПК РФ).

При рассмотрении дела установлен факт наличия недостатков работ, выполненных ответчиком которые зафиксированы в акте. При этом ответчиком до настоящего времени работы по устранению недостатков выполненных работ не проведены.

Оценив представленные в дело доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд полагает, что исковые требования  обоснованы, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ возлагаются на ответчика, виновного в доведении спора до суда, в полном объеме. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

принять уточненные требования истца.

Уточненные исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Технология», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Михайловск устранить в течение тридцати дней с момента вступления решения суда в законную силу недостатки работ по муниципальному контракту от 02.12.2019 № 81/19, а именно:

На территории Комсомольского пруда:

- на объекте Детский бассейн Б - устранить разрушение лакокрасочного покрытия (далее ЛКП) опор. Произвести ремонт террасной доски ступеней и бортов бассейна. Восстановить контур (террасной доски) со стороны рыбацкой зоны. Устранить разрушения ЛКП перил декинга;

на объекте Декинг Д2 (для прогулок, вдоль леса)- устранить разрушение ЛКП опор, разрушение террасной доски - 2 шт., разрушение ЛКП перил декинга, восстановить светодиодное освещение;

на объекте Пирс Ш (Южный пляж, рядом со спасательной вышкой) - устранить разрушение ЛКП опор, усилителей опор и несущей рамы.

на объекте Пирс П2 (средний на южном пляже) - устранить разрушение ЛКП опор, усилителей опор, несущей рамы, разрушение сварочных швов подушек опор и торца декинга. Произвести ремонт лестницы входа/выхода из воды - 1шт.

на объекте Декинг Д4 - устранить разрушение ЛКП опор и перил. Заменить  террасную доску - 3 шт. Произвести ремонт угла пирса.

на объекте Лодочный причал (в районе Декинг Д4) - устранить разрушение ЛКП опор, несущей рамы и причальных столбов. Произвести ремонт ступени лодочного проката.

на объекте Павильон проката - Устранить течь кровли. Устранить разрушение ЛКП деревянной отделки проката.

на объекте Пирс П5, П6 (ГИМС) - устранить разрушение ЛКП опор, выполнить ремонт террасной доски. Устранить разрушение крепежа алюминиевых лаг.

на объекте Туалетный модуль №1, 7 - устранить потерю геометрии ёмкости септика;

на объекте Туалетный модуль № 6 - устранить всплывание ёмкости септика;

на объекте Туалетный модуль № 2 - устранить разрушение ступеней;

-на объекте Туалетный модуль № 1,2,3,4,5,6,7 - устранить разрушение ЛКПоблицовки;

-на объекте Раздевалка №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - устранить разрушение ЛКП облицовки;

на объекте ФИО2 (административное здание) - устранить разрушение ЛКП перил, опор, усилителей и несущей рамы. Выполнить ремонт террасной доски и F-образной планки по контуру декинга. Выполнить ремонт двух подушек несущей рамы. Заменить крепления алюминевых лаг;

на объекте Пирс П4 (спасательная станция административное здание) - устранить разрушение ЛКП опор. Произвести ремонт террасной доски. Заменить F-образную планку;

на объекте места для сидения МС 2(напротив спорт площадок) - устранить разрушение ЛКП и конструкции от оползневых процессов;

на объекте GRS20 В Скамья со спинкой (18шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Bank Line 1 скамья (30шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка В 002 200 (2000*450*450)(10шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Лежак интегрированный в грунт (2100*2000*750) (5шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

-на объекте Скамья «Багдад» металлическая с деревянным настилом(18шт) -устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

-на объекте Шезлонг «Солнце» (304шт) - устранить разрушение ЛКП деревянныхэлементов;

на объекте Скамейка на готовое основание (габион)48*,066- устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Деревянные пляжные дорожки 5000*1000 (110п/м) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов, устранить коррозию и разрушение тросов крепления дорожек;

-на объекте Спасательная вышка ПМО-СВ-1,1(2шт) - устранить разрушение ЛКПдеревянных элементов;

на объекте  Скамейка  индивидуального  изготовления  с  закрытым каркасом 3450*770*450 (4шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов.

Устранить разрушения ступеней из архитектурного бетона лестницы Л1 для спуска в воду;

- Устранить вышелушивание окрасочного материала облицовочного материала по всему периметру парапета дамбы, подпорных стен;

-Привести в рабочее состояние на «Южном склоне»:

Систему Тверь 150x150мм, высота 9,0м, LED 2x56W - 3 шт.;

Систему Тверь 150x150мм, высота 9,0м, LED 1x56W - 3 шт.;

Светильник Аксель LED 28W 3000К - 15 шт.;

Торшер Торжок LED 17W ЗООК, высота 1,0м - 27 шт.

-Привести в рабочее состояние на «Северном склоне»:

Систему Тверь 150x150мм, высота 9,0м, LED lx56W - 5 шт.;

Светильник Аксель LED 28W ЗОООК - 14 шт.;

Торшер Торжок LED 17W ЗООК, высота 1,0м - 42 шт. (от здания ГИМС МЧС до детской площадки);

Прожектор Смайл LED 40W.

На территории Пионерского пруда:

на объекте Покрытие (деревянный настил, обшивка торцов лестницы и мест для сидения) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте BankLine 1 скамья со спинкой (15шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка В001 200 замкнутая R-внут. =2000мм (2шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка В001 200 замкнутая R-внут. =4000мм (2шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная со спинкой (кол-во спинок 2шт) R-внут.-5000мм (1шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная со спинкой (кол-во спинок 2шт) R-внут.-4500мм (1шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная. RBHyr-11000 Длина внут-4000(1шт) - устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

на объекте Скамейка радиусная со спинкой (кол-во спинок 2 шт) RBHyr-l 1,5(1шт)

-устранить разрушение ЛКП деревянных элементов;

-на объекте Комбинация 637*441 *290 (1шт) - устранить растрескивание одногоэлемента (бревна) конструкции.

Привести в рабочее состояние 6  опор со светильниками h 9м, 29  опор со светильниками h1м, 15 светильников «Бавария» вдоль парковки и детских зон.

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «Технология», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Михайловск в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины по иску.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                  Н.В. Демкова