Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-106446/17-143-966

11 сентября  2017 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена    04 сентября 2017 года

Мотивированное решение изготовлено    11 сентября 2017 года

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Гедрайтис О.С. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в предварительном судебном заседании дело по иску 

ООО «Армадастрой» (ИНН 

<

***>, 127349, 

<

...>)  

к ГБУ «Жилищник района Свиблово» (ИНН 

<

***>, 129343, 

<

...>)

о взыскании 2.981.134 руб. 98 коп. задолженности и 232.558 руб. 84 коп. неустойки.

при участии: 

от истца: не явка, извещен

от ответчика: ФИО2 дов. от 29.07.2017

УСТАНОВИЛ:

с учетом уточнений исковых требований ООО «Армадастрой» просит арбитражный суд взыскать с ГБУ «Жилищник района Свиблово» 2.981.134 руб. 98 коп. задолженности, 232.558 руб. 84 коп. неустойки по государственным контрактам №ГК-562/2016 от 30.08.2016, №ГК-672/2016 от 26.09.2016.

 Истец в судебное заседание не явился, однако в соответствии с ст.123 АПК РФ считается надлежащим образом извещенным о дате, времени и месте судебного разбирательство, в связи с чем арбитражным судом принято решение о рассмотрении дела в порядке ст.156 АПК РФ.

Оценив материалы дела, выслушав представителя  ответчика, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком в 2016 году были заключены два государственных контракта на выполнение подрядных работ в районе Свиблово города Москвы: 30.08.2016 государственный контракт №ГК-562/2016 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Свиблово, общая сумма контракта составляет - 2 836 944 руб. 00 коп., в т.ч. НДС- 432 754 руб. 17 коп., 26.09.2016 государственный контракт №ГК-672/2016 на выполнение работ по устройству игрового комплекса по адресу: Лазоревый пр. д.20, общая сумма контракта составляет - 244 190 руб. 98 коп., в т.ч. НДС- 37 249 руб. 47 коп.

В соответствии с п. 2.6. госконтрактов расчет за выполненные работы производится ответчиком (Заказчиком) после полного завершения работ и обязательства по оплате стоимости этапа считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость этапа, с лицевого счета ответчика (Заказчика).

В соответствии с п. 4.7. госконтрактов подписанный ответчиком и Подрядчиком (истцом) Акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный истцом (Подрядчиком) ответчику счет на оплату Цены госконтракта являются основанием для оплаты истцу выполненных работ.

По контрактам были составлены акты сдачи-приемки выполненных работ и предъявлены истцом (подрядчиком) ответчику для оплаты.

Общая сумма выполненных и принятых ответчиком работ по государственному контракту №ГК-562/2016 от 30.08.2016 составляет 2 836 944 руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%)-432 754 руб. 17 коп., в связи с чем,  заказчику (ответчику) был выставлен счет на вышеуказанную сумму.

09.12.2016 по государственному контракту №ГК-562/2016 от 30.08.2016 произведена частичная оплата в размере 100 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением №2167, задолженность составляет 2 736 944 руб. 00 коп. 

Общая сумма выполненных и принятых ответчиком работ по государственному контракту №ГК-672/2016 от 26.09.2016 составляет цену контракта 244 190 руб. 98 коп., в т.ч. НДС (18 %) - 37 249 руб. 47 коп. В связи с чем, заказчику (ответчику) был выставлен счет №14 от 25.10.2016 на вышеуказанную сумму, которыей до настоящего времени не оплачен.

Таким образом, в настоящее время по государственным контрактам №ГК-562/2016 от 30 августа 2016 и .№ГК-672/2016 от 26.09.2016 за ГБУ г. Москвы «Жилищник района Свиблово» перед «АРМАДАСТРОЙ» имеется задолженность за выполненные подрядные работы в районе Свиблово города Москвы на общую сумму 2 981 134 руб.98 коп., что ответчиком подтверждается.

В порядке ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Учитывая вышеизложенное, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст.310 ГК РФ не допускается, следовательно, требование истца о взыскании задолженности в размере 2.981.134 руб. 98 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Кроме того, истец просит взыскать сумму пени, предусмотренную п.7.2 контрактов, что по расчету истца составляет 232.558 руб. 84 коп.

Размер неустойки судом проверен, признан правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства, в связи с чем, подлежит взысканию с ответчика в судебном порядке.

Учитывая, что требование истца подтверждено представленными доказательствами, оно подлежит удовлетворению в заявленной сумме в судебном порядке.

Ответчик исковое заявление не оспорил, в письменном отзыве подтвердил наличие задолженности.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в  судебном порядке.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 702, 711, 720, 740, 746  ГК РФ, ст. ст. 41, 70, 110, 167-170, 176  АПК РФ, суд                       РЕШИЛ:

Взыскать с  ГБУ «Жилищник района Свиблово» (ИНН 7716763704, 129343, г. Москва, Берингов пр-д, д. 1) в пользу  ООО «Армадастрой» (ИНН 9715236811, 127349, г. Москва, ул. Лескова, д. 8)  2 981 134 (два миллиона девятьсот восемьдесят одну тысячу сто тридцать четыре) руб. 98 коп. задолженности и   232 558 (двести тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб.  84 коп.  неустойки.   

    Взыскать с ГБУ «Жилищник района Свиблово» (ИНН 

<

***>, 129343, 

<

...>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственной пошлины  в размере  39068 (тридцать девять тысяч шестьдесят восемь) руб.00 коп. 

               Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца  со дня  принятия.

СудьяО.С. Гедрайтис