116_26604362 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-63637/20 

116-482 

29 сентября 2020 г. 

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П.,  

при ведении протокола судебного заседания, секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ГБУ  "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ" ( ОГРН 

<

***>)  

к ООО "СТРОЙДИЗАЙН" ( ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)   о взыскании 418 486,66 руб и обязании совершить определенные действия.  

при участии представителей от истца (заявителя) – согласно протокола судебного заседания от ответчика (заинтересованного лица) – 

РЕШИЛ:

Обязать ООО « СТРОЙДИЗАЙН» ( ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в  пользу ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ" ( ОГРН  

<

***>) предоставить отчетную документацию согласно « технического  задания « в соответствии с п.3.8 контракта № 72/2018 от 14.01.2019г. ( фотофиксация,  журнал производства работ , паспорта на МАФ, схема производства работ) по всем  выполненным адресам , а также произвести , в рамках гарантийных обязательств по  Контракту , работы по следующим адресам : 1. Мкр. Северное Чертаново , д. 7 , корп.  «Б» : восстановить горизонтальность ступеней, произвести замену бортового камня;  2. Сумской пр., д. 3 , корп. 2 –осуществить перекладывание брусчатого покрытия на  площади около 20м2 ; 3. Сумской пр., д. 5, корп. 2 –осуществить перекладывание  брусчатого покрытия на площади около 50м2, восстановить бетонировку бортового  камня; 4. Сумской пр., д. 31 корп.2 –восстановить сопряжение бортового камня с  асфальтобетонным покрытием , убрать строительный мусор, устранить проседание  бортового камня около 5м.п.; 5. ФИО2 , д. 14, корп. 1 : осуществить  частичную замену бортового камня, осуществить ремонт поврежденных участков  асфальтобетонного покрытия, осуществить ремонт поврежденных участков  искусственного ( синтетического) покрытия , бетонирование опор ограждения,  

восстановить травяной покров на участках общей площадью около 100м2; 6. Ул.  Чертановская , д. 16, корп.1 –осуществить ремонт поврежденных участков  асфальтобетонного покрытия, осуществить ремонт поврежденных участков  асфальтобетонного покрытия с промазыванием швов; 7. Ул. Чератновская , д. 11,  корп.1, д. 13 : -осуществить ремонт поврежденных участков асфальтобетонного  покрытия на площади до 2м2.  

Взыскать с ООО "СТРОЙДИЗАЙН" ( ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в  пользу ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ" ( ОГРН  

<

***>) штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту №  72/2018 от 14.01.2019г. в размере 403.926 рублей , штраф за ненадлежащее  исполнение гарантийных обязательств в размере 14.560 рублей , расходы по  госпошлине 17.370 рублей.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья: А.П. Стародуб