АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-6109/2023

25 июля 2023 г.

г. Севастополь

 

 Резолютивная часть решения оглашена 18.07.2023 

 Решение изготовлено в полном объеме 25.07.2023 

Арбитражный суд города Севастополя в составе  председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

государственного казенного учреждения города Севастополя  "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, Севастополь)  

к обществу с ограниченной ответственностью "ССК" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, Нижний Новгород),  

о взыскании, 

при участии в судебном заседании представителей от истца –  ФИО2 по доверенности от 16.12.2022 № 82,  

УСТАНОВИЛ:

государственное казенное учреждение города Севастополя  "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" обратилось в  Арбитражный суд города Севастополя с иском к обществу с ограниченной  ответственностью "ССК" о взыскании 95548,90 рублей неустойки по  государственному контракту от 22.08.2019 № 082-СМР-19.  

Код доступа к материалам дела: 

 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте  судебного разбирательства, отзыв на иск не представил, явку представителей  в судебное заседание не обеспечил, ходатайств не заявлял.  

Ответчик отзыв на иск не представил, иск не оспорил, ввиду чего  ответчик несет риск наступления последствий совершения или несовершения  ими процессуальных действий в порядке ч. 2 ст. 9 АПК РФ.  

Учитывая отсутствие возражений сторон против продолжения  рассмотрения дела в судебном разбирательстве арбитражного суда первой  инстанции, суд в соответствии с п. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, п. 27 постановления Пленума Высшего  Арбитражного суда РФ № 65 от 20.12.2006, завершил предварительное  заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции.  

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные  требования в полном объеме.  

Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения представителя  истца, оценив представленные доказательства, по существу заявленных  требований приходит к следующему.  

Как видно из материалов дела, 31.03.2021 между государственным  казенным учреждением города Севастополя "Управление по эксплуатации  объектов городского хозяйства" (далее – Заказчик) и Обществом с  ограниченной ответственностью "ССК" (далее – подрядчик) в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд», и иными нормативными правовыми актами о  контрактной системе в сфере закупок, заключен государственный контракт  от 22.08.2019 № 082-CMP-19 на выполнение строительно-монтажных работ  по объекту: «Ремонт и комплексное благоустройство пешеходной сети  Гагаринского района города Севастополя: - от пр. Юрия Гагарина д. 5/3 до  ул. Вакуленчука д. 25Б (остановка ул. Меньшикова); - от ул. Вакуленчука д.  18Б (остановка ул. Меньшикова) до ул. Вакуленчука д. 36/3 (остановка  

 

Студгородок); - от ул. Вакуленчука д. 36/3 (остановка Студгородок) до ул.  Красивая; - от ул. Красивая до ул. Адмирала ФИО3 д. 30; - от  автомобильного моста на ул. Пожарова до пр. Юрия Гагарина д. 5/3; - от пр.  Юрия Гагарина д. 11 до пр. Юрия Гагарина д. 50; - от ул. Дмитрия Ульянова  д. 1 до ул. Ефремова (по пр-т Юрия Гагарина); - от ул. Адмирала ФИО3 д.  30 до площади Комбата ФИО4» (далее - Контракт).  

Пунктом 1.1 Контракта установлено, что Подрядчик обязуется в сроки,  качественно и на условиях Контракта выполнить строительно-монтажные  работы по объекту.  

Сроки выполнения работ - в течение 120 дней с момента заключения  Контракта, т.е. 20.12.2019 (п. 4.1 Контракта).  

Цена Контракта составляет: 67 375 120 ,00 руб. (п. 2.3 Контракта). 

В соответствии с и. 6.10 Контракта датой (моментом) надлежащего  исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является дата  подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ согласно  требованиям настоящего раздела Контракта.  

Контракт расторгнут по соглашению сторон 26.01.2021, сумма  выполненных работ составила 54 657 172,40 руб., неисполненными остались  обязательства на сумму 12 717 947,60 руб.  

За ненадлежащее исполнение обязательств по контракту истец  начислил ответчику неустойку в размере 95 548,90 рублей.  

27.01.2020 (исх. № 07/231) и 16.09.2022 (исх. № 07/1925) в адрес  ответчика направлены требования об оплате неустойки, которые оставлены  без ответа, что послужило основанием для обращения в суд.  

Правоотношения сторон в данном споре регулируются нормами  параграфа 4 главы 30 ГК РФ и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В соответствии со статьей 309, пунктом 1 статьи 310 Гражданского  кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны  

 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства  и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно  предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими  законами или иными правовыми актами.  

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что  выполнение работ по контракту ответчиком выполнено с просрочкой, в связи  с чем, к обществу подлежат применению меры гражданско-правовой  ответственности в виде начисления пени.  

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,  удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией,  задатком, обеспечительным платежом и другими способами,  предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).  

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

По смыслу статьи 330 ГК РФ неустойку должник обязан уплатить в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения.  

Согласно пункту 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44- ФЗ) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом  

 

срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере,  определенном в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты  пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

В соответствии с пунктом 2 утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 Правил списания сумм неустоек  (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но  не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим  исполнением обязательств, предусмотренных контрактом списание  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)  осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в  полном объеме, за исключением контрактов, по которым:  

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о  сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы  товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг,  предусмотренных контрактами;  

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в  связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика,  исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения  контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;  

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном  объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на  строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта  поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине  возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта  обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения  

 

условий, в связи с введением политических или экономических санкций  иностранными государствами, совершающими недружественные действия в  отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или  российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением  иностранными государствами, государственными объединениями и (или)  союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями  иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов  мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).  

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил списание начисленных  и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком  в следующих случае и порядке:  

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов,  пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет  списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за  исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего  пункта;  

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов,  пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20  процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии  уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов,  пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д"  настоящего пункта;  

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие  неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по  контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств,  повлекших невозможность исполнения контракта в связи с  распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет  списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);  

 

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие  неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по  контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на  строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта  поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с  даты заключения контракта до даты представления предусмотренного  абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства  Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в  некоторые акты Правительства Российской Федерации" предложения  поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий  контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные  ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении  такого контракта, с приложением информации и документов,  обосновывающих такое предложение;  

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие  неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по  контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств,  повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением  санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет  списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).  

Общая сумма пени, заявленная истцом, составляет 95548,18 рублей,  что составляет 0,14 % от цены Контракта (67 375 120 ,00 рублей).  

Таким образом, заказчик обязан списать начисленную неустойку,  составляющую менее чем 5% от цены контракта.  

Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для  отказа в иске.  

Применительно к пункту 40 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

 

муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 28.06.2017), списание неустоек (штрафов, пеней)  является обязанностью заказчика.  

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2017  N 302-ЭС17-13455 указано, что даже наличие спора относительно  начисленной неустойки (штрафа) не может трактоваться как условие,  препятствующее списанию неустойки (штрафа), поскольку подобные  антикризисные меры были установлены специально для защиты  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных  (муниципальных) контрактов.  

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного  Суда Российской Федерации от 14.08.2018 N 305-ЭС18-5712, порядок  списания начисленных сумм неустоек направлен на установление  действительного размера задолженности и урегулирование споров между  сторонами.  

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по  контрактам суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для  применения мер государственной поддержки.  

Согласно определению Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2023 N 301-ЭС22-20431 пункт 7 Правил N 783 (согласно которому в  случае если подрядчик не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной  суммы неустоек, принятие решения о ее списании не допускается) относится  к порядку и случаю осуществления непосредственно заказчиком списания  сумм неустоек (штрафов, пеней), но он не может быть истолкован как  препятствующий суду при наличии спора заказчика и поставщика  (подрядчика, исполнителя) о размере начисленной и неуплаченной суммы  неустоек (штрафов, пеней) применить подпункт "а" пункта 3, пункт 11  Правил N 783 и признать за соответствующим лицом право на ее списание.  Наличие между заказчиком и подрядчиком спора об основаниях начисления  неустойки (пени, штрафа), ее размере не может являться основанием для  

 

отказа в защите права, которое является нарушенным, и неприменения судом  предусмотренных законодательством для определенных случаев  антикризисных мер.  

Учитывая, что контракт от 31.03.2022 № 9-ЕП-2022 исполнен  подрядчиком в полном объеме и размер начисленной неустойки за  нарушение срока выполнения работ не превышает 5% цены контракта,  Правила № 783 подлежат применению в рассматриваемой ситуации,  вследствие чего неустойка в сумме 95548,18 рублей подлежит списанию и не  может быть взыскана в судебном порядке.  

Согласно статье 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Поскольку истцу при принятии искового заявления была предоставлена  отсрочка по уплате госпошлины, при вынесении решения об отказе в  удовлетворении иска с истца в доход федерального бюджета подлежит  взысканию 3822 рублей государственной пошлины – исходя из размера  заявленных требований, а также ставок госпошлины, установленных статьёй  333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.  

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 –  170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с государственного казенного учреждения города  Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Севастополь), в доход  федерального бюджета 3 822 рублей государственной пошлины.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня  его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано  

 

через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:50:00

Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич