АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-2131/2020

г. Белгород

21 сентября 2022 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО  "БелЗНАК-Прохоровка" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО  "СТРОЙОТДЕЛКОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об уменьшении стоимости выполненных работ, взыскании 2 155 863 руб. 47 коп., 

по встречному иску ООО "СТРОЙОТДЕЛКОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ООО "БелЗНАК-Прохоровка" (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору подряда № 1 от 18.02.2019 г. в размере  980 810 руб. 85 коп., пени за период с 16.10.2019 г. по 03.02.2022 г. в размере 825 842 руб.  74 коп. с последующим ее начислением по день фактического исполнения денежного  обязательства,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: ФИО2, удостоверение № 2848, доверенность № 4 от 10.01.2022;  

от ответчика: ФИО3, генеральный директор, паспорт, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования ООО "БелЗНАК-Прохоровка" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО "СТРОЙОТДЕЛКОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "БелЗНАК-Прохоровка" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) стоимость устранения недостатков, связанных с некачественным  выполнением работ в рамках договора подряда № 1 от 18.02.2019 г. в размере 1 941 926  руб. 40 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 30 427 руб., расходы  на оплату проведенной по делу экспертизы в размере 27 023 руб. 29 коп., всего 1 999 376  руб. 69 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Встречные исковые требования ООО "СТРОЙОТДЕЛКОМПЛЕКТ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО "БелЗНАК-Прохоровка" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу ООО "СТРОЙОТДЕЛКОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  сумму основного долга в размере 980 810 руб. 85 коп., неустойку за период с 16.10.2019  

по 31.03.2022 в размере 880 768 руб. 14 коп., расходы по уплате государственной  пошлины в размере 31 067 руб., всего 1 892 645 руб. 99 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

В результате зачета взысканных по делу денежных сумм взыскать с ООО  "СТРОЙОТДЕЛКОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  "БелЗНАК-Прохоровка" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 106 730 руб. 70 коп.  

Взыскать с ООО "БелЗНАК-Прохоровка" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 549 руб. государственной пошлины за рассмотрение  встречного иска судом первой инстанции.  

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 3:36:27

 Кому выдана Петряев Алексей Васильевич