Арбитражный суд Калининградской области  Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040  

http://kaliningrad.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград Дело № А21-10568/2024 

«23» октября 2024 года  

Резолютивная часть решения объявлена «21» октября 2024 года  Решение изготовлено в полном объеме «23» октября 2024 года  

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ЭТНА» к  Администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный  округ Калининградской области» о взыскании 533 990,22 рублей  

при участии в заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от ответчика: н/я установил. 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНА» обратилось в суд с иском  к Администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный  округ Калининградской области» о взыскании неустойки в сумме 533 990,22 рублей.  

 Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.  Судом установлено. 

 Между сторонами был заключен муниципальный контракт от 24.09.2021 года   № 0135300003821000137.  

 По условиям контракта ООО «ЭТНА» (подрядчик) обязалось выполнить  работы по объекту: «Ремонт дорожного полотна от ул. Пионерской по ул. Гагарина в  г. Зеленоградске» в соответствии со сметной документацией, а Администрация  муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ  Калининградской области» (заказчик) обязалась работы принять и оплатить.  

 В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена согласована 1 825 805 рублей.  

В соответствии с пунктом 3.9 контракта оплата за работы производится в  течение 30 дней с даты подписания документов о приемке работ.  

Разделом 8.6 договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение  обязательств по контракту.  

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 25.12.2023 года по  делу № А21-16121/2022 с Администрации муниципального образования  «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в пользу ООО  «ЭТНА» по муниципальному контракту от 24.09.2021 года № 0135300003821000137  взысканы: основной долг в сумме 1 577 985,29 рублей, неустойка по положениям  

пункта 8.6.2 контракта за период с 21.09.2022 года по 31.12.2022 года в сумме  39 844,12 рублей.  

 Решение вступило в силу 12.03.2024 года, исполнено 18.07.2024 года. 

 По настоящему делу подрядчик просил взыскать неустойку по положениям  пункта 8.6.2 контракта за период с 01.01.2023 года по 18.07.2024 года в сумме  533 990,22 рублей (1 577 985,29 х 18% х 564 : 300).  

В отзыве заказчик требования не признал, указав, что исполнительный лист  поступил для исполнения 22.04.2024 года, оплата произведена 18.07.2024 года в  сроки, установленные частью 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса.  

Суд полагает, что требования подрядчика подлежат удовлетворению по  следующим основаниям.  

 В рассматриваемом случае обязанность заказчика (администрации  муниципального образования) по перечислению денежных средств возникла в связи с  неисполнением гражданско-правовой обязанности, а не вследствие причинения вреда  (деликта). Следовательно, эти обязательства не регулируются положениям статьи  242.2 БК РФ, касающиеся особенностей исполнения судебных актов по искам к  публично-правовым образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину  или юридическому лица в результате незаконных действий (бездействий)  государственных и муниципальных органов.  

Заказчик является стороной гражданского правоотношения, обязанной  обеспечивать и осуществлять оплату по контракту в соответствии с его условиями.  

Расчет неустойки проверен судом, признан обоснованным.  

Требования подрядчика в заявленной сумме подлежат удовлетворению на  основании положений статьи 330 ГК РФ, положений контракта.  

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Администрации муниципального образования «Зеленоградский  муниципальный округ Калининградской области» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ЭТНА» неустойку в сумме 533 990,22 рублей, расходы по  госпошлине в сумме 13 680 рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный  апелляционный суд.  

Судья О.Н.Шкутко