РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   26 марта 2025 года   

по делу А33-1121/2025

Красноярск 

«26» марта 2025 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить (изменив срок для исполнения обязательств).

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в течение 3 месяцев с даты вступления настоящего судебного акта в законную силу исполнить свои обязательства, предусмотренные условиями заключенного с ответчиком договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, осуществив технологическое присоединение к электрической сети ПАО «Россети Сибирь» объекта СНТ «Ветеран-10», объекта «ТП для электроснабжения садовых домов», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Красноярский край, Березовский район, СНТ «Ветеран-10», кадастровый номер земельного участка 24:04:0000000:8179 с учетом следующих характеристик:

? максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;

? категория надежности третья;

? класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ;

? максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует,

а именно, осуществив:

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств СНТ «Ветеран-10»;

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- строительство ЛЭП 6 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, являющихся приложением к договору до границы, установленной правоустанавливающими документами СНТ «Ветеран-10». Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 6 кВ Тип и место установки разъединителя;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012           № 442).

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить.

В случае неисполнения решения суда в части неимущественного требования в полном объёме в течение 3 месяцев с даты вступления настоящего судебного акта в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран-10 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, пгт. Берёзовка Красноярского края) судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до фактического исполнения решения суда.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран-10 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, пгт. Берёзовка Красноярского края) 50 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

ФИО1