АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050 пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Томск                                                                                            Дело №А67-7306/2017

21.03.2018

Арбитражный суд Томской области в составе судьи А.В. Хлебникова, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Сибмагистраль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 284 592 руб. 31 коп. неустойки, 841 198 руб. 58 коп. штрафа по муниципальному контракту №32 от 07.07.2016г.,

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Сибмагистраль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Муниципальному образованию "Томский район" в лице Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района о взыскании 1 825 396 руб. 86 коп. основного долга по муниципальному контракту №32 от 07.07.2016г.

 

при участии в заседании:

от Управления: ФИО2, по доверенности от 10.01.2018

от ООО "Сибмагистраль": не явился (извещен) 

 

У С Т А Н О В И Л:

Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Сибмагистраль" о взыскании 301 333 руб. 06 коп. неустойки, 841 198 руб. 58 коп. штрафа по муниципальному контракту №32 от 07.07.2016г.

Определением от 27.09.2017г. исковое заявление принято к производству.

В предварительном судебном заседании представитель истца пояснил, что требования о взыскании неустойки и штрафа заявлены за разные нарушения в соответствии с условиями муниципального контракта (за нарушение сроков передачи журналов строительных работ (передан 1 экземпляр вместо 3, как это предусмотрено контрактом, и за просрочку сдачи выполненных работ).

Ответчик указал, что журнал строительных работ, несмотря на то, что входит в состав исполнительной документации (которая была передана в трех экземплярах), ведется в одном экземпляре на строительном объекте; журнал был передан заказчику. Просрочка сдачи работ произошла по субъективным причинам заказчика (состав комиссии со стороны заказчика на приемку являлся не в полном составе), непосредственно заказчику работы были сданы вовремя (л. д. 6-7 т. 2).

Протокольным определением от 25.10.2017г. принято заявление истца об уменьшении исковых требований, в соответствии с которым истец просит взыскать с ответчика 284 592 руб. 31 коп. неустойки, 841 198 руб. 58 коп. штрафа по муниципальному контракту №32 от 07.07.2016г.

От ответчика поступило встречное исковое заявление о взыскании с Муниципального образования "Томский район" в лице Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сибмагистраль" части суммы задолженности по муниципальному контракту №32 от 07.07.2016г. в размере 50 000 руб. (л.д. 24-31 т. 2).

В обоснование встречного требования указано на выполнение работ, необходимых для выполнения основных работ по муниципальному контракту №32 от 07.07.2016г., на основании протоколов заседания технического совета №001 от 25.07.2016г., №002 от 03.08.2016г., №003 от 11.08.2016г., №004 от 15.08.2016г.

Определением от 25.10.2017г. принято встречное исковое заявление к совместному рассмотрению с первоначальным иском по делу №А67-7306/2017.

Протокольным определением от 16.01.2018г. принято заявление об увеличении встречного искового требования, в соответствии с которым ООО "Сибмагистраль" просит взыскать с Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района 1 825 396 руб. 86 коп. основного долга.

ООО "Сибмагистраль" в дополнительных письменных пояснениях к встречному исковому указало, что дополнительные работы подрядчиком были выполнены по инициативе и согласованию с заказчиком, отвечали необходимым потребностям заказчика и были выполнены в целях возмещения износа покрытия, восстановления и улучшения ровности и сцепных качеств, устранения деформаций и повреждения покрытия в целях обеспечения безопасности движения.

          Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района в письменном отзыве на встречное исковое заявление указало, что работы в рамках контракта были выполнены подрядчиком в полном объеме в соответствии с техническим заданием и оплачены в установленном порядке. Доказательства согласования в установленном законом порядке выполнения работ на сумму, превышающую цену спорного контракта, или наличия предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ исключительных случаев для изменения цены контракта, в материалы дела не представлены. ООО "Сибмагистраль" приняло обязательство по предоставлению журналов в 3х экземплярах на себя при заключении контракта, следовательно, утверждение ООО "Сибмагистраль" о невключении данных журналов в состав исполнительной документации противоречит фактическому поведению стороны в процессе исполнения муниципального контракта (л. д. 77-81 т. 3).

Протокольным определением от 06.02.2018г. судебное разбирательство в судебном заседании отложено на 21.03.2018г. в 09 час. 00 мин.

ООО "Сибмагистраль" в дополнительных пояснениях указало, что подрядчик от заказчика получал журналы в одном экземпляре и передал их заказчику в соответствии с установленным законодательством, вследствие чего исполнить обязательства по предоставлению оставшихся двух экземпляров перед заказчиком не представляется возможным, поскольку зарегистрированные журналы в трех экземплярах подрядчику от заказчика не передавались. Передача журналов выполненных работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси в оставшихся двух экземплярах произошла по вине заказчика, заказчик не создал необходимых условий для исполнения данного обязательства подрядчиком. Просил размер штрафа и неустойки снизить согласно ст. 333 ГК РФ (л. д. 93-95 т. 3).

ООО "Сибмагистраль" в дополнительных пояснениях также указало, что не согласно с истцом в части нарушения сроков принятия поэтапного выполнения работ, представило контррасчет.

          Судебное заседание проведено в отсутствие представителя ответчика согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

          В судебном заседании представитель истца поддержал первоначальное исковое требование, против снижения начисленных санкций возражал, просил отказать в удовлетворении встречного иска.

          Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

07.07.2016г. между Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, действующего от имени муниципального образования "Томский район", (заказчиком) и ООО "Сибмагистраль" (подрядчиком) заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" №32 с дополнительными соглашениями от 15.07.2016г. №1, от 05.08.2016г. №2, от 13.10.2016г. №4, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" согласно техническому заданию заказчика (приложение №2) и сметной документации (приложение №3), календарному графику производства работ (приложение №4), а заказчик - принять выполненные подрядчиком работы и оплатить работы в соответствии с условиями контракта (л. д. 7-38 т. 1).

Контракт действует в редакции дополнительных соглашений №№1-4.

Пунктом 1.3. контракта предусмотрено, что объемы и виды выполняемых работ определяются техническим заданием заказчика (приложение №2), сметной документацией (приложение №3).

Сроки выполнения работы указаны в разделе 8 контракта (п. 1.3. контракта).

Согласно п. 4.1. контракта общая стоимость работ составляет 16 823 971 руб. 61 коп., является твёрдой и определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 13 контракта.

В соответствии с п. 4.2. контракта оплата будет произведена заказчиком по факту выполнения работ после подписания актов приема выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 30 дней с момента предоставления подрядчиком счета, счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте; заказчик в соответствии с контрактом осуществляет приемку работ в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.

Заказчик вправе принять выполненные работы в объеме, превышающем предусмотренный утвержденной сметной документацией и техническим заданием без изменения стоимости контракта (п. 4.3. контракта).

Согласно п. 6.4. контракта приемка выполненных работ осуществляется по факту выполнения работ на основании письменного извещения подрядчика об окончании выполнения работ (этапа работ).

Подрядчик должен направить извещение заказчику в трехдневный срок со дня окончания выполнения работ (этапа работ). Вместе с извещением об окончании работ (этапа работ) подрядчик должен передать заказчику пакет исполнительной документации в 3 экземплярах. Подрядчик письменно подтверждает, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам; приёмка осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком (п. 6.5. контракта).

По результатам приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ, которые подписываются всеми членами комиссии (п. 6.5.5. контракта).

Срок выполнения работ установлен в п. п. 8.1.-8.2. контракта со дня заключения контракта до 15.08.2016г. (включительно).

Датой окончания работ по контракту является дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (п. 8.5. контракта).

Согласно с п. 7.1. контракта стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

          В соответствии с п. 7.2. контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению работ (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, по вине подрядчика, подрядчик обязуется оплатить неустойку в виде штрафа в размере 5% от цены контакта, что составляет 841 198 руб. 58 коп.

          За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, по вине подрядчика, подрядчик за каждый день просрочки обязуется уплатить неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле, указанной в п. 7.4. контракта.

          Работы, предусмотренные контрактом, выполнены с нарушением промежуточных сроков, в связи с чем истцом ответчику начислена неустойка в сумме 284 592 руб. 31 коп..

Кроме того, ответчиком не исполнена обязанность по передаче исполнительной документации, предусмотренная п. 6.4 контракта, в связи с чем истцом начислен штраф в сумме 841 198 руб. 58 коп.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия №05-1301 от 01.08.2017г. (л. д.11-17 т. 1).

Требование претензии ответчиком не исполнено, что послужило основанием обращения Управления с настоящим иском в суд.

В свою очередь ООО "Сибмагистраль" указало, что в рамках исполнения контракта №32 от 07.07.2016г. выполнены дополнительные работы на сумму 1 825 396 руб. 86 коп., которые заказчиком не приняты и не оплачены.

В адрес заказчика направлена претензия с приложением актов о приемке выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат, счетов-фактур и счетов на оплату (л. д. 65-66 т. 2).

Уклонение Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района от оплаты выполненных работ послужило основанием обращения ООО "Сибмагистраль" с встречным иском в суд.

Рассмотрев спор, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам по существу заявленных требований.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 1 ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы (ст. 740), проектные и изыскательские работы (ст. 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст.763 ГК РФ).

Статьей 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

В соответствии с п. 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. №7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пеней (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Согласноч. 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон №44-ФЗ) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Порядок начислений штрафов и пеней (на момент заключения контракта) предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - Правила №1063).

В соответствии с п. 6 Правил №1063 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле, указанной в Правилах.

Следовательно, в настоящем случае взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств и штрафа за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению работ (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, по вине подрядчика, предусмотрено как законом, так и соглашением сторон (п. п. 7.2., 7.4. контракта).

Представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ (л. 

<

...> 73-76, 81-83, 88-90, 95-96, 104-1051 13-117, 119-121, 126-127 т. 1) подтверждается нарушение ответчиком промежуточных сроков выполнения работ.

Довод ответчика о несогласованности промежуточных сроков выполнения работ, противоречит представленным в материалы дела доказательствам, так в приложении №1 к дополнительному соглашению от 15.07.2016г. №1 (приложение №4 к муниципальному контракту от 07.07.2016г. №32) сторонами согласован календарный график производства работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" (л. д. 36-38 т. 1).

Приложение №1 к дополнительному соглашению от 15.07.2016г. №1 (приложение №4 к муниципальному контракту от 07.07.2016г. №32) ответчиком надлежащим не оспорено, ходатайство о его фальсификации от ответчика не поступало.

При этом сводный сметный расчет №3 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" содержит стоимость каждого этапа работ.

В этой связи суд приходит к выводу о согласовании сторонами как конечного, так промежуточных сроков выполнения работ.

Доказательств выполнения работ по контракту согласно графика, либо уклонения истца от принятия работ ответчиком не предоставлено; имеющимися в материалах дела актами о приемке выполненных работ подтверждается выполнение работ с нарушением промежуточных сроков.

Довод ответчика о том, что дата приемки выполненных работ должна соответствовать дате выполненных работ по факту согласно п. 6.4., п. 6.5.5. муниципального контракта №32 от 07.07.2016г., а не дате подписания актов выполненных работ по форме КС-2, судом отклоняется, поскольку в п. 8.5. договора сторонами согласовано, что датой окончания работ по контракту является дата подписания заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ.

          При этом согласно п. 6.4. контракта приёмка выполненных работ осуществляется по факту выполнения работ на основании письменного извещения подрядчика об окончании выполнения работ (этапа работ). Подрядчик должен направить извещение заказчику в трёхдневный срок со дня окончания выполнения работ (этапа работ). Вместе с извещением об окончании работ (этапа работ) подрядчик должен передать заказчику пакет исполнительной документации в 3х экземплярах. Подрядчик письменно подтверждает заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

          В п. 6.5. контракта стороны согласовали, что приёмка осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком: комиссия в течение 10 дней после выполнения работ должна осмотреть и принять выполненные работы, за исключением случаев, когда она вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки или отказаться от исполнения контракта (п. 6.5.3. контракта).

          Таким образом, при заключении контракта стороны согласовали порядок приемки выполненных работ и момент окончания работ, отличный от момента фактического выполнения работ, что не лишало исполнителя возможности заблаговременно уведомить заказчика о готовности работ, принимая во внимание срок, установленный п. 6.5.3 контракта.

          В связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательств по контракту истцом начислена пеня за период с 17.07.2016г. по 15.08.2016г. в сумме 284 592 руб. 31 коп.

Расчет начисленной истцом неустойки проверен судом и признан неверным в части определения периода просрочки исполнения обязательства.

Принимая во внимание условия п. 6.4., п. 6.5.3. контракта, приемка выполненных работ должна была быть произведена в течении 10 дней после направления заказчику уведомления о готовности работ, вместе с тем уведомление о готовности работ: на участке "д. Белоусово - д. Овражное" направлено 02.08.2016г., что подтверждается письмом исх. №587 от 02.08.2016г. (л. д. 17 т. 3), повторное извещение было направлено 12.08.2016г. (л. д. 21 т. 3), работы приняты лишь 15.08.2016г., что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 (л. д. 119-121 т. 1); на участке "с. Богашево- ж.р. Каштак" уведомление направлено 19.07.2016г., что подтверждается письмом исх. №522 от 19.07.2016г. (л. д. 18 т. 3), повторное извещение направлено письмом исх. №552 от 26.07.2016г. (л. д. 19 т. 3), работы приняты 09.08.2016г., что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 (л. д. 104-105 т. 1); на участке "Подъезд от а/дороги г. Томск - с. Моряковский Затон до с. Половинка" уведомление направлено 14.07.2016г. (письмо исх. №512 от 14.07.2016г. (л. д. 13 т. 3), повторное извещение было направлено письмом исх. №548 от 26.07.2016 (л. д. 14 т. 3), работы приняты лишь 09.08.2016г., что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 (л. д. 81-83 т.1); на участке "Подъезд от а/дороги с. Моряковский Затон - с. Половинка до д. Козюлино" извещение направлено 14.07.2016г., что подтверждается письмом исх. №513 от 14.07.2016г. (л. д. 15 т. 3), повторное извещение было направлено письмом исх. №549 от 26.07.2016г. (л. д. 16 т. 3), работы приняты 09.08.2016г., что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 (л. д. 88-90 т. 1); на участке "Подъезд от а/д г. Томск - с. Мельниково к п. 86-й квартал" извещение направлено 14.07.2016г. письмом исх. №514 от 14.07.2016г. (л. д. 6 т. 3), повторное извещение было направлено письмом исх. №550 от 26.07.2016г. (л. д. 7 т. 3), работы приняты 09.08.2016г. (л. д. 95-96 т. 1); на участке "Подъезд от а/дороги г. Томск - с. Межениновка к д. Плотниково" извещение направлено 22.07.2016г. письмом исх. № 553 от 26.07.2016г. (л. д. 20 т. 3), работы приняты 11.08.2016г., что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 (л. д. 55-57 т. 1).

Таким образом, при отсутствии в материалах дела документально обоснованных замечаний к качеству работ, суд приходит к выводу о том, что они должны быть приняты не позднее 10 дней с момента направления уведомления о готовности работ.

Доказательств выполнения работ ненадлежащим образом истцом не представлено, в связи с чем начисление неустойки за период после истечения установленного п. 6.5.3. контракта срока до момента подписания акта по форме КС-2 неправомерно.

Судом произведен перерасчет пени с учетом п. 6.4, п. 6.5.3. контракта, ст. 193 ГК РФ, примененного истцом коэффициента К-0,01 (ст. 9ГК РФ), действующей на день вынесения решения учетной ставки банковского процента, в результате чего размер неустойки составил 201 151 руб. 56 коп.

          В указанном размере требование заявлено правомерно.

          В п. 4 Правил №1063 установлено, что за ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

В связи с нарушением ответчиком обязанности по передаче исполнительной документации, предусмотренной п. 6.4 контракта, истцом начислен штраф в сумме 841 198 руб. 58 коп.

В связи с нарушением ответчиком обязанности по передаче исполнительной документации, предусмотренной п. 6.4. контракта, истцом начислен штраф в сумме 362 247 руб. 90 коп.

Согласно п. 6 Требований Приказа Ростехнадзора РФ от 26.12.2006г. №1128, в состав исполнительной документации входит иная документация, отражающая фактическое исполнение проектных решений.

СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов" устанавливает перечень документов, входящих в основной состав исполнительной документации, среди прочего, упоминающий и журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.

В этой связи журналы выполненных работ и журналы укладки асфальтобетонной смеси входили в состав исполнительной документации и подлежали передаче заказчику в обусловленный муниципальным контрактом срок и в 3х экземплярах, исходя из достигнутого сторонами соглашения при заключении данного контракта.

Следовательно, истцом правомерно произведено начисление штрафа.

Ответчиком заявлено о снижении начисленных санкций согласно ст. 333 ГК РФ.

На основании п. 1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Правила о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ применяются также в случаях, когда неустойка определена законом, например, ст. ст. 23, 23.1, п. 5 ст. 28, ст. ст. 30 и 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей", п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО, положениями Федерального закона от 10.01.2003г. №18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", ст. 16 Федерального закона от 29.12.1994г. №79-ФЗ "О государственном материальном резерве", п. 5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (п. 78 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. №7).

Факт ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подтвержден материалами дела.

Как разъяснено в п. 69 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

В соответствии с п. 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. №7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ) (п. 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. №7).

Согласно п. 77 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. №7 снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (п. 1 и 2 ст. 333 ГК РФ).

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000г. №263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

Ответчик, заявляя требование о применении ст. 333 ГК РФ, должен был представить суду доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Однако такие доказательства ответчиком в материалы дела не представлены.

С учетом изложенного, а также, учитывая наличие арифметических ошибок в расчете неустойки, приведших к заявлению истцом требований в меньшем размере (ст. 9 ГК РФ), принимая во внимание фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для уменьшения размера санкции в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

В месте с тем, как следует из п. 7.2 контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению работ (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, по вине подрядчика, подрядчик обязуется оплатить неустойку в виде штрафа в размере 5% от цены контакта, что составляет 841 198 руб. 58 коп. При этом размер подлежащего начисления штрафа не зависит от допущенного нарушения.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, отсутствие у истца каких-либо значительных негативных последствий, суд приходит к выводу, что заявленный к взысканию размер штрафа явно несоразмерен последствиям нарушенного обязательства по передаче журналов выполнения работ в одном экземпляре, приводит к накоплению истцом экономически необоснованной прибыли, а также принимая во внимание значительное превышение суммы штрафа к сумме возможных убытков, компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, суд считает возможным уменьшить размер штрафа до 420 599 руб. 29 коп.

В остальной части первоначальный иск удовлетворению не подлежит.

Рассмотрев встречное исковое требование, суд приходит к следующим выводам.

При применении к отношениям сторон норм гражданского законодательства необходимо учитывать специфику контрактной системы в сфере закупок (ч. 1 ст. 2 Закона №44-ФЗ, Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017г.).

Статьей 34 Закона №44-ФЗ установлено, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 настоящего Закона.

Исходя из положения п. 1 ст. 95 Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов, или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

По общему правилу поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд без государственного или муниципального контракта не порождает у исполнителя права требовать оплаты соответствующего предоставления (п. 20 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017г., п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015г., п. 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014г. №165, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.06.2013г. №37/13, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2013г. №18045/12, определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2016г. №303-ЭС-13256).

В п. 12 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017г., разъяснено, что увеличение объема работ по государственному (муниципальному) контракту, в том числе когда такое увеличение превышает 10 процентов от цены или объема, предусмотренных контрактом, допустимо исключительно в случае, если их невыполнение грозит годности и прочности результата выполняемой работы. К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком также могут быть отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

По смыслу приведенных норм в случае, если заказчик согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ создавал бы возможности для извлечения им преимуществ из своего недобросовестного поведения, что противоречит п. 4 ст. 1 ГК РФ.

Оценивая представленные в материалы дела документы в совокупности, в том числе контракт, акты выполненных работ, справки о стоимости работ, переписку сторон, установив, что цена контракта твердая, дополнительные соглашения к муниципальному контракту, изменяющие установленную контрактом стоимость и объем работ, либо муниципальный контракт на выполнение спорных работ между сторонами с соблюдением требований Закона №44-ФЗ, не заключались, выполняя работы, истец не мог не знать, что работы выполняются без соблюдения требований Закона №44-ФЗ, суд приходит к выводу о том, что по смыслу ст. 34 Закона №44-ФЗ без изменения заказчиком первоначальной цены контракта фактическое выполнение подрядчиком спорных работ не может породить обязанность заказчика по их оплате, в связи с чем в удовлетворении встречного иска надлежит отказать.

При этом в настоящем деле отсутствуют основания утверждать, что спорные работы не могли быть учтены в технической документации к контракту; выполненные обществом работы не являлись необходимыми для обеспечения годности и прочности их результата, для достижения цели контракта.

Система правового регулирования закупок для государственных и муниципальных нужд устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

При таких обстоятельствах в удовлетворении встречного иска надлежит отказать.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску согласно ст. 110 АПК РФ относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь ст. ст. 110, 168-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибмагистраль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 201 151 руб. 56 коп. неустойки, 420 599 руб. 29 коп. штрафа по муниципальному контракту №32 от 07.07.2016г., всего взыскать 621 750 руб. 85 коп.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать общества с ограниченной ответственностью "Сибмагистраль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 44 334 руб. государственной пошлины по первоначальному и встречному искам.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                  А. В. Хлебников