Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть  

Дело № А63-18208/2017

г. Ставрополь

13 марта 2018 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чапуговой В.С., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению 

комитета градостроительства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Рикстрой», г. Железноводск, ОГРН  

<

***>,  

третьи лица: муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства  города Ставрополя», г. Ставрополь, администрация города Ставрополя, г. Ставрополь,  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, 

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО1 по доверенности от  08.06.2017 № 06/7-13/1-1/1631, представителя ответчика ФИО2 по доверенности от  08.05.2017 № Р-11-17, представителя третьего лица - МУП «Управление капитального  строительства города Ставрополя» ФИО3 по доверенности от 09.01.2018 № 5-исх.,  представителя третьего лица - администрация города Ставрополя ФИО4 по доверенности от  25.01.2017 № 01/1-10-15.  

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

заявление истца об уточнении исковых требований удовлетворить.  Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Рикстрой», г. Железноводск, ОГРН  

<

***>, устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту от  

31.12.2014 № 25, а именно: 

выполнить наладку слаботочных систем (завершить работы по наладке телевизионной  

антенны, таксофонных аппаратов и локальной компьютерной системы); 

выполнить окраску ограждения вокруг спортплощадок; заменить плитку из базальта на ступенях главного входа; выполнить устройство (исправление) ступеней главного входа с уклоном от здания; выполнить ремонт примыкания желобов водосточной системы; 

устранить замечания по устройству резинового покрытия спортивных площадок и стадиона;  выполнить тротуарную дорожку с западной стороны за забором школьной территории;  

устранить проседание асфальтового покрытия; организовать водосток в ливневую канализацию на дворовых проездах и главном входе; 

организовать водосток в ливневую канализацию на внутридворовых проездах и главном  

входе; 

выполнить работы по заделке трещин на поверхности стен, полов и потолков;  устранить последствия и причины замокания стен в спортивном зале 8 блока;  устранить замечания по подвалам;  

выполнить разметку на стадионе, баскетбольных и волейбольных площадках.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рикстрой», г. Железноводск, ОГРН  1122651031612, государственную пошлину в размере 6 000 руб. в доход федерального бюджета.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья Ващенко А.А.