Арбитражный суд Пензенской области Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, 

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, e-mail:penza.info@arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г.Пенза Дело № А49-6444/2023 

Резолютивная часть решения оглашена 13.12.2023 г.  Полный текст решения изготовлен 20.12.2023 г.  

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Телегина А.П.,  рассмотрев в открытом судебном заседании при ведении протокола  секретарем судебного заседания ФИО1 дело  

по иску: акционерного общества «Пензанефтепродукт» (ОГРН  

1025801100533) 

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Алюмтек»  

(ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 3 085 347, 27 руб., при участии представителей сторон: от истца: ФИО2, представителя по доверенности; от ответчика: не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ:

АО «Пензанефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд с иском к  ООО «Алюмтек» о взыскании 4 159 500, 50 руб. – неустойки за просрочку  выполнения работ по договорам подряда (Интерьер) АЗК 8-3830722/0783Д от  17.10.2022, АЗК № 9 – 3830722/0784Д от 17.10.2022, АЗК № 10 -  

 № 3830722/0785Д от 17.10.2022, АЗК № 11 - № 3830722/0786Д от 17.10.2022,  АЗК № 17 - № 3830722/0787Д от 17.10.2022, (Экстерьер) АЗК № 8 -   № 3830722/0788Д от 17.10.2022, АЗК № 9 – 3830722/0789Д от 17.10.2022, АЗК   № 10 – 3830722/0790Д от 17.11.2022, АЗК № 11 – 3830722/0792Д от  17.10.2022, АЗК № 17 - № 3830722/0793Д от 17.10.2022, начисленной за  период с 1.01.2023г. по 20.06.2023г.  

Истец указал, что между истцом и ответчиком заключен ряд договоров  подряда на выполнение ответчиком строительно-ремонтных работ по замене  фирменного стиля интерьера и экстерьера розничной сети «Роснефть» по  объектам истца:  

- АЗК № 8 - 

<

...>; - АЗК № 9 - 

<

...>; - АЗК № 10 - Пензенская область. р.п. Мокшан; - АЗК № 11 - 

<

...>; - АЗК № 17 - 

<

...>. 

Общая цена договоров при их заключении составила 75 791 016, 24  руб.  

Согласно п. 5.1 договоров работы подлежали выполнению до  30.12.2022г.  

В установленный срок работы в полном объеме не выполнены. 

Истцом на основании п.23 договоров начислена неустойка за  нарушение сроков выполнения работ за период с 1.01.2023г. по 20.06.2023г. в  общей сумме 4 159 500, 50 руб.  

Поскольку досудебная претензия об уплате неустойки оставлена  ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.  

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 26.06.2023г.  по делу № А49-6444/2023 исковое заявление принято к производству  Арбитражного суда Пензенской области в составе судьи Енгалычевой О.А.  

В связи с болезнью судьи Енгалычевой О.А. определением и. о.  председателя третьего судебного состава Арбитражного суда Пензенской  области Лапшиной Т.А. от 2.10.2023г. дело передано на рассмотрение судьи  Телегина А.П.  

Определением от 25.10.2023 судом принято заявление истца об  уменьшение исковых требований до суммы 3 313 778, 77 руб.  

Определением от 25.10.2023 судом принято заявление истца об  уменьшение исковых требований до суммы 3 085 347, 27 руб., составившей  неустойку, рассчитанную за период с 1.01.2023г. по 21.08.2023г.  

В расчете неустойки учтена ее частичная оплата ответчиком в сумме  592 242,60 руб. за предшествующие периоды просрочки в рамках  рассмотрения дела № А49-3579/2023.  

В ходе подготовки дела ответчиком признано нарушение сроков  выполнения работ.  

Ответчик признал, что расчет неустойки соответствует  обстоятельствам просрочки, однако указал, что размер неустойки  значительно превышает размер возможных убытков, вызванных нарушением  обязательств.  

В этой связи ответчик просил применить ст. 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации и снизить ее размер до суммы 1 500 000 руб., что  эквивалентно начислению процентов по ст.395 Гражданского кодекса  Российской Федерации. Ответчик указал, что просрочка сдачи объектов  является незначительной, какие-либо негативные последствия для истца  отсутствуют.  

В судебном заседании 13.12.2023г. истец требования о взыскании  неустойки в сумме 3 085 347, 27 руб. поддержал.  

Истец указал, что ответчиком допущена существенная просрочка в  выполнении работ, работы по договорам подряда в итоге завершены только  21.08.2023., в связи с чем просрочка сдачи работ достигала 230 дней.  

Оснований для снижения размера неустойки согласно контрсчету  ответчика (с ее исчислением по ст.395 Гражданского кодекса Российской  Федерации) истец не видит. В этой связи истцом отклонено предложение  ответчика об урегулировании спора мирным путем на вышеназванных  условиях ООО «Алюмтек».  

Предусмотренную договором ставку неустойки в размере 0,05% от  суммы неисполненных в срок обязательств полагает объективно отражающей  последствия нарушения обязательств.  

В судебное заседание 13.12.2023г. ответчик не явился, о месте и  времени его проведения извещен надлежащим образом.  

В направленном дополнении к отзыву ответчик, руководствуясь ст. 333  Гражданского кодекса Российской Федерации просил о снижении неустойки  до суммы 1 500 000 руб., указал, что задержка выполнения работ не вызвана  недобросовестным поведением ответчика.  

С учетом надлежащего извещения ответчика о времени и месте  судебного разбирательства на основании ч.3 ст.156 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом  13.12.2023г. в отсутствие его представителя.  

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца, арбитражный  суд установил следующее.  

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен ряд  договоров подряда на выполнение ответчиком строительно-ремонтных работ  по замене фирменного стиля интерьера и экстерьера розничной сети  «Роснефть» автозаправочных станций истца в Пензенской области.  

Для выполнения работ на АЗК № 8 в г. Пензе , ул.Аустрина, 143е  заключены:  

1) договор на выполнение строительно-монтажных работ с заменой  элементов фирменного стиля экстерьера в рамках программы обновления  сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО «Пензанефтепродукт» № 3830722/0788Д от  17.10.2022., действующий с учетом дополнительного соглашения от  14.08.2023, на сумму 10 003 161,60 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г.  

Работы по вышеуказанному договору выполнены ответчиком за  пределами установленного срока, что подтверждается актами о приемке  выполненных работ и справками об их стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от  9.01.2023 на сумму 561 670 руб., № 2 от 3.04.2023 на сумму 2 852 217,60 руб.,   № 3 от 28.04.2023 на сумму 5 428 369,20 руб., № 4 от 9.06.2023 на сумму  758 134,80 руб., № 6 от 21.08.2023 на сумму 689 786,40 руб.  

2) договор на выполнение строительно-монтажных работ с заменой  элементов фирменного стиля интерьера в рамках программы обновления  сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО «Пензанефтепродукт» № 3830722/0783Д от  17.10.2022г.. действующий с учетом дополнительного соглашения от  14.08.2023г., на сумму 2 433 903,61 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г.  

Работы по вышеуказанному договору выполнены ответчиком за  пределами установленного срока, что подтверждается актами о приемке  выполненных работ и справками об их стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от  9.01.2023 на сумму 188 260,80 руб., № 2 от 9.01.2023 на сумму 245 269,20  руб., № 3 от 3.04.2023 на сумму 439 772,40 руб., № 5 от 14.08.2023 на сумму  450 174 руб., № 4 от 28.04.2023 на сумму 478 275,60 руб., № 6 от 21.08.2023 на  сумму 632 151,61 руб.  

Для выполнения работ на АЗК № 9 в г. Пензе, ул. Кривозерье, 67а  заключены:  

1) договор № 3830722/0789Д от 17.10.2022г., действующий с учетом  дополнительного соглашения от 14.08.2023г., на выполнение строительно-монтажных работ с заменой элементов фирменного стиля экстерьера в  рамках программы обновления сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО  «Пензанефтепродукт» на сумму 10 905 242,40 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г.  

Работы выполнены ответчиком за пределами установленного срока,  что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками об их  стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от 9.01.2023 на сумму 570 553,20 руб., № 2  от 3.04.2023 на сумму 949 814,40 руб., № 3 от 28.04.2023 на сумму  7 214 667,60 руб., КС3 № 4 от 9.06.2023 на сумму 1 452 307,20 руб., № 6 от  21.08.2023 на сумму 717 900 руб.  

2) договор № 3830722/0784Д от 17.10.2022., действующий с учетом  дополнительного соглашения от 14.08.2023 на выполнение строительно-монтажных работ с заменой элементов фирменного стиля интерьера в рамках  программы обновления сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО «Пензанефтепродукт»  на сумму 2 354 334 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г.  

Работы выполнены ответчиком за пределами установленного срока,  что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками об их  стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от 9.01.2023 на сумму 187 682,40 руб., № 2 от  9.01.2023 на сумму 237 513,60 руб., № 3 от 3.04.2023 на сумму 516 091,20  руб., № 5 от 14.08.2023 на сумму 454 790,40 руб., № 4 от 28.04.2023 на сумму  368 334 руб., № 5 от 14.08.2023 на сумму 454 790,40 руб., № 6 от 21.08.2023 на  сумму 589 922,40 руб.  

Для выполнения работ на АЗК № 10 - Пензенская область, р.п. Мокшан  заключены:  

1) договор № 3830722/0790Д от 17.10.2022г., действующий с учетом  дополнительного соглашения от 14.08.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ с заменой элементов фирменного стиля экстерьера в  рамках программы обновления сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО  «Пензанефтепродукт» на сумму 9 780 409,20 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г.  

Работы выполнены ответчиком за пределами установленного срока,  что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками об их  стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от 9.01.2023 на сумму 554 907,60 руб., № 3  от 28.04.2023 на сумму 8 021 701,20 руб., КС3 № 3 от 9.06.2023 на сумму 929  022 руб., № 4 от 21.08.2023 на сумму 274 778,40 руб.  

2) договор № 3830722/0785Д от 17.10.2022., действующий с учетом  дополнительного соглашения от 14.08.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ с заменой элементов фирменного стиля интерьера в рамках  программы обновления сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО «Пензанефтепродукт»  на сумму 2 334 781,20 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г.  

Работы выполнены ответчиком за пределами установленного срока,  что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками об их  стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от 9.01.2023 на сумму 198 637,20 руб., № 2  от 9.01.2023 на сумму 250 508,40 руб., № 3 от 28.04.2023 на сумму  1 023 393,60 руб., № 4 от 14.08.2023 на сумму 397 080 руб., справкой по  форме КС3 № 5 от 21.08.2023 на сумму 465 162 руб.  

Для выполнения работ на АЗК № 11 в 

<

...> заключены:  

1) договор № 3830722/0792Д от 17.10.2022г., с действующий с учетом  дополнительного соглашения от 14.08.2023г., на выполнение строительно-монтажных работ с заменой элементов фирменного стиля экстерьера в  

рамках программы обновления сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО  «Пензанефтепродукт» на сумму 9 619 080 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г.  

Работы выполнены ответчиком за пределами установленного срока,  что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками об их  стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от 9.01.2023 на сумму 561 015,60 руб., № 2  от 28.04.2023 на сумму 7 887 568,80 руб., справками по форме КС3 № 3 от  9.06.2023 на сумму 929 220 руб., № 4 от 21.08.2023 на сумму 241 275,60 руб.  

2) договор № 3830722/0786Д от 17.10.2022г., действующий с учетом  дополнительного соглашения от 14.08.2023г., на выполнение строительно-монтажных работ с заменой элементов фирменного стиля интерьера в рамках  программы обновления сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО «Пензанефтепродукт»  на сумму 2 533 935,60 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г.  

Работы выполнены ответчиком за пределами установленного срока,  что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками об их  стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от 9.01.2023 на сумму 195 596,40 руб., № 2  от 9.01.2023 на сумму 245 923,20 руб., № 3 от 28.04.2023 на сумму  1 036 406,40 руб., № 4 от 14.08.2023 на сумму 384 022,80 руб., справкой по  форме КС3 № 5 от 21.08.2023 на сумму 671 986,80 руб.  

Для выполнения работ на АЗК № 17 в 

<

...>  заключены:  

1) договор № 3830722/0793Д от 17.10.2022г., действующий с учетом  дополнительного соглашения от 14.08.2023г., на выполнение строительно-монтажных работ с заменой элементов фирменного стиля экстерьера в  рамках программы обновления сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО  «Пензанефтепродукт» на сумму 11 333 320,80 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г.  

Работы выполнены ответчиком за пределами установленного срока,  что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками об их  стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от 9.01.2023 на сумму 627 618 руб., № 2 от  3.04.2023 на сумму 4 425 902,40 руб., № 3 от 28.04.2023 на сумму 4 507 910,40  руб., № 4 от 14.08.2023 на сумму 144 078 руб., № 5 от 9.06.2023 на сумму  1 292 246,40 руб., № 6 от 21.08.2023 на сумму 335 565,60 руб.  

2) договор № 3830722/0787Д от 17.10.2022., действующий с учетом  дополнительного соглашения от 14.08.2023г., на выполнение строительно-монтажных работ с заменой элементов фирменного стиля интерьера в рамках  программы обновления сети «Роснефть» АЗК/АЗС АО «Пензанефтепродукт»  на сумму 2 436 464,40 руб.  

Договор заключен со сроком окончания работ до 30.12.2022г. 

Работы выполнены ответчиком за пределами установленного срока,  что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками об их  стоимости форм КС-2, КС-3 № 1 от 9.01.2023 на сумму 196 231,20 руб., № 2  от 9.01.2023 на сумму 251 217,60 руб., № 3 от 3.04.2023 на сумму 533 624,40  руб., № 5 от 14.08.2023 на сумму 355 891,20 руб., № 4 от 28.04.2023 на сумму  409 713,60 руб., № 6 от 21.08.2023 на сумму 689 786,40 руб.  

В соответствии с п. 5.2. договоров никакие обстоятельства не могут  служить основанием для требования подрядчиком о продлении срока  выполнения работ, за исключением случаев внесения в проектную  документацию изменений и соответственно необходимость выполнения  дополнительных работ и изменения графика работ (см. п. 8.6 договоров),  обстоятельства форс-мажора или случаи несвоевременной поставки МТР  Заказчиком/Третьим лицом, указанным Заказчиком, как это установлено в  Приложении № 6.  

Пунктом 23 договоров и приложениями № 2.4 и № 7 к договорам  предусмотрены штрафные санкции за нарушение срока выполнения работ.  

При нарушении Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе  требовать уплаты неустойки, в частности:  

- при нарушении срока выполнения работ по Объекту (согласно  приложению 7) Заказчик имеет право начислить неустойку в размере 0,05%  от цены договора за каждый день просрочки, но не более 20% за весь срок  просрочки.  

В связи с тем, что ответчиком в установленный срок работы в полном  объеме не выполнены, истцом начислена неустойка за нарушение сроков  выполнения работ.  

Заключенные договора является договорами строительного подряда. 

В соответствии со ст.740 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо  выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать  подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат и уплатить обусловленную цену.  

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в  договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть  предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение  как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения  работы.  

В силу ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом.  

Согласно статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  

исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой. 

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения.  

Факт нарушения ответчиком предусмотренных договорами сроков и  верность представленных расчетов признаны ответчиком в ходе проведения  заседания 22.11.2023г. в связи с чем суд находит основания для взыскания  неустойки в предъявленном размере.  

В соответствии с представленными суду расчётами (т.8 л.д.40-49)  начисление неустойки осуществлено по момент завершения работ21.08.2023г. и учитывает обстоятельства частичного исполнения договоров.  

Требование о взыскании неустойки в сумме 3 085 347,27 руб.,  учитывает ограничительный размер неустойки по каждому из договоров (не  более 20% цены договора), а также уплату неустойки в сумме 592 242,60  руб., уплаченной за просрочку исполнения по тем же договорам в ходе  рассмотрения дела А49-3579/2023.  

Оснований для снижения неустойки по заявлению ответчика суд не  усматривает.  

В соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна  последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  

Согласно п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная  законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям  нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт  1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Бремя доказывания обоснованности своих возражений лежит на  должнике.  

Явной несоразмерности взыскиваемой неустойки последствиям  нарушения ответчиком обязательства суд не усматривает.  

Отсутствие недобросовестности при нарушении срока исполнения  обязательства в рамках предпринимательских отношений в силу п.3 ст.401  Гражданского кодекса Российской Федерации не служит основанием для  освобождения от ответственности.  

На основании вышеизложенного, требования истца о взыскании  неустойки подлежит удовлетворению в заявленном размере, в сумме  3 085 347,27 руб.  

В соответствии ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат  отнесению на ответчика. 

С учетом уменьшения размера исковых требований на основании пп.1  п.1 ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу подлежит  возврату из федерального бюджета государственная пошлина в сумме 5 371  руб.  

Руководствуясь ст.ст. 101, 102, 106, 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования акционерного общества «Пензанефтепродукт»  (ИНН 

<

***>) удовлетворить, судебные расходы отнести на ответчика.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алюмтек»  (ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Пензанефтепродукт»  (ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 3 085 347,27 руб., а также расходы по  государственной пошлине в сумме 38 427 руб.  

Возвратить акционерному обществу «Пензанефтепродукт» (ИНН  5800000016) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме  5 371 руб.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы  в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Пензенской области в течение одного месяца со дня изготовления решения в  полном объеме.  

Судья А.П.Телегин