4508/2022-359374(1) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-89680/2021

20 июня 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2022 года. Полный текст решения изготовлен 20 июня 2022 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Коросташова А.А.  

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ29" (адрес: Россия 354000, ГОРОД СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ВОРОВСКОГО  (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н) 

<

...>, ОГРН: 

<

***>);  ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ИСНЕС"  (адрес: Россия 195197, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ВН.ТЕР.Г, ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 59, ЛИТЕРА Ф,  ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 214/5, ОГРН: 

<

***>);  

о взыскании, 

при участии: - от истца: ФИО2 (доверенность от 10.12.2021), - от ответчика: ФИО3 (доверенность от 01.12.2021) 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ-29" (далее -  ООО «Строймонтаж-29») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной  ответственностью "ГК ИСНЕС" (далее - ООО «ГК Иснес») о взыскании 31 346 952 руб.  18 коп. долга по оплате выполненных работ в рамках договора субподряда от 24.12.2020   № С-2020-12-1.  

Общество с ограниченной ответственностью "ГК ИСНЕС" в рамках настоящего  дела заявило встречное исковое заявление, уточенное в порядке ст. 49 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, к Обществу с ограниченной ответственностью  "СТРОЙМОНТАЖ-29" о взыскании 33 527 217 руб. 72 коп. неустойки по спорному  договору.  

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон,  арбитражный суд установил следующее.  

Как следует из материалов дела, между ООО «ГК Иснес» (подрядчик) и ООО  «Строймонтаж-29» (субподрядчик) заключен договор субподряда № С-2020-12-1 от  24.12.2020 (далее – договор).  

Согласно пункту 1.1. договора субподрядчик обязался выполнить в пользу  подрядчика следующие виды строительных работ - дренажные работы, работы по  устройству подпорных стен Пс1-1, Пс1-2, Пс1-3, Пс1-4, Пс1-5, Пс1-6, дренаж  подпорных стен, вывоз строительного мусора по объекту в соответствии с Ведомостью  объёмов работ (приложение № 1 к договору).  

Согласно пункту 2.1. договора, цена договора (стоимость работ) составила 80 064  958 рублей 74 копейки, в том числе НДС.  

С 22.04.2021 прекращено действие договора с отказом подрядчика от его  исполнения (уведомление от 22.04.2021 исх. № 121 об отказе от договора субподряда №  С-2020-12-1 от 24.12.2020).  

Гарантийное удержание представляет собой согласованный сторонами в  соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ способ обеспечения исполнения  подрядчиком всех обязательств, предусмотренных договором.  

Согласно пункту 7.2. договора, гарантийный срок на выполняемые работы по  договору составляет 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного  строительством объекта в соответствии с требованиями действующего  законодательства.  

В пункте 3.27. договора стороны указали, что подрядчик производит удержание в  качестве гарантийных обязательств в размере 5% (далее – гарантийная сумма) от  стоимости за все выполненные работы, принятые и отраженные в актах по форме №  КС-2 по истечении гарантийных обязательств, согласно п.7.2. договора, оставшаяся  часть суммы в размере 5% от стоимости за все выполненные работы по договору  уплачивается подрядчиком субподрядчику по безналичному расчёту путем  перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика в течение 60-ти  календарных дней со дня подписания подрядчиком акта о выполнении обязательств.  

В соответствии с разделами 1-9 Ведомости объёмов работ истец выполняет  только часть работ на объекте, а не производит всю саму реконструкцию объекта в  смысле, придаваемом этому понятию законом (п. 14 ст. 1 ГрК РФ).  

Исполнение истцом (субподрядчиком) своих обязательств по договору в полном  объёме исходя из предмета договора (п.1.1.) не будет является необходимым и  достаточным для ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.  

По факту выполнения работ по договору за период с декабря 2020 по февраль  2021 субподрядчик передал генподрядчику по выполненным работам акты о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 31.01.2021, № 2 от 26.02.2021 на общую  сумму 62 359 943 руб. 93 коп. Со стороны подрядчика указанные акты о приёмке  подписаны им без замечаний и разногласий. Подписав акты по форме № КС-2  подрядчик тем самым согласился с выполненными субподрядчиком работами по  договору и принял их.  

В счёт оплаты принятых работ по договору подрядчик уплатил субподрядчику 31  012 991 руб. 75 коп. От оплаты оставшихся 31 346 952 руб. 18 коп. подрядчик отказался.  

Размер гарантийной суммы отражен в формах № КС-3 № 1 от 31.01.2021, № 2 от  26.02.2021 в общей сумме 3 117 997 руб. 19 коп. В сумму задолженности (31 346 952  руб. 18 коп.) истец включил гарантийную сумму 5% (3 117 997 руб. 19 коп.).  

При оплате подрядчик удержал гарантийные 5% в размере 3 117 997 руб. 19 коп.  

Согласно пунктам 2.1., 3.3. контракта, заключённого между госзаказчиком и  генподрядчиком, комплекс работ предусматривал реконструкцию здания с приведением  его до состояния полной готовности к эксплуатации.  

Согласно пп. 4.3., 6.13., 6.14., 6.15. контракта, датой исполнения обязательств по  выполнению работ, предусмотренных контрактом, считается дата подписания  сторонами окончательного акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и  окончательной справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма № КС-3),  акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (форма №  КС-11).  

Таким образом, акт ввода в эксплуатацию законченного строительством  (реконструкцией) объекта подлежал оформлению и подписанию только после  завершения всей реконструкции здания в рамках завершенного исполнением контракта  и только между сторонами контракта - ФКУЗ «Санаторий «Салют» МВД России  (госзаказчик) и ООО «ГК Иснес» (генподрядчик).  

Поскольку ООО «Строймонтаж-29» являлось субподрядчиком по отношению к  контракту и ООО «ГК Иснес», оно не могло являться стороной подписания акта ввода в  эксплуатацию законченного строительством объекта.  

20.04.2021 письмом исх. № 526 ФКУЗ «Санаторий «Салют» МВД России  (госзаказчик) уведомило ООО «ГК Иснес» (генподрядчик) об одностороннем отказе от  исполнения контракта по причине предоставления ответчиком в качестве обеспечения  заключения (исполнения) контракта подложной спорной гарантии, непредоставления  нового обеспечения исполнения контракта, недействительности заключённого с ООО  «ГК Иснес» контракта.  

В связи с отказом гензаказчика от контракта акт ввода в эксплуатацию  законченного строительством (реконструкцией) объекта вообще не мог быть подписан.  

В соответствии со статьёй 190 ГК РФ, установленный законом, иными  правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной  датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами,  неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие,  которое должно неизбежно наступить.  

Положения пунктов 3.27., 7.2. договора о производстве оплаты удержанной  гарантийной суммы после подписания подрядчиком акта о выполнении обязательств по  договору и акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта, не  подлежат применению, поскольку разумный срок и изначально предполагаемый срок  ввода объекта в эксплуатацию истекли.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и  сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма  Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по  договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства  заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.  

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных  субподрядчиком работ является сдача их результата подрядчику (статьи 702, 711, 746  ГК РФ). Сдача результата работ субподрядчиком и приёмка его подрядчиком  оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).  

В рассматриваемом случае в действиях ответчика усматривается односторонний  отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со статьёй 310 ГК РФ не  допускается, следовательно, требование истца о взыскании в составе задолженности по  договору гарантийной суммы является обоснованным и подлежит удовлетворению в  судебном порядке.  

При таких обстоятельствах, срок выплаты для ответчика гарантийной суммы  является наступившим, подписанные ответчиком акты КС-2 и справки КС-3 № 1 от  31.01.2021, № 2 от 26.02.2021 обязывают его оплатить результат принятых им работ по  договору. Гарантийная сумма удержаний в размере 3 117 997 руб. 19 коп. – 5% от  стоимости принятых подрядчиком от субподрядчика работ по актам о приёмке (форма   № КС-2) № 1 от 31.01.2021, № 2 от 26.02.2021 (62 359 943 руб. 93 коп.) не подлежит  исключению из суммы исковых требований.  

По вопросу удержания ответчиком 30% (18 707 983 руб. 20 коп.) от стоимости  принятых по договору работ по причине отсутствия факта передачи субподрядчиком  подрядчику исполнительной документации суд исходит из следующего.  

В период действия договора субподрядчик (истец) письмом от 03.03.2021 исх. №  10 передал в распоряжение ФКУЗ «Санаторий «Салют» МВД России (госзаказчик) за  генподрядчика (ООО «ГК Иснес») исполнительную документацию на объект  «Реконструкция объекта капитального строительства: «Здание пристройки с бассейнами  санаторного комплекса …. по вывозу, утилизации и размещению отходов 5 класса  опасности за период с 03.01.2021 по 28.02.2021, в составе которой значились:  

акт приёма-передачи отходов 5 класса опасности № 7 от 26.02.2021 между ООО  «Строймонтаж-29» и ООО «СПК «ЗАРЯ»;  

договор на оказание услуг по утилизации отходов 5 класса № 2ЭК от 03.01.2021  между ООО «Строймонтаж-29» и ООО «СПК «ЗАРЯ»;  

договор на оказание услуг по утилизации отходов 5 класса № 2 от 05.08ю2020  между ООО «СПК «ЗАРЯ» и ИП ФИО4;  

технические условия ИП ФИО4 № ТУ 23.99.19-00-2002101531 от  05.08.2020;  

сертификат соответствия № РОСС RU.НХ37.Н02388 от 09.09.2020 на вторичный  бетонный щебень;  

договор аренды спецтехники – дробильной установки № 1 от 18.12.2020; 

акт отбора отходов ООО ДиЛаб» № 73069 от 11.01.2021;  акт отбора отходов ООО ДиЛаб» № 73070 от 11.01.2021;  протокол исследования ООО «ДиЛаб» № 73065-М от 13.01.2021;  

протокол исследования ООО «ДиЛаб» № 73066-М от 13.01.2021;  материалы, обосновывающие отнесение отхода к классу опасности;  

аттестат аккредитации аналитической лаборатории ООО «ДиЛаб» от 09.03.2016   № РОСС RU.0001.518520;  

договор на оказание автотранспортных услуг по перевозке отходов 5 класса № 3  от 03.01.2021 между ООО «Строймонтаж-29» и ООО «НИКА ТРАНС»;  

товарно-транспортные накладные за период с 03.01.2021 по 28.02.2021 на  перевозку отходов 5 класса.  

Данная исполнительная документация была принята гензаказчиком без  замечаний и возражений по её составу. На момент подписания актов и справок (КС №№  2, 3) гензаказчик не заявил генподрядчику мотивированного отказа от подписания  данных документов по причине предоставления ему на выполненные работы  исполнительной документации не в полном составе.  

По договору подрядчик принял от субподрядчика выполненные работы за период  с 24.12.2020 по 26.02.2021, подписал акты и справки (КС №№ 2, 3) № 1 от 31.01.2021 и   № 2 от 26.02.2021. При этом ответчик не заявил мотивированного отказа от подписания  данных документов по мотиву непредоставления либо предоставления в неполном  составе ему истцом исполнительной документации на выполненные работы.  

Не предоставление исполнительной документации в полном составе или  частично не является безусловным основанием для отказа в оплате выполненных работ.  По смыслу статьи 726 ГК РФ, отказываясь оплачивать переданные результаты  

подрядных работ по причине непередачи субподрядчиком (истцом) исполнительной  документации, подрядчик (ответчик) не доказал, что отсутствие части такой  документации исключает возможность использования принятых им работ по договору  по прямому назначению.  

Согласно пункту 5.4. договора, за каждый факт неисполнения или  ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных  договором, штраф устанавливается в размере 5% цены договора.  

Пунктом 5.5. договора установлено, что за каждый факт неисполнения или  ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения (в том числе в случае не  предоставления субподрядчиком в срок, предусмотренный договором, отчётных  документов), штраф устанавливается в размере 0,5% от стоимости договора.  

В соответствии с пунктом 5.6. договора, штрафы начисляются за каждый факт  неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств,  предусмотренных договором, которые не имеют стоимостного выражения, в размере  10 000 рублей, в том числе:  

предоставление неполного комплекта исполнительной документации;  

ненадлежащим образом оформленная отчётная документация (КС-2, КС-3) и  исполнительная документация;  

несоблюдение пропускного режима; 

несоблюдение временных ограничений нахождения на объекте при выполнении  работ;  

предоставление документов с нарушением сроков. 

Согласно пункту 5.8. договора, при нарушении субподрядчиком срока начала и  окончания работ, указанных в графике производства работ (приложение № 3 к  договору), срока устранения недостатков, выполнения гарантийного ремонта,  установленных настоящим договором, подрядчик вправе начислить и взыскать в  субподрядчика пеню в размере 0,1% от общей цены работ по договору за каждый день  просрочки.  

В заявлении от 06.05.2022 об уменьшении размера требований по встречному  иску до 33 527 217 руб. 72 коп. ответчиком указаны основания для начисления в  отношении истца неустойки с указанием сумм неустойки за каждое вменяемое истцу  нарушение договора:  

не представление приложений 1-5 к договору, неустойка – 400 324,79 руб. (п.5.5.  договора);  

не предоставление отчётной первичной документации на выполненные работы,  исполнительной документации, фотофиксации (п.3.8. договора), неустойка – 40 000  руб.;  

просрочка выполнения работ за март и апрель 2021, неустойка 4 263 507,77 руб.  (п.5.8. договора);  

не установка информационного щита на стройплощадке в срок до 28.12.2020 (п.  4.1.5. договора), неустойка – 4 003 247,94 руб. (п.5.4. договора);  

не установка в срок до 28.12.2020 ограждения строительной площадки, мойки  колёс, места хранения стройматериалов и противопожарного инвентаря (п.4.1.16.  договора), неустойка - 4 003 247,94 руб. (п.5.4. договора);  

не разработка и не предоставление ответчику проекта производства работ,  проект на временные инженерные коммуникации и сооружения (п.4.1.17. договора),  неустойка – 800 649,58 руб.;  

необеспечение ответчиком за свой счёт содержания круглосуточной охраны  объект (п. 4.1.20. договора), неустойка - 4 003 247,94 руб.;  

не обеспечение ответчиком бесперебойной видеотрансляции хода выполнения  работ на объекте в режиме реального времени (п. 4.1.21. договора), неустойка - 4 003  247,94 руб.;  

не разработка ответчиком проекта нормативов образования отходов (п. 4.1.23.  договора), неустойка – 8 006 495,88 руб.;  

не проведение ответчиком мероприятий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, не обеспечение на объекте мер противопожарной  безопасности, радиационной безопасности, правил санитарии (п. 4.1.26. договора),  неустойка - 4 003 247,94 руб.  

Поскольку штраф, являясь мерой гражданско-правовой ответственности, носит  компенсационный характер и не может служить источником обогащения одной из  сторон, по своей правовой квалификации нарушения условий п.п. 1.6., 3.8., 4.1.5.,  4.1.16., 4.1.17., 4.1.20., 4.1.21., 4.1.23., 4.1.26. договора представляют собой случаи  ненадлежащего исполнения договорных обязательств, не имеющих стоимостного  выражения, что ответчиком (подрядчиком) не опровергнуто путём предоставления  соответствующих доказательств, то подлежит применению 5.6. договора как основание  для расчёта штрафа (начисления неустойки) для истца (субподрядчика) за  ненадлежащее исполнение им своих обязанностей по п.1.6. (не представление  приложений №№ 1-5 к договору), п.3.8. (не представление отчётной первичной  документации на выполненные работы, исполнительной документации, фотофиксации),  п.4.1.5. (не установка информационного щита на стройплощадке в срок до 28.12.2020),  п.4.1.16. (не установка в срок до 28.12.2020 ограждения строительной площадки, мойки  колёс, места хранения стройматериалов и противопожарного инвентаря), п.4.1.17. (не  разработка и не предоставление ответчику проекта производства работ, проект на  временные инженерные коммуникации и сооружения ), п.4.1.20. (необеспечение  ответчиком за свой счёт содержания круглосуточной охраны объект), п.4.1.21. (не  обеспечение ответчиком бесперебойной видеотрансляции хода выполнения работ на  объекте в режиме реального времени), п.4.1.23. (не разработка ответчиком проекта  нормативов образования отходов, п.4.1.26. (не проведение ответчиком мероприятий по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не обеспечение на объекте мер  противопожарной безопасности, радиационной безопасности, правил санитарии.  

С учётом пункта 5.6. договора, за каждый факт ненадлежащего исполнения  договорных обязательств, не имеющих стоимостного выражения, предусмотрен штраф  в размере 10 000,00 руб., нарушений – 9, всего на общую сумму 90 000,00 рублей.  

При рассмотрении заявления ответчика об уменьшении предмета встречного  иска необходимо принять во внимание то, что вменяемые ответчиком истцу нарушения  п.п. 3.8., 4.1.5., 4.1.16., 4.1.17., 4.1.20., 4.1.21., 4.1.23., 4.1.26. договора:  

не повлияли на принятие ответчиком (подрядчиком) выполненных истцом  (субподрядчиком) работ по договору за период с 24.12.2020 по 26.02.2021, акты (КС   № 2) и справки (КС № 3) № 1 от 31.01.2021 и № 2 от 26.02.2021 на принятые работы  подписаны ответчиком (подрядчиком) без замечаний, возражений и претензий,  частично оплачены в размере 31 012 991 руб. 75 коп.;  

не повлекли для ответчика наступления негативных последствий при  исполнении им как генподрядчиком контракта с госзаказчиком за период с 24.12.2020  по 28.02.2021, работы госзаказчиком от генподрядчика за период с 24.12.2020 по  28.02.2021 приняты по актам и справкам (КС №№ 2,3) без замечаний, оплачены  полностью. Доказательств иного ответчиком не представлено.  

В письме от 19.05.2021 исх. № 39 субподрядчик указал, что вместе с актом о  приемке работ по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 от 31.01.2021 № 1  подрядчику была предоставлена исполнительная документация по вывозу и утилизации  отходов 5 класса опасности, у субподрядчика имеются товарно-транспортные  

накладные по вывозу мусора и протоколы лабораторных исследований отходов,  подтверждающие 5 класс опасности, данные документы будут предоставлены  подрядчику после подписания последним оригиналов форм №№ КС-2 и КС-3 и акта  взаиморасчетов по договору по состоянию на 19.05.2021.  

В период действия договора с 24.12.2020 по 26.02.2021 субподрядчиком были  выполнены, а подрядчиком приняты работы по договору на общую сумму на 62 359 943  руб. 93 коп. На выполненные работы и их стоимость подрядчиком подписаны акты (КС   № 2) о приёмке выполненных работ и справки по форме № КС-3 № 1 от 31.01.2021 на  48 687,64 руб. и № 2 от 26.02.201 на 13 672,29 руб. Данные документы ответчиком  (подрядчиком) подписаны без замечаний и возражений. Претензий по объёму, качеству,  сроку и стоимости принятых по договору работ за период с 24.12.2020 по 26.02.2021  подрядчик не заявил. Доказательства иного в материалах дела отсутствуют.  

Штраф в размере 400 324,79 руб. (0,5% от цены договора – п.5.5. договора) за не  предоставление приложений 1-5 к договору, закреплённой пунктом 1.6. договора,  является неправомерно начисленным субподрядчику, в данном случае подлежит  ответственность, предусмотренная п. 5.6. договора (10 000 руб.).  

Штраф в размере 40 000 руб. за непредставление комплектов первичной учетной  документации, исполнительной документации, фотофиксации, закреплённой пунктом  3.8. договора, является неправомерно начисленным субподрядчику, в данном случае  подлежит ответственность, предусмотренная п. 5.6. договора (10 000 руб.).  

Штраф в размере 4 263 507,77 руб. (5% от цены договора – п.5.8. договора) за  просрочку выполнения работ за март –апрель 2021 является неправомерно  начисленным субподрядчику, поскольку в данном случае не приступление  субподрядчика к выполнению работ в период с марта по апрель 2021 стало следствием  действий подрядчика по не полной оплате принятых им работ за период с 24.12.2020 по  26.02.2021, что исключает ответственность субподрядчика по пункту 5.8. договора –  штраф 5% от цены договора - 4 263 507,77 руб.  

Штраф в размере 4 003 247,94 руб. за не установку информационного щита на  стройплощадке в срок до 28.12.2020 (п.4.1.5. договора) является неправомерно  начисленным субподрядчику, в данном случае подлежит ответственность,  предусмотренная п. 5.6. договора (10 000 руб.).  

Штраф в размере 4 003 247,94 руб. за не установку в срок до 28.12.2020  ограждения строительной площадки, мойки колёс, места хранения стройматериалов и  противопожарного инвентаря (п.4.1.16. договора) является неправомерно начисленным  субподрядчику, в данном случае подлежит ответственность, предусмотренная п. 5.6.  договора (10 000 руб.).  

Штраф в размере 800 649,58 руб. за не установку и не предоставление проекта  производства работ, проект на временные инженерные коммуникации и сооружения  (п.4.1.17. договора) является неправомерно начисленным субподрядчику, в данном  случае подлежит ответственность, предусмотренная п. 5.6. договора (10 000 руб.).  

Штраф в размере 4 003 247,94 руб. за необеспечение содержания круглосуточной  охраны объект (п.4.1.20. договора) является неправомерно начисленным субподрядчику,  в данном случае подлежит ответственность, предусмотренная п. 5.6. договора (10 000  руб.).  

Штраф в размере 4 003 247,94 руб. за необеспечение бесперебойной  видеотрансляции хода выполнения работ на объекте в режиме реального времени  (п.4.1.21. договора) является неправомерно начисленным субподрядчику, в данном  случае подлежит ответственность, предусмотренная п. 5.6. договора (10 000 руб.).  

Штраф в размере 8 006 495,88 руб. за не обеспечение уборки территории и  вывоза строительных отходов с неё, за не разработку проекта нормативов образования  отходов и лимитов на их размещение (п.4.1.23. договора) является неправомерно  

начисленным субподрядчику, в данном случае подлежит ответственность,  предусмотренная п. 5.6. договора (10 000 руб.).  

Штраф в размере 4 003 247,94 руб. за не проведение мероприятий по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не обеспечение на объекте мер  противопожарной безопасности, радиационной безопасности, правил санитарии  (п.4.1.26. договора) является неправомерно начисленным субподрядчику, в данном  случае подлежит ответственность, предусмотренная п. 5.6. договора (10 000 руб.).  

По встречному иску о взыскании неустойки с учётом заявления от 06.05.2022 об  изменении размера требований по встречному иску ответчик (субподрядчик) заявил об  уменьшении неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ.  

В порядке статьи 333 ГК РФ, учитывая, что нарушение за не приступление  субподрядчика к выполнению работ в период с марта по апрель 2021 стало следствием  действий подрядчика по не полной оплате принятых им работ за предыдущий период с  24.12.2020 по 26.02.2021, в рассматриваемом случае является незначительным и не  повлёкшим негативные последствия для подрядчика (ответчика) – работы за период с  24.12.2020 по 28.02.2021 подрядчик по контракту передал госзаказчику, последний их  принял и оплатил, за период с марта по апрель 2021 по невыполненным работам  госзаказчик не заявил генподрядчику штрафных требований, применение к  судбподрядчику штрафа 5% от цены договора (4 263 507,77 руб.) является чрезмерным,  в связи с чем суд уменьшает сумму штрафа (неустойки) с 4 263 507,77 руб. (0,1% от  цены договора за каждый день просрочки) до 813 203,20 руб. (0,1% от цены стоимости  невыполненных работ договора (13 331 200,00 руб.) за каждый день просрочки.  

При таких обстоятельствах по встречному иску подлежит взысканию неустойка  на общую сумму в 903 203,2 руб.  

 В остальной части встречного иска следует отказать. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГК ИСНЕС" в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ-29" 31 346 952 руб. 18  коп. долга, 179 734 руб. 76 коп. судебных расходов по уплате государственной  пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ-29"  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГК ИСНЕС" 903 203 руб. 20 коп.  неустойки.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет удовлетворенных требований сторон и взыскать с Общества с  ограниченной ответственностью "ГК ИСНЕС" в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ-29" 30 623 483 руб. 74 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ-29"  в доход федерального бюджета 24 754 руб. 00 коп. государственной пошлины по  встречному иску.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГК ИСНЕС" в доход  федерального бюджета 165 882 руб. 00 коп. государственной пошлины по встречному  иску.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

 Электронная подпись действительна.Судья Дан ные ЭП :Удостов еряющий  центр Фед еральное кКазноарчеойссттваошов А.А. 

Дата 22.12.2021 8:13:51

 Кому выдана Коросташов Алексей Анатольевич