ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-110457/20-117-725

город Москва

17 ноября 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 22 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2020 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Большебратской Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

публичного акционерного общества «РОССЕТИ Московский регион» (115114, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "АХУН" (143396 Москва город поселение Первомайское деревня Жуковка, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 

<

***>)

о расторжении договора

по встречному иску ООО «АХУН» к ПАО «РОССЕТИ Московский регион» о признании продленными технических условий на срок до 20.02.2022 и об обязании ПАО «РОССЕТИ Московский регион» осуществить мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в соответствии с договором,

при участии: 

от ПАО «РОССЕТИ Московский регион»: ФИО2 - представитель;

от ООО «АХУН»: ФИО3 - представитель;

установил:

ПАО «РОССЕТИ Московский регион» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № НМ-18-354-526(909557) от 26.02.2018, заключенного с ООО «АХУН».

Определением суда от 28.08.2020 принято встречное исковое заявление ООО "АХУН" о признании продленными технических условий на срок до 20.02.2022 и об обязании ПАО «РОССЕТИ Московский регион» осуществить мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в соответствии с договором, а также 100 000 руб. судебных издержек.

Суд заслушал представителей сторон, которые поддержали доводы своих основного и встречного исков, представили взаимные возражения.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

26.02.2018 между ПАО «РОССЕТИ Московский регион» (прежнее наименование ПАО «Московская объединённая электросетевая компания») (далее - истец) и ООО "АХУН" (далее - ответчик) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № НМ-18-354-526(909557) (далее - договор) энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 143397, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Первомайское п., вблизи дер. Жуковка, к.н. 50-50-77/016/2012-175. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 150 кВт.

Неотъемлемой частью и приложением к договору являются технические условия от 20.02.2018 № НМ-18-202-536(909557/102/НМ) (далее - технические условия), предусматривающие выполнение мероприятий по технологическому присоединению как со стороны сетевой организации, так и со стороны Заявителя.

Сетевая организация исполнила взятые на себя обязательства и в соответствии с пунктом I договора выдала заявителю технические условия от 20.02.2018 № НМ-18-202-536(909557/102/НМ).

Согласно п. 5 договора, срок исполнения мероприятий по осуществлению такого присоединения составляет один год, срок действия технических условий - два года со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с пунктом II договора ПАО «РОССЕТИ Московский регион» надлежащим образом и своевременно выполнило свою часть технических условий и обеспечило ООО «АХУН» возможностью осуществления технологического присоединения по договору.

В соответствии с п. 8 договора ООО «АХУН» обязалось надлежащим образом исполнить обязательства по договору осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика, указанные в технических условиях. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, ООО «АХУН» обязано уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий со своей стороны.

Так как срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, установленный договором, истек 30.04.2019, а по состоянию на 22.04.2020 ООО «АХУН» не направило в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, срок осуществления мероприятий по вине ООО «АХУН» оказался нарушенным, что свидетельствует о неисполнении ООО «АХУН» своих обязательств в установленный договором срок.

В связи с неисполнением ООО «АХУН» своих обязательств, ПАО «РОССЕТИ Московский регион» лишилось в полном объеме платы за технологическое присоединение, на которую был вправе рассчитывать при заключении договора и его надлежащем исполнении заказчиком, а также возможных доходов за передачу электроэнергии. При этом в связи с истечением технических условий дальнейшее исполнение договора стало невозможно.

ПАО «РОССЕТИ Московский регион» направило ООО «АХУН» письмо № ДЗН-82-(909557)-20 от 22.04.2020 о расторжении договора ТП на условиях прилагаемого соглашения о расторжении. Ответа на претензию не поступило, в связи с чем, ПАО «РОССЕТИ Московский регион» инициирован настоящий иск.

В обоснование встречных исковых требований ООО «АХУН» указывает на то, что ООО «АХУН» 19.05.2020 № 2-1905 и 05.06.2020 № 1-0506 обращалось в ПАО «МОЭСК» за продлением сроков действия технических условий. Эти обращения удовлетворены не были и были получены отказы в продлении: НМ-20-204-330(798832/125/НМ) от 26.05.2020 и НМ/01/866 от 15.06.2020, мотивированные тем, что отсутствуют со стороны ООО «АХУН» намерения исполнить мероприятия по технологическому присоединению.

ООО «АХУН» направило ПАО «РОССЕТИ Московский регион» уведомление о выполнении технических условий № 1-3006 от 30.06.2020.

ПАО «РОССЕТИ Московский регион» через личный кабинет ООО «АХУН» Интернет-портала МОЭСК https://lk.rossetimr.ru был дан ответ в электронной форме, что «в настоящее время сетевой организацией подготовлены исковые заявления для направления в арбитражный суд г. Москвы по месту нахождения истца. О дате, месте и времени рассмотрения исковых заявлений Вы будете уведомлены соответствующим образом и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Таким образом, продление технических условий и проверка выполнения Вами мероприятий по исполнению технических условий в настоящее время не представляется возможной.».

В силу пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила) технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные этими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации, так как на основании абзаца второго части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее-35-ФЗ) данный вид договора имеет характер публичного.

В соответствии с п. 16 (5) Правил нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении обстоятельств связанных с тем, что ответчик не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий, согласно подпункта а) пункта 16 (6) Правил.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с согласованными условиями и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон, договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Учитывая изложенные обстоятельства, основываясь на ст. ст. 309, 310, 450 ГК РФ, постановлении Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, суд приходит к выводу о том, что ООО «АХУН» нарушен срок выполнения обязательств по договору № НМ-18-354-526(909557) от 26.02.2018, что является существенным нарушением договора, что в свою очередь повлекло лишение ПАО «РОССЕТИ Московский регион» платы за технологическое присоединение.

Встречные исковые требования, в свою очередь, подлежат оставлению без удовлетворения, поскольку за продлением срока действия технических условий общество обратилось за истечением срока их действия, сохранение в настоящее время у сетевой организации технической возможности технологического присоединения встречным истцом не доказано. При этом, суд учитывает, что о невозможности  продления технических условий и проверке выполнения ООО «АХУН» мероприятий по исполнению технических условий заявителю было сообщено в ответах на письма от 26.05.2020, 15.06.2020, 30.06.2020.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы относятся на ООО «АХУН».

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 179, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

решил:

Исковые требования публичного акционерного общества «РОССЕТИ Московский регион» удовлетворить, расходы по государственной пошлине отнести на ответчика.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № НМ-18-354-526(909557) от 26.02.2018, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "АХУН".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АХУН" в пользу публичного акционерного общества «РОССЕТИ Московский регион» расходы по государственной пошлине в сумме 6 000 руб.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "АХУН" оставить без удовлетворения, судебные расходы отнести на истца.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья                                                                    Е.А. Большебратская