Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-9756/2024

г. Хабаровск

14 октября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 октября 2024

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем  О.Г. Лисичкиной

рассмотрев в заседании суда дело по иску муниципального унитарного предприятия «Служба заказчика № 1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681013, 

<

...>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре)

об обязании выполнить работы

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, действующей по доверенности от 25.12.2023 б/н,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

 

Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика № 1» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании выполнить работы по договорам от 18.07.2022 б/н, от 27.07.2022 б/н, взыскании неустойки.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из договоров от 18.07.2022 б/н, от 27.07.2022 б/н, наличие не выполненных работ, обязанность ответчика в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу выполнить работы, право на взыскание неустойки в размере 1 500 руб. с 01.05.2024 по день фактического исполнения.

Ответчик, в судебное заседание не явился, отзыва и возражений на иск не представил.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

18.07.2022 между муниципальным унитарным предприятием «Служба заказчика № 1», заказчик и индивидуальным предпринимателем ФИО1, подрядчик заключен договор на разборку дома, планировку территории, вывоз и захоронение строительного мусора, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по разборке дома № 22 по ул. Баррикадная, вывоза строительного мусора, образовавшегося в результате разборки дома и планировки территории, в ом числе с завозом земляного грунта.

В соответствии с пунктом 2.1.1. договора подрядчик обязуется своими силами выполнить работы по разборке дома и вывезти строительный мусор, образовавшийся в результате разборки дома. Произвести планировку территории, в том числе с завозом земляного грунта, в объеме не менее 50 м3.

Как указано в пункте 2.1.2. договора подрядчик при производстве работ соблюдает правила техники безопасности, производит ограждение опасной зоны, перед началом работ устанавливает на территории производства работ табличку (на листе формата А3), содержащую информацию о сроках выполнения работ, ответственных лицах, контактных номерах телефонов.

В соответствии с пунктом 2.1.5. договора подрядчик обеспечивает уборку территории производства работ, поэтапное освобождение территории работ от строительных материалов и мусора, не реже одного раза в месяц.

В пункте 2.1.7. договора указано, что подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с графиком пункт 3.2. договора.

В соответствии с пунктом 3.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 31.12.2023 начало работ: 18.07.2022, окончание работ: 01.05.2024.

Пунктом 3.2. договора установлено, что подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком:

3.2.1. установка ограждения, не более 3 дней от начала работ.

3.2.2. выполнение работ по разборке дома (выполняется поэтапно не менее 20% в месяц от общего строительного объеме дома).

3.2.3. вывоз строительного материала и мусора с территории производства работ (выполняется по мере разборки не реже двух раз в месяц).

В соответствии с пунктом 4.1. договора подрядчику предоставляется право самостоятельно реализовать материал, полученный в процессе разборки дома № 22 по ул. Баррикадная в счет оплаты выполненных работ, предусмотренных договором.

Пунктом 5.1. договора установлено, что по окончанию работ подрядчик предоставляет акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости, составленный с участием представителя Комсомольского-на-Амуре филиала КГБУ «Хабкрайкадастр».

В соответствии с пунктом 7.3. договора, в случае нарушения сроков окончания работ подрядчик выплачивает заказчику неустойку в сумме 1 500 руб. за каждый день просрочки. За нарушение отдельного этапа работ в соответствии с графиком (пункты 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.) подрядчик выплачивает заказчику неустойку за каждый этап в сумме 1 000 руб. ежемесячно.

27.07.2022 между муниципальным унитарным предприятием «Служба заказчика № 1», заказчик и индивидуальным предпринимателем ФИО1, подрядчик заключен договор на разборку дома, планировку территории, вывоз и захоронение строительного мусора, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по разборке дома № 10 по ул. Восточное шоссе, вывоза строительного мусора, образовавшегося в результате разборки дома и планировки территории, в ом числе с завозом земляного грунта.

В соответствии с пунктом 2.1.1. договора подрядчик обязуется своими силами выполнить работы по разборке дома и вывезти строительный мусор, образовавшийся в результате разборки дома. Произвести планировку территории, в том числе с завозом земляного грунта, в объеме не менее 50 м3.

Как указано в пункте 2.1.2. договора подрядчик при производстве работ соблюдает правила техники безопасности, производит ограждение опасной зоны, перед началом работ устанавливает на территории производства работ табличку (на листе формата А3), содержащую информацию о сроках выполнения работ, ответственных лицах, контактных номерах телефонов.

В соответствии с пунктом 2.1.5. договора подрядчик обеспечивает уборку территории производства работ, поэтапное освобождение территории работ от строительных материалов и мусора, не реже одного раза в месяц.

В пункте 2.1.7. договора указано, что подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с графиком пункт 3.2. договора.

В соответствии с пунктом 3.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 31.12.2023 начало работ: 27.07.2022, окончание работ: 01.05.2024.

Пунктом 3.2. договора установлено, что подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком:

3.2.1. установка ограждения, не более 3 дней от начала работ.

3.2.2. выполнение работ по разборке дома (выполняется поэтапно не менее 20% в месяц от общего строительного объеме дома).

3.2.3. вывоз строительного материала и мусора с территории производства работ (выполняется по мере разборки не реже двух раз в месяц).

В соответствии с пунктом 4.1. договора подрядчику предоставляется право самостоятельно реализовать материал, полученный в процессе разборки дома № 10 по ул. Восточное шоссе в счет оплаты выполненных работ, предусмотренных договором.

Пунктом 5.1. договора установлено, что по окончанию работ подрядчик предоставляет акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости, составленный с участием представителя Комсомольского-на-Амуре филиала КГБУ «Хабкрайкадастр».

В соответствии с пунктом 7.3. договора, в случае нарушения сроков окончания работ подрядчик выплачивает заказчику неустойку в сумме 1 500 руб. за каждый день просрочки. За нарушение отдельного этапа работ в соответствии с графиком (пункты 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.) подрядчик выплачивает заказчику неустойку за каждый этап в сумме 1 000 руб. ежемесячно.

Актами от 18.07.2022, 27.07.2022 объекты переданы подрядчику.

Письмами от 07.05.2023, от 09.08.2023, от 04.10.2023, от 12.12.2023 заказчик уведомлял подрядчика об отсутствии ограждения зоны производства работ по разборке дома 22 по ул. Баррикадная, о необходимости периодически вывозить строительный мусор, а также просил усилить темпы выполнения работ.

Письмами от 07.05.2023, от 09.08.2023, от 04.10.2023, заказчик уведомлял подрядчика об отсутствии ограждения зоны производства работ по разборке дома 10 по ул. Восточное шоссе.

Письмами от 28.09.2023, от 10.10.2023, от 12.12.2023 истец указал, что в отношении лома №10 по ул. Восточное шоссе прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре установлено, что по состоянию на 20.09.2023 работы по разбору дома, вывозу строительного мусора, с проведением планировки территории с завозом земляного грунта не завершены, строительный мусор в полном объеме не вывезен, территория захламлена остатками дома. Также установлено, что в мае 2023 в ходе разбора дома на рабочего обрушилась стена.

Актами обследования от 08.05.2024 установлено, что на спорных объектах отсутствуют ограждения опасной зоны, срок действия договоров истек, работы не завершены, акты о рекультивации не представлены.

Истцом ответчику направлены претензия от 08.05.2024 б/н о нарушении сроков выполнения работ, оплате неустойки.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Отношения сторон основаны на обязательствах подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

На основании статьи 702 ГК РФ по договору подряда она сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3 статьи 401 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 АПК РФ является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Оценив и исследовав представленные доказательства, принимая во внимание отсутствие в деле доказательств выполнения подрядчиком обязательств по заключенным договорам либо принятия всех зависящих от него действий и мер по исполнению условий договоров надлежащим образом и в согласованные сроки, учитывая подтвержденный материалами дела факт невыполнения объема работ, предусмотренного условиями договоров, нарушения последним установленных сроков выполнения работ, отсутствие приостановления выполнения работ, суд пришел к выводу о ненадлежащем выполнении работ ответчиком, доказательств обратного ответчиком не представлено.

Исковое требование истца об обязании индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу выполнить работы подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено о взыскании неустойки в размере 1 500 руб. с 01.05.2024 по день фактического исполнения.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 7.3. договоров, в случае нарушения сроков окончания работ подрядчик выплачивает заказчику неустойку в сумме 1 500 руб. за каждый день просрочки. За нарушение отдельного этапа работ в соответствии с графиком (пункты 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.) подрядчик выплачивает заказчику неустойку за каждый этап в сумме 1 000 руб. ежемесячно.

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016  № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», разъясняется, что истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна.

Требование о начислении неустойки по договорам от 18.07.2022 б/н, от 27.07.2022 б/н подлежит удовлетворению с 01.05.2024 в размере 1 500 руб. в день по день фактического выполнения работ.

Государственная пошлина в  размере 6 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре) в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда выполнить работы по адресу: 

<

...>, предусмотренные договором от 18.07.2022 б/н в виде: проведения ограждения опасной зоны, установки таблички в формате А3, содержащей информацию о сроках выполнения работ, ответственных лицах и контактных номерах телефонов; выполнения работ, направленных на разборку дома, вывоза строительного мусора, образовавшегося в результате разборки этого дома, проведения планировки территории, завоза земляного грунта в объеме не менее 50м3, предоставления акта обследования, подтверждающего факт прекращения существования объекта недвижимости, составленного с участием представителя Комсомольского-на-Амуре филиала краевого государственного бюджетного учреждения «Хабаровский краевой центр государственной  кадастровой оценки и учета недвижимости».

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре) в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда выполнить работы по адресу: 

<

...>, предусмотренные договором от 27.07.2022 б/н в виде: проведения ограждения опасной зоны, установки таблички в формате А3, содержащей информацию о сроках выполнения работ, ответственных лицах и контактных номерах телефонов; выполнения работ, направленных на разборку дома, вывоза строительного мусора, образовавшегося в результате разборки этого дома, проведения планировки территории, завоза земляного грунта в объеме не менее 50м3, предоставления акта обследования, подтверждающего факт прекращения существования объекта недвижимости, составленного с участием представителя Комсомольского-на-Амуре филиала краевого государственного бюджетного учреждения «Хабаровский краевой центр государственной  кадастровой оценки и учета недвижимости».

Начислять неустойку по договору от 18.07.2022 б/н с 01 мая 2024 в размере 1 500 руб. в день по день фактического выполнения работ.

Начислять неустойку по договору от 27.07.2022 б/н с 01 мая 2024 в размере 1 500 руб. в день по день фактического выполнения работ.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

     Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                           Л.А. Збарацкая