Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Тамбов

«06»  мая 2022г.                                    Дело № А64-290/2022

Резолютивная часть решения объявлена 27 апреля 2022 года

Полный текст решения изготовлен 06 мая 2022 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Тишина А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел дело № А64-290/2022 по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «ТамбовТехМонтаж»Тамбовская обл., г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к администрации Умётского района Тамбовской областиТамбовская обл., Уметский р-н, р.п. Умет (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)об отмене уведомленияпри участии в судебном заседании:от истца: ФИО2 - представитель, доверенность от 03.09.2021. от ответчика: ФИО3 - представитель, доверенность №8 от 25.01.2022. 

отводов не заявлено.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ТамбовТехМонтаж» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Администрации Умётского района Тамбовской области о признании незаконным и отмене уведомления №15-12/2673 от 24.12.2021г. об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №0164200003021000277 от 17.03.2021г.

Как следует из материалов дела,  17.03.2021г. между Администрацией Умётского района Тамбовской области от имени муниципального образования - Умётский район Тамбовской области, именуемой в дальнейшем «Заказчик» и ООО «ТамбовТехМонтаж», именуемом в дальнейшем «Подрядчик», был заключен Муниципальный контракт № 0164200003021000277 на: «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.п. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения» (далее -Контракт).

Предмет контракта: «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.п. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения» (п. 1.1. контракта)

Согласно п. 1.2. Контракта Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику Работы на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту, который является Приложением №5 к Контракту и его неотъемлемой частью, извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) Подрядчика (участника закупки), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

Согласно п. 1.4. Контракта виды и объемы работ содержатся в Приложении № 1 к контракту (проектно-сметная документация), Приложении № 2 к Контракту (Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ), Приложение № 3 к Контракту (проект сметы контракта).

Согласно п.2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 35 520 529,74 руб. НДС не облагается.

Цена контракта включает общую стоимость всех работ и строительных материалов, предусмотренных Приложением № 1 к контракту (проектно-сметная документация) и Приложением № 2 к Контракту (Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ), оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению Контракта.

Согласно п.4.1. Контракта Место выполнения работ:   Тамбовская область, Умётский район, р.

<

...> в районе д.28.

Согласно п.4.2. Контракта Сроки выполнения работ: в течение 4-х месяцев с даты заключения контракта.

Дополнительным соглашением №2 к контракту отдельные пункты контракта изложены в следующей редакции:

- « п.2.1 - Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 39 024 033,24 руб. НДС не облагается»;

- « п.4.2 – Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 26.11.2021г. (включительно), согласно Приложения №5 к Контракту (график выполнения строительно-монтажных работ). 

Таким образом, срок выполнения работ составляет 255 календарных дней.

24.12.2021 года на адрес электронной почты Подрядчика поступило Уведомление № 15-12/2673 от 24.12.2021г. об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 17 марта 2021 года № 0164200003021000277 на: «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.п. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения», согласно которого было принято решение отказаться от исполнения контракта в связи с тем, что работы, предусмотренные контрактом, не выполнены в сроки, предусмотренные Контрактом.

Истец считает решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 17 марта 2021 года № 0164200003021000277 на: «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.н. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения» не соответствует требованиям контракта и Федерального закона от 05.03.2014г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

В материалы дела от ответчика поступили возражения.

Представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика исковые требования не признал.

Суд приобщил дополнительные документы.

Дополнений и ходатайств от сторон не поступило.

Оценив представленные в дело доказательства, заслушав в судебном заседании доводы и возражения сторон, суд исходит из следующего.

Статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ - защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, иными способами, предусмотренными законом.

Истец должен обосновать наличие у него материально-правовой заинтересованности в деле и указать, на защиту каких именно его субъективных прав и законных интересов направлены исковые требования, какие права истца могли бы быть защищены (восстановлены) в случае удовлетворения иска

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Исходя из правил, установленных  в статьях 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать   от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований и должны исполняться надлежащим образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются согласно правилам статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обязательства сторон  установлены муниципальным контрактом  №0164200003021000277 от 17.03.2021г. (в редакции  дополнительного соглашения №2 от 19.11.2021г.).

Определение данного вида договора содержится в ст. 702 ГК РФ и сформулировано следующим образом: по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ.

В силу пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Пункт 1 ст. 721 ГК РФ предусматривает, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Оплата выполненных подрядчиком работ, в соответствии со ст. 746 ГК РФ, производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Судом установлено, что 17.03.2021г. между Администрацией Умётского района Тамбовской области от имени муниципального образования - Умётский район Тамбовской области, именуемой в дальнейшем «Заказчик» и ООО «ТамбовТехМонтаж», именуемом в дальнейшем «Подрядчик», был заключен Муниципальный контракт № 0164200003021000277 на: «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.п. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения» (далее -Контракт).

Предмет контракта: «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.п. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения» (п. 1.1. контракта)

Согласно п. 1.2. Контракта Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику Работы на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту, который является Приложением №5 к Контракту и его неотъемлемой частью, извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) Подрядчика (участника закупки), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

Согласно п. 1.4. Контракта виды и объемы работ содержатся в Приложении № 1 к контракту (проектно-сметная документация), Приложении № 2 к Контракту (Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ), Приложение № 3 к Контракту (проект сметы контракта).

Согласно п.2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 35 520 529,74 руб. НДС не облагается.

Цена контракта включает общую стоимость всех работ и строительных материалов, предусмотренных Приложением № 1 к контракту (проектно-сметная документация) и Приложением № 2 к Контракту (Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ), оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению Контракта.

Согласно п.4.1. Контракта Место выполнения работ:   Тамбовская область, Умётский район, р.

<

...> в районе д.28.

Согласно п.4.2. Контракта Сроки выполнения работ: в течение 4-х месяцев с даты заключения контракта.

Дополнительным соглашением №2 к контракту отдельные пункты контракта изложены в следующей редакции:

- « п.2.1 - Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 39 024 033,24 руб. НДС не облагается»;

- « п.4.2 – Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 26.11.2021г. (включительно), согласно Приложения №5 к Контракту (график выполнения строительно-монтажных работ). 

Таким образом, срок выполнения работ составляет 255 календарных дней.

24.12.2021 года на адрес электронной почты Подрядчика поступило Уведомление № 15-12/2673 от 24.12.2021г. об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 17 марта 2021 года № 0164200003021000277 на: «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.п. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения», согласно которого было принято решение отказаться от исполнения контракта в связи с тем, что работы, предусмотренные контрактом, не выполнены в сроки, предусмотренные Контрактом.

Частью 9 статьи 95 Закона N 44-ФЗ установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это предусмотрено контрактом.

Разделом 11 контракта Заказчиком предусмотрены условия расторжения контракта: «11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.2. Право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств: предусмотрено».

Истец считает решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 17 марта 2021 года № 0164200003021000277 на: «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.н. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения» не соответствует требованиям контракта и Федерального закона от 05.03.2014г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отказ ответчика в одностороннем порядке от исполнения контракта в силу ч. 2 ст. 154 ГК РФ является односторонней сделкой. 

Пунктом 1 статьи 166 ГК РФ установлено, что сделка недействительна по основаниям, установленным ГК РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

 Отказ от исполнения контракта, оформленный решением от 28.10.2019г., является односторонней сделкой, которая может быть оспорена на основании статьи 168 ГК РФ.

 Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами (статья 155 ГК РФ). 

Согласно статье 156 ГК РФ к односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. 

В силу пункта 1 статьи 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Судом установлено, что основанием для принятия ответчиком решения об  одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 17 марта 2021 года № 0164200003021000277 послужили следующие обстоятельства:

 - не выполнение истцом претензий ответчика  от 02.04.2021г. № 15-12/667, 04.05.2021г. № 15-12/900,  29.11.2021г.  № 15-12/2396;

- не выполнение истцом предписаний ФБУ «Росстройконтроль», а именно: предписание № 3039-01 от 11.08.2021г., предписание № 3039-02 от 09.09.2021г.; предписание № 3039-03 от 24.09.2021г.; предписание № 3039-04 от 20.10.2021г.; предписание № 3039-05 от 08.11.2021г.; предписание № 3039-05/02 от 12.11.2021г.; предписание № 3039-06 от 09.12.2021г.

Также ответчик в отзыве указывает, что 13.12.2021г. комиссией, утвержденной распоряжением администрации Уметского района от 10.12.2021 № 517а-р, было проведено обследование объекта: «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.п. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения», подготовлен акт обследования объекта. Актом было установлено, что работы, предусмотренные контрактом, не выполнены в сроки, предусмотренные контрактом.

По состоянию на 23.12.2021г. своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик не выполнил.

Суд не принимает, доводы ответчика, изложенные в отзыве, по следующим основаниям.

Пунктом 1 ст. 406 ГК РФ предусмотрено, что кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Согласно п.3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Судом установлено, что в процессе выполнения работ по контракту были выявлены независящие от Подрядчика обстоятельства, создающие невозможность их выполнения и завершения в установленный контрактом срок, а именно:

- несоответствие стоимости оборудования, указанной в проектной документации заводом-изготовителем станции водоподготовки ООО «Экоконсалтинг»;

- невозможность разработки графика производства работ и плана финансирования без информации, которую в обращении от 06.04.2021 № 81 ООО «ТамбовТехМонтаж» просило разъяснить в отношении несоответствия стоимости станции водоподготовки;

- недостатки технологической схемы, предусмотренной проектным решением (необходимость разнести скважины друг от друга на расстояние не менее 25 метров);

- необходимость  замены  технологического   оборудования   в   связи  с  его несовместимостью с объектом.

В силу п.1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Из материалов дела следует, что истец направлял ответчику информацию о замечаниях к проекту с уведомлением о приостановлении работ, что подтверждается следующими письмами от 06.04.2021г. № 81, 15.04.2021г. № 99, 30.04.2021г. № 123, 30.04.2021г. № 125.

При этом суд отмечает, что ответчик, данный факт не оспаривает, напротив ответчик, рассмотрев вышеуказанные истцом обстоятельства, подтвердил необходимость приостановки работ и корректировки проектной документации (письмо от 12.07.2021г. №15-12/1357). 

В результате срок приостановки выполнения работ по контракту составил с 06.04.2021г. по 19.11.2021г., т.е. 228 дней.

В связи с внесенными изменениями в первоначальную проектно-сметную документацию и прохождением экспертизы ПСД, между Заказчиком и подрядчиком было заключено 19.11.2021г. дополнительное соглашение №2 к контракту. При этом, срок с момента возобновления работ по контракту (дата заключения 19.11.2021г. дополнительного соглашения № 2) и новый установленный срок окончания выполнения работ по контракту согласно дополнительному соглашению (до 26.11.2021г.) составил всего 7 календарных дней. 

Следовательно, работы по контракту ни технически, ни технологически в соответствии со строительными нормами и правилами выполнить в данный срок было невозможно.

Судом данные действия ответчика расцениваются как нарушение ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, суд отмечает, что в период приостановки работ Общество принимало меры для надлежащего исполнения контракта, а именно: осуществило закупку дорогостоящего оборудования (станции водоподготовки и резервуаров, буровой установки) и арендовало буровой инструмент, приобрело необходимые материалы, проводило работы, не подлежащие корректировке ПСД (осуществляло подготовку фундаментов, устройство ограждения, строительство подводящего водопровода и другие работы), что подтверждается журналами производства работ, а также следующими актами выполненных работ: №1 от 24.12.2021г., №2 от 24.12.2021г., №3 от 24.12.2021г., №4 от 24.12.2021г., №5 от 24.12.2021г., №6 от 24.12.2021г.

При изложенных обстоятельствах, требования истца о признании решения Администрации Умётского района Тамбовской области об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №0164200003021000277 от 17.03.2021г. на «Строительство водозаборного узла по ул. Мира в районе д.28, р.п. Умёт, Умётского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения», выраженное в уведомлении №15-12/2673 от 24.12.2021г., недействительным, являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору, суд находит их достаточными для разрешения спора по существу. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РЕШИЛ: 

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

2. Признать решение Администрации Умётского района Тамбовской области об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №0164200003021000277 от 17.03.2021г. на «Строительство водозаборного узла по ул.Мира в районе д.28, р.п. Умет, Уметского района, Тамбовской области с отходящими сетями водоснабжения», выраженное в уведомлении №15-12/2673 от 24.12.2021г., недействительным.

3. Взыскать с администрации Умётского района Тамбовской области (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ТамбовТехМонтаж" (

<

...>, кабинет 37, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Истцу выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул. Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу, через арбитражный суд Тамбовской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда www.19aac.ru или Арбитражного суда Центрального округа.

Судья Тишин А.А.