27_885241 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А67-2873/2017

г. Томск

10 августа 2017 года

Арбитражный суд Томской области  

в составе судьи А.В. Кузьмина, при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Шпаренко, при участии: 

от истца: Н.А. Васильчука по доверенности от 27.02.2017 № 07,  от ответчика: ФИО1 по доверенности от 10.10.2016 № 14,  

рассмотрев в судебном заседании дело № А67-2873/2017 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Томская строительная компания «Луч»  (634059, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «РосКитСтрой» (636841, 

<

...>, ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 50 000 рублей, встречному иску общества с ограниченной ответственностью «РосКитСтрой» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Томская строительная компания «Луч»  о взыскании 45 000 рублей,  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Томская  строительная компания «Луч» удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РосКитСтрой» (636841,  

<

...>,  ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Томская строительная компания «Луч» (634059, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 500 828 рублей 48 копеек, в том  числе 1 211 615 рублей 79 копеек задолженности по договору субподряда от 10.09.2014 №  ркс/10.09.2014/2, 289 212 рублей 69 копеек неустойки за период с 26.03.2015 по 10.08.2017, а  также 2 000 рублей судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску, всего:  1 502 828 рублей 48 копеек.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Томская строительная  компания «Луч» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РосКитСтрой»  106 407 рублей 96 копеек неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с  01.11.2014 по 03.03.2015.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Произвести процессуальный зачет. 

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «РосКитСтрой» (636841, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Томская строительная компания «Луч» (634059, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 396 420 (один  миллион триста девяносто шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 52 копейки.  

Выдать исполнительный лист с указанием суммы, подлежащей взысканию по  результатам процессуального зачета.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РосКитСтрой» (636841,  

<

...>,  ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Томская строительная компания «Луч» (634059, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере одной  трехсотой ставки рефинансирования, равной 8,25 % годовых, от суммы долга за каждый день  просрочки, начиная с 11.08.2017 до даты фактического исполнения обязательства по оплате.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РосКитСтрой» (636841,  

<

...>,  ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 38 806 (тридцать  восемь тысяч восемьсот шесть) рублей 22 копейки государственной пошлины по иску и  встречному иску.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Томская строительная  компания «Луч» (634059, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 2 641 (две тысячи шестьсот сорок один)  рубль 78 копеек государственной пошлины по встречному иску.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия  и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не  превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья А.В. Кузьмин