Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

10. 10. 2023 года.                                                                                      Дело № А40-104406/23-43-840

Резолютивная часть решения объявлена 05. 10. 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 10. 10. 2023 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного казённого учреждения " Служба технического заказчика " Федерального медико-биологического агентства (ОГРН 

<

***>)

к ООО " РТ-СоцСтрой " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 3 200 000 руб. 00 коп. – неустоек,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность № 2/Д-47 от 31.05.2023г., от ответчика – ФИО3, доверенность № 43 от 14.12.2022г.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителей, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 3 200 000 руб. 00 коп. – неустоек, на основании статей 330 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал предъявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, не согласился с доводами ответчика против иска, возражал против удовлетворения ходатайства ответчика о применении судом ст. 333 ГК РФ; представил истребованные судом документы; не заявил о том, что располагает какими-либо иными документами, подтверждающими предъявленный иск, опровергающими возражения ответчика, кроме имеющихся в материалах дела; не возражал против рассмотрения дела по существу в данном судебном заседании по имеющимся в деле документам; каких-либо ходатайств не заявили.

Ответчик направил представителя в судебное заседание, который иск не признал полностью по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, заявив, вместе с тем, ходатайство о применении судом ст. 333 ГК РФ; расчет истца оспорил по основаниям изложенным в отзыве; не заявил о том, что располагает какими-либо иными документами, опровергающими иск, кроме имеющихся в материалах дела; не возражал против рассмотрения дела по существу в данном судебном заседании по имеющимся в деле документам; каких-либо ходатайств не заявил.

Ходатайство ответчика о применении судом ст. 333 ГК РФ, принимая во внимание возражения истца, имеющиеся в деле документы и обстоятельства дела, по мнению суда, следует оставить без удовлетворения за необоснованностью и недоказанностью, как не соответствующее правовой позиции по данному вопросу выработанной в постановлении Пленума Верховного суда РФ № 7 от 24.03.2016 г. (в редакции от 07.02.2017 г.).

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.05.2021 № 1336-р (далее - Распоряжение №   1336-р) федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства (далее - ФГКУ «СТЗ» ФМБА России, Заказчик) определено государственным заказчиком по объекту капитального строительства «Многопрофильный медицинский центр Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, г. Ялта Республика Крым».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2022 № 2106-р (далее - Распоряжение № 2106-р) общество с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой» (далее - ООО «РТ-СоцСтрой», Подрядчик) определено единственный исполнителем осуществляемой федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства в 2022-2023 годах закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта).

Во исполнение Распоряжения № 1336-р и Распоряжения № 2106-р между ФГКУ «СТЗ» ФМБА России и ООО «РТ-СоцСтрой» заключен Государственный контракт от 17.08.2022 № F9230-17/22 на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: Многопрофильный медицинский центр Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, г. Ялта Республика Крым (далее - Контракт).

Пунктом 2.1. Контракта установлено, что Генподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по разработке Рабочей документации, строительству Объекта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Технической документацией (Приложение 2 к Контракту) и Сметой (Приложение № 7 к Контракту) согласно этапам, указанным в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) и сдаче результата Работ Заказчику. Заказчик обязуется принять и оплатить результат надлежаще выполненных Работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

Пункт 2.4.1 Контракта предусматривает, что выполняемые Генподрядчиком Работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Во исполнение п. 4.2.1 Контракта Заказчик согласно акту приема-передачи строительной площадки от 22 августа 2022 г. передал Подрядчику, а Подрядчик принял строительную площадку для выполнения строительно-монтажных работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

Пунктом 4.2.12 Контракта установлено, что Заказчик обязан привлечь Генподрядчика к участию в деле по иску (замечаниям, предписаниям и др.), предъявленному к Заказчику контролирующими органами, в связи с ненадлежащим исполнением им обязательств по Контрактую.

Пункт 4.4.64 Контракта определяет, что Генеральный подрядчик обязан Исполнять обязанности, установленные для Генподрядчика Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Исходя из пункта 5.1 Контракта (в редакции дополнительного соглашения к Контракту от 16.03.2023 № 5) Цена Контракта (цена Работ) составляет 4 753 100 427 (четыре миллиарда семьсот пятьдесят три миллиона сто тысяч четыреста двадцать семь) рублей 32 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по действующей налоговой ставке 20%, что составляет 786 035 911 (семьсот восемьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 55 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

В соответствии с пунктом 11.4 Контракта Генподрядчик несет всю полноту ответственности за соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность строительных работ, а также выполнение различного рода требований административного характера, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и иных обязательных требований на территории Объекта. Предписания контролирующих органов об устранении нарушений требований безопасности, иных обязательных требований выполняются силами и за счет Генподрядчика.

Помимо указанного выше, пункт 4.1.4. Контракта предусматривает, что Заказчик вправе требовать устранения недостатков (дефектов) Работ, иных нарушений, оплаты неустойки в соответствии с разделом 16 Контракта. Пунктами 4.4.33, 4.4.39 Контракта установлено, что Генеральный подрядчик обязан соблюдать сроки выполнения обязательств, а также сроки устранения недостатков, предъявленных Генподрядчику в порядке, установленном Контрактом, обеспечивать устранение за свой счет недостатков, выявленных как в процессе выполнения работ, так и течение гарантийного срока.

В рамках исполнения функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора, Крымским управлением Ростехнадзора проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта: «Многопрофильный медицинский центр Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, г. Ялта Республика Крым» (акт выездной проверки от 14.03.2023 № 14-03/09-33/А).

По результатам указанной проверки, Крымским управлением Ростехнадзора были установлены нарушения ООО «РТ-СоцСтрой» норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере строительства, а именно:

1.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса, пункта 8 РД 11-05-2007 (утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7) Генеральным подрядчиком нарушены требования порядка ведения общего журнала работ (не ведутся 3 и 6 разделы).

При этом пунктом 4.4.46 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан (ежемесячно) вести журнал учета выполненных работ (по форме № КС-ба) и своевременно оформлять исполнительную документацию. Пункт 3.3.1 Контракта Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик ежедневно в соответствии с требованиями РД 11-02-2007 ведет обязательные журналы для производства и контроля строительно-монтажных. Согласно п. 3.8.14 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

2.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 8 РД 11-05-2007 (утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7) Генеральным подрядчиком нарушены требования порядка ведения специальных журналов работ (не заполнены пункты подтверждения проектной прочности бетона).

При этом пунктом 4.1.11 Контракта установлено, что Генподрядчиком в общем журнале и журналах специальных работ ведется учет выполнения работ. В пункте 4.4.46 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан (ежемесячно) вести журнал учета выполненных работ (по форме № КС-ба) и своевременно оформлять исполнительную документацию. Пунктом 3.3.1 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик ежедневно в соответствии с требованиями РД 11 -02-2007 ведет обязательные журналы для производства и контроля строительно-монтажных. Согласно п. 3.8.14 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

3.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта организации строительства 1 Ю1-2021-00036-ПОС, Р 1663-КЖ-0.ВЧ.1 л. 1-9, Генеральным подрядчиком нарушены требования предоставления исполнительной документации (не в полном объеме представлена исполнительная документация на выполненные работы по устройству свай и бетонирование подпорных стен).

При этом пунктом 4.4.23 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить наличие на строительной площадке Технической документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ (в том числе Технической документации и Исполнительной документации, общего и специальных журналов работ), а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. В пункте 4.4.46 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан (ежемесячно) вести журнал учета выполненных работ (по форме № КС-ба) и своевременно оформлять исполнительную документацию. Пунктами 3.5, 3.5.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик в соответствии с условиями Контракта представляет Заказчику следующие документы (заверенные копии, либо оригиналы по согласованию с Заказчиком) на выполненные Работы и Оборудование: Исполнительную документацию в составе, определенном СП 68.13330.2017. Согласно п. 3.8.6, 3.8.15 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр.) и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

4.в нарушении части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 10 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: на строительной площадке не организованы места для временного накопления отходов (бункеры на специально оборудованной открытой площадке с водонепроницаемым покрытием и ограждением с грех сторон).

При этом в пунктах 4.4.8, 4.4.35 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, временных зданий и сооружений, автодорог, складских и монтажных площадок, видеонаблюдения, освещения, поста мойки колес, Объекта и подключенных инженерных сетей. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе оборудует пункты мойки (очистки) колес автотранспорта, бункеры-накопители для строительного мусора и отходов производства. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства.

5.в нарушении части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта организации строительства 1101-2021-00036- ПОС, л. 2, раздела 9.4 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), Генеральным подрядчиком нарушены требования при хранении и использовании газовых баллонов, а именно: допущено хранение и транспортировка баллонов с газами без навинченных на их горловины с предохранительными колпаками. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации не защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Пункты хранения баллонов не оборудованы предупреждающими знаками.

При этом пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) установлено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.12 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования».

6.в нарушении части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не установлены на выезде из стройплощадки посты мойки колес, предусмотренные проектом.

При этом в пунктах 4.4.8, 4.4.35 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, временных зданий и сооружений, автодорог, складских и монтажных площадок, видеонаблюдения, освещения, поста мойки колес, Объекта и подключенных инженерных сетей. Пунктом 8.10 Контракта установлена обязанность Генподрядчика в течение 7 (семи) дней с момента утверждения ППР организовать на объекте «Пункт мойки колес». Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе оборудует пункты мойки (очистки) колес автотранспорта, бункеры-накопители для строительного мусора и отходов производства. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства.

7.в нарушении части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС.ПЗ, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не ведутся в установленном порядке журналы учета движения отходов.

При этом в пунктах 4.4.8, 4.4.35 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, временных зданий и сооружений, автодорог, складских и монтажных площадок, видеонаблюдения, освещения, поста мойки колес, Объекта и подключенных инженерных сетей. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе оборудует пункты мойки (очистки) колес автотранспорта, бункеры-накопители для строительного мусора и отходов производства. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства.

8.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: организация строительной площадки (количество и расположение бытовых контейнеров и складских помещений, количество выездов, устройство временных дорог) не соответствует проекту организации строительства.

При этом в пунктах 4.4.8, 4.4.35 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, временных зданий и сооружений, автодорог, складских и монтажных площадок, видеонаблюдения, освещения, поста мойки колес, Объекта и подключенных инженерных сетей. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламнохудожественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства.

9.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС.ПЗ л. 107, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не установлены шумозащитные экраны.

При этом в пунктах 4.4.8, 4.4.35 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, временных зданий и сооружений, автодорог, складских и монтажных площадок, видеонаблюдения, освещения, поста мойки колес, Объекта и подключенных инженерных сетей. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламнохудожественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства.

10.в нарушении части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта организации строительства 1101-2021-ОООЗб-ПОС.ПЗ л. 108, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: по контуру строительной площадки не организован отвод поверхностных вод.

При этом в пунктах 4.4.8, 4.4.35 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, временных зданий и сооружений, автодорог, складских и монтажных площадок, видеонаблюдения, освещения, поста мойки колес, Объекта и подключенных инженерных сетей. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламнохудожественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства.

11.в нарушении части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта 1663-КЖ-0,8 ч. 1, л. 4, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, в том числе согласно акту от 17.10.2022 № Бт/ПС-8/1 устройство бетонирования сваи № 1 подпорной стены № 8 применен бетон B30F150W10, а по проектной документации B30F50W6.

При этом в пунктах 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктами 15.1-15.2 Контракта установлено, что Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Технической документации, гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями технических регламентов, Технической документации, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. Генподрядчик гарантирует возможность эксплуатации Объекта в соответствии с условиями Контракта на протяжении установленного в Контракте гарантийного срока. Пунктом 3.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) установлено, что Генподрядчик выполняет СМР в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, на основании настоящего технического задания, проектной документации, утвержденной Заказчиком в установленном порядке, определяющих объем, содержание Работ, а также условиями Контракта. Пунктом 3.4.2 Технического задания определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Пунктом 3.4.9 Технического задания установлено, что в случае нарушения Генподрядчиком п. 3.4.5 Технического задания и (или) требований Проектной (Рабочей) документации, Контракта, нормативно-правовых актов, в том числе технологии и последовательности производства Работ, а также требований Административных органов, Генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.

12.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 11, том 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС.ПЗ, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не разработана в составе проекта производства работ схема расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства.

13.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: на строительной площадке не выполнено охранное и аварийное освещение.

При этом в пунктах 4.4.8, 4.4.35 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, временных зданий и сооружений, автодорог, складских и монтажных площадок, видеонаблюдения, освещения, поста мойки колес, Объекта и подключенных инженерных сетей. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера — обращения, рекламнохудожественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства.

14.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 11 тома 6.1, раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п.п. 6.4.1., 6.4.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), п.п. 7, 39, 10 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, п. 2.3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, Генеральным подрядчиком нарушены требования эксплуатации электроустановок, а именно: не подтверждена готовность работника к выполнению трудовых функций по эксплуатации электроустановок, к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики и энергопринимающих: не осуществляется эксплуатация электроустановок строительства объекта, устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей подготовленным электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, соответствующие права и прошедшие проверку знаний в соответствующей комиссии.

При этом в пункте 4.4.41 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан при осуществлении Работ нести ответственность за выполнение действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, требований ведомственных документов и документов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Пунктами 8.6, 8.8 Контракта установлено, что Генподрядчик несет ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ в отношении привлеченных Генподрядчиком лиц, за соблюдение работниками Генподрядчика требований охраны труда, правил выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках, требований обращения с машинами и механизмами, за использование средств индивидуальной защиты. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

15.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17 тома 6.1, раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), п. 2.3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации: не имеют соответствующую группу но электробезопасности работники, относящиеся к электротехнологическому персоналу, использующие в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент, выполняющие сварочные работы, отсутствуют удостоверения у указанных работников.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. В пункте 4.4.41 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан при осуществлении Работ нести ответственность за выполнение действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, требований ведомственных документов и документов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Пунктами 8.6, 8.8 Контракта установлено, что Генподрядчик несет ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ в отношении привлеченных Генподрядчиком лиц, за соблюдение работниками Генподрядчика требований охраны труда, правил выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках, требований обращения с машинами и механизмами, за использование средств индивидуальной защиты. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

16.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17 тома 6.1, раздела 6 проекта организации строительства 1101 -2021 -00036-ПОС, п. 6.4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), п. 11 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, Генеральным подрядчиком не обеспечивается соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе строительных работ - не оформлена документация, в организациях, осуществляющих строительство: списки работников:

а)имеющие право выполнения переключений в электроустановках, ведения оперативных переговоров;

б) имеющие право подачи и согласования диспетчерских и оперативных заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния оборудования и устройств в составе электроустановок;

в) имеющие право единоличного осмотра электроустановок;

г) имеющие право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски, выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ в электроустановках, выполнять обязанности допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. В пункте 4.4.41 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан при осуществлении Работ нести ответственность за выполнение действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, требований ведомственных документов и документов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Пунктами 8.6, 8.8 Контракта установлено, что Генподрядчик несет ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ в отношении привлеченных Генподрядчиком лиц, за соблюдение работниками Генподрядчика требований охраны труда, правил выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках, требований обращения с машинами и механизмами, за использование средств индивидуальной защиты. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

17.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1.СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не представлена схема электрических соединений, в том числе нормальная схема электрических соединений электроустановок строительной площадки, общая схема электроснабжения для нормального режима.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. В пункте 4.4.41 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан при осуществлении Работ нести ответственность за выполнение действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, требований ведомственных документов и документов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Пунктами 8.6, 8.8 Контракта установлено, что Генподрядчик несет ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ в отношении привлеченных Генподрядчиком лиц, за соблюдение работниками Генподрядчика требований охраны труда, правил выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках, требований обращения с машинами и механизмами, за использование средств индивидуальной защиты. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

18.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1 101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 7.29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не предоставлена техническая документация, согласно требованиям правил, в том числе ее утвержденные перечни по эксплуатации электроустановок строительной площадки объекта и организацию эксплуатации временных сетей электроснабжения.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. В пункте 4.4.41 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан при осуществлении Работ нести ответственность за выполнение действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, требований ведомственных документов и документов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Пунктами 8.6, 8.8 Контракта установлено, что Генподрядчик несет ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ в отношении привлеченных Генподрядчиком лиц, за соблюдение работниками Генподрядчика требований охраны труда, правил выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках, требований обращения с машинами и механизмами, за использование средств индивидуальной защиты. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с Г1УЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

19.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-ОООЗб-ПОС, п. 6.4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 7.26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, гл. 1.8 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не проведены испытания и измерения электрооборудования, аппаратов и сетей строительства в установленном порядке. Отсутствует технический отчет о проведенных испытаниях и измерениях электроустановок строительной площадки объекта, строительного городка.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. В пункте 4.4.41 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан при осуществлении Работ нести ответственность за выполнение действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, требований ведомственных документов и документов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Пунктом 4.4.53 установлено, что Генподрядчик обязан провести индивидуальное испытание всех инженерных сетей и Оборудования. Участвовать в его комплексном испытании в присутствии представителя Заказчика с подписанием Сторонами соответствующего акта. Форма акта проведения испытаний оборудования согласовывается Сторонами в порядке, установленном настоящим Контрактом. Пунктами 8.6, 8.8 Контракта установлено, что Генподрядчик несет ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ в отношении привлеченных Генподрядчиком лиц, за соблюдение работниками Генподрядчика требований охраны труда, правил выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках, требований обращения с машинами и механизмами, за использование средств индивидуальной защиты. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

20.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 1.7.51 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не выполнено заземление строительных вагончиков на территории строительства.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

21.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1, 6.4.7 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 1.7.151 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не защищены штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А, наружной установки, а также внутренней установки, устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (УЗО), на территории строительства, в строительном городке.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

22.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 4.1.11 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не указано в полном объеме на приводах коммутационных аппаратов положения «включено» и «отключено» во всех РУ строительных площадках объекта.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

23.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1, 6.4.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 2.1.4, 2.3.14, 2.3.15, 2.3.18 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2022 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: с нарушением проложена кабельная сеть 0,4 кВ строительной площадки и строительного городка, от РУ до токоприемников (не в полном объеме защищены от механических повреждений, не закреплены, проложены частично по земле).

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

24.в нарушении части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1, 6.4.9 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 1.7.51, 1.7.57, 1.7.135 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не выполнена на строительной площадке, в сетях временного электроснабжения, требуемая система заземления TN-C-S (не организованы, согласно требований нормативно-технической документации в РУ шины РЕ и N).

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

25.в нарушении части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 11.28, 4.1.3 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют четкие надписи, указывающие назначение присоединений на автоматических выключателях, установленных в строительных вагончиках, не выполнены 1ЦР-1, ЩР-2, предупреждающие плакаты и знаки электробезопасности установленного образца.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

26.в нарушении части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 2.3.23 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют бирки на кабелях с обозначениями, согласно требованиям правил, в сети временного электроснабжения строительной площадки объекта, бирки не вывешены с обеих сторон в местах прохода кабелей через перегородки и перекрытия на строительной площадке.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера — обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 83Зн, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

27.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); п. 2.3.23 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не выполнена в полном объеме фазировка, обозначение шин, проводников во всех РУ временных сетей электроснабжения строительства объекта, в соответствии с требованиями правил.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране груда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

28.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1 Ю1-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), п. 2.1.21 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, п. 2.1.10, 2.1.11 ГОСТ 10434-82. «Государственного стандарт Союза ССР. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 № 450) Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не выполнено оконцевание жил гибких проводников наконечниками, с использованием фасонных шайб в РУ строительства, включая РУ-0,4 кВ КТП-1790.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

29.в нарушении части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), п. 1.7.100 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не обеспечена непрерывность цепи заземления нейтрали трансформатора в КТП-1790.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

30.в нарушении части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), п. 4.1.18, 4.1.28 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: не закрыты проходы кабеля в РУ, предотвращающие попадание внутрь шкафов пыли, влаги, посторонних предметов, на строительных площадках объектов.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

31.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-00036-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), п. 1.2.1, 1.2.3, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261, Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует утвержденный перечень инвентарных средств защиты и протоколы испытаний электрозащитных средств. Не укомплектован персонал, осуществляющий строительство, защитными средствами, согласно требованиям нормативно-технической документации.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. В пункте 4.4.41 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан при осуществлении Работ нести ответственность за выполнение действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, требований ведомственных документов и документов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Пунктами 8.6, 8.8 Контракта установлено, что Генподрядчик несет ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ в отношении привлеченных Генподрядчиком лиц, за соблюдение работниками Генподрядчика требований охраны труда, правил выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках, требований обращения с машинами и механизмами, за использование средств индивидуальной защиты. Пунктом 8.8 Контракта установлено, что Генподрядчик несет ответственность за соблюдение работниками Генподрядчика требований охраны труда, правил выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках, требований обращения с машинами и механизмами, за использование средств индивидуальной защиты. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Пунктом 3.4.7 Технического задания установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить работников, находящихся на строительной площадке, местах производства работ, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью в соответствие требований законодательства Российской Федерации. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 №2).

32.в нарушении части 3, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 17, тома 6.1 раздела 6 проекта организации строительства 1101-2021-ОООЗб-ПОС, п. 6.4.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), п. 2.4.7 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, п. 2.1.10, 2.1.11 ГОСТ 10434-82. «Государственного стандарт Союза ССР. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 № 450) Генеральным подрядчиком нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют порядковые номера на опорах, установленных на территории строительства.

При этом в пункте 4.4.8 Контракта указано, что Генподрядчик обязан обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией. Пунктом 11.9 Контракта установлено, что Генподрядчик обязан обеспечить содержание территории Объекта в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки и зданий Объекта временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Объекта и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр. Пунктом 11.21 Контракта установлено, что после подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик своими силами, средствами и за свой счет в сроки, установленные Графиком производства Работ, выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по организации Строительной площадки, в том числе осуществит устройство ворот, пешеходных галерей, настилов, перил, дорожных знаков, обустроенного объезда, временных дорог, аварийного освещения, информационного щита, информационного баннера - обращения, рекламно-художественного оформления, защитной строительной сетки, ограждений. Пунктом 3.4.2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту) определено, что Генподрядчик обязан выполнять Работы в последовательности, определенной действующими нормативными актами, Проектной (Рабочей) документацией, условиями Контракта. В частности, с момента приемки по акту приема - передачи строительной площадки, Генподрядчик должен выполнить работы, включенные в подготовительный период (включая работы, предусмотренные Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 833н, работы и мероприятия, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве) с обязательным оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства. Согласно п. 3.8.9, 3.8.12, 3.8.13 Технического задания Генподрядчик выполняет работы в том числе в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2).

Таким образом, Генеральным подрядчиком допущены нарушения условий Контракта и норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере строительства, выразившиеся:

1.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части ведения общего журнала работ;

2.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части ведения специальных журналов работ;

3. в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части ведения и обеспечения наличия на строительной площадке исполнительной документации;

4.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (на строительной площадке не организованы места для временного накопления отходов);

5.в нарушении требований при хранении и использовании газовых баллонов (допущено хранение и транспортировка баллонов с газами без навинченных на их горловины с предохранительными колпаками. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации не защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Пункты хранения баллонов не оборудованы предупреждающими знаками);

6.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не установлены на выезде из стройплощадки посты мойки колес, предусмотренные проектом);

7.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не ведутся в установленном порядке журналы учета движения отходов);

8.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (организация строительной площадки (количество и расположение бытовых контейнеров и складских помещений, количество выездов, устройство временных дорог) не соответствует проекту организации строительства);

9.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не установлены шумозащитные экраны);

10.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (по контуру строительной площадки не организован отвод поверхностных вод);

11.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (в том числе согласно акту от 17.10.2022 № Бт/ПС-8/1 устройство бетонирования сваи № 1 подпорной стены № 8 применен бетон B30F150W10, а по проектной документации B30F50W6);

12.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не разработана в составе проекта производства работ схема расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий);

13.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (на строительной площадке не выполнено охранное и аварийное освещение);

14.в ненадлежащем исполнении обязанностей в части требований эксплуатации электроустановок (не подтверждена готовность работника к выполнению трудовых функций по эксплуатации электроустановок, к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики и энергопринимающих: не осуществляется эксплуатация электроустановок строительства объекта, устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей подготовленным электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, соответствующие права и прошедшие проверку знаний в соответствующей комиссии);

15.в ненадлежащем исполнении обязанностей в части требований проектной документации и эксплуатации электроустановок (не имеют соответствующую группу по электробезопасности работники, относящиеся к электротехнологическому персоналу, использующие в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент, выполняющие сварочные работы, отсутствуют удостоверения у указанных работников);

16.в ненадлежащем исполнении обязанностей в части требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе строительных работ - не оформлена документация, в организациях, осуществляющих строительство;

17.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не представлена схема электрических соединений, в том числе нормальная схема электрических соединений электроустановок строительной площадки, общая схема электроснабжения для нормального режима);

18.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не предоставлена техническая документация, согласно требованиям правил, в том числе ее утвержденные перечни по эксплуатации электроустановок строительной площадки объекта и организацию эксплуатации временных сетей электроснабжения);

19.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не проведены испытания и измерения электрооборудования, аппаратов и сетей строительства в установленном порядке. Отсутствует технический отчет о проведенных испытаниях и измерениях электроустановок строительной площадки объекта, строительного городка);

20.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не выполнено заземление строительных вагончиков на территории строительства);

21.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не защищены штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А, наружной установки, а также внутренней установки, устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (УЗО), на территории строительства, в строительном городке);

22.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не указано в полном объеме на приводах коммутационных аппаратов положения «включено» и «отключено» во всех РУ строительных площадках объекта);

23.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (с нарушением проложена кабельная сеть 0,4 кВ строительной площадки и строительного городка, от РУ до токоприемников (не в полном объеме защищены от механических повреждений, не закреплены, проложены частично по земле);

24.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не выполнена на строительной площадке, в сетях временного электроснабжения, требуемая система заземления TN-C-S (не организованы, согласно требований нормативно-технической документации в РУ шины РЕ и N);

25.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (отсутствуют четкие надписи, указывающие назначение присоединений на автоматических выключателях, установленных в строительных вагончиках, не выполнены ЩР-1, ЩР-2, предупреждающие плакаты и знаки электробезопасности установленного образца);

26.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (отсутствуют бирки на кабелях с обозначениями, согласно требованиям правил, в сети временного электроснабжения строительной площадки объекта, бирки не вывешены с обеих сторон в местах прохода кабелей через перегородки и перекрытия на строительной площадке);

27.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не выполнена в полном объеме фазировка, обозначение шин, проводников во всех РУ временных сетей электроснабжения строительства объекта, в соответствии с требованиями правил);

28.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не выполнено оконцевание жил гибких проводников наконечниками, с использованием фасонных шайб в РУ строительства, включая РУ-0,4 кВ КТП-1790);

29.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не обеспечена непрерывность цепи заземления нейтрали трансформатора в КТП-1790);

30.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (не закрыты проходы кабеля в РУ, предотвращающие попадание внутрь шкафов пыли, влаги, посторонних предметов, на строительных площадках объектов);

31.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (отсутствует утвержденный перечень инвентарных средств защиты и протоколы испытаний электрозащитных средств. Не укомплектован персонал, осуществляющий строительство, защитными средствами, согласно требованиям нормативно-технической документации);

32.в ненадлежащем исполнении обязанностей по контракту в части требований проектной документации (отсутствуют порядковые номера на опорах, установленных на территории строительства), что установлено в ходе выездной проверки Крымским управлением Ростехнадзора (акт выездной проверки от 14.03.2023 № 14-03/09-33/А).

В соответствии с пунктом 16.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Пунктом 16.6. Контракта установлено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем размере: г) 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом размер штрафа за неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет 3 200 000 рублей из расчета: 100 000 (сумма штрафа) х 32 (количество нарушений) = 3 200 000 рублей 00 копеек.

В связи с нарушением сроков исполнения обязательств по Контракту Истец обращался к Ответчику с претензиями от 24.03.2023 № 02/СТЗ-506, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-506, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-507, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-508, от 24.03.2023 №02/СТЗ-509, от 03.10.2022 № 02/СТЗ-510, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-511,     от 24.03.2023 № 02/СТЗ-512, от 03.10.2022 № 02/CT3-513, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-514, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-515, от 03.10.2022 №     02/СТЗ-516, от 24.03.2023 №          02/СТЗ-517, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-518, от  03.10.2022 № 02/СТЗ-519, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-520, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-521, от   03.10.2022 №        02/СТЗ-522, от 24.03.2023 № 02/CT3-523, от 24.03.2023            № 02/СТЗ-524, от 03.10.2022 № 02/СТЗ-525, от 24.03.2023 № 02/СТЗ-526, от 24.03.2023  № 02/СТЗ-527, от      03.10.2022 №            02/СТЗ-528, от            24.03.2023      № 02/CT3-530, от 03.10.2022          № 02/CT3-531, от 24.03.2023 № 02/CT3-532, от 24.03.2023 № 02/CT3-533, от 03.10.2022 № 202/CT3-534, от 24.03.2023 № 02/CT3-535, от 24.03.2023 № 02/CT3-536, от 24.03.2023 № 02/CT3-537, от 27.03.2023 № 02/СТЗ-546.

Таким образом, Истец надлежащим образом исполнил меры досудебного урегулирования, однако Ответчик отказался от оплаты требований Истца, а также не устранил выявленные нарушения.

Размер неустойки судом проверен, установлено, что арифметически и методологически выполнен верно в соответствии с условиями заключенного между сторонами договора.

Доводы Ответчика рассмотрены и отклонены как необоснованные и не подтвержденные документально, факты нарушений зафиксированы документально.

Ссылка Ответчика о том, что требование об обязании устранить замечания по п.9 предписания Заказчика №44 рассматривалось в рамках рассмотрения дела А40-139280/23-83-781 также не принимается судом, поскольку данный факт не опровергнут судом, а лишь установлено отсутствие необходимости в устранении указанного нарушения на момент принятия решения судом.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает пли позволяет определить день его исполнения пли период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Требование истца о взыскании неустоек в сумме 3 200 000 руб. 00 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Ходатайство ответчика о применении судом ст. 333 ГК РФ оставить без удовлетворения.

Взыскать с ООО " РТ-СоцСтрой " (ОГРН 

<

***>) в пользу Федерального государственного казённого учреждения " Служба технического заказчика " Федерального медико-биологического агентства (ОГРН 

<

***>) 3 200 000 руб. 00 коп. – неустоек и расходы по уплате госпошлины в сумме 39 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья

ФИО1