Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-133220/2019

06 июля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНТА" (197374, 

<

...>, литера Б, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СК РЕГИОН" (196084, Санкт-Петербург город, улица Кондратенко, дом 3, литер А, помещение 1Н, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 05.11.2019 

- от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНТА" (далее – ООО "ЛЕНТА") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СК РЕГИОН" (далее – ООО "СК РЕГИОН") о взыскании 917 165,83 руб. неустойки за период с 01.03.2019 по 17.12.2019 по договору от 03.05.2018 № 218-ГП (далее – Договор).

Представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ЛЕНТА" (заказчиком) и ООО "СК РЕГИОН" (исполнителем) заключен Договор, по условиям которого исполнитель по техническому заданию заказчика (приложение № 1) обязуется выполнить из собственных материалов, своими и/или привлеченными силами и средствами в установленный Договором срок комплекс работ по проектированию и интеграции помещений торгового комплекса «Ленкта-2018» (объект), арендуемых заказчиком в здании торгового центра «Соломбала молл», расположенном по адресу: 

<

...>, в том числе:

- подготовить рабочую документация в соответствии с собранными исходными данными, требованиями технического задания (приложение № 1), требованиями СП, ГОСТ, технических регламентов (проектные работы);

- проверить состав и полноту исходных данных для проектных работ, их содержание, уровень детальности и качества выполнения, а также их пригодность для целей выполнения проектных работ. Осуществить сбор недостающих исходных данных, обследование помещений, обследование инженерных систем;

- выполнить комплекс строительно-монтажных и отделочных работ, работы по внутренним инженерным системам в соответствии с проектными решениями, калькуляционным расчетом (приложение № 2) и сводным сметным расчетом (приложение № 3) (строительные работы) в том числе: подключение оборудования, предоставленного заказчиком и автоматизация всех инженерных систем объекта, монтируемых исполнителем;

- осуществлять функции генподрядчика;

- осуществлять авторский надзор за строительством;

- выполнить функции заказчика, установленные законом.

В силу пункта 1.2. Договора работы не считаются выполненными в полном объеме, если не соответствуют условиям Договора и приложениям к нему, не подписан акт исполнения обязательств исполнителя и передачи результата выполненных работ в гарантийную эксплуатацию, указанный в п. 6.2.3. Договора, вследствие ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора работы, предусмотренные Договором, осуществляются исполнителем в следующие сроки: начало работ: 03.05.2018, окончание работ: 31.08.2018, при этом:

- проектные работы: начало 03.05.2018, окончание 04.06.2018;

- строительные работы: начало 03.05.2018, окончание 31.08.2018. 

По п. 3.1. Договора в редакции дополнительного соглашения от 21.01.2019 № 2 к Договору общая стоимость выполняемых работ по Договору составляет 69 711 952,44 руб. без НДС. Налог на добавленную стоимость оплачивается сверх цены Договора по ставке согласно действующему законодательству на дату совершения хозяйственных операций.  

Согласно п. 3.4.1.3. дополнительного соглашения от 22.01.2019 № 3 к Договора оплата фактически выполненных в течение календарного месяца работ осуществляется не ранее первого и не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем, при условии подписания между сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в соответствии с приложением № 3. Вместе с актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат исполнитель обязуется предоставить заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с законодательством РФ, иные документы в отношении результата работ, предусмотренные действующим законодательством и необходимые заказчику для использования результата работ (всей рабочей и исполнительной документации, сертификатов, деклараций, паспортов и инструкций по эксплуатации на смонтированное оборудование, актов на скрытые работы и пр.). 

В соответствии с п. 7.2. договора в случае несоблюдения исполнителем установленного Договором конечного срока завершения работ, исполнитель обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,15% от стоимости невыполненных работ, предусмотренных п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки.  

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по от 30.04.2019 № 7, акты о приемке выполненных работ от 30.04.2109 № 7 на сумму 2 391 185,70 руб., от 30.06.2018 № 1 на сумму 17 120 393,18 руб., от 30.09.2018 № 4 на сумму 7 980 558,37 руб., от 30.11.2018 № 6 на сумму 1 925 000 руб., от 31.07.2018 № 2 на сумму 29 613 869,17 руб., от 31.08.2018 № 3 на сумму 16 234 842 руб., от 31.10.2018 № 5 на сумму 4 967 946,50 руб., справки о стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающие выполнение работ по Договору на общую сумму 80 233 794,92 руб. (с НДС).

ООО "ЛЕНТА", ссылаясь на то, что сумма Договора с учетом НДС составила 82 334 976,67 руб., в то время как ООО "СК РЕГИОН" не выполнило работы на сумму 2 101 181,75 руб., в претензии от 30.07.2019 № 73414 потребовало оплатить неустойку на основании пункта 7.2 договора.

ООО "СК РЕГИОН" не исполнило указанное требование, что послужило основанием для обращения ООО "ЛЕНТА" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Стороны подписали дополнительное соглашение 22.01.2019 №3 к Договору, в котором определили срок окончания всего комплекса работ по Договору - 28.02.2019.

Исполнитель не выполнил предусмотренные договором работы в срок. Стороны 31.10.2018 составили Акт № 1 приемки объекта в эксплуатацию, в котором установили неготовность к приемке в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования, их неработоспособность, отсутствие произведенного монтажа этих систем. Исполнитель отразил в указанном акте свою обязанность устранить недостатки в срок до 20.02.2019.

Поскольку исполнитель в полном объеме не устранил установленные недостатки, 13.03.2019 Заказчик направил Исполнителю претензию № 66496 от 13.03.2019 с требованием оплатить неустойку за нарушение срока выполнения работ.

Стороны 18.03.2019 произвели на объекте совестный осмотр выполненных работ и подписали Акт о выявленных недостатках (дефектах).

Представленными в материалы дела актами формы КС-2 подтверждается выполнение исполнителем работ на общую сумму 80 233 794,92 руб.

ООО "ЛЕНТА" начислило 917 165,83 руб. неустойки за период с 01.03.2019 по 17.12.2019 на основании пункта 7.2 договора.

Проверив расчет неустойки, суд признает его верным.

Ответчик отзыв на исковое заявление и доказательства выполнения работ на сумму начисления неустойки, а также доказательства оплаты неустойки не представил.

На основании изложенного, исковые требования в сумме 917 165,83 руб. неустойки подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК РЕГИОН" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛЕНТА" 917165,83 руб. неустойки и  21343 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Т.А. Косенко