Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-4718/2022

21 сентября 2022 г.

г. Ханты-Мансийск

   Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Агеева А.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного  учреждения «Лесопарковое хозяйство» (628401, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата  присвоения ОГРН: 23.01.2003, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «СибирьСпецТранс» (628401, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата  присвоения ОГРН: 14.08.2008, ИНН: 

<

***>) об устранении недостатков выполненных  работ и взыскании 453 081 рубля 40 копеек,  

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО2 по доверенности № 86 АА 3081939 от 29.01.2021,  от ответчика – не явились,  

 руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры,  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТранс» в течении 30  календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно  устранить недостатки работ, выполненных по гражданско-правовому договору на  выполнение работ по строительству (обустройству) объекта «Сквер «Театральный» № А-53  от 05.08.2019, обнаруженных в пределах гарантийного срока, а именно:  

1) Устранить на опорах освещения шелушения, отслоения окрасочного слоя, следы  коррозии металла труб нижней части опор освещения (в зоне фланцевого соединения с  подземной частью, возле смотрового люка);  

2) Устранить коррозию на металлических поверхностях корпуса шкафа электрического  КШУ и постамента под шкаф, выполненного из угловой стали;  

3) Очистить от строительного мусора в виде обломков железобетона и остатков щебня  почвогрунт на отдельных участках газонов, кроме того, устранить нарушение технологии  

устройства газонов - поверхность осевшего растительного слоя на всех газонах ниже  окаймляющего борта на 5-6 см, что превышает допустимое значение в 3 раза.  

4) Выполнить надлежащим образом переустройство канализационного люка ливневой  канализации на пешеходной дорожке в районе детской игровой площадки № 2:  

 - установить крышку люка в одной отметке с покрытием тротуара; 

 - устранить растрескивание бетона вокруг регулировочного кольца люка;  

 - устранить дефекты покрытия из тротуарной плитки в узле примыкания к  канализационному люку в виде подвижности тротуарной плитки и вымывания  пескоцементной смеси в швах.  

5) Устранить нарушение технологии деталей крепления бортового камня БР 100.20.8  (на участке пешеходной дорожки протяженностью 2,5 пог.м в районе спортивной площадки)  вьmолнить: заделку бетоном боковой поверхности бортового камня на высоту 10 см.  устранить просадку бортового камня на 10 мм по отношению к планировочной отметке  покрытия пешеходной дорожки.  

Результат устранения недостатков сдать Истцу по акту сдачи-приемки работ. 

В случае неисполнения Ответчиком решения суда, в течение 30 календарных дней с  момента вступления в законную силу решения суда, предоставить муниципальному  казенному учреждению «Лесопарковое хозяйство» право своими силами исправить  недостатки работ с последующим отнесением всех затрат по устранению на счет Ответчика.   Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТранс» в пользу  муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» 240 071 рубль 51 копейка,  в том числе договорную неустойку (штраф) в размере 226 540 рублей 70 копеек, а также  расходы по оплате государственной пошлины в сумме 13 531 рубль 00 копеек.  

 Вернуть муниципальному казенному учреждению «Лесопарковое хозяйство» из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 531 рубль 00 копеек,  уплаченную по платежному поручению № 36057 от 04.03.2022.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры.  

 В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа  и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

 Судья А.Х. Агеев 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 09.12.2021 2:05:45Кому выдана Агеев Артур Хамитович