46/2018-352946(1) 

Арбитражный суд Ярославской области 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 

http://yaroslavl.arbitr.ru  

 Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  (резолютивная часть)

Дело № А82-8473/2018

г. Ярославль

04 сентября 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Фирсова А.Д.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление 

федерального государственного казенного учреждения комбинат «Октбярьский» Управления  Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному  округу (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Пересвет-Инвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании 1440035 рублей, возложении обязанности устранить недостатки  

при участии от истца –ФИО2 по доверенности 04.12.2017 от ответчика – не явился 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Пересвет-Инвест» в пользу федерального  государственного казенного учреждения комбинат «Октбярьский» Управления  Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному  округу неустойку в размере 1440035 рублей.  

Возложить на акционерное общество «Пересвет-Инвест» обязанность в течении 30  дней со дня вступления настоящего решения суда в законную силу устранить недостатки  выполненных работ по контракту от 11 февраля 2015 года № 20-ГК/2015-ФАИП а именно:  

1) Устранить разрушение фундаментов опор кабельной эстакады, технологических  трубопроводов;  

2) Устранить «провисание» технологического трубопровода, идущего от фильтров  тонкой очистки к врезке над опорами фундамента;  

3) Устранить коррозию, восстановить лакокрасочное покрытие (ЛКП) на  технологических трубопроводах участок от блока фильтров до места врезки,  металлоконструкции кабельной эстакады резервуарного парка, на переходных мостиках и  металлоконструкций под лафетными стволами;  

4) Заменить неисправные датчики. После замены датчиков необходимо провести  наладку системы контроля и загазованности.  

5) Устранить пустоты и провалы тротуарной плитки в районе продуктовой насосной,  насосной пенотушения.  

Взыскать с акционерного общества «Пересвет-Инвест» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 33400 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том  числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети  «Интернет».  

Судья Фирсов А.Д.