Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-80032/25-14-584

г. Москва

15 июля 2025 года

Резолютивная часть объявлена                                                                 16 июня 2025 г.

Дата изготовления решения в полном объеме                                        15 июля 2025 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего - судьи Лихачевой О.В.

Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю.Ю., с использованием средств аудиозаписи

рассмотрев дело по иску ООО "УВП - КС" (ИНН 

<

***>)

к НАО "ИРМАСТ-ХОЛДИНГ" (ИНН 

<

***>)

о взыскании 112 740 894,40 руб.

в судебное заседание явились:

от истца– Куприянова Ю.Н. по доверенности от 03.03.2025г.

в судебное заседание не явились:

от ответчика –извещён;

УСТАНОВИЛ:

ООО «УВП Комплексные системы» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к НАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГС» о взыскании:

- по Договору строительного субподряда № 10-07/2023 от 10.07.2023 г.:

- суммы основного долга в размере 73 829 248, 31руб., пени по п. 15.11 Договора за период с 23.01.2024г. по 31.03.2025г. в размере 9 509 721,12 руб., дальнейшее взыскание пени по п. 15.11. Договора производить путем начисления на сумму долга начиная с 01.04.2025г. по момент фактической оплаты суммы основного долга;

- по Договору строительного субподряда № 15-08/2023-ИХ от 15.08.2024 г.:

- суммы основного долга в размере 21 372 807. 50 руб., пени по п. 15.6. Договора за период с 11.01.2024 г. по 31.03.2025 г. в размере 5 275 517,48 руб., дальнейшее взыскание пени по п. 15.6 Договора производить путем начисления на сумму долга начиная с 01.04.2025 г. по момент фактической оплаты суммы основного долга;

- по Договору № ПД 11/04-2023-И от 11.04.2023 г.:

- суммы основного долга в размере 360 000 руб., пени по п. 6.2. Договора за период с 2610.2023 г. по 31.03.2025 г. в размере 158 000,00 руб., дальнейшее взыскание пени по п. 6.2. Договора производить путем начисления на сумму долга начиная с 01.04.2025 г. по момент фактической оплаты суммы основного долга;

- по Договору РД 1301 РД от 13.01.2023 г.:

- сумму основного долга в размере 1 800 000,00 руб., пени по п 6.2. Договора за период с 02.08.2024 г. по 31.03.2025 г. в размере 435 600,00 руб., дальнейшее взыскание пени по п. 6.2. Договора производить путем начисления на сумму долга начиная с 01.04.2025 г. по момент фактической оплаты суммы долга.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, в заседание суда первой инстанции не явился. Отзыв не представил, иск по праву и размеру документально не оспорил.

Учитывая надлежащее уведомление ответчика о дате, времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 12 от 04 июня 2024 г., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие ответчика, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ по материалам, представленным истцом и не оспоренным ответчиком.

Выслушав представителя истца, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению полностью по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Так, между Истцом и Ответчиком был заключен Договор строительного субподряда № 10-07/2023 от 10.07.2023 г. (далее - Договор 1), Договор строительного субподряда № 15-08/2023-ИХ от 15.08.2024 г. (далее - Договор 2), Договор № ПД 11/04-2023-И от 11.04.2023 г. (далее - Договор 3) и Договор № РД 1301 РД от 13.01.2023 г. (далее - Договор 4).

1. Исковые требования по Договору строительного субподряда № 10-07/2023 от 10.07.2023 г. (далее - Договор 1).

Как уже указано выше, между Обществом с ограниченной ответственностью «Уникальные волоконные приборы - Комплексные системы» (далее - Истец) и Непубличным акционерным обществом «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» (далее - Ответчик) заключен Договор строительного субподряда№ 10-07/2023 от 10.07.2023 г. (далее-Договор-1).

В соответствии с п. 2.1. Договора-1 в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 03.06.2024 Генподрядчик (Ответчик) поручает, а Субподрядчик (Истец) обязуется в соответствии с Рабочей документацией выполнить строительные, монтажные, пусконаладочные и другие связанные с Объектом работы, перечень и объем которых определяется «Ведомостью объемов и стоимости работ по объекту» (Приложение № 1 к Договору) и «Ведомостью объемов и стоимостью оборудования и материалов» (Приложение № 1.1. к Договору), и передать их Генподрядчику в установленном Договором порядке.

Как следует из Приложения № 1 к Договору-1 в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 03.06.2024 г. общая стоимость работ составляет 161 753 246,51 руб. (Сто шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят три тысячи двести сорок шесть рублей 51 копеек) в том числе НДС 20%. При этом стоимость материалов и оборудования, согласно Приложению № 1.1. к Договору-1 составляет 60 253 813,70 руб. (Шестьдесят миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот тринадцать рублей 70 копеек), в том числе НДС 20%.

Согласно п. 9.4. Договора-1 в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2023г оплату по Договору Генподрядчик осуществляет, следующим образом:

- авансовый платеж в размере - 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 копеек) в том числе НДС 20% в размере 1 166 666,67 руб. (один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек), Генподрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика в срок до 20.07.2023 г. при условии получения счета от Субподрядчика.

- авансовый платеж в размере - 26 600 000,00 руб. (Двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС 20% в размере 4 433 333,33 руб. (Четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки), Генподрядчик выплачивает на отдельный лицевой счет (подсчет) открытый Субподрядчику в территориальном органе Федерального казначейства в срок до 05.08.2023 г.

- авансовый платеж в размере 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 копеек) в том числе НДС 20% в размере 1 166 666,67 руб. (один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек) Генподрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика в срок до 22.09.2023 г. при условии получения счета от Субподрядчика.

- авансовый платеж в размере - 22 500 000,00 руб. (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек) в том числе НДС 20% в размере 3 750 000,00 руб. (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) Генподрядчик перечисляет Субподрядчику в срок до 25.01.2024.

- оплата принятого оборудования и материалов, а также выполненных работ осуществляется за вычетом аванса в размере 30% от стоимости.

- оплата принятого по товарной накладной № 17714549744210000700/113 от 22.12.2023 г. оборудования и материалов в размере 26 730 812,34 руб. (Двадцать шесть миллионов семьсот тридцать тысяч восемьсот двенадцать рублей 34 копейки) в том числе НДС 20% в размере 4 455 135,39 руб. (Четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч сто тридцать пять рублей 39 копеек) осуществляется в следующем порядке:

а) 30% стоимости оборудования и материалов по товарной накладной № 17714549744210000700/113 от 22.12.2023 г. засчитывается в счет ранее выплаченного аванса.

б) 70% стоимости оборудования и материалов по товарной накладной № 17714549744210000700/113 от 22.12.2023 г. Генподрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 15 рабочих дней после подписания товарных накладных.

В соответствии с условиями Договора-1 и дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2023 Генподрядчиком был выплачен Субподрядчику совокупный аванс в размере 69 100 000,00 руб. (Шестьдесят девять миллионов сто тысяч рублей 00 копеек).

Согласно п. 9.19 Договора-1 оплата Работ по Договору производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Актов приемки выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ/затрат (КС-3) на основании выставленного счета.

Оплата поставленного Оборудования и Материалов осуществляется Генподрядчиком на расчетный счет Субподрядчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания УПД Генподрядчиком.

В период срока действия Договора-1 Истец надлежащим образом выполнял свои обязательства по Договору-1 на общую сумму 221 640 816, 95 руб. (Двести двадцать один миллион шестьсот сорок тысяч восемьсот шестнадцать рублей 95 копеек), что подтверждается актами выполненных работ по форме КС-2, товарными накладными, согласно которым Истец поставлял материалы и оборудование на Объект, а также актом о полном исполнении обязательств по Договору от 22.11.2024 года.

Вместе с тем, Ответчик свои финансовые обязательства по Договору-1 исполнил не в полном объеме.

Так, в нарушение п. 9.4. Договора-1 в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2023 г. Ответчик несвоевременно перечисли оплату в размере 70% стоимости оборудования и материалов по товарной накладной № 17714549744210000700/113 от 22.12.2023 г.

Кроме того, Ответчиком в нарушение п. 9.19 Договора-1 не полностью оплачены надлежащим образом выполненные Истцом работы, ввиду чего у него образовалась задолженность в размере 73 829 248,31 руб. (Семьдесят три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч двести сорок восемь рублей 31 копейка).

В соответствии с п. 15.11 Договора-1 в случае просрочки исполнения Генподрядчиком (Ответчиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком (Ответчиком) обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик (Истец) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком (Ответчиком) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

На основании условий Договора Истец направил в адрес Ответчика претензию № ИЗ 1-01-25-3 от 31.01.2025 г. с требованием в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии перечислить на счет Истца денежные средства в размере 80 289 821,63 руб. (Восемьдесят миллионов двести восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать один рубль, 63 копейки), из которой 73 829 248,31 руб. (Семьдесят три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч двести сорок восемь рублей 31 копейка) - сумма основного долга и 6 460 573,32 руб. (Шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят три рубля 32 копейки) - пени за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных работ за период с 23.01.2024 по 31.01.2025 г.

Денежные средства или мотивированные возражения по состоянию на 31.03.2025 от Ответчика в адрес Истца так и не поступили.

Таким образом по состоянию на 31.03.2025 г. общий размер требований Истца к Ответчику составляет 83 338 969,43 руб. (Восемьдесят три миллиона триста тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей 43 копейки), из которой 73 829 248,31 руб. (Семьдесят три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч двести сорок восемь рублей 31 копейка) - сумма основного долга по Договору-1 и 9 509 721,12 руб. (Девять миллионов пятьсот девять тысяч семьсот двадцать один рубль 12 копеек) - пени за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных работ за период с 23.01.2024 по 31.03.2025.

2. Исковые требования по Договору строительного субподряда № 15- 08/2023-ИХ от 15.08.2024 г. (далее - Договор-2).

Между Истцом и Ответчиком был заключен Договор строительного субподряда № 15- 08/2023-ИХ от 15.08.2024 г. (далее - Договор-2).

В соответствии с условиями Договора-2 Генподрядчик (Ответчик) поручает, а Субподрядчик (Истец) обязуется в соответствии с Рабочей документацией выполнить строительные, монтажные, пусконаладочные и другие связанные с Объектом работы, перечень и объем которых определяется «Ведомостью объемов и стоимости работ по объекту» (Приложение № 1 к Договору), и передать их Генподрядчику (Ответчику) в установленном Договором порядке.

Как следует из п. 2.2. Договора-2 Субподрядчик (Истец) своими силами и средствами осуществляет поставку Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ на Объекте и которые реализует Генподрядчику (Ответчику) за счет цены Договора. Генподрядчик обязуется принять Оборудование и Материалы, а также результат выполненных строительно-монтажных работ Субподрядчика - «Работы», на условиях, которые оговариваются сторонами в настоящем Договоре и дополнительно в соглашениях к настоящему Договору, (п. 2.3. Договора-2).

Пунктом 9.1. Договора-2 в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 27.05.2024 г. установлено, что общая цена Договора составляет сумму в размере 45 876 542,23 руб. (Сорок пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок два рубля 23 копейки).

Как следует из п. 9.4. Договора-2 оплату Генподрядчик (Ответчик) осуществляет, следующим образом:

- авансовый платеж в размере - 12 243 000 руб. (Двенадцать миллионов двести сорок три тысячи рублей 00 копеек) в том числе НДС 20% в размере 2 040 500, 00 руб. (Два миллиона сорок тысяч пятьсот рублей 00 копеек), Генподрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета от Субподрядчика.

- авансовый платеж в размере - 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 копеек) в том числе НДС 20% в размере 1 66 666,67 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек), Генподрядчик выплачивает на расчетный счет Субподрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления о готовности Материалов и Оборудования к отгрузке.

Согласно п. 9.15 Договора-2 оплата Работ по настоящему Договору производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания Актов приемки выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ затрат (КС-3) на основании выставленного счета.

В период срока действия Договора-2 Истец надлежащим образом выполнял свои обязательства по Договору-2 на общую сумму 45 876 542,23 руб. (Сорок пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок два рубля 23 копейки), что подтверждается актами выполненных работ по форме КС-2, товарными накладными, согласно которым Истец поставлял материалы и оборудование на Объект, а также актом о полном исполнении обязательств по Договору от 22.11.2024 года.

Вместе с тем, Ответчик свои финансовые обязательства по Договору-2 исполнил не в полном объеме, ввиду чего у него образовалась задолженность перед Истцом в размере 21 372 807,50 руб. (Двадцать один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот семь рублей 50 копеек).

Как следует из п. 15.6 Договора-2 в случае просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств по перечислению денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, Субподрядчик имеет право начислить Генподрядчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера неисполненного финансового обязательства Генподрядчика за каждый день просрочки до момента фактического исполнения финансового \       обязательства со стороны Генподрядчика.

На основании вышеуказанных условий Договора-2, Истец направил в адрес Ответчика претензию № И31-01-25-2 от 31.01.2025 в которой просил в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии перечислить на свой расчетный счет денежные средства в размере 25 765 628,03 руб. (Двадцать пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 03 копейки), из которой 21 372 807,50 руб. (Двадцать один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот семь рублей 50 копеек) - сумма основного долга и 4 392 820,53 руб. (Четыре миллиона триста девяносто две тысячи восемьсот двадцать рублей 53 копейки) - пени за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных работ за период с 11.01.2024 г. по 31.01.2025 г.

Денежные средства или мотивированные возражения от Ответчика в адрес Истца так и не поступили.

Таким образом общий размер исковых требований по состоянию на 31.03.2025 г. составляет 26 648 324,98 руб. (Двадцать шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста двадцать четыре рубля 98 копеек), из которой 21 372 807,50 руб. (Двадцать один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот семь рублей 50 копеек) - сумма основного долга по Договору-2 и 5 275 517,48 руб. (Пять миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот семнадцать рублей 48 копеек) - пени за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных работ за период с 11.01.2024 по 31.03.2025.

3. Исковые требования по Договору № ПД 11/04-2023-И от 11.04.2023 г. (далее - Договор-3).

Между Истцом и Ответчиком был заключен Договор № ПД 11/04-2023-И от 11.04.2023 г. (далее - Договор-3).

По условиям Договора-3 Ответчик поручает, а Истец обязуется выполнить следующие работы по разработке проектной документации «Технические средства охраны и видеонаблюдение периметра аэропорта» по объекту «Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел «Южный». 1 этап. Доведение инфраструктуры аэропорта Орел «Южный» до требований, предъявляемых к посадочным площадкам» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Сводами правил, ГОСТ и другими действующими нормативными документами Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а Ответчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Согласно п. 2.1. Договора-3 в редакции Дополнительного соглашения № 1 стоимость работ по Договору (Цена Договора) определяется в соответствии со Протоколом-Соглашением о договорной цене на разработку рабочей документации (Приложения № 3 к настоящему Договору) и составляет - 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 233 333 (Двести тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Пунктом 2.3. Договора-3 в редакции Дополнительного соглашения № 1 стороны предусмотрели следующий порядок оплаты выполненных работ:

2.3.1. Заказчик (Ответчик) выплачивает Подрядчику (Истцу) аванс в размере 30% от общей цены Договора, что составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч рублей) рублей 00 копеек в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, при условии получения счета от Подрядчика (Истца).

2.3.2. Заказчик (Ответчик) производит оплату по 1 этапу выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных по первому этапу работ и представления Подрядчиком (Истцом) разработанной проектной документации, счёта-фактуры и счета на оплату.

2.3.3. Заказчик (Ответчик) производит оплату по 2 этапу выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных по второму этапу работ и представления Подрядчиком (Истцом), счёта-фактуры и счета на оплату

2.3.4. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик (Ответчик) производит в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных по третьему этапу работ и представления Подрядчиком (Истцом) счёта-фактуры и счета на оплату

В период срока действия Договора Истец надлежащим образом выполнил свои обязательства по Договору, что подтверждается Актом № 1 от 15.08.2023 г., Актом № 2 от 18.10.2023 г. и Актом № 3 от 27.12.2023 г.

Вместе с тем, Ответчик не полностью выполнил свои обязательства по оплате надлежащим образом выполненных работ, а именно, не осуществил оплату в порядке п. 2.3.3. и п. 2.3.4. Договора-3, в связи с чем, у Ответчика образовалась задолженность перед Истцом в размере 360 000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п. 2 ст.702 ГК РФ)

Согласно ст.758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Как следует из п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

С учетом вышеуказанных норм права, а также принимая во внимание фактические обстоятельства по делу, Ответчик должен оплатить Истцу надлежащим образом выполненные работы в сумме 360 000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). При этом правовых оснований для отказа произвести полный расчет по Договору-3 у Ответчика нет.

Как следует из п. 6.2. Договора-3, при задержке Заказчиком (Ответчиком) платежей, предусмотренных в настоящем Договоре, Подрядчик (Истец) вправе потребовать от Заказчика (Ответчика) уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, до момента исполнения обязательства по перечислению денежных средств. На аванс пени начисляются.

С учетом п. 6.2. Договора-3 с Ответчика также подлежат взысканию пени в размере 158 000,00 зуб. (Сто пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как следует из п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

На основании вышеизложенного Истец имеет право на взыскание пеней по Договору до момента исполнения Ответчиком обязательства по оплате надлежащим образом выполненных работ.

Таким образом общий размер требований Истца к Ответчику по Договору-3 по состоянию на 31.03.2025 г. составляет 478 000,00 руб. (Четыреста семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), из которых 360 000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) - сумма долга по Договору-3 и 158 000,00 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) - пени, рассчитанные на основании п. 6.2. Договора-3 за период с 26.10.2023 г. по 31.03.2025 г.

4. Исковые требования по Договору № РД 1301 РД от 13.01.2023 г. (далее - Договор-4).

Между Истцом и Ответчиком был заключен Договор № РД 1301 РД от 13.01.2023 г. (далее - Договор-4).

По условиям Договора-4 Заказчик (Ответчик) поручает, а Подрядчик (Истец) обязуется выполнить следующие работы по разработке рабочей документации «Технические средства охраны и видеонаблюдение периметра аэропорта» по объекту: «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Сводами правил, ГОСТ и другими действующими нормативными документами Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а Заказчик (Ответчик) обязуется принять и оплатить результат работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Согласно п. 2.1. Договора-4 стоимость работ определяется в соответствии со Сметой (Приложения № 3 к настоящему Договору) и составляет - 1 800 000, 00 руб. (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС 20% в размере 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек).

Пунктом 2.3. Договора-4 стороны предусмотрели следующий порядок оплаты выполненных работ:

- Заказчик (Ответчик) выплачивает Подрядчику (Истцу) аванс в размере 30% от общей цены Договора, что составляет 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 90 000 (Девяносто тысяч рублей) рублей 00 копеек в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, при условии получения счета от Подрядчика.

- Окончательную оплату по Договору Заказчик (Ответчик) производит в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, представления Подрядчиком (Истцом) счёта-фактуры и счета на оплату.

В нарушение условий Договора-4 Ответчик аванс Истцу не выплатил.

Однако несмотря на нарушение условий со стороны Ответчика, Истец свои обязательства исполнил надлежащим образом, что подтверждается Актом № 1 от 25.07.2024 г.

Согласно Акту № 1 от 25.07.2024 г. Ответчик принял у Истца без нареканий выполненные по Договору-4 работы по разработке рабочей документации на общую сумму 1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС 20% в размере 300 000. 00 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек).

С учетом п. 2.3. Договора-4 Ответчик должен был оплатить надлежащим образом выполненные работы не позднее 01.08.2024 г.

Вместе с тем, по состоянию на 31.03.2025 г. денежные средства за надлежащим образом выполненные работы на расчетный счет Истца так и не поступили.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п. 2 ст.702 ГК РФ)

Согласно ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Как следует из п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Таким образом, на основании вышеуказанных условий Договора-4 и норм права с Ответчика в пользу Истца подлежит взысканию сумма основного долга в размере 1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС 20% в размере 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек).

Как следует из п. 6.2. Договора-4, при задержке Заказчиком (Ответчиком) платежей, предусмотренных в настоящем Договоре, Подрядчик (Истец) вправе потребовать от Заказчика (Ответчика) уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, до момента исполнения обязательства по перечислению денежных средств. На аванс пени начисляются.

С учетом п. 6.2. Договора-4 с Ответчика также подлежат взысканию пени за период с 02.08.2024 по 31.03.2025 в размере 435 600,00 руб. (Четыреста тридцать пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как следует из п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

На основании вышеизложенного Истец имеет право на взыскание пеней по Договору до момента исполнения Ответчиком обязательства по оплате надлежащим образом выполненных работ.

Таким образом общий размер требований Истца к Ответчику по Договору-4 по состоянию на 31.03.2025 г. составляет 2 235 600,00 руб. (Два миллиона двести тридцать пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек), из которых 1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек) - сумма долга по Договору-4 и 435 600,00 руб. (Четыреста тридцать пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек) - пени, рассчитанные на основании п. 6.2. Договора-4 за период с 02.08.2024 г. по 31.03.2025 г.

Досудебный порядок разрешения спора сторонами соблюден.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как следует из п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При этом п. 3 ст. 709 ГК РФ определено, что цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Пунктом 1 ст. 711 ГК РФ предусмотрено, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно п. 1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как следует из п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как следует из п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

На основании вышеизложенного Истец имеет право на взыскание пеней по Договорам до момента исполнения Ответчиком обязательства по оплате надлежащим образом выполненных работ.

На момент подачи искового заявления, требования Претензии Ответчиком не удовлетворены, каких-либо возражений на Претензию от Ответчика не поступало, денежные средства не оплачены.

В соответствии с ч. 3 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств, при этом, в силу ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, однако, ответчиком доказательств, подтверждающих уплаты денежных средств, суду не представлено.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Принимая во внимание отсутствие опровергающих, представленные истцом доказательства, суд руководствуется позицией ВАС РФ изложенной в Постановлении № 8127/13 от 15.10.2013 г. по делу № А46-12382/2012, согласно которой суд не вправе исполнять обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, поскольку это нарушает фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 65 , ч. 3.1 и 5 ст. 70 АПК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Суд исходит из того, что по смыслу положений ст. 268 АПК РФ доказательства должны быть представлены в суд первой инстанции, который разрешает спор по существу.

Данных, подтверждающих уплаты денежных средств полностью, суду также представлено.

Принимая во внимание изложенное, суд удовлетворяет исковые требования в полном объёме.

В силу ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Непубличного акционерного общества «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» в пользу Обществом с ограниченной ответственностью «Уникальные волоконные приборы - Комплексны системы»:

- по Договору строительного субподряда № 10-07/2023 от 10.07.2023г:

- сумму основного долга в размере 73 829 248, 31руб., пени по п. 15.1L Договора за период с 23.01.2024г. по 31.03.2025г. в размере 9 509 721,12 руб., дальнейшее взыскание пени по п. 15.11. Договора производить путем начисления на сумму долга начиная с 01.04.2025г. по момент фактической оплаты суммы основного долга;

- по Договору строительного субподряда № 15-08/2023-ИХ от 15.08.2024г:

- сумму основного долга в размере 21 372 807. 50 руб. , пени по п. 15.6. Договора за период с 11.01.2024г. по 31.03.2025г. в размере 5 275 517,48 руб., дальнейшее взыскание пени по п. 15.6 Договора производить путем начисления на сумму долга начиная с 01.04.2025г. по момент фактической оплаты суммы основного долга;

- по Договору № ПД 11/04-2023-И от 11.04.2023г.:

- сумму основного долга в размере 360 000руб., пени по п. 6,2. Договора за период с 2610.2023г. по 31.03.2025г. в размере 158 000,00 руб. , дальнейшее взыскание пени по п. 6.2. Договора производить путем начисления на сумму долга начиная с 01.04.2025г. по момент фактической оплаты суммы основного долга;

- по Договору РД 1301 РД от 13.01,2023г.:

- сумму основного долга в размере 1 800 000,00 руб., пени по п 6.2. Договора за период с 02.08.2024г. по 31.03.2025г. в размере 435 600,00 руб., дальнейшее взыскание пени по п. 6 2. Договора производить путем начисления на сумму долга начиная с 01.04.2025г. по момент фактической оплаты суммы долга.

Взыскать с Непубличного акционерного общества «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» в доход федерального бюджета РФ 1 038 704руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по адресу должника.

Судья:                                                                                                 О.В. Лихачева