АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Барнаул                                                                                               Дело № А03–12680/2022                   

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2023 года  

 

Решение в полном объеме изготовлено 13 июля 2023 года  

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска», г. Бийск, к государственному унитарному предприятию дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», г. Бийск,

об обязании безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту №Ф.2017.282958 от 18.07.2017, 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - общества с ограниченной ответственностью «Вираж», г. Бийск (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

при участии в заседании представителей:           

от истца:  ФИО2 по доверенности №9 от 03.05.2023 (в режиме онлайн).

от ответчика: не явился, извещен,  

от третьего лица: не явился, извещен,   

 

У С Т А Н О В И Л:

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к государственному унитарному предприятию дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» (далее – ответчик) об обязании безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту 

 

№Ф.2017.282958 от 18.07.2017, не позднее 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу, путем выполнения работ, соответствующих строительным нормам и правилам, выполнив следующие виды работ: - полная замена слоев дорожного покрытия.

Исковые требования обоснованны статьями 309, 310, 721, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим качеством работ, выполненных по муниципальному контракту №Ф.2017.282958 от 18.07.2017.

Ответчик и третье лицо явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежаще. 

В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Представитель истца ходатайствовала о принятии уточненных требований, просила обязать ответчика в срок не позднее 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу безвозмездно устранить недостатки выполненных в ходе исполнения Муниципального контракта № Ф.2017.282958 от 18 июля 2017 года работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов № 68, № 70, № 70/1, №  72, № 74, № 74/1, № 74/2 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края, а именно,  выполнить следующие работы: 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 68 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 1 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 375,05 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдением требований муниципального контракта и нормативной документации - 375,05 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 108 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 70 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 1 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 559,4 кв.м.;

 

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 559,4 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 174 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 70/1 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 3 шт;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 106 шт.; 

- ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой – 16,7 м;

- выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия (фрезеровка, нанесение выравнивающего слоя асфальтобетона, в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно требований муниципального контракта и нормативной документации с последующим устройством тонкослойного покрытия (тонкослойные покрытия из битумоминеральных смесей) – 299,7 кв.м.;

в дворовой территории  многоквартирного дома № 72 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 4 шт;

- демонтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей – 4 шт;

- монтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей с учетом отметки верха асфальтобетонного покрытия – 4 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 436,15 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 436,15 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 126 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 74 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 10 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением 

 

швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 443,9 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 443,9 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой –160 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 74/1 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 25 шт;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 160 шт.; 

- ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой – 27,7 м;

- замена асфальтобетонного покрытия с ремонтом основания – 1,0 кв.м.;

- выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия (фрезеровка, нанесение выравнивающего слоя асфальтобетона, в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно требований муниципального контракта и нормативной документации с последующим устройством тонкослойного покрытия (тонкослойные покрытия из битумоминеральных смесей) – 420,81 кв.м.;

в дворовой территории  многоквартирного дома № 74/2 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 9 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 434,66 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 434,66 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой –210 шт.

Суд принял уточнение исковых требований.

Выслушав истца, изучив материалы дела, проверив расчет, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям. 

Между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» и ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» заключен муниципальный контракт № Ф,2017,282958 от 18.07.2017 (далее - «Контракт»), на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Бийск в 2017 году» (далее по тексту - Работы).

В соответствии с о. 1.1. Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Бийск в 2017 году». 

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение № 1 к Контракту).

В соответствии с п.п.6.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту и сдать объем работ, предусмотренные контрактом, Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

В соответствии: с п.п.6.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить соответствие качества работ и материалов, применяемых им при выполнении работ, ГОСТам, СНиПам, соответствующим сертификатам и другим документам, удостоверяющим их качество.

В соответствии с п. 4 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) местом выполнения работ, в том числе является дворовые территории, расположенные по адресу: 

<

...>, 70/1, 72, 74, 74/1, 74/2.

Ответчик передал истцу результаты выполненных работ, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 17.10.2017 (форма КС-2).

Стоимость работ по контракту составила 85 675 375 (восемьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) руб. 91 коп.

После завершения работ по Контракту было выявлено их ненадлежащее исполнение.

25.07.2022 сотрудниками МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» проведен выездной осмотр дворовой территории, расположенной по адресам: г. Бийск, г, Бийск, ул. Липового, 68, 70,70/1, 72, 74, 74/1, 74/2.

В ходе проведенного осмотра, в период гарантийного срока, выявлены следующие недостатки:

-   дворовые территории многоквартирных домов № 68, 70, 70/1, 74/2 по ул. Липового в г. Бийске - выявлены разрушения бортового камня, поперечные трещины, выкрашивание/разрушение асфальтобетонного покрытия, не устранена вырубка;

-   дворовые территории многоквартирных домов № 72, 74/1, 74 по ул. Липового в г. Бийске - выявлены разрушения бортового камня, поперечные трещины, выкрашивание/разрушение асфальтобетонного покрытия.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» в адрес ГУП ДХ АК «Юго - Восточное ДСУ» по факту выявленных гарантийных недостатков направлена претензия № 1683 от 28.07.2022.

Подрядчик в добровольном порядке требования претензии не удовлетворил.

В соответствии с п. 7.1 -7.4. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, с соблюдением технологии производства работ и прочих условий настоящего контракта, достижение результатов работ, предусмотренных настоящим контрактом, и возможность эксплуатации объектов, на которых выполняются работы, согласно их установленному назначению.

Гарантийный срок на настоящий момент не истек.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с  пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно статье 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

Факт выполнения ненадлежащего качества работ подтверждаются контрактом, актами, письмами, претензией, доводами истца, содержащимися в исковом заявлении, иными материалами дела.

По ходатайству истцу суд определением от 14 октября 2022 года назначил по делу судебную экспертизу, проведение которой поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-правовой центр «Ваше право», г. Барнаул, ФИО3 и ФИО4.

На разрешение перед экспертами поставлены вопросы:

1. Имеются ли в работах по благоустройству дворовых территорий по ул. Липового, 68, ул. Липового, 70, ул. Липового, 70/1, ул. Липового, 72, ул. Липового, 74, ул. Липового, 74/1, ул. Липового, 74/2 в г. Бийске, выполненных на основании муниципального контракта № №Ф.2017.282958 от 18.07.2017, недостатки? Если да, то какие?

2. Каковы причины возникновения обнаруженных недостатков (производственные, эксплуатационные, иные)?

3. Каковы виды и объемы работ, необходимы для устранения обнаруженных экспертами недостатков? Каковы варианты устранения недостатков работ? Каковы сроки устранения недостатков работ?

Согласно заключению экспертов №20-06-01 от 20.06.2023, экспертами сделаны следующие выводы: 

По первому вопросу:

В результате проведенных исследований в работах по благоустройству дворовой территории по ул. Липового, 68, г. Бийск, выполненных на основании контракта №0.2017.282958 от 18.07.2017, выявлены следующие дефекты: 

-                              механические повреждения асфальтобетонного покрытия и бортовых камней;

-                              трещины асфальтобетонного покрытия;

-                              застой воды на асфальтобетонном покрытии;

-                              трещины бортового камня;

-                              отсутствует заделка швов между бортовыми камнями;

-                              толщина асфальтобетонного покрытия не соответствует предусмотренной муниципальным контрактом;

-                              зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям нормативной документации;

-                              водонасыщение обобранных образцов асфальтобетона не соответствует требованиям нормативной документации.

В результате проведенных исследований в работах по благоустройству дворовой территории по ул. Липового, 70, г. Бийск, выполненных на основании муниципального контракта №0.2017.282958 от 18.07.2017, выявлены следующие дефекты:

-                               механические повреждения асфальтобетонного покрытия и бортовых камней;

-                               застой воды на асфальтобетонном покрытии;

-                               трещины асфальтобетонного покрытия;

-                               сопряжение асфальтобетонного покрытия выполнено с нарушением требований нормативной документации;

-                               трещины бортового камня;

-                               отсутствует заделка швов между бортовыми камнями;

-                               водонасыщение обобранных образцов асфальтобетона не соответствует требованиям нормативной документации.

В результате проведенных исследований в работах по благоустройству дворовой территории по ул. Липового, 70/1, г. Бийск, выполненных на основании муниципального контракта №Ф.2017.282958 от 18.07.2017, выявлены следующие дефекты:

-                               механические повреждения асфальтобетонного покрытия и бортовых камней;

-                               застой воды на асфальтобетонном покрытии;

-                               отраженная трещина асфальтобетонного покрытия;

-                               отсутствие ремонта асфальтобетонного покрытия в месте проб;

-                               отсутствует заделка швов между бортовыми камнями;

-                               трещины бортового камня;

-                               отсутствует заделка швов между бортовыми камнями;

-                               зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям нормативной документации.

В результате проведенных исследований в работах по благоустройству дворовой территории по ул. Липового, 72, г. Бийск, выполненных на основании муниципального контракта №Ф.2017.282958 от 18.07.2017, выявлены следующие дефекты:

-                               механические повреждения асфальтобетонного покрытия и бортовых камней;

-                               застой воды на асфальтобетонном покрытии;

-                               люки смотровых колодцев инженерных сетей устроены не в одном уровне с поверхностью асфальтобетонного покрытия;

-                               просадка с повреждением асфальтобетонного покрытия;

-                               трещины асфальтобетонного покрытия;

-                               трещины бортового камня

-                               отсутствует заделка швов между бортовыми камнями;

-                               ровность асфальтобетонного покрытия не соответствует требованиям нормативной документации;

-                               толщина асфальтобетонного покрытия не соответствует предусмотренной муниципальным контрактом;

-                               водонасыщение отобранных образцов не соответствует требованиям нормативной документации.

В результате проведенных исследований в работах по благоустройству дворовой территории по ул. Липового, 74, г. Бийск, выполненных на основании муниципального контракта №Ф.2017.282958 от 18.07.2017, выявлены следующие дефекты:

-                               механические повреждения асфальтобетонного покрытия и бортовых камней;

-                               застой воды на асфальтобетонном покрытии;

~ трещины асфальтобетонного покрытия;

сопряжение асфальтобетонного покрытия выполнено с нарушением требований нормативной документации;

-                               отсутствует заделка швов между бортовыми камнями;

-                               зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям нормативной документации;

-                               толщина асфальтобетонного покрытия не соответствует предусмотренной муниципальным контрактом;

-                               водонасыщение отобранных образцов не соответствует требованиям нормативной документации.

В результате проведенных исследований в работах по благоустройству дворовой территории по ул. Липового, 74/1, г. Бийск, выполненных на основании муниципального контракта №0.2017.282958 от 18.07.2017, выявлены следующие дефекты:

-                               механические повреждения асфальтобетонного покрытия и бортовых камней;

-   застой воды на асфальтобетонном покрытии;

-                               трещины асфальтобетонного покрытия;

-                               трещины бортового камня;

-                               отсутствует заделка швов между бортовыми камнями;

-                               зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям нормативной документации.

В результате проведенных исследований в работах по благоустройству дворовой территории по ул. Липового, 74/2, г. Бийск, выполненных на основании муниципального контракта №0.2017.282958 от 18.07.2017, выявлены следующие дефекты:

-                               механические повреждения бортовых камней;

-                               застой воды на асфальтобетонном покрытии;

-                               трещины асфальтобетонного покрытия;

-                               сопряжение асфальтобетонного покрытия выполнено с нарушением требований нормативной документации;

-                               повреждение асфальтобетонного покрытия с застоем воды;

-                               отсутствие ремонта асфальтобетонного покрытия в месте отбора проб;

-                               трещины бортового камня;

-                               отсутствует заделка швов между бортовыми камнями;

-                               зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям нормативной документации;

-                               водонасыщение отобранных образцов не соответствует требованиям нормативной документации.

По второму вопросу:

Причинами возникновения выявленных недостатков на объектах исследования являются:

1.       нарушения технологии производства строительных работ, допущенных подрядчиком ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Юго- Восточное ДСУ»;

2.        применение при производстве строительных работ материалов, не соответствующих требованиям нормативной документации;

3.        нарушение требований нормативной документации при отборе образцов из асфальтобетонного покрытия;

4.       нарушение технологии производства асфальтобетонной смеси.

По третьему вопросу: 

Для устранения дефектов в работах по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов № 68, № 70, № 70/1, №  72, № 74, № 74/1, № 74/2 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края, выполненных на основании муниципального контракта № Ф.2017.282958 от 18 июля 2017 года необходимо выполнить следующие работы: 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 68 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 1 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 375,05 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдением требований муниципального контракта и нормативной документации - 375,05 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 108 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 70 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 1 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 559,4 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 559,4 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 174 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 70/1 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 3 шт;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 106 шт.; 

- ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой – 16,7 м;

- выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия (фрезеровка, нанесение выравнивающего слоя асфальтобетона, в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно требований муниципального контракта и нормативной документации с последующим устройством тонкослойного покрытия (тонкослойные покрытия из битумоминеральных смесей) – 299,7 кв.м.;

в дворовой территории  многоквартирного дома № 72 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 4 шт;

- демонтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей – 4 шт;

- монтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей с учетом отметки верха асфальтобетонного покрытия – 4 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 436,15 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 436,15 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 126 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 74 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 10 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 443,9 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 443,9 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой –160 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 74/1 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 25 шт;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 160 шт.; 

- ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой – 27,7 м;

- замена асфальтобетонного покрытия с ремонтом основания – 1,0 кв.м.;

- выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия (фрезеровка, нанесение выравнивающего слоя асфальтобетона, в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно требований муниципального контракта и нормативной документации с последующим устройством тонкослойного покрытия (тонкослойные покрытия из битумоминеральных смесей) – 420,81 кв.м.;

в дворовой территории  многоквартирного дома № 74/2 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 9 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 434,66 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 434,66 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой –210 шт.

Суд считает верным при разрешении настоящего спора руководствоваться  заключением, полученным по результатам судебной экспертизы. 

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что исковые требования заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ).  

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку истец освобожден от оплаты государственной пошлины, государственная пошлина в сумме 6 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить. 

Обязать государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», г. Бийск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в срок не позднее 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу безвозмездно устранить недостатки выполненных в ходе исполнения Муниципального контракта № Ф.2017.282958 от 18 июля 2017 года работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов № 68, № 70, № 70/1, №  72, № 74, № 74/1, № 74/2 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края, а именно,  выполнить следующие работы: 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 68 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 1 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 375,05 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдением требований муниципального контракта и нормативной документации - 375,05 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 108 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 70 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 1 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 559,4 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 559,4 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 174 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 70/1 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 3 шт;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 106 шт.; 

- ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой – 16,7 м;

- выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия (фрезеровка, нанесение выравнивающего слоя асфальтобетона, в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно требований муниципального контракта и нормативной документации с последующим устройством тонкослойного покрытия (тонкослойные покрытия из битумоминеральных смесей) – 299,7 кв.м.;

в дворовой территории  многоквартирного дома № 72 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 4 шт;

- демонтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей – 4 шт;

- монтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей с учетом отметки верха асфальтобетонного покрытия – 4 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 436,15 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 436,15 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 126 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 74 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 10 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 443,9 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 443,9 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой –160 шт.; 

в дворовой территории  многоквартирного дома № 74/1 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 25 шт;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 160 шт.; 

- ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой – 27,7 м;

- замена асфальтобетонного покрытия с ремонтом основания – 1,0 кв.м.;

- выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия (фрезеровка, нанесение выравнивающего слоя асфальтобетона, в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно требований муниципального контракта и нормативной документации с последующим устройством тонкослойного покрытия (тонкослойные покрытия из битумоминеральных смесей) – 420,81 кв.м.;

в дворовой территории  многоквартирного дома № 74/2 по ул. Липового в городе Бийске Алтайского края: 

-  замену бортовых камней – 9 шт;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 434,66 кв.м.;

- устройство нового  асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований муниципального контракта и нормативной документации – 434,66 кв.м.;

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой –210 шт. 

Взыскать с  государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», г. Бийск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска», г. Бийск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 468 000 руб. 00 коп. расходов на оплату судебной экспертизы 

Взыскать с  государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», г. Бийск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в доход Федерального бюджета Российской Федерации 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения.

 

  Судья                                                                                                        С.В. Янушкевич