1210/2022-71817(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-1515/2022  

от 21 июля 2022 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХ" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в 20-дневный срок со дня вступления решения суда в  законную силу устранить недостатки работ по проведению капитального ремонта  многоквартирного дома по адресу: 

<

...>:  

1. Выполнить отбивку поврежденного штукатурного слоя на дымовых трубах  выше уровня кровли в объеме 44,16 кв. м., а именно: 6,1 кв. м. (труба № 1 и № 2) + 4,94 кв.  м. (труба № 3); 4,94 кв. м. (труба № 4); 6,1 кв. м. (труба № 5 и № 6); 6,1 кв. м. (труба № 8 и   № 9); 4,94 кв.м. (труба № 10); 4,94 кв. м. (труба № 11); 6,1 кв. м. (труба № 12 и № 13)  

2. Выполнить оштукатуривание дымовых труб выше уровня кровли в объеме  44,16 кв. м.  

3. Выполнить окраску поверхности дымовых труб выше уровня кровли в  объеме 44,16 кв. м.  

4. Выполнить разборку разрушенной кладки дымовых труб в объеме 2,08 куб.  м., а именно: 0,58 куб. м. (труба № 1 и № 2); 0,7 куб. м. (труба № 3); 0,8 куб. м. (труба № 8 и   № 9)  

5. Выполнить кладку разобранных дымовых труб в объеме 2,08 куб. м.  6. Установить колпаки на дымовые трубы в количестве 6 шт.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

В случае неисполнения решения суда в части устранения недостатков  выполненных работ, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройТех» в  пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Архангельской области» судебную неустойку в размере 700 руб. за каждый день  неисполнения судебного акта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХ" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации "Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины, а также 156 руб. судебных издержек.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья В.А. Крылов  Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 7:38:07

Кому выдана Крылов Вадим Александрович