АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-2635/2020

г. Ставрополь

26 мая 2021 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении  протокола помощником судьи Васильевой С.С., рассмотрел в судебном заседании исковое  заявление общества с ограниченной ответственностью «Блеск», ОГРН 1022603622470, ИНН  2631011054, г. Ставрополь, к обществу с ограниченной ответственностью «Тройка», ОГРН  1182651020661, ИНН 2636216094, г. Ставрополь, с привлечением к участию в деле в качестве  третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, НО  СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», ОГРН  1132651033140, ИНН 2636808125, г. Ставрополь, ООО «Юнирост», ОГРН 1037728038292, ИНН  7728296652, г. Москва, о взыскании с ответчика по договору субподряда № 4 от 29 апреля 2019  года на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных  домов г. Буденновск 54 074 963 руб. 43 коп. пени за просрочку исполнения обязательства за  период с 02.09.2019 по 22.03.2021 и далее до момента фактического исполнения обязательства,  6 945 982 руб. штрафа за отказ от договора подряда в связи с нарушением сроков выполненных  работ, 8 559 244 руб. 70 коп. за генподрядные услуги по выполненным работам, 8 805 711 руб.  10 коп. неполученных доходов, 27 783 929 руб. 20 коп. штрафа за нарушение принятых  обязательств, не связанных с просрочкой выполненных работ; о взыскании по договору  субподряда № 151/19/3 от 24 апреля 2019 года 28 736 667 руб. 30 коп. пени за просрочку  исполнения обязательства за период с 02.09.2019 по 22.03.2021 и далее до момента  фактического исполнения обязательства, 4 056 644 руб. 80 коп. штрафа за отказ от договора  подряда в связи с нарушением сроков выполнения работ, 7 362 190 руб. 04 коп.  неосновательного обогащения от излишне перечисленного аванса; 1 886 503 руб. 20 коп. за  генподрядные услуги по выполненным работам, 8 255 108 руб. 80 коп. неполученных доходов,  12 169 934 руб. 40 коп. штрафа за нарушение принятых обязательств, не связанных с  просрочкой выполненных работ; о взыскании 200 000 руб. государственной пошлины.  

Руководствуясь статьями 110, 159, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

ходатайство ответчика об отложении рассмотрения дела отклонить. 

Ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки удовлетворить.  Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тройка», ОГРН 1182651020661,  ИНН 2636216094, г. Ставрополь, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Блеск»,  ОГРН 1022603622470, ИНН 2631011054, г. Ставрополь, 7 000 000 руб. неустойки по договору  субподряда № 4 от 29.04.2019 за период с 02.09.2019 по 22.03.2021, а также неустойку, начиная  с 23.03.2021 до момента фактического исполнения обязательства; 7 362 190 руб. 04 коп.  задолженности по договору субподряда № 151/19/3 от 24.04.2019, 4 500 000 руб. неустойки за  период с 02.09.2019 по 22.03.2021, а также неустойку, начиная с 23.03.2021 до момента  фактического исполнения обязательства, 112 449 руб. расходов по уплате государственной  пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в  двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Демкова