1233_1630388  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ru  E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-4538/2020

16 марта 2023 года

г. Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи С.А. Чумаченко, при ведении  протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «ИнтерСтрой» (295051, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Ленина,  д. 12, помещение 201, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 22.06.2016, ИНН:  

<

***>, КПП: 910201001)  

Ответчик: 

Администрация города Алушты Республики Крым (298516, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 25.11.2014,  ИНН: 

<

***>, КПП: 910101001),  

при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

Департамент капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города Алушты Республики Крым,  

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Алушты  Республики Крым,  

Управление образования и молодежи Администрации города Алушты Республики  Крым,  

об изменении договора, 

при участии представителей сторон: от сторон – не явились. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 201 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Изменить условия договора о комплексном освоении территории в целях  

строительства жилья экономического класса от 01.12.2016, заключенного между обществом  

с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» (ОГРН 

<

***>) и Администрацией  

города Алушты Республики Крым (ОГРН 

<

***>), изложив 

подпункт 5 пункта 1.3 указанного договора в следующей редакции:  

«5) Строительство общеобразовательной школы на условиях «под ключ» на 800 мест,  

в соответствии с Заданием на проектирование от 14.02.2023.»; 

пункт 2.2 указанного договора в следующей редакции:  «2.2. Срок действия Договора – до 31 декабря 2025 года.»;  

подпункт 5 пункта 3.7 указанного договора в следующей редакции:  

«5) проектирование и строительство общеобразовательной школы на 800 мест на  

условиях «под ключ», в соответствии с Заданием на проектирование от 14.02.2023.»; абзац второй пункта 3.7 указанного договора в следующей редакции: 

«Максимальный срок выполнения обязательств, указанных в подпунктах 2)-5) пункта  

3.7 – до 31 декабря 2025 года.». 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  

подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  

постановления арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  

порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд  

(299011, 

<

...>). 

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть  

получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Судья С.А. Чумаченко