542/2020-178707(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел.: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-2474/2020

28 сентября 2020 года

город Саратов

 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые  технологии» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов в месячный срок со дня  вступления решения в законную силу устранить выявленные в пределах гарантийного срока  недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 0360300010118000018-  0036110-01 от 11.09.2018, а именно:  

- Разборка облицовки стен: из гранитных плит (одна плита разбита - 0,28м2)  HP (320 руб.): 77% от ФОТ  

СП (208 руб.): 50% от ФОТ; 

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (п.8.7.1 При  ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства  (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых  конструктивных элементов) ОЗП=1,15;  

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) HP (6 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 55% от ФОТ; 

- Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия);  

- Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми  плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону (8,16м2 -без стоимости материала) (п.8.7.1 При  ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства  (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению  новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15;  

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) HP (154 руб.): 105% от ФОТ СП (81 руб.): 55% от ФОТ; 

- Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм,  600x600x10 мм (замена разбитой плиты ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по  реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в  новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15  ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25);  

- Клей плиточный «Ceresit» СМ117 для керамогранита (п.8.7.1 При ремонтно-строительных  работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных  технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых  конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25);  

- Затирка «Старатели» (разной цветности); - Затирка «Старатели» (разной цветности) (по всей площади сооружения); 

- Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1  м2: до 4  

19 165,47 = 20 904,97 - 3,5 х 497,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по  реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в  новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15;  ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)  

HP (89 руб.): 105% от ФОТ СП (47 руб.): 55% от ФОТ; - Клей плиточный «Юнис Гранит»; - Монтаж уголка из нержавеющей стали (без стоимости материалов) 

(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов  капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том  числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;  ТЗМ=1,25)  

HP (3 руб.): 90% от ФОТ СП (3 руб.): 85% от ФОТ. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Современные цифровые  технологии» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов в пользу Администрации  Дергачевского муниципального района Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), р.п.Дергачи расходы по оплате независимой экспертизы в размере 12 000 руб.,  судебные расходы за проведение экспертизы в размере 38 280 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Современные цифровые  технологии» (ОГРН 1116453008088, ИНН 6453118925), г.Саратов в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 8 000 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда Саратовской области ФИО1 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 22.08.2019 10:31:33

 Кому выдана ФИО1