И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

М О Т И В И Р О В А Н Н О Е   

Р Е Ш Е Н И Е

город Москва                                                                                                              Дело № А40-152250/24-151-1144

07.10.2024 года.                

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи К.В. Вольской

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

ППК «ВСК» (ОГРН 1207700151427)

к ответчику: ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» (ОГРН 1207700053318)

о взыскании 600 000 руб. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании штрафа по договору №469/23 от 01.06.2023 в размере 600 000 руб. 00 коп.    

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ. 

В суд от ответчика поступило заявление о составлении мотивированного решения. 

Ответчик представил в установленный судом срок отзыв на заявленные требования. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что между ППК «ВСК» (далее - Генподрядчик, Компания) и ООО «Альянс Групп» (далее - Субподрядчик) заключен договор субподряда от 01.06.2023 № 469/23 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту с шифром объекта Ю-41/22-30 (далее - Договор).

В соответствии с п. 8.2.7 Договора, Субподрядчик обязан разработать и передать Генподрядчику все разделы Документации по Объекту в сроки, установленные Контрактом.

Как предусмотрено п. 8.2.14 Договора, Субподрядчик обязан передавать Генподрядчику документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями строительных регламентов и СНиП и условиями Контракта.

В силу п. 8.2.21 Договора, Субподрядчик обязан выполнить строительно-монтажные Работы по Контракту в соответствие с Проектной и Рабочей документациями, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.

Согласно п. 13.1.4 Договора, при обнаружении Генподрядчиком в ходе приемки Работ или отдельных Этапов работ по Контракту недостатков в выполненной Работе, в том числе выявления некомплектности Документации, ее несоответствие положениям Контракта, в том числе раздела 23 Контракта, либо иных недостатков, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (недоделок) и сроки их устранения, а в случае, если такие сроки не будут установлены, то Субподрядчик устраняет недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их обнаружения. При отказе (уклонении) Субподрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и такой акт считается подписанным со стороны Субподрядчика.

В силу п. 13.1.5 Договора, Субподрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Субподрядчиком в установленные сроки выявленных Генподрядчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренных Договором.

Указанные нарушения неоднократно отражались в актах проверки ППК «ВСК», а именно в актах № 1 от 23.08.2023; № 2 от 30.08.2023; № 3 от 12.10.2023.

По состоянию на сегодняшний день, Субподрядчиком не исполнены 3 (три) предписания.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

По результатам исследования совокупности представленных в материалы дела доказательств, судом установлена несостоятельность доводов возражений ответчика ввиду следующего.

Ответчик указывает на то, что нарушения, указанные Истцом в Актах проверки, не являются нарушением Субподрядчиком обязательств по Договору.

Согласно п. 1 ст. 747 ГК РФ заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

Пункт 5.10 СП 48.13330.2019 "Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004", утвержденного Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр (далее - Свод правил), устанавливает, что перед началом выполнения работ на объекте лицо, осуществляющее строительство, принимает площадку для строительства по акту. Также п. 7.9 Свода правил предусмотрено, что в случае осуществления строительства на основании договора застройщик (технический заказчик) передает строительную площадку подрядной организации (генеральной подрядной организации) как лицу, осуществляющему строительство, по акту. Площадь и состояние строительной площадки должны соответствовать условиям договора.

Согласно Акта проверки № 1 при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства от 23.08.2023 установлено, что отсутствует ограждение строительной площадки, объект не обеспечен бытовыми помещениями, паспорт объекта не соответствует единым нормам оформления.

Объект Ответчику был передан с момента заключения Договора (01.06.2023), Акт о приеме-передаче от 06.06.2023, направлен документ в адрес Ответчика 15.06.2023.

Письмом от 19.10.2023 № ЮВО/48758 ПИК «ВСК» сообщило, что в рамках исполнения договора субподряда для ускорения проведения инженерных изысканий и разработке разделов проектной документации совместно с ФКП «УЗКС Минобороны России» (далее - Технический заказчик») было оказано содействие в передаче следующих документов:

акт приема-передачи строительной площадки от 06.06.2023, договор БП, ГПЗУ, в соответствии с письмом от 15.06.2023 № ЮВО/26181-дсп;

получение разрешения на вырубку зеленых насаждений без компенсационной оплаты, согласно акту оценки состояния зеленых насаждений от 23.06.2023 №14, переданного в адрес ООО «Альянс Групп» от 26.06.2023 № ЮВО/28049;

в адрес субподрядчика от 08.06.2023 переданы координаты пунктов ГГС, запрошенных ранее в рамках выполнения смежных Объектов в данном районе строительства (ул. Оганова);

представителями филиала «СУ по ЮВО» ППК «ВСК» и ООО «Оборонэнерго» организован вынос электрического кабеля 0,4 кВ, попадающего в зону строительного пятна;

технические условия от ресурсоснабжающих организаций

по электроснабжению, теплоснабжению, сетям связи от органов военного управления, согласно письмам от 02.10.2023 № ЮВО/45574-дсп и от 04.10.2023 № ОУЭ/45996;

направлены замечания по генплану и корректировке чертежа в адрес ООО «Альянс Групп» от 04.09.2023 № ЮВО/40608 и от 15.09.2023 № ЮВО/42698;

представителями филиала «СУ по ЮВО» ППК «ВСК» разработан и согласован с органами военного управления генеральный план сооружений на строительном пятне застройки.

Однако неустранение ООО «Альянс Групп» замечаний к программам и техническим заданиям по инженерным изысканиям от 01.09.2023 № ЮВО/40282, неустранение замечаний и непредоставление отчетов по инженерным изысканиям на строительном пятне застройки от 22.09.2023 №ЮВО/43947, неустранение замечаний по корректировке проектной документации от 16.10.2023 № ЮВО/48010, дорожной карты от 22.09.2023 № ЮВО/43960 и сопоставительной ведомости от 19.09.2023 №ЮВО/43358, корректировке раздела ППР от 19.09.2023 № ЮВО/43274 и от 16.10.2023 № ЮВО/48013 повлекло за собой неисполнение договорных обязательств со стороны Ответчика, о чем ему было сообщено повторно письмом от 16.10.2023 №ЮВО/48011.

Кроме того, ППК «ВСК» сообщало, что для прохождения Государственной экспертизы МО РФ Ответчику необходимо направить в адрес ППК «ВСК» полный комплект документации, согласованный с органами военного управления и заинтересованными ресурсо-снабжающими организациями.

Пунктом 4.9 "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр), при осуществлении строительства, на основании договора, базовыми организационными функциями подрядной организации как лица, осуществляющего строительство, являются, в том числе:

осуществление строительного контроля лицом, осуществляющим строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов, технологий, конструкций, оборудования, полуфабрикатов и изделий требованиям технических регламентов, проектной (ПОС) и рабочей документации;

обеспечение безопасности труда (в том числе ограждение строительной площадки до начала любых работ и опасных зон работ за ее пределами в соответствии с требованиями НД, установка информационных щитов и стенда пожарной защиты) на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения;

Ответчик обязан обеспечить в ходе Работ на Объекте выполнение на Строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение Объекта и территории Строительной площадки (п. 8.2.26 договора).

Ответчик утверждает, что обязанность вести журналы работ у него отсутствует ввиду того, что работы им на объекте не проводились.

Актом контрольного обмера № 1 от 30.05.2024 стороны по Договору определили, что ООО «Альянс Групп» выполнило комплекс строительно-монтажных работ на Объекте, указанных в приложении к Акту.

Объемы работ выполнены по неутвержденной проектной и рабочей документации, но факт их производства зафиксирован всеми сторонами и подписан представителем Ответчика, соответственно у ООО «Альянс Групп» имелась обязанность вести журналы производства работ.

Ответчик указывает на то, что паспорт объекта был подготовлен и выполнен в соответствии с СП 48.13330.2019 и требования ППК «ВСК» о ином виде паспорта объекта субъективны и не находят под собой оснований.

В соответствии с Приказом генерального директора ФКП «УЗКС Минобороны РФ» от 08.09.2022 № 133 «Об утверждении Единого стандарта требований по обеспечению охраны строительных площадок Министерства обороны Российской Федерации», установлены требования к информационным стендам (п. 4) с указанием примера информационного стенда.

Данный приказ вынесен в целях исключения причинения вреда здоровью и жизни населения, несанкционированного доступа внутрь объекта и на территорию строительной площадки при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов обороны и безопасности, входящих в военную инфраструктуру Вооруженных Сил Российской Федерации и соответственно обязателен для исполнения субподрядными организациями, с которыми заключены договоры в целях исполнения оборонных заказов.

В соответствии с п. 8.2.7 Договора, Субподрядчик обязан разработать и передать Генподрядчику все разделы Документации по Объекту в сроки, установленные Контрактом.

Как предусмотрено п. 8.2.14 Договора, Субподрядчик обязан передавать Генподрядчику документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями строительных регламентов и СНиП и условиями Контракта.

В силу п. 8.2.21 Договора, Субподрядчик обязан выполнить строительно-монтажные Работы по Контракту в соответствие с Проектной и Рабочей документациями, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.

Согласно п. 13.1.4 Договора, при обнаружении Генподрядчиком в ходе приемки Работ или отдельных Этапов работ по Контракту недостатков в выполненной Работе, в том числе выявления некомплектности Документации, ее несоответствие положениям Контракта, в том числе раздела 23 Контракта, либо иных недостатков, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (недоделок) и сроки их устранения, а в случае, если такие сроки не будут установлены, то Субподрядчик устраняет недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их обнаружения. При отказе (уклонении) Субподрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и такой акт считается подписанным со стороны Субподрядчика.

В силу п. 13.1.5 Договора, Субподрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Субподрядчиком в установленные сроки выявленных Генподрядчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренных Договором.

Обязательства, предусмотренные п.8.2.7., п.8.2.14., п.13.1.5. Контракта, Субподрядчиком до настоящего времени не исполнены.

Ряд нарушений, указанных в Актах проверок, послуживших основанием для обращения с настоящим исковым заявлением, до настоящего момента Субподрядчиком не устранены, нарушены сроки выполнения работ по договору субподряда, что привело к необходимости расторжения договора с Ответчиком и начислению неустойки.

При невыполнении предписания и/или несоблюдении сроков, указанных в предписании Генподрядчика, при нарушении требований законодательства, действующего на момент выявления нарушения, по соблюдению на объекте реконструкции требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности и требований по охране окружающей среды, экологической и санитарной безопасности, мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ на объекте, в том числе указанных в Приложении № 8 к Договору, которое может повлечь тяжелые последствия, такие как: несчастный случай с летальным исходом; групповой несчастный случай; инцидент, на устранение последствий которого потребуются серьезные материальные затраты и ресурсы (крупный пожар; серьезные последствия для окружающей среды или санитарно-гигиенического благополучия населения и т.д.), Генподрядчик вправе применить к Субподрядчику штраф в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей за каждое нарушение.

Учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, судом установлена обоснованность предъявленных к ответчику требований о взыскании штрафа в размере 600 000 руб. 00 коп. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца подлежащими удовлетворению.

На основании ст.ст. 8, 10, 12, 307-310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) в пользу ППК «ВСК» (ОГРН 

<

***>) штраф по договору №469/23 от 01.06.2023 в размере 600 000 руб. 00 коп., госпошлину в размере 15 000 руб. 00 коп. 

                Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

 

Судья                                                                                                                                                 К.В. Вольская