АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952) 24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: 664011, ул. Дзержинского, д. 36А, тел. 

<

***>; факс: 

<

***> 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Иркутск Дело № А19-23946/2023  

09

» 

января 

« 2024 года 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению  ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ (далее - ФКР МКД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) (адрес: 664003, ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, ГРЯЗНОВА УЛИЦА, ДОМ 1, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНПРОЕКТ"  (далее - ООО "РЕГИОНПРОЕКТ") (адрес: 630049, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,  НОВОСИБИРСК ГОРОД, КРАСНЫЙ 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 32 310 руб. 21 коп. установил: 

ФКР МКД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ обратилось в Арбитражный суд Иркутской  области с исковым заявление к ООО "РЕГИОНПРОЕКТ" о взыскании 32 310 руб. 21 коп.,  - по выставленной претензии № 7417/2023 от 16.06.2023 года по договору № 71/Г/2023 от  24.10.2022 г.; по выставленной претензии № 9846/2023 от 07.08.2023 по договору №  71/172023 от 24.10.2022 г.; по выставленной претензии исх. 7416/2023 от 16.06.2023 г. по  договору № 74/172023 от 24.10.2022 г.; по выставленной претензии № 9325/2023 от  25.07.2023 г. по договору № 74/172023 от 24.10.2022 г.; по выставленной претензии №  9656/2023 от 01.08.2023 г. по договору № 75/Г/2023 от 24.10.2022 г.; по выставленной  претензии 9290/2023 от 25.07.2023 г. по договору № 75/172023 от 24.10.2022 г., а также  расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. 00 коп.  

Определением суда 25.10.2023 исковое заявление принято к производству; дело  назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с  пунктом 1 части 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации (далее - АПК РФ), без вызова сторон согласно статье 228 АПК РФ, о чем истец  и ответчик извещены надлежащим образом.  

В уставленные определением суда сроки ответчик, в нарушение требований статьи  131 АПК РФ, мотивированный отзыв с документальным обоснованием имеющихся  возражений не представил, исковые требования ни по существу, ни по размеру не  оспорил.  

Рассмотрев вопрос об извещении ответчика, суд установил следующее. 

Согласно части 4 статьи 121 АПК РФ судебное извещение, адресованное  юридическому лицу, направляется по месту нахождения юридического лица. При этом  место нахождения юридического лица определяется на основании выписки из единого  государственного реестра юридических лиц.  

Так судом установлено, что копия определений суда от 25.10.2023 о принятии  заявления к производству, направлялось ответчику заказным письмом с уведомлением по  юридическому адресу: 630049, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК ГОРОД,  КРАСНЫЙ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, которое получено ответчиком 09.11.2023.  

Кроме того, 20.10.2023 ответчиком подано ходатайство об ознакомлении с  материалами дела в электронном виде, которое судом удовлетворено и предоставлен  доступ к материалам дела в электронном виде 23.10.2023.  

На основании изложенного, учитывая положения статей 121, 123 АПК РФ, 165.1 ГК  РФ, суд приходит к выводу о надлежащем уведомлении ответчика о наличии в  арбитражном суде дела с его участием.  

Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Дело рассмотрено по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации путем принятия решения арбитражного суда по делу,  рассматриваемому в порядке упрощенного производства 18.12.2023, в виде подписания  судьей резолютивной части решения, согласно которому заявленные исковые требования  удовлетворены.  

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения от  18.12.2023 размещена судом, по правилам статьи 229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, на официальном сайте http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 19.12.2023.  

В силу пункта 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в  случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного  производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.  

20.12.2023 истцом подана апелляционная жалоба. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд составляет мотивированное решение в  связи с подачей ответчиком заявления о составлении мотивированного решения суда.  

Исследовав материалы дела, ознакомившись с письменными доказательствами, суд  установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.  

Между ФКР МКД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (заказчик) и ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"  (подрядчик) 05.08.2022 заключены договоры об оказании услуг и (или) выполнении работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № 71/Г/23 от  24.10.2022, № 74/Г/2023 от 24.10.2022, № 75/Г/2023 от 24.10.2022.  

Предметом Договора № 71 является обязанность Подрядчика выполнить работы по  проведению технического обследования общего имущества многоквартирных домов  Иркутской области в сроки, определенные Договором о проведении капитального  ремонта.  

В соответствии с пунктом 2.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить весь  комплекс работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирных  домах, в том числе расположенных по адресам: Иркутская область, р.п. Чунский, ул,  ФИО1, д. 2; 

<

...>; Иркутская область, г.  Зима, мкр. Ангарский, д. 16; Иркутская область, г. Зима, мкр. Ангарский, д. 6; Иркутская  область, г. Зима, мкр. Ангарский, д. 5; 

<

...>;  

<

...>; 

<

...>; 

<

...>,  

<

...> (далее МКД) в соответствии с  техническим заданием на оказание услуг и (или) выполнение работ (Приложение № 1 к  договору о проведении капитального ремонта), проектной и (или) сметной документацией  (Приложение № 2 к договору о проведении капитального ремонта) и условиями договора  о проведении капитального ремонта в полном объеме, сдать выполненные работы  Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.  

Согласно пункту 3.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику  работы, в сроки, определенные настоящим договором о проведении капитального ремонта  и утвержденным Заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к договору о  проведении капитального ремонта).  

Пунктом 3.2 Договора предусмотрено, что сроки выполнения работ, включая сроки  выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным Заказчиком Графиком  выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о проведении капитального  ремонта). Окончанием выполнения всех работ является последний день установленного  срока выполнения работ согласно Графику выполнения работ, включая выполнение всех  видов работ, этапов работ (в соответствии с Проектной и (или) сметной документацией  (Приложение № 2), демонтажные работы, монтажные работы, пусконаладочные работы,  приемку выполненных работ, документальное оформление с учетом всех необходимых  согласований, подписаний и утверждений документов, определенных договором о  проведении капитального ремонта).  

Сроки выполнения работ по техническому об^ЗЯШнйю общего имущества в МКД,  включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным  Заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о  проведении капитального ремонта):  

- окончание выполнения работ МКД: 

<

...>  

15.04.2023 

<

...>  

15.04.2023 

г. Зима, мкр. Ангарский, д. 16  

15.04.2023 

<

...> д. 25  

28.02.2023 

<

...>  

28.02.2023 

р.п. Лесогорск, ул. Комсомольская, д. 4 

30.04.2023 

р.п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 33 

30.04.2023 

При нарушении сроков, указанных в Графике выполнения работ, Заказчик вправе  

потребовать от Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней) по каждому объекту  капитального ремонта, не сданному в срок.  

Согласно пункту 3.3. Договора о проведении капитального ремонта, сроки начала и  окончания выполнения работ, в том числе по видам работ, этапам работ, по каждому  объекту капитального ремонта, определенные Графиком выполнения работ, являются  исходными для определения ответственности за нарушение сроков выполнения работ.  

В соответствии с пунктом 5.3.2 Договора о проведении капитального ремонта,  Подрядчик обязан приступить к выполнению работ после заключения договора о  проведении капитального ремонта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Графиком  выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о проведении капитального  ремонта).  

В соответствии с пунктом 5.3.4 Договора о проведении капитального ремонта,  Подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством и в сроки,  определенные Графиком выполнения работ, проектом производства работ, в полном  соответствии с договором о проведении капитального ремонта, Приложениями к нему,  предписаниями, разъяснениями Заказчика, а также требованиями действующего  законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 6.2 Договора, приемка выполненных работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должна быть  произведена не позднее 20 рабочих дней до окончания срока выполнения работ,  определенного Графиком выполнения работ.  

В соответствии с пунктом 6.4 Договора, ко дню приемки выполненных работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Подрядчик должен  сформировать в полном объеме и передать Заказчику комплект документации,  предусмотренный Техническим заданием, и оформленный в соответствии с требованиями  действующего законодательства Российской Федерации.  

В силу пункта 8.2. Договора, за нарушение Подрядчиком сроков, предусмотренных  Графиком производства работ и/или Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику  неустойку в размере одной сто тридцатой за каждый день просрочки исполнения  обязательств, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому  нарушены.  

Предметом Договора № 74 является обязанность Подрядчика выполнить работы по  проведению технического обследования общего имущества многоквартирных домов  Иркутской области в сроки, определенные Договором о проведении капитального  ремонта.  

В соответствии с пунктом 2.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы  весь комплекс работ по техническому обследованию общего имущества в  многоквартирных домах, в том числе расположенному по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> (далее МКД) в соответствии с техническим заданием на  оказание услуг и (или) выполнение работ (Приложение № 1 к договору о проведении  капитального ремонта), проектной и (или) сметной документацией (Приложение № 2 к  договору о проведении капитального ремонта) и условиями договора о проведении  

капитального ремонта в полном объеме, сдать выполненные работы Заказчику, а Заказчик  обязуется принять выполненные работы и оплатить их.  

Согласно пункту 3.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику  работы, в сроки, определенные настоящим договором о проведении капитального ремонта  и утвержденным Заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к договору о  проведении капитального ремонта).  

Пунктом 3.2 Договора предусмотрено, что сроки выполнения работ, включая сроки  выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным Заказчиком Графиком  выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о проведении капитального  ремонта). Окончанием выполнения всех работ является последний день установленного  срока выполнения работ согласно Графику выполнения работ, включая выполнение всех  видов работ, этапов работ (в соответствии с Проектной и (или) сметной документацией  (Приложение № 2). демонтажные работы, монтажные работы, пусконаладочные работы.  приемку выполненных работ, документальное оформление с учетом всех необходимых  согласований, подписаний и утверждений документов, определенных договором^ о  проведении капитального ремонта).  

Сроки выполнения работ по техническому обследованию общего имущества в МКД,  включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным  Заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о  проведении капитального ремонта):  

- окончание выполнения работ МКД - 15.04.2023. 

Согласно пункту 3.3. Договора о проведении капитального ремонта, сроки начала и  окончания выполнения работ, в том числе по видам работ, этапам работ, по каждому  объекту капитального ремонта, определенные Графиком выполнения работ, являются  исходными для определения ответственности за нарушение сроков выполнения работ.  

В соответствии с пунктом 5.3.2 Договора о проведении капитального ремонта,  Подрядчик обязан приступить к выполнению работ после заключения договора о  проведении капитального ремонта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Графиком  выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о проведении капитального  ремонта).  

В соответствии с пунктом 5.3.4 Договора о проведении капитального ремонта,  Подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством и в сроки,  определенные Графиком выполнения работ, проектом производства работ, в полном  соответствии с договором о проведении капитального ремонта, Приложениями к нему,  

предписаниями, разъяснениями Заказчика, а также требованиями действующего  законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 6.2 Договора, приемка выполненных работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должна быть  произведена не позднее 20 рабочих дней до окончания срока выполнения работ,  определенного Графиком выполнения работ.  

В соответствии с пунктом 6.4 Договора, ко дню приемки выполненных работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Подрядчик должен  сформировать в полном объеме и передать Заказчику комплект документации,  предусмотренный Техническим заданием, и оформленный в соответствии с требованиями  действующего законодательства Российской Федерации.  

В силу пункта 8.2 Договора, за нарушение Подрядчиком сроков, предусмотренных  Графиком производства работ и/или Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику  неустойку в размере одной сто тридцатой за каждый день просрочки исполнения  обязательств, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому  нарушены.  

Предметом Договора № 75 является обязанность Подрядчика выполнить работы по  проведению технического обследования общего имущества многоквартирных домов  Иркутской области в сроки, определенные Договором о проведении капитального  ремонта.  

В соответствии с пунктом 2.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы  весь комплекс работ по техническому обследованию общего имущества в  многоквартирных домах, в том числе расположенных по адресам: 

<

...> (далее - МКД № 9); 

<

...> (далее - МКД № 156), 

<

...> (далее - МКД № 30) в соответствии с техническим заданием  на оказание услуг и (или) выполнение работ (Приложение № 1 к договору о проведении  капитального ремонта), проектной и (или) сметной документацией (Приложение № 2 к  договору о проведении капитального ремонта) и условиями договора о проведении  капитального ремонта в полном объеме, сдать выполненные работы Заказчику, а Заказчик  обязуется принять выполненные работы и оплатить их.  

Согласно пункту 3.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику  работы, в сроки, определенные настоящим договором о проведении капитального ремонта  и утвержденным Заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к договору о  проведении капитального ремонта).  

Пунктом 3.2 Договора предусмотрено, что сроки выполнения работ, включая сроки  выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным Заказчиком Графиком  выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о проведении капитального  ремонта). Окончанием выполнения всех работ является последний день установленного  срока выполнения работ согласно Графику выполнения работ, включая выполнение всех  видов работ, этапов работ (в соответствии с Проектной и (или) сметной документацией  (Приложение № 2), демонтажные работы, монтажные работы, пусконаладочные работы,  приемку выполненных работ, документальное оформление с учетом всех необходимых  согласований, подписаний и утверждений документов, определенных договором о  проведении капитального ремонта).  

Сроки выполнения работ по техническому обследованию общего имущества в МКД  1,2,3, включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным  Заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о  проведении капитального ремонта):  

- окончание выполнения работ МКД 1,2,3 - 30.03.2023. 

При нарушении сроков, указанных в Графике выполнения работ, Заказчик вправе  потребовать от Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней) по каждому объекту  капитального ремонта, не сданному в срок.  

Согласно пункту 3.3 Договора, сроки начала и окончания выполнения работ, в том  числе по видам работ, этапам работ, по каждому объекту капитального ремонта,  определенные Графиком выполнения работ, являются исходными для определения  ответственности за нарушение сроков выполнения работ.  

В соответствии с пунктом 5.3.2 Договора, Подрядчик обязан приступить к  выполнению работ после заключения договора о проведении капитального ремонта, в  соответствии с утвержденным Заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение № 3  к настоящему договору о проведении капитального ремонта).  

Согласно пункту 5.3.4 Договора, Подрядчик обязан выполнить все работы с  надлежащим качеством и в сроки, определенные Графиком выполнения работ, проектом  производства работ, в полном соответствии с договором о проведении капитального  ремонта, Приложениями к нему, предписаниями, разъяснениями Заказчика, а также  требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 6.2 Договора, приемка выполненных работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должна быть  произведена не позднее 20 рабочих дней до окончания срока выполнения работ,  определенного Графиком выполнения работ.  

В соответствии с пунктом 6.4 Договора, ко дню приемки выполненных работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Подрядчик должен  сформировать в полном объеме и передать Заказчику комплект документации,  предусмотренный Техническим заданием, и оформленный в соответствии с требованиями  действующего законодательства Российской Федерации.  

В силу пункта 8.2 Договора, за нарушение Подрядчиком сроков, предусмотренных  Графиком производства работ и/или Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику  неустойку в размере одной сто тридцатой за каждый день просрочки исполнения  обязательств, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому  нарушены.  

В обоснование заявленных требований истец указал, что в нарушение пунктов 3.1,  5.3.4 Договоров, работы выполнены и сданы Заказчику с нарушением срока, в связи с чем,  заказчик начислил ответчику неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств в  сумме 32 310 руб. 21 коп., из которых: 10 682 руб. 29 коп. - по выставленной претензии   № 7417/2023 от 16.06.2023 года по договору № 71/Г/2023 от 24.10.2022; 10 744 руб. 71 коп.  -по выставленной претензии № 9846/2023 от 07.08.2023 по договору № 71/172023 от  24.10.2022; 4 714 руб. 45 коп. - по выставленной претензии № 7416/2023 от 16.06.2023 по  договору № 74/172023 от 24.10.2022; 2 671 руб. 87 коп. - по выставленной претензии   № 9325/2023 от 25.07.2023 по договору № 74/172023 от 24.10.2022; 2 924 руб. 56 коп. - по  выставленной претензии № 9656/2023 от 01.08.2023 по договору № 75/Г/2023 от  24.10.2022; 572 руб. 33 коп. - по выставленной претензии № 9290/2023 от 25.07.2023 по  договору № 75/172023 от 24.10.2022.  

Претензии ответчиком оставлены без удовлетворения, что послужило основанием  для обращения истца с настоящим иском в суд с требованиями о взыскании с ответчика, в  судебном порядке, неустойки за просрочку исполнения обязательств.  

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с  требованиями статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.  

Проанализировав условия представленных договоров, суд считает, что по своей  правовой природе указанные договоры являются договорами подряда, следовательно,  правоотношения сторон в рассматриваемом случае регулируются положениями  параграфов 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в  договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

Таким образом, применительно к договору подряда существенными являются  условия о предмете и сроках выполнения подрядных работ.  

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между  сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем  существенным условиям договора.  

Оценив условия договоров, суд пришел к выводу о согласовании сторонами их  существенных условий, в связи с чем, договоры являются заключенными, порождающими  взаимные права и обязательства сторон.  

Поскольку регулирующее подрядные взаимоотношения законодательство прямо  предусматривает возможность подтверждения факта выполнения работ и его объема  исключительно составлением акта, указанный документ свидетельствует как о факте  приема работ, так и подтверждает объем таковых.  

Как следует из материалов дела, и не оспаривается сторонами, во исполнение  обязательств по договорам подрядчиком выполнены работы по объектам капитального  ремонта, работы в полном объеме приняты заказчиком, ответчиком данный факт не  оспорен.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.  

Заказчиком заявлено требование о взыскании неустойки за просрочку выполнения  работ в размере 32 310 руб. 21 коп., из которых: 10 682 руб. 29 коп. - по выставленной  претензии № 7417/2023 от 16.06.2023 года по договору № 71/Г/2023 от 24.10.2022; 10 744  руб. 71 коп. - по выставленной претензии № 9846/2023 от 07.08.2023 по договору   № 71/172023 от 24.10.2022; 4 714 руб. 45 коп. - по выставленной претензии № 7416/2023 от  16.06.2023 по договору № 74/172023 от 24.10.2022; 2 671 руб. 87 коп. - по выставленной  претензии № 9325/2023 от 25.07.2023 по договору № 74/172023 от 24.10.2022; 2 924 руб. 56  

коп. - по выставленной претензии № 9656/2023 от 01.08.2023 по договору № 75/Г/2023 от  24.10.2022; 572 руб. 33 коп. - по выставленной претензии № 9290/2023 от 25.07.2023 по  договору № 75/172023 от 24.10.2022.  

Рассмотрев заявленные требования, суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии с пунктами 8.2 Договоров, за нарушение Подрядчиком сроков,  предусмотренных Графиком производства работ и/или Договором, Подрядчик уплачивает  Заказчику неустойку в размере одной сто тридцатой за каждый день просрочки  исполнения обязательств, действующей на день уплаты неустойки ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ,  сроки по которому нарушены.  

 № п/п 

Адрес МКД  

Вид работ  

ставки 

рефинансир ования ЦБ  РФ  

Стоимость 

работ по  договору  

Перио д  

просро чки  

(дни)  

Сумма 

штрафных  санкций  

Срок 

фактического  окончания  

работ (этапа  работ)  

Срок 

окончания  работ (этапа  работ)  

1 

Иркутская  

область, 

<

...> 

Техническое  

 обследование  

 общего 

 имущества в  многокварти 

рном доме.  

0,000577 

178 475,34  

29 

2 986,03  

15.05.2023  

16.04.2023  

2 

Иркутская  

область, 

<

...>  

Техническое  обследование  общего  

имущества в  

многоквартир ном доме.  

0,000577 

178 758,24  

29 

2 990,76  

15.05.2023  

16.04.2023  

3 

Иркутская  

область, г.  Зима, мкр.  Ангарский, Д.  16  

Техническое  обследование  общего  

имущества в  многоквартир ном доме.  

0,000577 

68 344,48  

11 

433,72 

27.04.2023  

16.04.2023  

4 

Иркутская  

область, 

<

...>  

д. 25 

Техническое  обследование  общего  

имущества в  многоквартир ном доме.  

0,000577 

6 935,38 

44 

176,05 

14.04.2023  

01.03.2023  

5 

Иркутская  

область, 

<

...>  

Техническое  

обследование  общего  

имущества в  

многоквартир ном доме.  

0,000577 

50 749,48  

44 

1 288,26  

14.04.2023  

01.03.2023  

6 

Иркутская  область, р.п.  

Лесогорск,  ул.  

Комсомольск  ая, д. 4  

Техническое  

обследование  общего  

имущества в  

многоквартир ном доме.  

0,000577 

221 193,91  

11 

1 403,73  

12.05.2023  

01.05.2023  

7 

Иркутская  

область, р.п.  Лесогорск,  

ул. Шастина,  Д. 33  

Техническое  

обследование  общего  

имущества в  

многоквартир ном доме.  

0,000577 

221 193,91  

11 

1 403,73  

12.05.2023  

01.05.2023  

10 682,29  

 № 

Адрес МКД  

Вид работ  

ставки 

Стоимость  

Период 

Сумма 

Срок 

Срок 

п/п 

рефинансир ования ЦБ  РФ  

работ по  договору  

просроч ки (дни)  

штрафны х санкций 

фактическ 

ого 

окончания  работ  

(этапа  работ)  

окончания  работ (этапа  

работ) 

1 

г.  

Нижнеудинск,  •ул. Максима Горького, д.8  

проведение  

технического  

 обследования  

0,0654%  

205 413,62  

80 

10 744,71 

30.05.2023  

10.03.2023  

10 744,71 

 № п/п 

Адрес МКД  

Вид работ  

ставки  

рефинансир ования ЦБ РФ  

Стоимость  работ по  договору  

Период  

 просроч ки (дни)  

Сумма штрафных санкций 

Срок  

фактическ ого  

окончания  работ  

(этапа  работ)  

Срок  

окончания  

работ,  (этапа  работ)  

1 

Иркутская  

область, 

<

...>  

Д. 14 

Техническое  обследование  общего  

имущества в многоквартирн ом доме.  

0,000577  

102 640,44  

11 

651,37 

27.04.2023  

16.04.2023  

2 

Иркутская  

область, 

г. Иркутск,  б-р  

ФИО2,  д. 3  

Техническое  обследование  общего  

имущества в многоквартирн ом доме.  

0,000577  

121 657,08  

11 

772,05 

27.04.2023  

16.04.2023  

3 

Иркутская  

область, г. ,  Иркутск, б-р  ФИО2,  

Д.6А 

Техническое 

обследование  общего  

имущества в многоквартирн ом доме.  

0,000577  

100 067,40  

7 

404,12 

27.04.2023  

16.04.2023  

4 

Иркутская  

область, 

<

...>  

д. 8 

Техническое 

обследование  общего  

имущества в многоквартирн ом доме.  

0,000577  

99 462,48  

7 

401,68 

27.04.2023  

16.04.2023  

5 

Иркутская  область, г.  Иркутск, б-р  

Техническое 

обследование  общего  

имущества  

0,000577  

579 929,14  

7 

2 342,02 

27.04.2023  

16.04.2023  

ФИО2, д.

29А 

 в 

многоквартирн ом доме.  

6 

Иркутская  

область, 

<

...>  

Техническое   обследование   общего  

 имущества в

многоквартирн ом доме.  

0,000577  

35 460,24  

7 

143,20 

27.04.2023  

16.04.2023  

4 714,45 

 №  п/  п  

Адрес МКД  

Вид работ  

ставки  

рефинансир ования ЦБ РФ  

Стоимость  работ по  договору  

Период  

 просроч ки (дни)  

Сумма штрафны х санкций 

Срок  

фактическ ого  

окончания  работ  

(этапа  работ)  

Срок 

окончания  работ (этапа  

работ) 

1 

Иркутск, 

Станиславског о, 3  

проведение  

технического  обследования  

0,0577%  

55 853,71  

14 

451,13 

07.06.2023  

15.05.2023  

2 

Иркутск, 

Станиславског 

проведение  технического  

0,0577%  

54 320,96  

14 

438,75 

07.06.2023  

15.05.2023  

о, 5 

обследования  

3 

Иркутск, 

Станиславског о,7  

проведение  

технического  обследования  

0,0577%  

56 136,58  

14 

453,41 

07.06.2023  

15.05.2023  

4 

Иркутск, 

Станиславског о, 13  

проведение  

технического  обследования  

0,0577%  

102 887,52  

11 

652,94 

07.06.2023  

15.05.2023  

5 

Иркутск, 

Станиславског о, 15  

проведение  

технического  обследования  

0,0577%  

42 927,17  

14 

346,72 

07.06.2023  

15.05.2023  

6 

Иркутск, 

Станиславског о, 17  

проведение  

технического  обследования  

0,0577%  

40 723,04  

14 

328,92 

07.06.2023  

15.05.2023  

2 671,87  

 № 

п/п  

Адрес МКД 

Вид работ  

ставки  

рефинансир ования ЦБ РФ  

Стоимость  работ по  

 договору  

Период  просроч ки  

(ДНИ)  

Сумма 

штрафных  санкций  

Срок  

фактическ ого  

окончания  работ  

(этапа  работ)  

Срок  окончания  

работ (этапа  

работ)  

1 

Иркутская 

область, 

<

...>  

ого, д.30 

Разработка   проектно- 

 сметной 

документации  

0,0577%  

36 736,81  

67 

1 420,02  

06.06.2023  

30.03.2023  

2 

Иркутская  

область, г. Иркутск, ул.  

ФИО3 ,д.9  

Разработка   проектно-сметной  

документации  

0,0577%  

15 338,90  

53 

469,02 

06.06.2023  

30.03.2023  

3 

Иркутская  

область, г. Иркутск, б-р. ФИО4,  

д.15б 

Разработка   проектно-сметной  

документации  

0,0577%  

94 468,47  

19 

1 035,52  

06.06.2023  

30.04.2023  

2 924,56  

п/ п  

А № дрес МКД 

Вид работ 

ставки 

рефинанси рования ЦБ  РФ  

Стоимость  

работ 

по 

договору  

Период  просроч ки (дни)  

Сумма 

штрафны  х санкций  

Срок  

фактическ ого  

окончания  работ  

(этапа  работ)  

Срок 

окончания  работ (этапа  работ)  

г.1 И ркутск, ул. Российская,  

д.14в 

 Разработка 

проектно-сметной 

документации  

0,0577%  

45 092,95  

22 

572,33 

06.06.2023  

30.04.2023  

572,33 

Таким образом, выполнение работ осуществлено подрядчиком с нарушением  

установленных договорами сроков, что послужило основанием для начисления неустойки,  предусмотренной пунктами 8.2 Договоров.  

Судом проверены расчеты неустойки, которые являются верными, контрасчета  ответчиком не представлено.  

Ответчик, в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного Процессуального Кодекса  Российской Федерации, доказательства оплаты неустойки в материалы дела не  представил, доводы истца о наличии задолженности не опроверг надлежащими,  относимыми и допустимыми доказательствами (65, 67, 68 Арбитражного  Процессуального Кодекса Российской Федерации).  

При таких обстоятельствах, учитывая изложенное, исходя из предмета и основания  заявленных требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в  их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации), принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, руководствуясь  действующим законодательством, суд находит исковые требования о взыскании пени в  размере 32 310 руб. 21 коп., подлежащими удовлетворению.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Из материалов дела следует, что истцом при обращении в суд государственная  пошлина не уплачена, с заявленных требований уплате подлежит госпошлина в сумме 2  000 руб., которая подлежит отнесению на ответчика и взыскиваются в доход  федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "РЕГИОНПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 

<

***>) штраф в  размере 32 310 руб. 21 коп., из которых: 10 682 руб. 29 коп. - по выставленной претензии   № 7417/2023 от 16.06.2023 года по договору № 71/Г/2023 от 24.10.2022; 10 744 руб. 71 коп. - по выставленной претензии № 9846/2023 от 07.08.2023 по договору № 71/172023 от  24.10.2022; 4 714 руб. 45 коп. - по выставленной претензии № 7416/2023 от 16.06.2023 по  договору № 74/172023 от 24.10.2022; 2 671 руб. 87 коп. - по выставленной претензии   № 9325/2023 от 25.07.2023 по договору № 74/172023 от 24.10.2022; 2 924 руб. 56 коп. - по  выставленной претензии № 9656/2023 от 01.08.2023 по договору № 75/Г/2023 от 24.10.2022;  572 руб. 33 коп. - по выставленной претензии № 9290/2023 от 25.07.2023 по договору   № 75/172023 от 24.10.2022.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "РЕГИОНПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 2 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение 15 дней с момента его вынесения.  

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке  упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.  

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть  подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке  упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение  принимается по правилам, установленным главой 20 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из особенностей, установленных  настоящей главой.  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней  со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня  подачи апелляционной жалобы.  

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного  производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в  законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана  апелляционная жалоба.  

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение  вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной  жалобы.  

Судья С.И. Кириченко