30_986470  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-7901/2017

город Мурманск

21 ноября 2017 года

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

обязать Общество с ограниченной ответственностью «Севертехснаб» в течение 30  дней со дня вступления в законную силу решения суда устранить недостатки  реконструкции улицы Жемчужной и подходов к путепроводу через железнодорожные  пути у станции Апатиты-1 в городе Апатиты, Мурманской области, а именно:  

1) устранить разрушения мест стыка асфальтобетона (продольного шва) на участках  от пешеходного перехода в районе д. № 4 до пешеходного перехода в районе д. № 6 (со  стороны домов № 4 и № 6); заездного кармана автобусной остановки в районе д. № 6; от  пешеходного перехода в районе д. № 6 до пешеходного перехода в районе д. № 12 (со  стороны домов № 6 и № 12); от пешеходного перехода в районе д. № 13 до пешеходного  перехода в районе д. № 7 (со стороны дома № 7); от пешеходного перехода в районе д. №  7 до пешеходного перехода в районе д. № 5 (со стороны домов № 5 и № 7);  

2) устранить просадки в местах устройства дождеприемных колодцев (в районе  въезда к домам № 4 и № 4а);  

3) в районе подъезда к домам № 3 и № 5 восстановить асфальтобетонное покрытие в  месте прокладки питающего кабеля светофорного объекта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Севертехснаб» в пользу  муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского  хозяйства» 6000 рублей судебных расходов.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца после  его принятия.  

Судья В.В. Власов