Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-78308/2019

20 января 2020 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ПОЖТЕХНИКА-СЕРВИС" (адрес:  Россия 170017, Тверь, деревня Большие Перемерки д. 2 лит. Б, ОГРН:  );

ответчик: закрытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №303" (199406, Санкт-Петербург город, улица Нахимова, 26, лит. а, пом. 4-Н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 01.04.2019

- от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖТЕХНИКА-СЕРВИС" (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №303" (далее – Управление) о взыскании 30 745 473,18 руб. задолженности по договору строительного подряда от 05.06.2016 № СДО.06.15-110 (далее – Договор).

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Представитель истца не возражал против рассмотрения дела в отсутствие представителя ответчика, поддержал исковые требования в полном объеме.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Обществом (подрядчиком) и Управлением (генподрядчиком) заключен Договор, в соответствии с которым генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение собственными и привлеченными силами, средствами и механизмами работ по монтажу, наладке и сдаче системы автоматического пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте: «Завод по производству ориентировано-стружечных плит (OSB-плит) мощностью 500 тыс. м3 в год в г. Торжке Тверской области на базе ООО «СТОД», согласно проекта, разработанного Обществом в составе: Главный производственный корпус; Здание энергоцентра №1; Здание энергоцентра №2; Здание сортировки древесных частиц; Здание производства древесных частиц; Здание осмоления стружки; Здание насосной станции пожаротушения; Здание АБК; Здание РМЦ; Фельдшерский пункт. 

В соответствии с п. 2.2.1. Договора начало выполнения работ – в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора, поступления на расчетный счет подрядчика аванса и сдачи по акту под монтаж строительной площадки или этапа работ.

Согласно п. 2.2.2. Договора окончание выполнения работ – не позднее 25 октября 2015 года в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 4), при условии своевременной сдачи строительной площадки под монтаж, выполнение сроков финансирования работ, оговоренных в статье 3 Договора и дополнительных соглашениях к Договору. При несоблюдении вышеуказанных условий сроки окончания работ продлеваются на время задержки.

В соответствии с п. 3.1. Договора ориентировочная стоимость подлежащих выполнению подрядчиком по Договору работ определяется протоколом согласования договорной цены к Договору и составляет 248 304 000 руб.

Этим же пунктом было установлено, что стоимость работ по каждому объекту и порядок финансирования определяется согласованными сторонами локальными сметами и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору. 

В силу п. 3.2. Договора порядок финансирования работ по Договору производится согласно следующего графика:

5 000 000 руб. – в течение 5 рабочих дней генподрядчик в счет цены Договора поставляет на строительную площадку трубы в ассортименте, указанном в заявке подрядчика в соответствии с графиком производства работ. Цена на поставленные трубы не должна превышать рыночную стоимость;

- в срок до 30.06.2015 генподрядчик перечисляет на счет подрядчика авансовый платеж в сумме 10 000 000 руб.

Согласно п. 3.3. Договора при завершении этапа работ подрядчик в срок до последнего числа текущего месяца предоставляет генподрядчику счет-фактуру со справкой о стоимости выполненных работ за отчетный период работ и затрат по форме КС-3 (в четырех экземплярах), прикладывает к ней акт приемки выполненных за отчетный период работ по форме КС-2 (в четырех экземплярах), а также комплект исполнительной документации, подтверждающий объем выполненных за отчетный период работ (в 6 экземплярах).

В соответствии с пунктом 3.4 договора при подписании актов сдачи-приемки выполненных работ и при проведении расчетов Стороны руководствуются позициями с применением коэффициента (К=0,99), указанного в сметах, на момент заключения Договора, за исключением позиций о стоимости оборудования. В  течение 10 рабочих дней после получения генподрядчик изучает, проверяет и возвращает подрядчику документы, указанные в п. 3.3. Договора, одобрив их или предоставив свои замечания.

В силу п. 3.5. Договора ежемесячный расчет за выполненные подрядчиком работы производится не позднее 10 банковских дней с момента подписания формы КС-2 и КС-3, но не позднее 20 числа следующим за отчетным периодом и предоставления подрядчиком счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ.

Согласно пункту 4.1.10 договора по окончании выполнения Подрядчиком работ Генподрядчик обязан организовать приемку их результата. 

В силу пункта 4.1.6 договора Генподрядчик обязан оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора. 

Согласно п. 5.6. Договора датой сдачи работ считается дата утверждения генподрядчиком окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.

05.06.2015 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №1 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость по монтажу, наладке и сдачи системы автоматического пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Главного производственного корпуса в соответствии с Локальными сметными расчетами (Приложение №1, 2, 3 к соглашению), которая составила 88 352 169,87 рублей. 

25.10.2015 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №2 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили продлить сроки производства работ до 16.03.2016. 

01.12.2015 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №3 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны договорились о поставке оборудования согласно перечню, указанному в Спецификации (Приложение №1 к соглашению), стоимость которого составила 29 700 000 рублей. 

01.03.2016 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №4 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость по монтажу, наладке и сдачи системы автоматического пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Здания производства древесных частиц в соответствии с Локальными сметными расчетами № 1, 2, 3 (Приложение №1 к соглашению), которая составила 31 249 512,08 рублей. 

10.03.2016 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение № 5 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость по монтажу, наладке и сдаче насосной станции пожаротушения в Здании насосной станции с пожарным резервуаром №2 в соответствии с Локальными сметными расчетами № 1, 2 (Приложение №1 к соглашению), которая составила 36 823 143,32 рублей. 

10.03.2016 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №5/1 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость комплекса работ по монтажу, наладке и сдаче электроснабжения, отопления и вентиляции, дренажной канализации, СКС, всасывающих участков в резервуарах в Здании насосной станции с пожарным резервуаром №2 по проекту разработанному ООО «ТрансИнжКом» в соответствии с Локальными сметными расчетами (Приложение №1, 2 к соглашению), которая составила 5 876 080,40 рублей. 

16.03.2016 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №6 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость по монтажу, наладке и сдаче системы автоматического пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Здания Энергоцентра №1 с электростанцией в соответствии с Локальными сметными расчетами № 1, 2, 3, 4 (Приложение №1 к соглашению), которая составила 15 877 093,06 рублей. Этим же соглашением стороны определили продлить сроки производства работ до 31.12.2016. 

01.06.2016 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №7 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость по монтажу, наладке и сдаче системы автоматического пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Здания центральной распределительной подстанции (ЦРП) в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к соглашению), которая составила 383 210,96 рублей. 

01.06.2016 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №8 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость комплекса работ по монтажу, наладке и сдаче системы автоматического газового пожаротушения, автоматического водяного пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Здания осмоления стружки в соответствии с Локальными сметными расчетами № 1 , 2 , 3, 4, 5 (Приложение №1 к соглашению), которая составила 59 022 587,99 рублей. 

01.06.2016 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» было подписано Дополнительное соглашение №9 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость комплекса работ по монтажу, наладке и сдаче системы автоматического водяного пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Здания сортировки в соответствии с Локальными сметными расчетами № 1, 2, 3 (Приложение №1 к соглашению), которая составила 8 721 826,10 рублей. 

01.06.2016 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №10 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость комплекса работ по монтажу, наладке и сдаче системы автоматического водяного пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Здания энергоцентра №2 в соответствии с Локальными сметными расчетами № 1, 2, 3 (Приложение №1 к соглашению), которая составила 6 498 782,63 рублей. 

01.07.2016 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №11 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость комплекса работ по монтажу, наладке и сдаче в Здании насосной станции с пожарным резервуаром №3 в соответствии с Локальными сметными расчетами (Приложение №1, 2, 3 к соглашению), которая составила 39 237 141,93 рублей. Этим же соглашением стороны определили продлить сроки производства работ до 31.12.2017. 

01.07.2017 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №12 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость комплекса работ по монтажу, наладке и сдаче в Здании насосной станции с пожарными резервуарами №1 в соответствии с Локальными сметными расчетами № 1, 2, 3, 4, 5 (Приложение №1 к соглашению), которая составила 12 690 924,31 рублей. 

01.07.2017 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №13 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость комплекса работ по монтажу, наладке и сдаче в Здании трансформаторной подстанции 2БКТП-1600КВА 10/0,4 кВ в соответствии с Локальными сметными расчетами № 1, 2 (Приложение №1, 2 к соглашению), которая составила 18 669 700,55 рублей. 

01.11.2017 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №14 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны определили стоимость комплекса работ связанных с обеспечением отопления Здания насосной станции с пожарным резервуаром №3 в соответствии с Локальными сметными расчетами № 1, 2 (Приложение №1, 2 к соглашению), которая составила 3 147 076,26 рублей. Этим же соглашением стороны определили продлить сроки производства работ до 31.12.2018. 

01.12.2017 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №15 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны пришли к соглашению, что на 27.11.2017 Подрядчик выполнил и сдал Генподрядчику работы на общую сумму 227 406 385,98 рублей, просрочка выполнения работ со стороны Подрядчика отсутствует, претензий по качеству выполнения работ нет. Этим же соглашением стороны подтвердили продление сроков производства работ до 31.12.2018. 

14.02.2018 между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписано Дополнительное соглашение №16 к договору №СДО.06.15-110, которым стороны согласовали выполнение дополнительных работ по монтажу, наладке и сдаче комплекса внутренних работ в Здании водоподготовки в соответствии с Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение №1 к соглашению), стоимость которых составила 17 120 000 рублей. Этим же соглашением стороны исключили из текста договора пункт 3.6., внесли изменения в пункты 3.2, 5.3, 5.8, 12.1. 

Так же стороны установили, что на 12.02.2018 Подрядчик выполнил и сдал Генподрядчику работы на общую сумму 262 441 230,56 рублей, просрочка выполнения работ со стороны Подрядчика отсутствует, претензий по качеству выполнения работ нет. 

При этом Генподрядчик оплатил на 12.02.2018 работы на общую сумму 255 946 696,33 рублей. 

Учитывая положение пункта 3.1. договора строительного подряда, между ООО «Пожтехника-Сервис» и ЗАО «СМУ-303» подписаны дополнительные соглашения, в соответствии с которым стоимость подлежащих выполнению работ составила 343 669 249,46 рублей. 

Подрядчик выполнил работы по Договору, что подтверждается следующими документами:

- справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.07.2015 № 1 на сумму 2 590 248,85 руб., от 31.08.2015 № 2 на сумму 6 017 470,89 руб., от 31.10.2015 № 3 на сумму 21 740 628,46 руб., от 30.11.2015 № 4 на сумму 30 686 513,77 руб., от 31.01.2016 № 5 на сумму 44 045 382,83 руб., от 29.02.2016 № 6 на сумму 55 343 439,61 руб., от 31.03.2016 № 7 на сумму 60 201 236,97 руб., от 30.04.2016 № 8 на сумму 78 507 719,93 руб., от 31.05.2016 № 9 на сумму 133 845 655,91 руб., от 31.08.2016 № 10 на сумму 158 735 514,41 руб., от 30.09.2016 № 11 на сумму 178 075 697,18 руб., от 31.01.2017 № 12 на сумму 197 808 065,07 руб., от 31.07.2017 № 13 на сумму 227 409 224,91 руб., от 04.12.2017 № 14 на сумму 262 444 069, 49 руб., от 28.02.2018 № 15 на сумму 272 250 248,66 руб., от 15.05.2018 № 16 на сумму 276 382 054,72 руб.;

- актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.07.2015 № 1 на сумму 2 616 410,96 руб., от 31.08.2015 № 2 на сумму 3 461 842,46 руб., от 31.10.2015 № 3 на сумму 15 881 977,35 руб., от 30.11.2015 № 4 на сумму 9 036 247,79 руб., от 31.01.2016 № 5 на сумму 13 493 807,12 руб., от 29.02.2016 № 6 на сумму 10 218 604,93 руб., от 29.02.2016 № 7 на сумму 1 161 663,71 руб., от 31.03.2016 № 9 на сумму 1 629 083,14 руб., от 31.03.2016 № 8 на сумму 3 268 329,10 руб., от 15.04.2016 № 10 на сумму 15 099 553,78 руб., от 30.04.2016 № 11 на сумму 2 078 646,46 руб., от 20.05.2016 № 13 на сумму 21 452 665,37 руб., от 31.05.2016 № 14 на сумму 34 113 195,16 руб., от 31.08.2016 № 15 на сумму 4 079 862,98 руб., от 31.08.2016 № 16 на сумму 966 099,04 руб., от 31.08.2016 № 17 на сумму 771 145,34 руб., от 31.08.2016 № 18 на сумму 2 219 709,80 руб., от 31.08.2016 № 19 на сумму 4 789 861, 24 руб., от 31.08.2016 № 20 на сумму 2 668 706,04 руб., от 31.08.2016 № 21 на сумму 386 005,14 руб., от 31.08.2016 № 22 на сумму 1 266 195,19 руб., от 31.08.2016 № 23 на сумму 3 398 443,19 руб., от 31.08.2016 № 24 на сумму 2 995 561,19 руб., от 31.08.2016 № 25 на сумму 102 057,42 руб., от 31.08.2016 № 26 на сумму 1 449 014,04 руб., от 30.09.2016 № 27 на сумму 1 154 881,34 руб., от 30.09.2016 № 28 на сумму 973 784,75 руб., от 30.09.2016 № 29 на сумму 1 294 296,32 руб., от 30.09.2016 № 30 на сумму 10 157 655,92 руб., от 30.09.2016 № 31 на сумму 89 426,30 руб., от 30.09.2016 № 32 на сумму 5 806 072,76 руб., от 31.01.2017 № 33 на сумму 1 426 048,01 руб., от 31.01.2017 № 34 на сумму 834 343,78 руб., от 31.01.2017 № 35 на сумму 61 679,54 руб., от 31.01.2017 № 36 на сумму 7 816 215,75 руб., от 31.01.2017 № 37 на сумму 1 180 333,94 руб., от 31.01.2017 № 38 на сумму 152 867,70 руб., от 31.01.2017 № 39 на сумму 905 966,24 руб., от 31.01.2017 № 40 на сумму 2 103 535,58 руб., от 31.01.2017 № 41 на сумму 3 186 851,97 руб., от 31.01.2017 № 42 на сумму 1 110 503,90 руб., от 31.01.2017 № 43 на сумму 1 057 569,10 руб., от 31.07.2017 № 44 на сумму 24 767 831,34 руб., от 31.07.2017 № 45 на сумму 4 833 328,50 руб., от 04.12.2017 № 46 на сумму 8 394 403,98 руб., от 31.10.2017 № 47 на сумму 157 047,21 руб., от 03.11.2107 № 48 на сумму 18 410 375,34 руб., от 09.11.2017 № 50 на сумму 8 117 641,26 руб., от 28.02.2018 № 49 на сумму 274 794,86 руб., от 28.02.2018 № 51 на сумму 2 549 275,54 руб., от 28.02.2018 № 52 на сумму 1 079 427, 34 руб., от 28.02.2018 № 53 на сумму 2 067 648,92 руб., от 28.02.2018 № 54 на сумму 2 729 894,77 руб., от 28.02.2018 № 55 на сумму 1 853 479,17 руб., от 15.05.2018 № 56 на сумму 740 232,88 руб., от 15.05.2018 № 57 на сумму 641 464,52 руб., от 15.05.2018 № 58 на сумму 517 845,36 руб., от 15.05.2018 № 59 на сумму 77 832,80 руб., от 15.05.2018 № 60 на сумму 66 083,54 руб., от 15.05.2018 № 61 на сумму 909 408,30 руб., от 15.05.2018 № 62 на сумму857 378,56 руб., от 15.05.2018 № 63 на сумму 356 503,96 руб., подписанными сторонами с наличием печатей Общества и Управления.

А также: 

- справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 08.10.2018 № 17 на сумму 279 589 970,37 руб., от 15.10.2018 № 18 на сумму 302 437 596,34 руб., от 11.01.2019 № 19 на сумму 328 872 550,29 руб., от 12.02.2019 № 20 на сумму 343 770 286,32 руб., от 08.10.2018 № 17 на сумму 279 589 910,37 руб., от 15.10.2018 № 18 на сумму 302 437 596,34 руб., от 11.01.2019 № 19 на сумму 328 872 550,29 руб., от 12.02.2019 № 20 на сумму 343 770 286,32 руб.;

- актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 08.10.2018 № 64 на сумму 163 349,76 руб., от 08.10.2018 № 65 на сумму 1 459 015,72 руб., от 08.10.2018 № 66 на сумму 1 611 476,44 руб., от 15.10.2018 № 67 на сумму 15 073 277,52 руб., от 15.10.2018 № 68 на сумму 7 774 408,45 руб., от 11.01.2019 № 69 на сумму 934 709,88 руб., от 11.01.2019 № 70 на сумму 25 955 174,83 руб., от 12.02.2019 № 71 на сумму 8 798 995,26 руб., от 12.02.2019 № 72 на сумму 6 575 209,03 руб., от 08.10.2018 № 64 на сумму 163 349,76 руб., от 08.10.2018 № 65 на сумму 1 459 015,72 руб., от 08.10.2018 № 66 на сумму 1 611 476,44 руб., от 15.10.2018 № 67 на сумму 15 073 277,52 руб., от 15.10.2018 № 68 на сумму 7 774 408,45 руб., от 11.01.2019 № 69 на сумму 934 709,88 руб., от 11.01.2019 № 70 на сумму 25 955 174,83 руб., от 12.02.2019 № 71 на сумму 8 798 995,26 руб., от 12.02.2019 № 72 на сумму 6 575 209,03 руб., подписанными Обществом в одностороннем порядке.

Управление не оплатило работы по Договору в полном объеме. Задолженность составила 30 745 473,18.

Общество направило в адрес Управления претензию от 02.04.2019 № 1 с предложением о перечислении задолженности.

Задолженность Управлением не оплачена, в связи с чем Общество обратилось в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт выполнения работ подтверждается указанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) принято судом определением от 23.10.2017. 

Из представленных документов следует, что часть работ, по которым имеется неоплаченный остаток, произведена кредитором в период после 15.05.2018 (КС-2 № 46 - 72), то есть после возбуждения дела о банкротстве должника, что свидетельствует о том, что задолженность по их оплате является текущей. 

Ответчик возражал против удовлетворения требований в связи с тем, что, как указывает ответчик, истец не представил достаточных и допустимых доказательств фактического выполнения им работ по Договору.

Также ответчик указывает, что удовлетворение исковых требований создаст правовую неопределенность в вопросе установления момента возникновения требований заявителя, что повлечет нарушение принципов очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов, а, следовательно, их прав, а также прав ответчика. 

Суд полагает, что доводы ответчика не обоснованы, поскольку акты формы КС-2 и КС-3 являются надлежащим доказательствами выполнения истцом работ по Договору. На данных актах указаны даты их составления, и, кроме того, истцом представлены доказательства направления актов в адрес ответчика.

Также суд отмечает, что Общество обращалось в суд с заявлением о включении требований, изложенных в настоящем исковом заявлении в реестр требований Управления. Определением от 04.06.2019 по дела А56-71907/2017/тр.20 производство по данному заявлению прекращено вследствие отнесения судом заявленных требований к текущим платежам.

Таким образом, исковые требования Общества подлежат рассмотрению вне рамок дела о банкротстве Управления.

На основании изложенного суд полагает, что истцом доказаны обстоятельства, на которые он ссылается как на основание заявленных требований, вследствие чего удовлетворяет требование о взыскании 30 745 473,18 руб.  задолженности в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью закрытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 303" в пользу общество с ограниченной ответственностью "ПОЖТЕХНИКА-СЕРВИС" 30 745 473,18 руб.  задолженности, 176 727 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.