Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

28 мая 2018 годаДело № А56-36620/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное строительное управление - 4» (194354, Санкт-Петербург, Северный пр., д. 11, лит. А, ОГРН: 1057810119069);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «А-Проект» (197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, корп. 3, лит. А, пом. 2-Н, ОГРН: 5067847007003);

о взыскании 326 885 руб. 43 коп. задолженности и 22 403 руб. 77 коп. неустойки за период с 28.11.2017 по 28.05.2018 с начислением неустойки по день фактического погашения задолженности на основании договора от 23.06.2017 № КР-34/АП-ССУ-4 (с учетом уточнения расчета неустойки на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятого судом),

оценив доводы ответчика, изложенные в отзыве, суд признает необоснованным включение истцом в сумму долга гарантийного удержания в 5% от суммы выполненных работ, поскольку в связи с отсутствием в настоящее время документов в соответствии с пунктом 3.5 договора (акта приемки объекта, законченного капитальным ремонтом, полписанного членами приемочной комиссии, актов выполненных работ и восстановления благоустройства от всех организаций, принимающих решение о закрытии ордера на производство работ ГАТИ) срок выплаты 5% от цены договора еще не наступил,

согласно представленным в материалы дела справкам по форме КС-3 от 28.08.2017 № 1, от 28.09.2017 № 2, от 13.10.2017 № 3 сумма гарантийного удержания составляет 115 632 руб. 38 коп. (34 288 руб. 11 коп., 47 846 руб. 66 коп., 33 497 руб. 61 коп.), следовательно, в рамках настоящего спора истец вправе требовать с ответчика  оплату выполненных работ за вычетом суммы гарантийного удержания в размере 115 632 руб. 38 коп., а именно только 211 253 руб. 05 коп., 

неустойка также подлежит пересчету, по расчету суда размер неустойки на основании пункта 6.1.1 договора за период с 28.11.2017 по 28.05.2018 (182 дня просрочки) составляет 9291 руб. 61 коп.,

оснований для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового заявления не имеется, 

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «А-Проект» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированное строительное управление - 4» 211 253 руб. 05 коп. задолженности и 9291 руб. 61 коп. неустойки по состоянию на 28.05.2018, всего: 220 544 руб. 66 коп., а также неустойку, начисленную на сумму задолженности, из расчета 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки за период с 29.05.2018 до момента фактического исполнения обязательства по погашению долга, а также 6305 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированное строительное управление - 4» в доход федерального бюджета 143 руб. 88 коп. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Рагузина П.Н.