АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2017 года

Дело №

А55-28201/2017

Резолютивная часть решения оглашена 18 декабря 2017 года

Решение изготовлено в полном объеме 25 декабря 2017 года

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Бунеева Д.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой О.Г.

рассмотрев в судебном заседании  18 декабря 2017 года  дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Сплав ЛТД"

к  Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Самарский государственный социально-педагогический университет"

с участием в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства образования и науки Российской Федерации

о внесении изменений в государственный контракт

при участии в заседании

от истца – представитель ФИО1

от ответчика – представители ФИО2, ФИО3

от третьего лица – не явился

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Сплав ЛТД" (истец, подрядчик) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Самарский государственный социально-педагогический университет" (ответчик, заказчик) о внесении изменений в государственный контракт от 26.09.2016 № 0342100024116000032-0030705-01. 

До начала судебного заседания истец представил заявление об уточнении исковых требований от 07.12.2017 № 258.

  Поскольку это заявление не противоречит закону, не нарушает интересы других лиц, суд согласно ч.1 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, принимает указанное изменение.

Ответчик не возражал против удовлетворения иска.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд признал исковые требования подлежащими полному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, на основании протокола рассмотрения заявки единственною участник электронного аукциона № 0342100024116000032 от 15.09.2016 между ООО «Сплав ЛТД» и Министерством образования и науки Российской Федерации от имени Российской Федерации в лице ответчика заключен государственный контракт № 0342100024116000032-0030705-01 от 26.09.2016 на выполнение работ по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства «под ключ» на общую сумму 173 000 000 рублей.

Заключенный сторонами контракт является договором строительного подряда, правовое регулирование которого предусмотрено нормами параграфов 1, 3 и 5 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В силу п.2 ст.763 Гражданского кодекса РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно п.2.1 указанного контракта истец обязался в установленные контрактом сроки, указанные в п.2.6 и п.4 контракта, выполнить работы по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства «Общежитие гостиничного типа по адресу: 

<

...> б/н, 534 квартал» «под ключ», а ответчик обязался принять результат paбот и оплатить его.

Согласно п.2.6 контракта срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 30 октября 2017 г.

Согласно п.4.3 контракта дата окончания выполнения работ - дата подписания итогового акта приемки выполненных работ, но не позднее 30.10.2017.

Согласно п.16.1, контракт вступает в силу с момента подписания сторонами действует до 30.11.2017 г.

Из материалов дела следует, что по состоянию на 10.10.2017 ООО «Сплав ЛТД» выполнены следующие виды работ на общую сумму 161 779 381,20 рублей:

- Подготовительные работы: Тепловые сети вынос: перекладка и вынос ТМ.

- Демонтажные и ремонтные работы.

- Кровля.

- Отделочные работы.

- Тепловые сети - ввод в здание.

- Водоснабжение и канализация.

- Отопление.

- Проемы.

- Фасад.

-  Силовое электрооборудование.

- Электроосвещение.

- Автоматическая система пожарной сигнализации.

- Крыльца и навесы.

- Вентиляция.

- Электрооборудование.

- Наружный водопровод.

- Телефония.

- Сеть эфирного телевидения.

- Технологические решения.

- Наружная канализация.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что дальнейшие работы по строительству объекта не могут быть исполнены ввиду отсутствия технической возможности. Для строительств дополнительной лестничной клетки необходимо произвести вынос подземных коммуникаций из зоны строительства (подземный газопровод).

Как видно из материалов дела, АО «Самарская сетевая компания» письмом исх. № 11989 от 20.12.2016 уведомило подрядчика о не согласовании проекта «Реконструкция общежития гостиничного типа по причине: - крыльцо общежития и канализационный колодец запроектированы по трассе кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1651, принадлежащих АО «ССК».

Истец указывает на то, что им неоднократно направлялись ответчика письма, информирующие о невозможности продолжить выполнение работ ввиду наличия подземных коммуникаций, не позволяющих проведение дальнейших работ.

Письмом № 129 от 15.08.2017 истец уведомил ответчика о том, что работы по строительству лестничной клетки приостановлены, дальнейшие работы возможны только после решения вопроса о переносе (выносе) подземных коммуникаций из зоны строительства. 

Представители ответчика подтвердили наличие обстоятельств, на которые истец ссылается в обоснование своих требований.

Кроме того, стороны заключили и представили в дело соглашение о признании обстоятельств, которые принимаются судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания, от 10.11.2017 с приложением графика выполнения оставшихся работ, согласно которому монтаж каркаса лестниц должен быть завершен истцом до середины декабря 2017 года, бетонные работы и монтаж сендвич-панелей – до конца третьей четверти января 2018 года, устройство кровли – до середины февраля 2018 года, а внутренняя отделка – до конца февраля 2018 года. 

В соответствии со ст.450 Гражданского кодекса РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной: в иных случаях, предусмотренных этим кодексом, другими законами или договором.

Одним из оснований для изменения или расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (п.1 ст.451 Гражданского кодекса РФ).

Пунктом 4 ст.451 Гражданского кодекса РФ установлено, что изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Поскольку судом установлено наличие обстоятельств, влекущих необходимость изменения государственного контракта, исковые требования следует удовлетворить.

Руководствуясь ст.ст.49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Принять уточнение истцом исковых требований, изложенное в заявлении от 07.12.2017 № 258.

Иск удовлетворить.

Внести изменения в государственный контракт № 0342100024116000032-0030705-01 от 26.09.2016 на выполнение работ по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства «под ключ», изложив пункты 2.6, 4.3 и 16.1 в следующей редакции:

«2.6. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 01 марта 2018 года.»,

«4.3. Дата начала работ - с момента подписания настоящего Контракта сторонами; Дата окончания выполнения работ – дата подписания Итогового акта приемки выполненных работ, но не позднее 01 марта 2018 года.

Датой выполнения всех обязательств по Контракту является дата окончания гарантийных обязательств Подрядчика.»,

«16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 01 апреля 2018 года.».

       Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

Д.М. Бунеев