АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-17653/2022

г. Уфа

19 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 08.12.2022

Полный текст решения изготовлен 19.12.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П., 

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 17 802 780 руб., 39 коп., предоставленные из бюджета Республики Башкортостан в 2019-2021 годах бюджету муниципального района Уфимский район РБ в качестве субсидии «проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район РБ» по соглашениям от 07.11.2019 №80652000-1-2019-016, от 26.02.2021 №80652000-1-2021-006,

Третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Уфимская газовая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

при участии в судебном заседании:

От истца – ФИО2. по доверенности от 14.10.2022 г., представлен диплом рег. номер 5 от 04.07.1997, паспорт гражданина РФ;

От ответчика - ФИО3 по доверенности № 17 от 28.12.2021 г., представлен диплом № 149 от 08.07.2016, удостоверение

От третьего лица – ФИО4 по доверенности от 02.12.2022, представлен диплом № 892 от 30.06.2012, паспорт.

В судебном заседании 01 декабря 2022 года объявлен перерыв до 08.12.2022 до 13 час. 30 мин. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же лицом.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 17 802 780 руб., 39 коп., предоставленные из бюджета Республики Башкортостан в 2019-2021 годах бюджету муниципального района Уфимский район РБ в качестве субсидии «проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район РБ» по соглашениям от 07.11.2019 №80652000-1-2019-016, от 26.02.2021 №80652000-1-2021-006.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.06.2022 исковое заявление было принято к производству.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования, просил удовлетворить. 

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в отзыве на исковое заявление, указав, что работы генеральным подрядчиком ООО «Уфимская газовая компания» в установленные контрактом сроки не выполнены, т.е. до 1 ноября 2021 года, объект не введен в эксплуатацию. Однако строительная готовность объекта на 25.12.2021г. составляла 100 %, т.е. строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Работы подрядчиком выполнены на сумму 178 098 834,43 рублей, оплачены администрацией в полном объеме. Кассовое освоение в рамках соглашения с МЖКХ РБ составило 100%.

Согласно акту проверки представителей Государственного комитета РБ по жилищному и строительному контролю от 30 декабря 2021 года выдано предписание № 155 от 30.12.2021г. с перечнем замечаний, которые необходимо устранить для получения заключения о соответствии построенного объекта (далее - ЗОС) от Государственного комитета РБ по жилищному и строительному контролю.

В составе данного предписания основным вопросом подрядчика ООО «УГК» являлось предоставление исполнительной документации, в т.ч. предоставление актов по пусконаладке, актов по промывке и дезинфекции, протоколов испытаний качества воды и т.д..

Подрядчиком часть замечаний была устранена и снята с контроля, а именно дооформлены документы по исполнительной документации в части электроснабжения, в части пусконаладочных работ, взяты пробы исследования качества воды со станции водоочистки на соответствие требований СанПии 2.1.3684-21, 1.2.3685-21 и 25 февраля 2022 года получен протокол лабораторных испытаний исследований. 7 апреля 2022 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» выдано экспертное заключение № 06-6034.

После очередной выездной проверки представителей Государственного комитета РБ по жилищному и строительному контролю составлен акт проверки от 11 апреля 2022г. № 80. Выявлены дополнительные замечания, касающиеся части электроснабжения (п. 10 акта проверки).

Для решения данных вопросов администрация района неоднократно обращалась  в адрес подрядчика об устранении замечаний, указанных в акте проверки № 80, и оформлении документов для сдачи Государственный комитет РБ по жилищному и строительному контролю и получения ЗОС.

Однако подрядчиком работы на объекте не велись, информацию о намерениях завершения строительства не представлялась, несмотря на неоднократные обращения в его адрес.

После чего администрацией района принято решение о проведении необходимых мероприятий для завершения работ на объекте своими силами. 

На сегодняшний день на объекте ведутся работы по промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды и трубопроводов (с последующим оформлением актов), работы по устранению замечаний в части электроснабжения.

После завершения работ и оформления соответствующих документов будет подано уведомление в Госстрой надзор РБ о сдаче объекта в эксплуатацию.

Таким образом, Администрацией принимаются все возможные меры по устранению замечаний и скорейшему вводу объекта в эксплуатацию.

Вместе с тем, срок достижения результатов проекта установлен до 31.12.2024 г.

Таким образом, указанное Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан нарушение, выраженное в отставании от графика соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.07.2019 № 450 «Об утверждении Региональной программы Республики Башкортостан по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на 2019 - 2024 годы», не является бюджетным нарушением и не влечет применение санкций в виде возврата в бюджет денежных средств. Просит отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Представитель третьего лица в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в отзыве на исковое заявление, указав, что считает требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению, в силу следующего. Подрядчиком были надлежащим образом выполнены работы на общую сумму в размере 178 098 834,43 руб., что подтверждается подписанными между сторонами актами приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3). Работы приняты без возражений и замечаний, оплачены в полном объеме. Организацией, осуществляющей строительный контроль за строительством объекта ЗАО «Электронефтегазстрой» проведена проверка выполненных работ на соответствие обязательным требованиям и подписаны акты выполненных работ без замечаний и возражений. ООО «Уфимская Газовая Компания» предприняты все зависящие от нее меры для выполнения работ по заключенному контракту. Подписанные акты выполненных работ свидетельствуют о фактическом завершении работ по строительству объекта.

В судебном заседании 08 декабря 2022 года представителем ответчика представлены разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, приказ № 153 от 14.10.2022г.  Государственного комитета РБ по жилищному и строительному контролю об утверждении  заключения о соответствии построенного объекта

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 12.02.2019 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 069-09-2019-272 (в редакции дополнительных соглашений от 18.12.2019, 24.12.2019, 18.09.2020, 25.02.2021) (далее - соглашение-069). 

Предметом соглашения-069 (в редакции дополнительного соглашения от 24.12.2019) является предоставление из федерального бюджета в 2019 - 2022 годах бюджету Республики Башкортостан субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Чистая вода" подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017г. № 1710.

В целях обеспечения проектирования и строительства водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 7 ноября 2019 года заключено соглашение № 80652000-1-2019-016 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (в редакции дополнительных соглашений от 14.11.2019, 09.12.2019, 25.12.2019, 28.12.2019, 03.12.2020, 03.04.2020) (далее - соглашение-016). 

Предметом соглашения-016 является предоставление из бюджета Республики Башкортостан в 2019-2021 годах бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан субсидии «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству жи;птщно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее - Министерство, ФИО5) как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации в рамках регионального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» Государственной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» (далее - Субсидия).

Во исполнение соглашения-069 между Министерством и Минстроем России и перечня объектов, определенных в соглашении-069. Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (Муниципальный заказчик) па основании результатов электронного аукциона 2 сентября 2019 года заключила муниципальный кон1ракт № 01015000003190013090001 с Обществом с ограниченной ответственностью «Уфимская Газовая Компания» (Генеральный подрядчик) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан» (далее соответственно - Контракт, Объект). Срок выполнения работ по Контракту - с момента подписания контракта по 30 ноября 2021 года. 

Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 6 к Контракту) сроки выполнения работ по контракту определены 01.11.2021 г. 

В целях обеспечения проектирования и строительства водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 26 февраля 2021 года заключено соглашение № 80652000-1-2021-006 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципа.1ьн0й собственности (в редакции дополнительных соглашений от 11.03.2021, 23.03.2021, 10.08.2021) (далее - соглашение-006). 

Предметом соглашения-006 является предоставление из бюджета Республики Башкортостан в 2021 году бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта капитального строительства «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству жилиицю-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее - Министерство, Минжилкомхоз РБ) как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации в рамках регионального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» Государственной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» (далее - Субсидия). 

Истец указал, что Администрация не исполнила свои обязательства по соглашению-016 и соглашению-006, результат проекта по Объекту не достигнут. Объект не введен в эксплуатацию. Акты ввода объекта в эксплуатацию не представлены по настоящее время. 

01.04.2022 года исх. № М02-09-3013 Минжилкомхозом РБ в Администрацию муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан посредством электронного документооборота Дело-Web было направлено требование о возврате средств в бюджет Республики Башкортостан по не достижению показателя результативности и эффективности использования субсидии на реализацию мероприятий Регионального проекта «Чистая вода», согласно которому предложено в тридцатидневный срок добровольно возвратить в бюджет Республики Башкортостан денежные средства в размере 17 802 780 рублей, рассчитанные в соответствии с пунктами 20, 21 Порядка № 450 по формуле. Требование было получено Администрацией, и зарегистрировано 01.04.2022. В настоящее время требование не исполнено, указанные средства в бюджет республики не возвращены.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

Статьей 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Проанализировав условия соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 12.02.2019 №069-09-2019-272, а также учитывая, что стороны приступили к его исполнению, суд приходит к выводу о том, что соглашение заключено и к отношениям его сторон применяются предусмотренные в нем условия. 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления указанных межбюджетных субсидий и их распределения между субъектами Российской Федерации устанавливаются федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на срок не менее трех лет.

Согласно пункту 1 статьи 139 БК РФ под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

На основании пункта 3 статьи 139 БК РФ цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» утверждены Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее - Правила). 

Абзацами 2 и 3 пункта 2 Правил установлено, что в случае если утвержденными правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации, разработанными в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, предусматривается предоставление субсидии на софинансирование одновременно капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) (далее - объекты недвижимого имущества) и мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты капитального строительства и приобретению объектов недвижимого имущества, или софинансирование 2 и более мероприятий в рамках одной государственной программы Российской Федерации (подпрограммы государственной программы Российской Федерации), такие субсидии для целей настоящих Правил относятся к консолидированным и на них распространяются положения настоящих Правил о консолидированной субсидии. 

Условия предоставления субсидий, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий и их распределения между субъектами Российской Федерации устанавливаются федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

В силу пункта 5 Правил целевое назначение субсидий определяется правилами предоставления субсидии и соглашениями исходя из расходных обязательств субъектов Российской Федерации, на софинансирование которых предусмотрены субсидии. 

Целевое назначение субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой программы) на софинансирование мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), определяется исходя из целей государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой программы), реализуемой за счет средств федерального бюджета. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества устанавливается соглашением в соответствии с правилами предоставления субсидий, а также принимаемых в случаях, предусмотренных пунктом настоящих Правил, актами Правительства Российской Федерации или актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности № 80652000-1-2019-016 от 07.1 1.2019, Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности № 80652000-1-2021-006 от 26.02.2021, заключенными между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан предусмотрено предоставление субсидии в целях реализации проекта «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан».

Согласно приложению №1 к Соглашению установлен срок достижения результатов проекта - 31.12.2024 г.

Пунктом 4.3.3 Соглашения предусмотрено обязательство муниципалитета обеспечивать достижение значений результатов регионального проекта, установленных в соответствии с приложением № 1 и выполнение мероприятий согласно графику в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

Вместе с тем, срок достижения результатов проекта установлен до 31.12.2024 г.

Таким образом, указанное Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан нарушение, выраженное в отставании от графика соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.07.2019 № 450 «Об утверждении Региональной программы Республики Башкортостан по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на 2019 - 2024 годы», не является бюджетным нарушением и не влечет применение санкций в виде возврата в бюджет денежных средств.

Постановлением Правительства РФ от 11.02.2022 № 149 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» принято решение приостановить до 1 января 2023 г. действие пунктов 16 - 20(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» в отношении субсидий, в том числе консолидированных субсидий, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях софинансирования строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность).

При указанных обстоятельствах в удовлетворении исковых требований Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан следует отказать.

Кроме того, возражая против удовлетворения требований ответчик указал, что размер предоставленной субсидии соответствует объему выполненных в рамках муниципального контракта обязательств. При этом результат работ, в целях софинансирования которого выделялась субсидия, достигнут – водозабор и сети построены, приняты заказчиком и введены в эксплуатацию.

С позиции ответчика, показатели результативности достигнуты, основания для возврата субсидии отсутствуют. 

Не оспаривая факта выполнения работ в объеме предоставленной субсидии, истец, тем не менее, ссылается на наличие формальных оснований для возврата денежных средств: при установленном в соглашении срок ввода в эксплуатацию декабрь 2021 года., фактическая на момент предъявления требования о возврате результат работ по проекту не достигнут. 

Указанная позиция Министерства заслуживает критической оценки на основании следующего. 

Конституционным Судом Российской Федерации (постановления от 06.06.1995 № 7-П, от 13.06.1996 № 14-П, определение от 18.01.2011 № 8-О-П) разъяснено, при рассмотрении дела суды обязаны исследовать по существу его фактические обстоятельства и не должны ограничиваться только установлением формальных условий применения нормы; иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту, закрепленное статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, оказывалось бы существенно ущемленным. 

Применение норм права не должно приводить к неосновательному обогащению одной стороны обязательства за счет другой его стороны, даже если формальное содержание нормы при ее грамматическом толковании ведет к такому результату. 

Указанное согласуется с правовой позицией, содержащейся в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2017 № 309-ЭС17-8472 и № 309-ЭС17-8475. 

При наличии в материалах дела разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 02-47-139-2022 от 24.10.2022года, приказа № 153 от 14.10.2022г.  Государственного комитета РБ по жилищному и строительному контролю об утверждении  заключения о соответствии построенного объекта и отсутствии со стороны Министерства возражений относительно выполнения работ по муниципальному контракту в полном объеме и с надлежащим качеством, суд приходит к выводу о том, что показатель результативности выполненных работ Администрацией достигнут, что исключает наличие оснований для возвращения денежных средств и удовлетворения иска

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку в удовлетворении иска судом отказано, истец освобожден от уплаты госпошлины, госпошлина не подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями  110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отказать.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                   

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

 

Судья Д.П. Кузнецов