Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-16327/2023

28 июля 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  25 июля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  28 июля 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "БАШУРАЛМОНОЛИТ" 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-СТРОЙ" 

о взыскании, 

при участии

- от истца/от ответчика: согласно протоколу судебного заседания от 25.07.2023

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "БАШУРАЛМОНОЛИТ" (далее – истец, ООО "БАШУРАЛМОНОЛИТ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга к обществу с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-СТРОЙ" (далее – ответчик, ООО МОНОЛИТ-СТРОЙ") о взыскании 61 860 891 руб. 86 коп. задолженности договору субподряда от 31.03.2021 № ГСП-21-02295/2-МС, 5 554 691 руб. 20 коп. задолженности  договору субподряда от 15.11.2021 № 21-02150/4-2021СУБ.

После принятия судом искового заявления ответчик произвел частичную оплату задолженности по договору субподряда от 31.03.2021 № ГСП-21-02295/2-МС в размере 15 000 000 руб., частичную оплату задолженности по договору субподряда от 15.11.2021 № 21-02150/4-2021СУБ в размере 449 694,83 руб., что подтверждается платежными поручениями от 11.07.2023 № 893, от 05.06.2023 № 52.

В связи с изменением размера задолженности и периода просрочки от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, на основании которых истец просил взыскать с ответчика 46 860 891 руб. 86 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договору субподряда от 31.03.2021 № ГСП-21-02295/2-МС за май и июнь 2022.

Уточнения приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением от 25.04.2023 судом истребованы из акционерного общества «Газстройпром» документы и сведения о наличии задолженности по оплате выполненных работ по Договору № ГСП-21-02295/2 от 31.03.2021 перед ООО «Монолит-Строй» со стороны АО «Газстройпром» по состоянию на 30.04.2022 года и на текущий момент.

От общества поступили дополнительные доказательства. Указанные документы приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании представитель  истца поддержал заявленные уточненные  требования в полном объеме, представитель ответчика возражал против исковых требований по основаниям изложенным в отзыве.

Суд установил следующее.

Истец указывает, что между ответчиком – ООО «Монолит-Строй» (Подрядчик) и истцом – ООО «БашУралМонлит» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда № ГСП-21-02295/2-МС от 31.03.2021г. 

В соответствии с п. 1.1 Договора субподряда № ГСП-21-02295/2-МС от 31.03.2021г. Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами работы (далее по тексту – «Работы») по Объектам ООО «Газпром инвест» (далее по тексту – «Заказчик»), указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. Подрядчик обязуется принимать Работы, фактически выполненные Субподрядчиком по Договору, в соответствии с проектной документацией, включая сметную часть (далее по тексту – «ПД»), предоставленной Заказчиком, либо при отсутствии ПД, в соответствии со сметной документацией (далее по тексту – СД) и оплачивать их стоимость Субподрядчику на условиях настоящего договора.

По состоянию на 31 декабря 2022 года ответчиком приняты выполненные истцом работы на сумму 128 952 930 (Сто двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, что подтверждается пописанными сторонами:

- Актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 31.05.2022 года, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 1 от 31.05.2022 года на сумму 101 690 667,60 руб., в том числе НДС 20%;

- Актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 2 от 30.06.2022 года, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 2 от 30.06.2022 года на сумму 27 262 262,40 руб., в том числе НДС 20%.

В соответствии с п. 9.1 Договора субподряда № ГСП-21-02295/2-МС от 31.03.2021г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.05.2022г., оплата за выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору Работы согласно подписанным Сторонами Актами (КС-2) и Справкам (КС3) осуществляется Подрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Субподрядчика (ОБС) в течение 7 (Семи) рабочих дней, или по согласованию Сторон, другими способами оплаты, не противоречащими законодательству РФ, после оплаты выполненных работ со стороны АО «Газстройпром» по договору субподряда от 31.03.2021 №ГСП-21-02295/2, заключенного с ООО «Монолит-Строй».

При этом, согласно п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику.

Кроме того, истец не является стороной по договору субподряда от 31.03.2021 №ГСП-21-02295/2, заключенного между АО «Газстройпром» и ООО «Монолит-Строй», а также по основному договору с Заказчиком, и не имеет возможности отслеживать момент оплаты по данному договору и влиять на ее исполнение путем предъявления каких-либо претензий в случае необоснованной задержки.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Следовательно, срок оплаты выполненных работ следует исчислять с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

Срок оплаты за выполненные работы по Актам от 31.05.2022г. и 30.06.2022г наступил соответственно 09.06.2022 года и 11.07.2022 года.

В настоящий момент оплата выполненных работ произведена ответчиком не в полном объеме. Задолженность за выполненные и принятые работы по Договору субподряда № ГСП-21-02295/2-МС от 31.03.2021г. составляет 46 860 891,86 руб.

Ответчик настаивал на том, что иск не подлежит удовлетворению, поскольку истец являлся не единственным субподрядчиком; полученные от заказчика денежные средства были перечислены ответчиком субподрядчикам по другим договорам, в том числе частично – истцу. Соответственно, поскольку в полном объеме денежные средства от заказчика не поступили, срок оплаты по договору с истцом также не наступил, будучи обусловлен поступлением оплаты от заказчика ответчику.

Суд отклоняет возражения ответчика, поскольку из представленной АО «Газстройпром» информации усматривается, что вплоть до 25.05.2023 в адрес ответчика заказчик перечислял денежные средства. При этом договоры между ответчиком и заказчиком, между ответчиком и истцом не содержат информации о приоритетах распределения денежных средств, о пропорциональном распределении и т.п.

В условиях, когда подтвержден факт получения ответчиком денежных средств от заказчика, основания для отказа в иске отсутствуют.

Иск подлежит удовлетворению с учетом изменения предмета и размера требований.

Излишне уплаченная государственная пошлина в связи с принятием судом уточнений исковых требований подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-СТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "БАШУРАЛМОНОЛИТ" (ИНН: 

<

***>) 46 860 891 руб. 86 коп. задолженности по договору субподряда от 31.03.2021 № ГСП-21-02295/2-МС за май и июнь 2022, а также 139 021 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-СТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета 60 979 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.