Арбитражный суд Пензенской области

440000, г. Пенза, ул. Кирова, д. 35/39, 

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А49-9953/2021

22 марта 2022 г.

г. Пенза

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 22 марта 2022 г.

 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Кудинова Р.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Пензастройсервис" (440067, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Градстрой" (440039, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 23922 руб. 83 коп. неустойки,

при участии: от истца – представителя ФИО2 (доверенность от 21.01.2022, диплом); от ответчика – не явился (извещен), 

 

установил:

истец – ООО "Пензастройсервис" обратился в арбитражный суд с иском к ООО "Градстрой" (далее – ответчик) о взыскании неустойки за нарушения сроков выполнения работ по договору субподряда № 07-05-20 от 24.07.2020 в сумме 23922 руб. 83 коп. за период с 21.09.2020 по 02.10.2020.

Определением суда от 08.10.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Учитывая специфику спора, наличие спорных вопросов, требующих проведения судебного заседания и вызова сторон, необходимость выяснения дополнительных обстоятельств и исследования дополнительных доказательств, арбитражный суд определением от 26.11.2021 перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В отзыве на иск от 28.10.2021 ответчик возражал против удовлетворения судом заявленных требований, поскольку нарушение сроков выполнения работ, вызвано ненадлежащим выполнением заказчиком встречного обязательства по оплате аванса.

Ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом. В соответствии со ст. 156 АПК РФ суд с учетом мнения представителей истца провел судебное заседание в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика.

Изучив материалы дела, дав оценку представленным доказательствам, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

Между ООО "Пензастройсервис" (генподрядчик) и ООО "Градстрой" (субподрядчик) 24.07.2020 заключен договор субподряда № 07-05-20, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению по устройству железобетонных колонн и балок согласно приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью договора, на объекте: "Жилой дом, расположенный но адресу: 

<

...> кадастровый номер 58:29:04005003:214" (далее - объект) и сдаче выполненных работ генподрядчику в пределах оговоренных настоящим договором сроков, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, своевременно принять результат выполненных субподрядчиком работ и оплатить их. Субподрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и (или) привлеченными силами, с применением собственного либо арендуемого вспомогательного оборудования, машин, механизмов, инвентаря и собственных материалов весь комплекс работ, предусмотренных настоящим договором. Виды и стоимость работ, подлежащих выполнению субподрядчиком, определяются в соответствии со сметой (приложение № 1). Работы выполняются из материала субподрядчика. Субподрядчик несет полную ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Во исполнение п. 1.3 договора ООО "Пензастройсервис" поставил ООО "Градстрой" бетон по УПД № 83113 от 31.08.2020, № 90703 от 07.09.2020, № 91401 от 14.09.2020, № 92201 от 22.09.2020, № 93018 от 30.09.2020 (акт сверки по состоянию на 31.12.2020) (л.д. 76-82).

Стоимость работ с учетом стоимости материалов в соответствии со сметой (приложение №1) к настоящему договору составляет 1993569 руб. Общая стоимость выполненных субподрядчиком работ может быть изменена в сторону увеличения или уменьшения в соответствии с выполненным объемом работ. Расчеты по договору производятся между сторонами в следующем порядке: генподрядчик перечисляет субподрядчику аванс в размере 50 % от сметной стоимости в сумме 996784 руб. 50 коп. в течение 5-и календарных дней после подписания договора. Ежемесячно после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированным формам КС-2 и КС-3 и передачи исполнительной документации, отражающих объем фактически выполненных субподрядчиком работ, генподрядчик в течение 10 календарных дней оплачивает субподрядчику сумму согласно объему фактически выполненных субподрядчиком работ за вычетом части суммы ранее выплаченного аванса в размере пропорциональном объему фактически выполненных в отчетном месяце работ.

Счет-фактуры выставляются в соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством. Субподрядчик представляет генподрядчику следующие документы: счет-фактуру, акты по форме КС-2 и КС-3 - в 2-х экземплярах каждый, надлежаще оформленную исполнительную документацию в полном объеме. Отсутствие одного из вышеперечисленных документов или ненадлежащее оформление (наличие ошибок, отсутствие подписей и/или печати) является основанием для задержки платежа генподрядчиком до устранения замечаний.

Окончательный расчет генподрядчика с субподрядчиком за фактически выполненную работу производится в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания окончательного акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированным формам КС-2 и КС-3. Акты по Форме КС-2 и КС-3 передаются субподрядчиком генподрядчику до 10 (десятого) числа текущего месяца. В случае несвоевременной передачи актов, приемка и оплата выполненных за текущий отчетный период работ переносится на следующий отчетный период. 

Датой платежа по настоящему договору (моментом исполнения генподрядчиком обязанности по оплате) является дата отметки банка на платежном документе генподрядчика о списании денежных средств с расчетного счета генподрядчика. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. По требованию любой из сторон должна быть проведена сверка взаиморасчетов.

Если на момент наступления срока исполнения обязательства генподрядчика по оплате выполненных работ субподрядчик имеет перед генподрядчиком задолженность по иным обязательствам (в том числе связанным с компенсацией стоимости потребленных ресурсов), срок исполнения обязательства, по оплате которых наступил, стороны вправе произвести зачет-встречных однородных требований в порядке, установленном действующим гражданским законодательством

В соответствии с п. 3.1 договора субподрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) перечисления авансового платежа, предоставления доступа к объекту и подписания акта сдачи-приемки строительной готовности, в полном объеме выполнить работы и сдать их результат генподрядчику в срок до 20.09.2020. В случае, если субподрядчик не сможет своевременно приступить к работам по обстоятельствам, связанным с нарушением генподрядчиком сроков предоставления доступа на строительную площадку, передачи утвержденной РД, разрешения на строительство, а также внесения изменений в ПСД, субподрядчик имеет право на увеличение срока выполнения работ, о чем сторонами будет заключено дополнительное соглашение к настоящему договору (п. 3.2 договора).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 02.10.2020 и акту о приемке выполненных работ от 02.10.2020, унифицированным формам КС-3 и КС-2 соответственно, работы были выполнены с нарушением срока на 12 дней (с 21.09.2020 по 02.10.2020).

Дополнительное соглашение по п. 3.2 договора сторонами не заключалось, в материалы дела не представлено.

Согласно п. 9.3.1 вышеуказанного договора за нарушение сроков выполнения работ по договору ООО "Пензастройсервис" вправе взыскать с ООО "Градстрой" неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ.

21.07.2021 заказчик направил ООО "Градстрой" досудебную претензию об уплате неустойки. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

В соответствии со ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе, неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пени), определенную законом или договором (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Материалами дела подтверждена просрочка выполнения работ, обстоятельства дела и расчет неустойки ответчиком не оспорены. Заявление о применении ст. 333 ГК РФ ответчиком не подано.

Согласно положениям ст. ст. 9, 65, 71 (ч. 3.1) АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд на основании ст. ст. 8, 309, 310, 330 ГК РФ удовлетворяет исковые требования в полном объеме. 

Довод ответчика о вине истца в просрочке выполнения работ судом отклоняется, так как задолженность по оплате выполненных работ является нарушением истцом обязательств по договору и не влечет продления срока договора; не является основанием для приостановления работ, однако не лишает ответчика права предъявить санкции, предусмотренные пунктами договора, действующим законодательством.

Расходы по уплате государственной пошлины, суд относит на ответчика (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

 

решил:

исковые требования удовлетворить, расходы отнести на ответчика.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Градстрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пензастройсервис" 23922 руб. 83 коп. неустойки, а также 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в месячный срок с момента его принятия.

 

Судья                                                                                               Кудинов Р.И.