957/2020-153678(1) 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   № 09АП-28477/2020

Дело № А40-20527/20

г. Москва

28 июля 2020 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи: Семикиной О.Н., 

рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью  «Северстройгрупп»,  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2020, принятое в порядке  упрощенного производства по делу № А40-20527/2020,  

по исковому заявлению Министерства обороны Российской Федерации (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Северстройгрупп» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании, без вызова сторон, 

УСТАНОВИЛ:

Министерство обороны Российской Федерации обратилось с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Северстройгрупп» о  взыскании 180 559руб. 42коп. неустойки по государственному контракту №  382/ЗА(Э)/2018/ДГЗ/З от 10.07.2018г.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2020 исковые требования  удовлетворены в полном объеме.  

Не согласившись с принятым по делу решением, истец обратился с  апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый  судебный акт.  

В порядке статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, апелляционная жалоба рассматривается в суде апелляционной инстанции  судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам с  уведомлением сторон о принятии жалобы к производству.  

Законность и обоснованность судебного решения проверены судом  апелляционной инстанции в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ.  

Как следует из материалов дела, 10.07.2018г. между истцом и ответчиком  заключен государственный контракт № 382/ЗА(Э)/2018/ДГЗ/З.  

В соответствии с вышеуказанным государственным контрактом ответчик  обязался выполнить работы, а истец принять и оплатить их.  

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона.  

Согласно п. 5.2 государственного контракта ответчик обязался выполнить  работы в срок до 01.09.2018г.  

Однако, ответчик свои обязательства в сроки, установленные государственным  контрактом, не выполнил.  

Учитывая, что ответчиком работы выполнены с просрочкой, то истец просит  взыскать неустойку, предусмотренную п. 15.3 государственного контракта из 1/300  ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, что по расчету истца составляет  180 559руб. 42коп.  

Довод ответчика о том, что выполнение работ в сроки, установленные  государственным контрактом, выполнить не представлялось возможным, признан  судом необоснованным, по следующим основаниям.  

В порядке ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика  и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных  неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе  исполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят  годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают  невозможность ее завершения в срок.  

Согласно п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а  начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих  обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление технической  документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует  исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно  свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет  произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).  

Так, ответчик, самостоятельно, на свой страх и риск выполнял работы, не  приостановив производство работ до устранения обстоятельств и предоставления  необходимой документации.  

Суд критически отнесся к представленному ответчиком письму от 27.11.2018г.,  поскольку оно адресовано начальнику инженерно-аэродромной службы командования  ВВС, кроме того, отметка о его получении поставлена неустановленным лицом.  

Доверенность, подтверждающая полномочия лица, проставившего свою  подпись, в материалы дела не представлена, печать организации на письме отсутствует.  

Ответчиком не представлено доказательств подтверждающих, что действия  неустановленного лица, подписавшего письмо о невозможности выполнения работ,  явствовали из обстановки и неустановленное лицо находилось на своем рабочем месте  при исполнении своих трудовых обязанностей.  

Статьей 183 ГК РФ установлено, что при отсутствии полномочий действовать от  имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается  заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо  (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.  

Как разъяснено в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 23.10.2000г. № 57 «О некоторых вопросах практики  применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации», при  рассмотрении арбитражными судами исков к представляемому (в частности, об  исполнении обязательства, о применении ответственности за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательства), основанных на сделке, заключенной  неуполномоченным лицом, следует принимать во внимание, что установление в  судебном заседании факта заключения упомянутой сделки представителем без  полномочий или с превышением таковых служит основанием для отказа в иске к  представляемому, если только не будет доказано, что последний одобрил данную  сделку (пункт 2 статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В данном случае, одобрение истцом совершенной сделки также не доказано. 

Довод ответчика о том, что о невозможности выполнения работ был уведомлен  получатель работ (восковая часть 77979), признан судом несостоятельным по  следующим основаниям.  

Так, в соответствии с п. 7.2.14 государственного контракта ответчик обязан  известить истца (то есть Министерство обороны Российской Федерации, а не  получателя работ по контракту - войсковую часть) в течение 3 рабочих дней и до  получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных  неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе  исполнения работ, а также иных, не зависящих от ответчика обстоятельств,  угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих  невозможность ее завершение в срок.  

Сторонами государственного контракта № 382/ЗА(Э)/2018/ДГЗ/З от 10.07.2018г.  являются Министерство обороны Российской Федерации и ООО «Северстройгрупп».  

Следовательно, согласование сроков выполнения работ по контракту  осуществляется между истцом и ответчиком.  

Между тем, доказательств, подтверждающих направление такого рода  обращений в адрес истца о переносе (согласовании) сроков или приостановлении  выполнения работ, в материалы дела ответчиком не представлены.  

Вместе с тем, полномочиями на изменение условий по выполнению работ по  контракту получатель не наделен, следовательно, в обязанности получателей входит  приемка выполненных работ и проверка качества.  

Таким образом, согласование и изменение сроков выполнения работ по  контракту с войсковой частью противоречит условиям контракта.  

Так, ответчик не приостанавливал работы, не уведомлял истца об каких-либо  обстоятельствах, препятствующих ему выполнить работы в срок, как и о том, что  указанные обстоятельства создают невозможность выполнения работ в установленные  сроки.  

Незамедлительное уведомление заказчика о возникающих препятствиях  своевременного завершения работы и приостановка работ до получения от заказчика  указаний, либо необходимой информации, предусмотрена в целях исключения  возможности срыва сроков выполнения работ и оперативного решения возникающих  вопросов.  

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме суд также принял во  внимание, что требований о взыскании неустойки за просрочку подписания итогового  акта истцом не заявлено.  

Учитывая, что ответчиком не приведены доводы, изложенные в Постановлении  Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации», то у суда отсутствовали основания для  применения ст. 333 ГК РФ в отношении требования о взыскании неустойки.  

Оснований применения в рассматриваемом деле положений ст. 404 ГК РФ, на  которые ссылается ответчик, не имеется в связи с отсутствием нарушения  (ненадлежащего исполнения) обязательств со стороны истца.  

Таким образом, размер неустойки судом проверен, признан правильным и  соответствующим последствиям нарушения обязательства, в связи с чем подлежащим  взысканию с ответчика в судебном порядке в заявленной сумме.  

Довод ответчика, изложенный в апелляционной жалобе, что суд первой  инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайство о снижении  неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ, судом отклоняется на основании  следующего.  

Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений отмечал,  что неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и мера имущественной  ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, по смыслу статей  12, 330, 332 и 394 ГК РФ, стимулирует своевременное исполнение обязательств,  позволяя значительно снизить вероятность нарушения прав кредитора, предупредить  

нарушение (определения от 17 июля 2014 года N 1723-0, от 24 марта 2015 года N 579-0  и от 23 июня 2016 года N 1376-0).  

Согласно п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7  "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств" если должником является  коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно  некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности,  снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого  должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1  статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

Согласно п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7  "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств" бремя доказывания  несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на  ответчика.  

Согласно п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств" снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате  коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно  некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она  явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение  кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).  

Поскольку заявление о применении статьи 333 ГК РФ в первой инстанции было  сделано ответчиком, именно на нем в силу статьи 65 АПК РФ лежало бремя  представления доказательств, подтверждающих явную несоразмерность взысканной  судом неустойки последствиям нарушенного обязательства.  

Ответчик лишь ограничился заявлением о необходимости применения  положений данной нормы права, однако, соответствующих доказательств,  подтверждающих несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств,  не представил (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.12.2017 N  Ф05-18519/2017 по делу № А41-34800/2017).  

Ответчиком также не представлены доказательства исключительности случая,  при котором имеются обстоятельства, препятствующие оплате неустойки и  позволяющие уменьшить ее размер (Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N  80-КГ16-5).  

Иные доводы апелляционной жалобы также отклоняются судом апелляционной  инстанции как документально неподтвержденные.  

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что  судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и  имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению  нормы материального и процессуального права. В свою очередь, доводы ответчика,  изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы  юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на  обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда  первой инстанции.  

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют  основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, для отмены или изменения решения суда от 23.04.2020 г.  

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2020 по делу № А40-20527/20  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северстройгрупп»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину за подачу апелляционной жалобы в размере 3000 руб.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа по основаниям, установленным в ч.4 ст.288 АПК РФ.  

Председательствующий судья: О.Н. Семикина