Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-164330/20-48-869

29 октября 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть объявлена 29 октября 2020 года

Полный текст изготовлен 29 октября 2020 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего: судьи  Бурмакова И.Ю. /единолично/,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН" (119415, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 53, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2010, ИНН: 

<

***>)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЭНЕРГОСТРОЙ" (299029, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.08.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 920401001, Ликвидатор: ФИО2

третье лицо: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. СЕВАСТОПОЛЯ (299011, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2014, ИНН: 

<

***>)

О признании требований включенными в ликвидационный баланс

при участии согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен об изложенном выше.

Истец требования поддержал. 

Ответчик  не явился, отзыв не представил. Извещение подтверждено данными сайта Почты России и сайта ВС РФ.

Исследовав материалы дела,  суд установил, что исковые требования подлежат    удовлетворению, так как признает обоснованными указанные ниже доводы истца.

28.03.2018 между ООО «ССК «Газрегион» (Подрядчик) и                                    ООО «Севэнергострой» (Субподрядчик) заключен договор субподряда на выполнение работ по строительству объектов ФГБОУ «МДЦ «Артек» № 1-А-РЕК-2018/СГМ18-012 (далее – Договор), в соответствии с пунктом 1.1 которого Субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ, определенных Договором.

В соответствии с утвержденным календарным графиком (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.01.2019) предусмотренные Договором работы на объекте «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 3 этап (Внутриплощадочные инженерные сети) стоимостью 65 590 225,66 рублей должны быть выполнены в срок до 31.12.2019.

ООО «ССК «Газрегион» в счет оплаты стоимости работ перечислило                ООО «Севэнергострой» аванс в сумме 65 590 225,66 рублей (с учетом корректировки долга от 04.10.2018 и от 22.04.2019). Однако по состоянию на 16.05.2020 Субподрядчик на указанном объекте выполнил и сдал в установленном порядке работы только на сумму 48 992 881,33 рублей. Работы на сумму 16 597 344,33 рублей не выполнены, сроки завершения работ сорваны. Сумма неотработанного аванса составляет 16 597 344,33 рублей.

Согласно пункту 12.2.1 Договора в случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик применяет к Субподрядчику неустойку (пени) в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и определяется по следующей формуле:

П = (Ц-В) × С, где:

Ц – цена Договора;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании справок по форме КС-3;

С – размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: С = Сцб × ДП, где Сцб – размер ставки рефинансирования ЦБ РФ, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП/ДК × 100 %, где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0–50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

Размер неустойки за просрочку выполнения работ, допущенную ООО «Севэнергострой» по состоянию на 16.05.2020, составляет 1 250 609,90 рублей, определенный по формуле:

(65 590 225,66 - 48 992 881,33) × 0,07535 = 1 250 609,90 рублей

Примечание: К = 137/644 × 100 % = 21,27 %; С = 5,5 % × 0,01 × 137 = 0,07535

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

В силу пункта 19.3.3 Договора Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения и сдачи Подрядчику результатов выполненных работ, предусмотренных Календарным планом работ, более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Подрядчика. 

26.02.2020 единственным участником ООО «Севэнергострой» принято решение  № 7 о ликвидации ООО «Севэнергострой». Согласно сведениям из ЕГРЮЛ регистрирующим органом по месту нахождения Ответчика является Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя.

В силу пункта 1 статьи 63 ГК РФ ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Сообщение о ликвидации ООО «Севэнергострой» опубликовано 18.03.2020 («Вестник государственной регистрации», часть 1 №11(778) от 18.03.2020/1297), следовательно, кредиторы ООО «Севэнергострой» вправе предъявить свои требования в срок до 18.05.2020.

В соответствии с пунктом 1 статьи 194 ГК РФ, если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок    (п. 2 ст. 194 ГК РФ).

18.05.2020 ООО «ССК «Газрегион» направило ликвидатору                                ООО «Севэнергострой» письмо № 01/2783 от 18.05.2020, которым уведомило об отказе от Договора от 28.03.2018 № 1-А-РЕК-2018/СГМ18-012 (Договор считается расторгнутым с момента получения письма № 01/2783 от 18.05.2020) и потребовало:

1) Перечислить неустойку за просрочку выполнения работ, рассчитанную за период с 01.01.2020 по 16.05.2020, в размере 1 250 609,90 рублей;

2) Возвратить неотработанный аванс в размере 16 597 344,33 рублей;

3) Возвратить предоставленные ООО «ССК «Газрегион», но не вовлеченные ООО «Севэнергострой» в производство работ на указанном объекте, материалы и оборудование;

4) Включить указанные требования ООО «ССК «Газрегион» в промежуточный ликвидационный баланс ООО «Севэнергострой».

Между тем согласно данным Почты России об отслеживании почтового отправления с трек-номером 12147147016855, содержащего письмо ООО «ССК «Газрегион» № 01/2783 от 18.05.2020, последнее было возвращено отправителю 23.07.2020.

Абзацем 2 пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ установлено, что сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

С учетом положений абзаца 2 пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ со дня возврата письма № 01/2783 от 18.05.2020 отправителю последнее считается доставленным                    ООО «Севэнергострой», а Договор – расторгнутым.

В силу статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Таким образом, со дня расторжения Договора (23.07.2020) неотработанный аванс представляет собой неосновательное обогащение ООО «Севэнергострой» за счет       ООО «ССК «Газрегион».

В силу пункта 1 статьи 64.1 ГК РФ в случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса юридического лица вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому лицу.

При указанных обстоятельствах необеспечение ликвидатором                            ООО «Севэнергострой» получения требования истца по адресу, указанному в сообщении о ликвидации, следует квалифицировать как уклонение от рассмотрения требования кредитора.  

Согласно правовой позиции Арбитражного суда Московского округа (постановление от 05.02.2020 № Ф05-24962/2019 по делу № А40-84950/2019) право кредитора, предусмотренное пунктом 1 статьи 64.1 ГК РФ, может быть реализовано путем предъявления искового заявления о признании требований кредитора включенными в промежуточный ликвидационный баланс.

Доказательств обратного ответчик суду не представил.

Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Госпошлина относится на ответчика в порядке  ст. 110 АПК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  ст. ст. 4, 110,  123, 124, 156, 167-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Признать требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН" в размере 17 847 954,23 (семнадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рублей 23 копеек, в том числе 16 597 344,33 рублей неосновательного обогащения и 1 250 609,90 рублей неустойки за период с 01.01.2020 по 16.05.2020, включенными в промежуточный ликвидационный баланс ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЭНЕРГОСТРОЙ".

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЭНЕРГОСТРОЙ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН" судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд апелляционной инстанции.

СУДЬЯБурмаков И. Ю.